화물자동차 공영차고지 조성사업 건설사업관리용역

공사감독자 배치기준(안)

2022. 05.

건설교통사업본부

대  중  교  통  과

『화물자동차 공영차고지 조성사업 건설사업관리용역』

공사감독자 배치기준(안)

□ 목  적

○ 『화물자동차 공영차고지 조성사업 건설사업관리용역』의 안전한 건설현장 관리 및 시공품질 확보를 위해 ｢건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침｣ 제8조제3항제1호에 따라 공사감독자 배치기준(안)을 일반에 공개하여 의견을 수렴하고자 함.

□ 관련규정

○ ｢건설기술 진흥법｣ 제35조, 같은 법 시행규칙 제35조

○ ｢건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침(국토교통부 고시 제2020-987호, 2020. 12. 16.)｣

○ ｢건설기술용역 대가 등에 관한 기준(국토교통부고시 제2021-961호, 2021. 07. 14.)｣

□ 의견제출 방법

○ 제출기간 : 2022. 05. 19.(목) ~ 2022. 05. 25.(수) 18:00까지(7일간)

○ 제출장소 : 포항시청 7층(건설교통사업본부 대중교통과, ☏ 054-270-3666)

○ 제출방법 : 전자메일 송부 또는 방문

○ 전자메일 : rukensin@korea.kr

□ 공사감독자 배치기준(안)

1). 사업개요

구 분	화물자동차 공영차고지 조성사업
사 업 위 치	남구 대송면 제내리 540번지 일원
사 업 량	부지면적 60,105㎡ 주차대수 502대(특대형 76대, 대형 262대, 승용차 164대)
공 사 비	11,669백만원
사 업 기 간	2022. 05. ~ 2023. 09.

2). 사업특성 및 발주청 역량 평가 결과

(근거 : 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제6조 및 제7조)

○ 공사특성(30점)

구분		점수	계
공종 난이도 (15점)	「건설기술 진흥법」 제39조제1항제1호에 규정된 설계ㆍ시공 관리의 난이도가 높아 특별한 관리가 필요한 건설공사 또는「건설기술용역 대가 등에 관한 기준」의 공종분류 상 복잡한 공종	15	5
	「건설기술 진흥법」 제39조제1항제1호에 규정된 공사 외의 공사로「건설기술용역 대가 등에 관한 기준」의 공종분류 상 보통의 공종 공사	10
	상기 외의 공사	5
공사 난이도 (15점)	「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 상의 시설물 분류 중 1종에 해당하는 공사	15	5
	「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 상의 시설물 분류 중 2종에 해당하는 공사	10
	상기 외의 공사	5

○ 사업여건(25점)

구분		점수	계
사업규모 (10점)	총 공사비 500억원 이상	10	6
	총 공사비 200억원 이상 500억원 미만	8
	총 공사비 100억원 이상 200억원 미만	6
	총 공사비 100억원 미만	4
사업기간 (5점)	공사기간 3년 이상	5	3
	공사기간 1년 이상 3년 미만	3
	공사기간 1년 미만	1
민원발생 가능성 (5점)	민원발생 가능성이 높다	5	3
	민원발생 가능성이 통상적인 수준이다	3
	민원발생 가능성이 낮다	1
유사사업 경험 (5점)	가용인력이 최근 5년간 수행경험 없음	5	5
	가용인력이 최근 5년간 5건 미만 수행	3
	가용인력이 최근 5년간 5건 이상 수행	1

○ 공사수행방식 (15점)

구분	점수	계
기술제안입찰방식, 대안입찰방식을 적용하는 공사, 설계경기를 적용하여 설계의 중요성이 강조된 공사, 국제설계경기를 적용하여 설계단계에서 외국사 또는 외국사와 공동도급업체가 참여할 수 있는 공사	15	10
기타공사	10
설계ㆍ시공일괄입찰방식을 적용하는 공사	5

○ 발주청 역량(30점)

구분		점수	계
인력 수 (20점)	가용인력이 ‘건설사업관리기술인 배치기준’에 따라 산출한 소요인력의 80% 미만	20	20
	가용인력이 ‘건설사업관리기술인 배치기준’에 따라 산출한 소요인력의 80% 이상, 90% 미만	15
	가용인력이 ‘건설사업관리기술인 배치기준’에 따라 산출한 소요인력의 90% 이상	10
경력 (10점)	가용인력의 관련업무 평균 실무경력이 12년 미만	10	10
	가용인력의 관련업무 평균 실무경력이 12년 이상, 15년 미만	7
	가용인력의 관련업무 평균 실무경력이 15년 이상	3

○ 평가결과

구 분	합 계	공사특성	사업여건	공사수행방식	발주청 역량
배점	100	30	25	15	30
평가	67	10	17	10	30

○ 평가결과에 따른 건설사업관리 방식

평가결과	사업관리방식 배정
평가점수(총점) 80점 이상	시공단계에서 감독 권한대행 등 건설사업관리를 적용한다
평가점수(총점) 50점 이상	시공단계에서 감독 권한대행 등 건설사업관리를 적용할 수 있다.
평가점수(총점) 50점 미만	직접감독 또는 건설사업관리 (시공단계에서 감독권한 대행 등 건설사업관리를 적용할 수 있다)

3). 공사특성 중 공종 난이도

(근거 : 건설기술용역 대가 등에 관한 기준(국토교통부 고시 제2021-961호, 2021.07.14.))

○ 토목공사

구분	단순한 공종	보통의 공종	복잡한 공종
해당공종	- 구조물이 없는 일반 부지 조성 - 하천제방, 호안, 하도 - 도로(국도, 지방도, 고속도로를 제외) - 상․하수관거 - 우수구거 - 포장보수 - 준설 및 매립 - 보통 조경	- 장대교량(200m이상)이나 터널이 없는 도로(도시가로, 국도, 지방도 또는 고속도로), 철도, 지하철 - 600㎜이상 하수관거 - 400㎜이상 상수관거 - 단순구조의 방파제, 접안시설 - 하수도 및 수로터널 - 공동구, 교량 등 구조물이 있는 부지조성 - 공항활주로 - 하천수문 및 통문 - 대형 조경구조물 - 기타 단순한 공종, 복잡한 공종에 해당하지 아니한 시설	- 비대칭으로 구조가 복잡한 교량 - 장대교량이나 터널이 있는 도로, 철도, 지하철 - 대구경 터널공사, 입체교차로 - 하구언, 갑문, 댐 - 정수장, 하수 및 오․폐수처리장 - 배수 및 양수펌프장 - 복잡한 구조의 방파제, 접안시설 - 대형구조물 기초공사 - 대형구조물 개축 - 수중 구조물

4). 건설사업관리 배치계획 및 업무범위 현황

※ 인원수 : 인·일 기준

업무분류체계			단위	수량	기준 인원수	보정계수			난이도	산정 인원수	비고
단계	기본업무			소계	고급	a.	b.	c.		고급
공통 업무	과업착수준비		식	1	7.0	1.00	1.00	1.00	1.000	7.00
	건설사업관리 업무수행계획서 작성		식	0	20.5	1.00	1.00	1.00	1.000	0.00
	건설사업관리 절차서 작성ㆍ운영		식	0	27.3	1.00	1.00	1.00	1.000	0.00
	작업분류체계 및 사업번호체계 관리/사업정보축적ㆍ관리		식	0	22.3	1.00	1.00	1.00	1.000	0.00
	사업정보관리시스템의운영		운영 일수	0	0.3	1.00	1.00	1.00	0.137	0.00
	클레임 사전분석		식	0	31.0	1.00	1.00	1.00	1.000	0.00
	최종 건설사업관리 보고	1)시공 전 단계	식	0	27.3	1.00	1.00	1.00	1.000	0.00
		2)시공 이후 단계		1	54.6	1.00	1.00	1.00	1.000	54.60
	소 계									61.60
시공 단계	공사착수		식	1	110.1	1.00	1.00	1.00	1	110.10
	시공성과확인 및 적정성 검토		공사일수	308	2.2	0.85	1.00	1.00	0.342	231.74
	사용자재의 적정성 검토		공사개월	0	1.8	1.00	1.00	1.00	0.342	0.00
	품질시험 및 성과검토		공사개월	0	11.0	1.00	1.00	1.00	0.342	0.00
	시공계획검토		공사개월	0	6.0	0.85	1.00	1.00	0.342	0.00
	기술검토 및 교육		공사개월	0	5.0	1.00	1.00	1.00	0.342	0.00
	공정관리		공사개월	0	5.5	1.00	1.00	1.00	0.342	0.00
	안전관리		공사개월	16	22.0	1.00	1.00	1.00	1.000	352.00
	환경관리		공사개월	16	3.5	1.00	1.00	1.00	0.342	19.15
	설계변경 관리		공사개월	0	13.4	1.00	1.00	1.00	0.342	0.00
	기성검사		회	3	5.2	1.00	1.00	1.00	1	15.60
	준공검사		식	1	6.1	1.00	1.00	1.00	1	6.10
	계약자간 시공인터페이스 조정		공사개월	0	1.5	1.00	1.00	1.00	1	0.00
	하도급타당성검토		공사년수	1	6.3	1.00	1.00	1.00	0.342	2.89
	시공단계의 예산검증 및 지원		회	0	4.6	1.00	1.00	1.00	1	0.00
	일반행정업무		용역일수	0	0.9	1.00	1.00	1.00	0.342	0.00
	소 계(감독권한대행)									737.58

5). 건설사업관리기술인 배치계획

구 분		분야	등급	근 무 기 간 (개월)																투입 개월 (월)	고급기준		비고
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		환산비	환산인·월
책임기술인		토목	고급	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16.000	1.000	16.00
상주기술인		토목	중급	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16.000	0.871	13.936
		조경	중급													0.5	1	1	1	3.500	0.871	3.049
		전기	중급											0.12	1	1	1	1	1	5.120	0.926	4.741
		통신	중급												0.22	1	1	1	1	4.220	0.892	3.764
소 계																				41.49
기술지원 기술인		토목	고급	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16.000		3.35
		조경	고급	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16.000
		전기	고급	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16.000		1.18
		통신	고급	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16.000		0.94
소 계																				5.47
총 계																				46.96