포항시 고시 제2020 - 281호

도시계획시설사업 실시계획 작성(변경) 고시

포항 도시계획시설(도로) 사업에 대하여「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제88조 규정에 의하여 실시계획을 작성(변경)하고, 같은법 제91조 규정에 따라 다음과 같이 고시합니다.

2020.  12.  23

포   항   시   장

1. 사업 시행지의 위치 : 포항시 북구 흥해읍 이인리 ~ 우현동 일원

- 종 류 : 포항 도시계획시설 (도로 : 대로3류27호선)

- 명 칭 : 한신공영~이인리간 도로(대3-27) 개설공사 2,3단계

2. 사업의 규모

- 도로개설 L=2.48km, B=25m(2단계 1.74km, 3단계 0.74km)

※ 2단계 일부구간 반폭(12.5m) 우선시행 후 향후 전폭(25m)개설 예정

3. 사업시행자의 주소 및 성명

- 주 소 : 포항시 남구 시청로 1(대잠동)

- 성 명 : 포항시장

4. 사업시행기간

- 당 초 : 2017. 10. 19 ~ 2020. 12. 31

- 변 경 : 2017. 10. 19 ~ 2025. 12. 31

5. 사용 또는 수용할 토지 및 지장물의 조서 : 붙임조서 참조

※ 관계도서 등은 포항시청 건설과에 비치하여 일반인에게 보이며, 기타 상세한 사항은 건설과(☎054-270-3423)로 문의하시기 바랍니다.