손실보상 계획서

사 업 명

345kV 신옥천-청양T/L 기설송전선로 선하지 권원확보사업

사업고시

산업통상자원부 고시 제2015-254호(2015.12.10)

사업개요

○ 사업위치 : 대전시 동구, 중구, 서구, 옥천군, 금산군, 계룡시,

공주시, 청양군 일원

○ 주요내용

필 지 수 : 933	토 지 주 : 1,294
사업 면적 : 544,972[eqn: m ^{2}]	사 업 비 : 6,837백만원
사업기간: 2015.09- 2017.08	선로 길이 : 79.455km

보상기간

2016년 2월 ~ 2017년 08월

예산과목

345kV 신옥천-청양T/L 기설송전선로 선하지 권원확보사업

예산관계

○ 보상금액 : 선하지 감정가액(과거사용료 포함)

보상방법

○ 보상금액 : 토지 공간사용료(감정가액)

○ 취득권리 : 선하부지(구분지상권)

세부일정

내 용	기 간	소요 일수
보상계획 개별통보	2016.01.29	7일간
보상계획 신문공고 (중앙일간지)	2016.01.29	1일간
보상계획열람(당사 송전운영팀 및 해당지자체)	2016.01.29 - 02.13	15일간
임의적 보상협의회 개최	2016.02.22	1일간
토지소유자 감정평가사 추천	2016.02.29	15일간
감정평가 실시	2016.03.14- 04.13	30일간
보상금 산정 및 개별통보	2016.04.15- 04.26	12일간
계약협의 및 보상금지불	2016.04.27- 07.27	3개월간