포항시 공고 제2012 - 1663호

포항 도시계획시설사업 시행(변경) 공람공고

포항 도시계획시설(동빈내항복원 해도수변유원지 조성)사업 시행(변경)을 위하여「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제90조 및 같은법 시행령 제99조 규정에 의하여 다음과 같이 관계서류의 공람을 실시하오니, 토지․건축물 등의 소유자 및 이해관계인은 사업시행에 대한 의견이 있을 때에는 공람기간 내에 의견서를 포항시청 도시계획과로 제출하여 주시기 바랍니다.

1. 공람기간 : 공고일로부터 14일간

2. 공람일시 및 장소 : 포항시청 동빈운하건설TF팀(09:00～18:00)

3. 도시계획시설사업 시행내용

사업명	위 치	사 업 내 용	시행기간	사업시행자
동빈내항복원 해도수변유원지 조성사업	포항시 남구 해도동, 송도동, 북구 죽도동 일원	ㅇ사업면적 : 96,100㎡ -유희시설 : 7,261㎡ -휴양시설 : 7,814㎡ -특수시설 : 2,247㎡ -편익시설 : 14,045㎡ -관리시설 : 12,440㎡ -녹지 및 기타시설 52,293㎡	ㅇ 당초 2009.6.25 ~ 2012.12.31 ㅇ 변경 2009.6.25 ~ 2014.3.30	ㅇ 당초 포항시장 대한주택 공사 사장 ㅇ 변경 포항시장 한국토지 주택공사 사장

4. 기타 상세한 사항은 포항시청 동빈운하건설TF ☎(054- 270-5172)으로 문의

하시기 바랍니다.

2012.  11.   .

포    항   시    장