봉산해병대권역 농촌마을종합개발사업 시행계획 승인

□ 총괄내역                                              < > : 외서자부담        (단위:천원)

사업명	기 본 계 획		시 행 계 획		증 감 내 역		사 유
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
총 계		<84,000> 4,980,000		<122,135> 4,980,000		<38,135> -
기초생활 시설		1,062,000		901,929		△160,071
마을공동 주차장	부지정비 주차장(아스팔트 포장) 쉼터 및 운동기구 전기, 가로등, 용지매수비	158,000	-	-	-	△158,000	부지 미확보로 사업 불가
건강관리실	대곡리 리모델링(96㎡) 신계리 회관증축(79㎡) 창지1리 회관증축(66㎡) 창지2리 회관증축(76㎡)	567,000	금오리 회관증축(86.32㎡) 대곡리 회관증축(85.70㎡) 신계리 회관증축(87.75㎡) 창지1리 회관증축(89.00㎡) 창지2리 회관신축(89.00㎡)	734,861	금오리 회관증축(86.32㎡)	167,861	금오리 마을 공동주차장 사업을 건강 관리실 증축 으로 변경
수오제	실내전시실(87㎡)디자인 전시시설물(80㎡)설치	157,000	리모델링82.72㎡ 기획전시실디자인1식	167,068	리모델링82.72㎡ 기획전시실디자인1식	10,068	세부설계에 의함
세심산책로	숲길정비 경관조성 운동기구1식	180,000	-	-	-	△180,000	사업 제외
지역경관 개선		377,000		61,688		△315,312
열녀비 사적정비	안내표지판 1식 숲,비석 정비 1식	57,000	잔디블록포장195.32㎡ 사각정자1개소 잔디136.20㎡	61,688	△안내표지판 1식 잔디블록포장195.32㎡ 사각정자1개소 잔디136.20㎡	4,688	세부설계에 의함
권역상징물	권역상징물1식 권역안내판3개	110,000		-	△권역상징물1식 △권역안내판3개	△110,000	사업 제외
생태자전거탐방로	제방도로정비 휴게시설(정자,벤치) 안전시설 가로경관조성	210,000		-	△제방도로정비 △휴게시설(정자,벤치) △안전시설 △가로경관조성	△210,000	사업 제외
지역소득 증대		<76,000> 2,186,000		<114,135> 2,916,253		<38,135> 730,253
해풍미나리 단지	비닐하우스(골조) 저온저장고 관정1개소	<36,000> 145,000		-	△비닐하우스(골조) △저온저장고 △관정1개소	<△36,000> △145,000	우리밀가공 사업으로 대체
수제산딸기잼가공및 우리밀가공	가공시설 및 저온저장고66.0㎡ 창고 및 사무실150.0㎡ 조경시설(조경,가로등)	<40,000> 161,000	가공공장 신축216.0㎡ 저온저장시설 및 딸기잼, 우리밀가공 기계설비	<114,135> 452,314	가공공장 신축216.0㎡ 저온저장시설 및 딸기잼, 우리밀가공 기계설비	<74,135> 291,314	우리밀가공과 같은 부지에 계획
해병대 극기 체험센터	리모델링 599.64㎡ 기자재 및 부대시설 체육시설,주차장,잔디 등 담장정비 및 조경	1,485,000	리모델링950.40㎡ 사각파고라 등 2개소 등의자 등 13개소 점토블럭포장 등 772.89㎡ 아스콘포장 1,156.22㎡ 마사토포장 4,316.66㎡ 식 재(왕벗나무 등)	1,935,901	리모델링350.76㎡ 사각파고라 등 2개소 등의자 등 13개소 점토블럭포장 등 772.89㎡ 아스콘포장 1,156.22㎡ 마사토포장 4,316.66㎡ 식 재(왕벗나무 등)	450,901	건축물 구조 검토 결과 및 주민의견 반영
해병대 극기 체험장	부지정비, 안전시설 위생화장실 1식, 장비창고 체험시설물 설치, 상징조형물	395,000	짚라인등 극기체험장비 포로수용소탈출등 창의체험장비 안전시설	528,038	짚라인등 극기체험장비 포로수용소탈출등 창의체험장비 안전시설	133,038	창의체험장등 주민의견 반영
지역역량 강화		<8,000> 447,000		<8,000> 447,000		- -
제경비		908,000		653,130		△254,870
기본계획비		85,000		85,000		-
세부설계비		126,000		111,344		△14,656	설계에 의함
공사감독비		287,000		250,925		△36,075	설계에 의함
사업관리비		50,000		53,926		3,926	설계에 의함
잡지출 등		60,000		51,711		△8,289	설계에 의함
예 비 비		300,000		100,224		△199,776	설계에 의함