포항시 화물자동차 공영차고지 조성사업 실시설계용역

과  업  지  시  서

2020. 4.

포 항 시

목       차

Ⅰ. 과업의 개요

1. 과업개요	2

2. 일반사항	2

Ⅱ. 과업수행 세부지침

1. 현황측량	6

2. 실시설계	9

3. 재해영향평가	13

Ⅲ. 성과품 작성 및 납품

1. 일반사항	16

2. 납품목록	16

3. 예정공정표	17

Ⅰ. 과업의 개요

1. 과업개요

가. 과업의 명칭

○ 포항시 화물자동차 공영차고지 조성사업 실시설계 용역

나. 과업의 목적

○ 절대 부족한 화물자동차 주차 공간 확보로 불법 밤샘주차를 개선하여 주민불편 해소 및 교통사고 예방

○ 복합편의시설 제공으로 운전자의 근로여건 개선하여 졸음운전 예방

○ 화물 및 교통정보 제공으로 화물운송 체계의 효율성 증대

다. 과업의 범위

○ 위    치 : 포항시 남구 대송면 제내리 540번지 일원(제내저수지)

○ 면    적 : 60,235㎡

○ 과업내용

- 현황측량

- 실시설계

- 재해영향평가

라. 과업기간 : 착수일로부터 6개월

2. 일반사항

가. 과업수행기준

○ 본 용역은 과업지시서 및 국토계획관련 법규 등 제반규정과 발주자의 지시에 따라 당해 기술자의 책임하에 성실히 수행하여야 한다.

○ 본 용역은 목적달성에 필요한 분야를 종합적으로 분석하고 본 과업범위에 표시된 것은 물론이고 표시되지 않은 중요한 항목이 있을 경우에는 본   과업에 포함하여 검토하여야 한다.

○ 제반규정과 과업지시서상에 명시되지 않은 사항이나 문구‧용어의 해석 등에 이견이 있는 경우에는 발주처의 요구에 따라야 한다.

나. 참여기술자 구성 등

○ 본 과업수행자는 관련분야에 대한 학식과 경험이 풍부한 기술능력 보유자로 과업수행 팀을 구성하여 과업수행이 원활하게 이루어지도록 하여야 한다.

○ 과업수행에 부적합하다고 인정되는 참여기술자가 있는 경우 발주자가 교체를 명할 수 있으며 용역수행자는 즉시 이에 따라야 한다.

○ 착수계에 명시된 과업참여기술자가 부족하여 본 과업 수행 상 어려움이   있다고 판단될 경우에는 적정 인원을 즉시 충원하여야 한다.

다. 착수계 등 제출

○ 과업수행자는 계약체결 후 7일 이내에 착수계 등을 제출하고, 과업지시서에 따라 성실하게 과업을 수행하여야 하고 착수계 제출 시 현장대리인계, 과업수행계획서, 과업참여기술자 명단, 보안각서 등 과업수행에 필요한 제반 서류를 제출하여야 한다.

라. 보고회 개최 및 공정보고

○ 과업진행 및 세부진행사항 검토를 위해 발주자의 요구가 있을 때에는 필요한 자료를 제출 또는 보고회를 개최하여야 하며, 보고 시 제기되는 의견 및  도출된 문제점을 검토하여 보완하여야 한다.

○ 과업수행자는 발주자가 요구하는 서식에 따라 매월 말을 기준하여 익월 5일까지 공정보고서를 서면으로 작성‧제출하여야 한다.

○ 월말 공정보고 및 보고회는 발주자와 협의하여 유연한 일정진행을 위해  유선 및 면담협의 등으로 대체 할 수 있다.

마. 설계변경 조건

○ 과업수행 도중 과업물량의 증‧감 또는 여건변화가 있는 경우 예산범위   내에서 발주자에게 보고 후 승인된 내용에 대하여 설계변경 할 수 있다.

○ 다음과 같은 사항이 발생될 경우에는 설계변경을 할 수 있다.

- 정책변경이나 천재지변 등 불가피한 사정이 발생하여 과업변경이 필요할 때

- 각종 적용품의 변동 및 설계오류 발견 시

○ 위항의 사유로 과업변경 요인이 발생될 경우 또는 계약체결 후 예정가격 및 계약금액의 결정에 하자 또는 착오가 있음이 발견되거나 기타 계약금액을 조정하여야 할 사유가 발생하였을 때는 해당금액을 조정하거나 준공 후라도 환수 조치할 수 있으며, 행정절차이행요인이 발견될 시는 준공을 하더라도 대금지급을 일부 유보할 수 있다.

바. 보안사항

○ 과업수행자는 과업수행에 필요한 제반 보안관계 규정에 의한 절차를 이행하여 보안대책을 수립하고, 대표자 및 참여기술자의 보안각서를 제출하여야 한다.

○ 과업 참여기술자 변경 시는 인수인계를 철저히 하여 모든 과업성과의 사전 유출 또는 과업수행의 공백이 발생되지 않도록 하여야 한다.

○ 본 과업수행 전‧후를 막론하고 모든 자료와 성과품은 타 용도의 사용을  금하며 발주자의 사전승인 없이 임의로 타인이나 기관에 제공 또는 대여 할 수 없다.

○ 발주자가 제공한 자료의 분실이나 파손의 경우 보안관리의 책임을 져야하며, 해당 자료를 원상태로 복원 제출하여야 한다.

○ 과업수행 중 보안에 관련된 사항은 보안통제를 철저히 하여야 하며, 유출로 인한 사회적 물의를 일으켰을 때에는 수급인이 민‧형사상의 모든 책임을 진다.

사. 자료의 적용 등

○ 통계자료의 적용은 다음 순위로 활용하고 자료의 출처를 명확하게 기재  하여야 함

① 기획재정부 통계청 통계자료

② 국토해양부 및 정부기관 통계자료

③ 당해 지역통계자료

④ 기타 공공기관 통계자료

○ 미래지표설정은 정부의 공식자료가 있는 경우에는 이를 적용하고 기타 관련 자료는 관계법령에 의한 상위계획, 정부기관의 잠정자료, 당해 전문기관의 공개자료의 순으로 활용하고 자료가 없는 경우에는 우리시와 협의하여   결정하여야 한다.

아. 기타사항

○ 과업수행자는 관련법규 또는 본 과업수행 상 필요한 경우 관계기관과 충분한 협의를 거쳐야 하며, 관련기관과의 협의에 필요한 서류를 작성‧제출하여야 한다.

○ 과업수행과 관련 발주자가 요구하는 보고회, 주민공람 등 행정적인 제반 보고사항은 사업 책임기술자가 참여하여 보고한다.

○ 과업지시서에 명시되지 아니한 사항이라도 필요하다고 인정되는 중요사항은 분야별 책임기술자가 발주자와 협의 결정하고 그에 필요한 자료를 제출 한다.

○ 발주자의 정책변화에 따라 불가피하게 과업지시내용을 변경하여야 할 경우에는 발주자의 요구에 응하여야 한다.

○ 과업수행에 따른 제반규정을 준수하여야 하며 세부지침에 명기된 사항   이외의 과업 내용에 지시되지 않은 사항이나 계획에서 고려되지 못한   사항의 경우는 발주자의 요구에 따라야 한다.

○ 과업 수행 상 필요한 관련자료는 발주자에게 요구하는 것을 원칙으로 하되 보유하지 않은 자료는 수급자가 이를 수집하고 보고한다.

Ⅱ. 과업수행 세부지침

1. 현황측량

1-1. 과업수행 일반지침

○ 현황측량은 공공측량작업규정에 의거하여 발주처의 지시에 따라 시행하도록 한다.

○ 측량은 실시하기 이전에 측량에 관한 세부 실시계획서를 작성하여 사전에
발주처와 협의 후 측량에 임하여야 한다.

○ 본 과업에 명시되지 않은 사항이라도 계약자는 과업수행 상 필요한 사항은
발주처의 지시에 의거 시행하여야 한다.

○ 하도급으로 측량을 시행하는 경우에는 계약자는 발주처에 하도급 내용을
제출하여 승인을 받아야 한다.

○ 지적도 및 임야도는 관할 관청에 비치된 지적공부 원도를 기본으로 하되,
도곽선 및 도근점을 아울러 등사하여 제작하여야 한다.

○ 삼각점 및 주요 수준점 조서를 작성하고 발주자가 필요하다고 인정하는 지점에 표석을 매설하여 영구 보존될 수 있도록 하여야 하고 도면에 위치와 좌표(x,y,z)를 기입한다.

○ 계약자는 작업진행 사항을 작업일지에 기록하여 필요시 발주처에서 확인할
수 있도록 하여야 한다.

○ 계약자는 측량작업 시 안전사고 방지에 유의하여야 한다.

○ 측량작업 시 필요한 관계기관의 제수속을 계약자 부담으로 신속히 처리 한다.

○ 측량을 위해 교통 혹은 보행의 금지 또는 제한이 필요한 경우 해당 경찰서
및 발주처와 협의하여 허가를 득한 후 시행한다.

○ 각도는 도․분․초로 면적 및 길이는 미터법을 사용한다.

○ 주요 측량원점과 등고선에는 필히 지반고를 기입한다.

○ 현황측량은 계획 및 설계에 지장이 없도록 과업면적의 10%이상으로 여유있게 측량하여야 한다.

1-2. 부문별 세부지침

가. 현황측량

○ 측량성과도를 이용하여 설계업무를 수행하는데 지장이 없도록 좌표인식이 가능하고 3D 입체화가 가능하도록 지형현황측량을 실시하여야 하며, 지장물 현황을 조사, 측량하여야 한다.

○ 부지 내 주요 수공구조물(하수암거 및 수로관 등)에 대한 현황측량 및 조사를 실시하여 사진촬영하고 그 근거자료를 명시하도록 한다.

○ 현황측량도에는 지하매설물(상․하수도관, 도시가스관, 통신케이블, 한전지중선, 각종맨홀, 수로구조물, 기타)과 각종 진행공작물에 대한 현황도가 포함 되어야 한다.

○ 현황측량성과도의 축적은 1/500로 하고 신축이 없는 용지를 사용하여야 하며, 지장물 현황(가옥, 비닐하우스, 루핑, 교량, 구거 등)을 상세히 기록하여야 하며, 측량성과에 대한 도근점 및 도곽선을 명시하여야 한다.

○ 현황측량 성과물을 종합하여 현황측량종합원도를 작성하되 컴퓨터 프로그램을 이용하여 x, y, z로 수치화하여 작성한다.

○ 발주자가 지형현황도를 파악하여 미비된 부분은 수급인의 부담으로 지체없이 보완하여야 한다.

나. 수준측량

○ 국립지리원에 등록된 수준점에 대하여는 기준성과를 확인(검측)하여 사용하고, 지구주위에 영구 보존될 수 있는 1개소 이상의 장소에 측량표준규격에 의하여 표석을 설치하고, 지구내 보조삼각점에 대하여도 수준측량을 실시하고 그 기록이 보존되도록 하여야 한다. (현황도에 표기, 사진촬영, 좌표(x,y) 기록)

다. 삼각측량

○ 국립지리원에 등록된 기지점 4개소 이상을 검측한 후 최소한 3개점을 기준으로 관측하되 광파 측량기계를 이용 1초독까지 측각한다.  측각은 2대회의 관측으로 초까지, 변장은 소숫점 이하 3위까지 산출하여야 한다.

○ 국립지리원에 등록된 기지점(표석 등)이 확인될 수 있도록 하고, 확인지점에 대한 표석 사진촬영하고 근거자료를 명시하도록 한다.

○ 새로 매설되는 삼각점 표석에 대해서도 원․근거리 사진을 촬영하여 근거로 제시한다.

라. 도근측량(필름포함하고 촬영한 년․월․일이 표기되어야 한다.)

○ 도근점의 배치는 주로 현황시설물의 실측에 편리하도록 배치하고 관측은 삼각측량에 준하며, 측각은 2배각으로 한다.

○ 수급인은 발주처의 지정인에게 삼각점, 수준점, 보조삼각점, 보조수준점 및 도근점을 인수인계 하여야 하며 지형현황측량 완료 2일전에 당사에 통보하여야 한다.

마. 지적도 작성

○ 지적도작성은 대상지구에 편입되는 경산시 지적도를 열람하여 작성토록 하고 지적도에 현황도를 합성하여 현황종합도를 작성한다.

○ 작성된 현황종합도는 컴퓨터프로그램을 이용하여 수치화한다.

2. 실시설계

2-1. 일반사항

○ 설계는 공사기간과 공사비 예산을 감안하여 이에 적합하도록 구조, 재료, 시공방법 등이 제시되어야 한다.

○ 본 과업과 본 과업에 명시되지 않은 사항이라도 수급자의 기획과 의도를 반영 합리적이고 구체적인 다양한 시행방안(규모, 타당성, 예상사업비 등)을 제시하여야 한다.

○ 실시설계는 건축․토목․전기․통신․소방 등 전문분야(공종)별 상호 보완 연계되어야 하며, 설계도서도 구분 작성한 후 납품하여야 한다.

○ 설계 시 친환경, 신․재생, 고효율 에너지 기자재를 적극 검토 반영하여야 한다.

○ 관련법령에 의한 기본업무 외 각종 인허가 등 대관업무도 본 용역에 포함한다.

○ 기타 본 과업에 명시되지 않은 사항은 발주자와 협의하여야 한다.

○ 수급자는 다음과 같은 관련법령 및 제반 규정을 준수하여 시행하며 필히 숙지ㆍ활용하여야 한다.

- 건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정

- 기본설계 등에 관한 세부시행기준

- 건설기술관리법, 건설산업기본법, 산업안전보건법

- 기타 건설공사의 안전ㆍ환경 등에 관한 법령 및 규정

- 폐기물관리법, 대기환경보존법 및 수질환경보존법

- 오수ㆍ분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한 법

- 국토해양부 제정 건축 또는 토목공사 표준시방서 및 설계․시공지침

- 도로법, 측량법, 수도법 및 하수도법

- 전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법

- 전기용품안전관리법, 전기설비기술기준, 내선규정, 배전규정

- 한전공급규정, 한국전력공사의 전기공급약관

- 정보통신기본법, 정보통신공사업법, 전파법

- 전기통신설비 기술기준에 관한규정 및 규칙

- 소방기본법, 소방시설공사업법 등 소방관련 법령 및 규정

- 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률

- 에너지이용 합리화법, 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정

- 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법

- 저탄소 녹색성장 기본법 및 녹색제품 구매 촉진에 관한 법률

- 산업표준화법 관련규정 및 기준

- 한국사업규격 및 K․S 규정집, 건설공사 품질 및 규격관리 실무편람

- 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률

- 기타 정부관련 법규 및 지방자치단체조례 등

2-2. 토목 분야

가. 토공

○ 부지조성에 따른 토량이동 및 정지계획은 배수계획을 감안하여 합리적으로 수립한다.

○ 토량의 이동은 가급적 본 사업구간의 단거리 내에서 절‧성토량을 같게 하는 것을 원칙으로 하고, 토량 균형이 불가능할 경우 토취장 및 사토장을 감독원과 협의하여 결정하여야 한다.

○ 비탈면은 토지이용도 및 경제성을 감안하여 설계한다.

나. 상수도공

○ 본 과업은「상수도법, 상수도시설기준, 여수시상수도기본계획」등 관련규정에 의거 실시설계용역을 수행하여야 한다.

○ 설계기준

- 관로는 급수구역에 용수 공급하는 급ㆍ배수관로로 나누어 시설용량 검토 후 관경결정

- 단위 격점별 용수 수요량 조사

- 배수관망 수리해석 및 결과분석

- 관로노선 선정 시는 공사비, 공사 난이도, 용지확보, 유지관리, 장래 도로 확장계획, 지하매설물 계획 등을 종합적으로 검토하여 가장 적합한 노선으로 가급적 직선화하도록 설계하여야 한다.

- 관의 내압 및 외압 경제성 등 종합적으로 검토하여 관종을 결정하여야 한다.

- 관로 구조물(각종 변실 등)기초지반 침하에 대한 검토 및 기초지반 보강대책을 강구하여 설계에 반영하여야 한다.

- 곡관 보호공 등 기타 부대시설에 대하여 설계에 반영하여야 한다.

- 각종 변실(제수변,공기변, 드레인관 등)계획을 수립하여 관리대장을 작성한다.

- 자재구입은 필요에 따라 시방서를 작성하고 그 물건의 기능, 특징, 용량, 제작방법, 성능, 시험방법, 부속품 등에 관하여 명시하여야 한다.

다. 하수도공

○ 본 과업은「하수도법, 하수도시설기준, 공공하수도시설 설치사업 업무지침, 하수도시설운영ㆍ관리업무처리통합지침, 소규모하수도사업통합지침」등의 관련규정에 따라「여수시하수도정비기본계획」에 맞추어 실시설계용역을 수행하여야 한다.

○ 설계기준

- 하수관거는 유량계산공식, 관거내 유속 및 구배, 관거의 종류, 매설위치 및 깊이, 관거의 접합, 맨홀 등에 대해 검토 반영하여야 한다.

- 강우량 및 홍수량 계산은「여수시하수도정비기본계획」을 준용하여 검토하여야 한다.

- 관종은 경제성, 시공성, 유지관리 측면을 검토ㆍ비교 결정하여야 한다.

- 자재구입은 필요에 따라 시방서를 작성하고 그 물건의 기능, 특징, 용량, 제작방법, 성능, 시험방법, 부속품 등에 관하여 명시하여야 한다.

- 관로설계는 비교안을 검토하여 경제적이고 시공이 용이하며, 현장여건에 적합한 노선 및 공법을 채택하여야 한다.

- 기타 관로에 반영되어야 할 부대시설에 대하여도 검토 반영하여야 한다.

- 관로 토공의 굴착구배, 심도 및 부성방법은 지반의 상태 및 예상되는 하중 등을 고려하여 이에 적합한 설계를 실시하여야 한다.

라. 포장공

○ 본 과업은「도로공사 설계기준, 도로공사 표준시방서」등의 관련규정에 의거 실시설계용역을 실시하여야 한다.

○ 설계기준

- 선정된 포장재는 차량통행이 가능하도록 설계하중을 검토하고 노면배순계획을 수립하여야 한다.

- 포장의 종류는 각 재료의 장‧단점을 비교하고 자연환경과 어울리는 재료로 선정 설계하여야 한다.

- 포장은 동선의 종류와 이용자의 빈도, 유지관리, 이용방법 등을 고려 하여 설계하여야 한다.

- 포장 구조는 동결심도, 포장재료, 지지력 및 경제성을 검토한다.

2-3. 전기분야

가. 설계기준

○ 보수, 유지관리가 용이하여야 하고 장래 증설, 변경, 개․보수에 대한 적용성이 있어야 한다.

○ 기술진보에 따른 자동화 등에 효과적으로 대처할 수 있는 시스템으로 구성한다.

○ 경제성, 기능성, 안전성, 효율선 등을 고려한 전력공급 계통도를 계획하여야 한다.

○ 조명설비

- 옥외에 설치되는 보안등은 조경과 건축물 주변여건 등 미관을 고려하여 설계한다.

○ 주차관리시스템 설치 대비하여 각 주차관리 시스템 및 CCTV 등 부대시설의 설치 위치에서 통신․전기 인입이 되도록 하여야 한다.

2-4. 조경분야

○ 설계 시 관계법령에 따른 조경면적을 준수하고 주변경관과 연계되도록 조경 및 조경시설을 설치하여야 한다.

3. 재해영향평가

3-1. 일반사항

○ 본 과업수행 참여진은 재해영향평가에 관한 학식과 경험이 풍부한 전문가로 구성하여 합리적이고 효율적인 과업이 이루어지도록 하여야 한다.

○ 본 과업수행을 위해서 자연재해대책법, 재해영향평가서 작성 등에 관한 규정 등 관련법령, 국토건설종합계획, 사업지역의 도시계획, 기타 법령에 의한 제반시설계획, 시설기준 등을 충분히 검토하여 재해영향평가 및 계획수립, 관계기관과의 협의 등에 문제점이 없도록 하여야 한다.

○ 수급인은 자연재해대책법 제4조에 근거하여 보고서 작성을 위한 현황 측량 등 조사 자료와 제시된 제안 등에 근거하여 효율적인 과업이 이루어지도록 하여야 한다.

○ 수급인은 관련 인허가기관(이하 “관계기관” 이라한다)과 재해영향평가 협의에 필요한 자료를 사전에 감독원에게 제출하여 승인을 받아야한다. 협의결과 추가적인 자료제출 요구를 받을 시에는 감독원과 협의하여 제출하여야 한다.

○ 수급인은 재해영향평가서 초안 제출 시 관할 관계기관과의 협의에 필요한 자료를 작성 제출하여야 한다.

○ 수급인은 설계업무에 필요한 재해영향 검토, 타당성 여부 등을 검토하여 계획, 설계 및 검토내용의 상호보완 및 Feed-Back을 통해 원활한 사업추진이 이루어질 수 있도록 협조하여야 한다.

○ 관계기관에서 제시된 검토 의견중 이와 관련된 사항에 대한 대안제시가 필요하며, 관계기관과의 협의내용을 설계에 반영할 때와 과업수행내용에 대하여는 감독원과 협의하여 시행하여야 한다.

○ 수급인은 감독원이 관계기관 협의를 위한 자료제출 및 회의의 참석 등을 요구할 때에는 이에 응하여야 한다.

○ 본 과업이 기본계획, 실시계획, 타 영향검토와 병행하여 실시될 경우 관련과업과 긴밀한 검토과정을 거쳐 각 과업내용이 상호 유기적으로 추진되어야 하므로 감독원이 검토 요구하는 사항에 대하여 즉시 이에 따라야 한다.

○ 본 과업에 대한 재해영향검토서 작성은 행정안전부 고시에 근거한 “재해영향평가등의 협의 실무지침”에 의한다.

○ 본 과업지시서에 명시되지 아니한 사항이라도 자연재해대책법 제4조 등 관계법령의 규정 등에 의하여 필요하다고 인정하는 중요사항은 우리시와 협의하여 결정하여야 한다.

○ 자연재해대책법 제4조에 의거 평가서의 작성 제출은 통합하여 작성하는 것이 원칙이며 불가피한 경우를 제외하고는 통합영향평가서가 작성될 수 있도록 다른 분야의 작성자와 긴밀히 협의하여 업무를 수행하여야 한다.

○ 재해영향평가 결과에 대하여 수급인의 귀책사유로 인하여 관계기관으로부터 재검토 요청이 있을 경우 수급인의 부담으로 처리해야 한다.

○ 관계기관과 재해영향평가협의 후 개발사업에 협의결과를 검토·반영이 필요할 경우는(과업 완료 후라도) 조치계획서를 작성ㆍ제출하여야 한다.

3-2. 과업수행에 따른 세부사항

가. 검토서 작성 시 다음 내용을 포함하여야 하며, 재해영향 저감대책은 개발 중․후를 구분하여 상세히 기재하고 재해저감시설 유지관리에 대한 내용을 포함하여 사후관리에 대한 구체적인 방안을 제시하여야 한다.

1. 제1장 사업의 개요

1.1 사업 배경 및 목적

1.2 사업 내용

1.3 사업 추진경위

1.4 재해영향평가 실시근거 및 절차

2. 제2장 기초현황 조사

2.1 기초현황 조사의 기본방향

2.2 유역 및 배수계통 조사

2.3 수문특성 조사

2.4 토양, 지질 및 지반 현황 조사

2.5 재해발생 현황 조사

2.6 재해관련 지구지정 현황 조사

2.7 방재시설 현황 조사

2.8 관련계획 조사

3. 제3장 재해영향평가 대상지역 설정

3.1 평가대상지역 설정 방법

3.2 사업 유형별 평가대상지역 설정

4. 제4장 재해영향 예측 및 평가

4.1 재해영향 유발요인 선정 및 설계빈도 결정

4.2 홍수유출해석

4.3 토사유출해석

4.4 급경사지 및 지반관련 재해위험도 평가

5. 제5장 재해영향 저감대책 수립 및 저감방안 반영

5.1 저감대책 수립 및 저감방안 반영 기본방향

5.2 저감대책 수립

5.3 저감방안 반영

6. 제6장 유지관리계획

6.1 개발 중 유지관리계획

6.2 개발 후 유지관리계획

7. 제7장 결  론

Ⅲ. 성과품 작성 및 납품

1. 일반사항

○ “계약상대자” 는 “발주기관”의 성과품 작성기준에 의거, 성과품을 작성하여 제출한다.

○ 모든 성과품의 인쇄는 “발주기관”과 협의하여 승인을 득한 후 실시한다.

○ 본 사업에 소요되는 각종 준공도면은 전산화된 성과로 납품하여야 한다.

2. 납품목록

가. 성과품 납품시기

○ 최종성과품은 과업수행 종료 3일 이전에 납품한다.

나. 납품도서목록

구 분	품 명	규 격	수 량	비 고
실시설계	∘ 실시설계도서 - 설시설계보고서 - 실시설계도면 - 수량산출서 - 단가산출서 - 설계내역서 - 공사시방서 - 용지 및 지장물도 - 기타	1식	5부
	∘ 전산파일(USB저장메모리)	1식	2EA
재해영향평가	∘ 재해영향평가보고서	1식	10부	CD 포함

3. 예정공정표

구 분		과업진행 개월 수
		1	2	3	4	5	6
현황측량
관련계획 검토 및 조사
실시설계	설계도서 작성
	관련부서 협의
재해영향 평가	재해영향평가 보고서 작성
	관련부서 협의
성과품 작성 및 납품