[ 포항 종합운동장 전광판 교체공사 ]

설계용역 과업지시서

2020. 05.

	새마을체육과

설계용역 과업지시서

1. 과업의 목적

◦ 2022년 경북도민체육대회 유치에 따른 체육인프라 확중으로 대·내외 방문객에게 스포츠메카로 포항의 위상을 널리 홍보하고 시민이 공감하고 기부자의 의미를 부각 시킬 수 있는 효과적 사업추진으로 협력사업의 대표적 랜드마크로 조성하기 위함.

2. 과업의 개요

가. 과업명 : 포항 종합운동장 전광판 교체공사 실시설계용역

나. 위  치 : 포항시 남구 대도동 313-1번지(포항종합운동장 내)

다. 공사규모 : 전광판(21.6m × 6.98m) 교체 1식

라. 추정공사비 : 2,950백만원 (실시설계용역비 포함)

3. 과업의 내용

가. 35년된 노후된 전광판 철거 및 작업부산물 처리

나. 기존전광판 관련 설치된 장비검토하여 규격에 맞는 제품선정.

다. FULL-Color 전광판 제작설치 및 운영시스템 구축 및 시운전.

라. 전광판 교체설치로 인한 구조검토 및 인허가 관련 확인.

4. 과업기간

본 용역은 착수일로부터 60일간으로 한다.

5. 과업 수행조건

가. 본 용역수행자는 수임의 의무와 비밀엄수의 의무를 진다.

나. 본 용역수행자는 계약일로부터 7일 이내에 설계에 관한 공정 계획을 작성하여 발주처의 승인 및 필요한 지시를 받아야 한다.

다. 공사상 필요한 일체의 용역설계를 그 범위로 하며, 이에 수반되는 조사 등 관련조사 및 협의에 필요한 도면과 구비서류 기타 본 용역에 관한 각종보고 및 제출자료와 감독관이 필요하다고 인정하여 요구하는 일체의 사항을 용역수행자 부담으로 한다.

라. 본 과업은 과업지시서를 숙지하고 제반법규 및 필요한 기초조사와 자료수집을 철저히 하여 작업에 임하여야 하고, 각종 보고시 도출된 문제점을 설계에 반영시켜야 한다.

마. 본 용역수행자는 다음과 같이 설계진행 사항을 보고하여야 한다.

1) 수시보고 : 감독관의 요청이 있거나 용역수행자가 필요하다고 인정되는 경우

2) 중간보고 : 중간보고는 1회이상 하여야 한다.

바. 본 과업의 설계도서와 자료일체, 저작권 및 기타 법률적인 행위를 위한 권한 일체는 발주처의 소유로 한다.

사. 설계 또는 본공사 시공중 현장 여건의 변동이나 설계보완 사항이 발생하여 발주처가 현지 기술지도 및 보완도서 제출을 요구할 경우 용역수행자는 즉시 이에 응하여야 한다.

아. 설계상의 하자로 인하여 재산상의 손실 또는 인명피해 기타 공사 진행상의 지장을 초래하였을 경우 용역수행자는 이에 대한 책임을 져야 하며, 재설계 및 손해배상을 하여야 한다.

자. 본 과업수행시 관계기관 협의 및 보고와 각종 심의위원회 참석 관계자료 보완, 설명 기타사항등은 전문성을 고려하여 용역수행자 책임하에 이행하되 본 사업시행에 지장이 없도록 제반 관련심의를 과업기간내에 완료, 협조하여야 한다.

차. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 발주처와 협의하여 처리하되 협의가 되지 않는 사항에 대하여는 발주처의 별도지시에 따른다.

카. 본 용역수행자는 설계과정에서 감독관의 지시감독을 받아야 하며 관계법령인 전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 전기설비기술기준, 내선규정 등 제반관련 법규에 저촉되지 않도록 하여야 한다.

6. 설계시 고려사항

가. 기존전광판 철거시 기존건물 훼손 고려하여 철거.

나. 현장 여건에 적합한 최신 전광판 비교 분석할것.

다. LED소자 선정시 부품 수급문제 해소할수 있는방안 검토.

라. 해상도 밝기 확인하여 최적의 제품 선정할것.

마. 전기 인입 확인 및 운영실과 네트워크 연계구성.

바. 다양한 정보등을 실시간으로 표출할수 있도록 구성된 전광판시 스템 구성.

사. 기부자의 의미를 부각 시킬 수 있는 효과적 이미지 및 대표적 랜드마크 구성

7. 일반사항

가. 본 용역수행자는 필요한 조사를 용역 수행자 부담으로 감독 입회하에 실시하여야 한다.

나. 본 용역수행자는 필요시 설계도서의 필요한 등록 기타 제반 대외기관의 허가 수속을 이행 하여야 하며, 그 비용은 용역수행자 부담으로 한다.

다. 본 용역수행자는 설계상 사용자재를 관련법에 의거 최고 제품으로 설계하여야 한다.

라. 발주처는 다음과 같은 사유가 있을 경우 본 과업용역을 일방적으로 해약할 수 있다.

1) 계약자가 용역수행이 불가능하다고 인정될 때

2) 발주처의 지시에 불응하여 용역업무를 진행할 때

3) 기타 계약조건을 위반할 때

마. 본 용역수행자가 시행한 관련조사서 및 성과품은 발주처의 소유로 한다.

8. 성과품 작성기준

가. 설계설명서는 서술식으로 기술하되 다음 내용을 포함하여 작성하여야 한다.

- 현황, 주요자재, 예정공정표 등

나. 설계도서

1) 도면의 크기 : 297㎜ × 420㎜

2) A3도면 편철 : 각5부

※ 각종 심의용 제출도면은 별도제출

※ 각종 발주처의 요구에 필요한 서류 별도제출

다. 시방서

1) 각분야별 공정별로 표준시방서, 전력기술관리법을 준용하여 상세히 작성 한다.

2) 일반사항 이외의 특별한 사항은 특기시방서를 작성하되 재료, 규격, 색상, 품질, 시공방법 등을 상세히 기술한다.

라. 내역서

1) 표준품셈에 의거 작성하되 노임 및 자재비는 조달청 가격정보에 의한다.

2) 내역서는 분야별, 공정별로 작성 한다.

3) 원가계산서는 실적공사비 양식을 사용하고 내역서는 실적공사비 공종 및 단가를 적용하며 실적공사비 단가가 없는 품목은 조달청 가격정보에 미수록된 자재 또는 품목은 3개 이상의 시중 물가지중 최저가격으로 하고  시중 물가지에도 없는 것은 견적서 또는 원가계산 및 실거래 가격으로 한다.

9. 성과품의 제출

가. 설계도서

1) 도면의 크기 : 297㎜ × 420㎜

2) A3도면 편철 : 각5부

3) A4 용지 : 도면, 내역서, 시방서, 설계설명서 편철2부

4) 설계설명서 5부

5) 시방서 5부 (중요부위 시공방법 및 각기구 상세도 명기)

6) 내역서 5부(일위대가, 단가산출서, 수량산출서 포함)

7) 공정표 및 각종 계산서 5부

8) CD(도면 오토캐드, 내역 및 관리프로그램은 엑셀 작성)

※ 각종 발주처의 요구에 필요한 서류 별도제출

9) 성과품 작성 세부사항

가.“도급자”는 성과품 작성에 있어서 시공 상 의문이나 문제점이 없도록 최선을 다하여 작성하되 다음사항은 그 정하는 바에 따른다.

1) 관련법규 및 제반규정 준수

2) 설계도면 작성에 관한 사항

① 설계용 도면은 보관이 용이하도록 케이스에 내장하여 제출할 것

② 도면 작성시 각부 치수(미터법 사용), 사용자재(품질, 규격, 형태) 상세도 작성 및 평면도 명기, 도면이해를 위한 주기 및 시공시 유의사항 등을 상세히 명기하여 시공 및 적산에 용이하도록 작성할 것.

③ 도면표기 방법 : 관련 법규 및 제반 규정을 준수하여 표기

④ 설계도면에는 참여 책임기술자가 서명 날인을 할 것

3) 시방서 작성에 관한 사항

① 시방서는 설계도면에 표기하기 어려운 시공방법, 품질기준 등을 명기해야 한다.

② 시방서는 국토교통부 제정 표준시방서 및 관련기준에 적합하도록 작성한다.

③ 특수공법 및 특수자재로서 국내 관련 규정이 없을 때에는 그 품질, 규격 및 시공방법에 대하여 외국의 기준을 적용할 수 있으나 관련 사항을 충분히 검토 후 작성해야 한다.

④ 사용자재에 있어서는 독과점 품목의 경우를 제외하고는 제조회사의 고유 제품명을 표기할 수 없으며 학술적 명칭을 사용해야 한다.

4) 예산 내역서

① 예산내역서 작성은 한국전기공사협회 제정 표준품셈에 준한다.

② 기획재정부 회계 예규 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙 및 건설공사 표준안전관리비 계상기준 및 사용기준을 적용한다.

③ 공사비에는 철거비, 폐자재 처리비등 공사에 필요한 사항을 포함한다.

④ 일위대가가 없는 자재의 경우 단가산출조서 등 근거를 기록한다.

⑤ 복합단가 산출은 일위대가표를 작성하여 국내 관련기준 및 외국 사례를 참조하여 작성한다.

⑥ 정부기관 준용 품셈, 기타 적산 참고자료 적용시는 반드시 근거를 제시한다.

⑦ 수량산출은 내역과 근거를 알아보기 쉽도록 품목별, 부위별로 작성집계한다.

⑧ 운반비는 운반장비, 운반거리, 도로상태 등 운반비 산정에 따른 세부 산출내역을 첨부해야 한다.