중앙 예술문화 창업로 조성

기본 및 실시설계용역

과 업 지 시 서

2020. 8 .

			목 차

Ⅰ. 과 업 개 요	………………………	3
Ⅱ. 과업 세부내용	………………………	5
Ⅲ. 과업 수행지침	………………………	8
Ⅳ. 세부 설계기준	………………………	18
Ⅴ. 성과품 작성	………………………	29

Ⅰ. 과업개요

1. 과업명

ㅇ 중앙 예술문화 창업로 조성 설계용역

2. 과업의 배경 및 목적

ㅇ 2017년 국토교통부 도시재생 뉴딜사업 공모 선정 사업(2018.8월 확정)

- 중앙 예술문화 창업로 조성(단위과제)

ㅇ 주민의견 수렴 및 전문가 자문 과정에서 도출된 의견을 바탕으로 문화예술팩토리에서 꿈틀로 구역까지 가로디자인 및 경관정비, 보행환경 개선, 예술문화 플레이그라운드 마련을 통한 중앙 예술문화 창업로 조성

ㅇ 예술인들의 공방과 창작공간이 산재된 거리를 지역특색에 맞게 재생하여 거리 활성화에 기여할 수 있는 경관개선 및 공공 공간 재조성

3. 과업의 개요

ㅇ 용역비 : 70백만원

ㅇ 공간적 범위 : 중앙동 일원(아래참조) 도로 L=920m 일원

예술문화창업로(예정)

L=920m

ㅇ 시간적 범위

: 2020(기준년도) ~ 2021(목표년도)

ㅇ 내용적 범위

1. 각종 현황 조사·분석

2. 주민의견 수렴 및 전문가 자문

3. 문화예술 창업로 조성 기본구상안 수립

4. 중앙예술문화 창업로 기본설계 (사업화 디자인 계획 수립) 시행

5. 상위 가이드라인, 법령 검토와 주민의견 반영, 심의, 자문 수행

6.. 실시설계(실현화) 시행

7. 기타 본 건의 과업목적 달성을 위해 “발주기관”이 요구하는 사항

ㅇ 총사업비 : 금1,292,000,000원 (부가세 포함)

※ 공사비 822,000,000원 / 보상비 400,000,000원 / 용역비 70,000,000원)

ㅇ 과업기간 : 착수일로부터 120일, 예정공정표는 다음과 같다.

구 분	추진일정(일)																			비고
	5	20		30		45		55		70		85		100		110		120
1. 현장조사 및 주민의견 수렴
2. 기본 구상안 수립
3. 기본설계도서 작성 및 제출
4. 실시설계도서 작성 및 제출
5. 착수, 중간, 완료보고
5. 성과품 작성

ㅇ 발주기관 및 연락처 : 포항시 도시재생과(054-270-3883)

Ⅱ. 과업 세부내용

1. 일반원칙

ㅇ 과업의 주요내용은 본 과업을 진행하는 과정에서 지역주민, 지역상인, 유관기관 및 단체와의 협의 등을 통해 조정될 수 있으며, 과업의 추진은 중앙동 도시재생현장지원센터·포항문화재단, 주민협의체 등과의 긴밀한 협조를 통해 진행하는 것을 기본 원칙으로 한다.

ㅇ 과업의 수행은 관련법령, 조례, 지침 등에 적합하여야 하며, 기타 법령과 기준의 범위를 벗어나는 사항에 대하여는 사전에 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

ㅇ 본 과업내용에서 제시하지 않은 사항일지라도 과업내용의 추가가 필요한 경우에는 발주자의 추가 요청에 따라 특별한 사유가 없는 경우, 수행하여야 한다.

2. 과업수행 세부내용

가. 기본 방향

ㅇ 중앙 예술문화 창업로의 특색을 살려 각 요소별로 네트워크화 하여 문화예술거리 조성에 대한 기본계획을 수립한다.

ㅇ 꿈틀로 구역이 가지고 있는 작업실과 체험장, 판매장 등을 활용하여 최대한의 관광 효과가 도출될 수 있도록 거리를 조성하여 지역 활성화 방안을 마련한다.

ㅇ 기본계획은 지역여건에 적절한지 타당성을 면밀히 검토 분석하여 차별화된 문화예술거리 조성 등을 자문위원회, 주민협의체, 현장지원센터의 의견을 반영하거나 협의하여 최종 결정한다.

ㅇ 무질서한 가로환경 및 가로시설물의 노후화 등 도심의 가로경관을 개선하여 볼거리가 있는 문화예술거리를 조성한다.

ㅇ 주변 노선별 특성 및 분위기에 맞는 테마를 구성하고 개인소유 건물 앞 공간을 이용한 길거리 미술관 등 예술공간 조성방안을 구상하고 특색 있는 경관 연출 방안을 구상한다.

ㅇ 지역자원(갤러리, 공방, 작업실, 체험장, 판매장 등)을 고려한 디자인 개발과 주변상권의 활성화 방안을 제시한다.

ㅇ 문화예술팩토리, 꿈틀로, 중상상가를 연계한 보행자 중심의 순환체계 형성한다.

ㅇ 각종 계획 및 구조물 등 구상시 노약자, 장애우 등 사회적 약자를 배려하고 구조물 등은 친환경자재를 설계에 반영한다.

나. 과업의 세부내용

1) 각종 현황 조사·분석

ㅇ 사업대상지 및 주변지역 현황 조사 및 분석

ㅇ 국내외 사례조사 및 분석

ㅇ 경관분석(주·야간), 공간특성(구조), 가로현황(구조, 시설물, 가로등 등)

ㅇ 공공용지, 기반시설, 도로 현황, 건축물 현황(공가 등) 등 분석

ㅇ 지역특성 파악 및 스토리텔링 발굴

2) 주민의견 수렴 및 전문가 자문

ㅇ 과업기간 내 사업 시행 공론과 과정 시행

ㅇ 사업 종료시까지 지역주민 회의 주관 및 활동 지원

ㅇ 지역주민이 자발적으로 사업에 참여 유도 및 주민 의견 통합

ㅇ 경관협정이 필요한 경우, 주민 및 상인 등 협의 이행

ㅇ 사업구상·실행을 위한 사업설명회 및 주민공청회 등 개최

3) 문화예술 창업로 조성 기본구상안 수립

ㅇ 구.중앙초(문화예술팩토리)~꿈틀로에 이르는 최적의 중앙 예술문화 창업로  구간 선정 검토

ㅇ 유휴 공‧폐가 자원을 활용한 문화‧예술 거점(플레이그라운드) 선정 검토

ㅇ 기본 디자인계획 구상(통합디자인(Total Design))

ㅇ 인근 육거리를 거리 및 공간의 특색을 살려 각 요소별로 네트워크화 하여 포항 예술문화 창업을 위한 분위기에 맞는 테마거리 조성 구상

ㅇ 가로경관개선을 위한 입면정비와 바닥포장, 가로변 쉼터, 조형벤치 등 휴게 공간 조성 검토

ㅇ 도로의 활용을 통한 프리마켓 도입과 예술작품 전시를 위한 길거리 미술관 조성 검토

ㅇ 경관조명을 활용한 야간경관 개선 검토

ㅇ 골목 불법주차 해결을 위한 불법 주정차 방지와 교통정온화기법의 도입과 도로다이어트를 통한 보행 공간 확보 검토

- 공중선, 간판사업 개선 등 무분별한 경관 개선 검토

- 도시재생뉴딜 주요 거점시설과 어울리는 보행 경관 개선 및 시설물 조성 검토

- 가로환경 개선, 보행환경 개선 등을 위한 시설 도입 검토

- 그 외 문화예술 창업로의 자체적 모색, 주민의견 수렴 및 국내외 우수사례 검토

4) 중앙예술문화 창업로 기본설계 (사업화 디자인 계획 수립) 시행

ㅇ 기본구상(안)을 바탕으로 컨셉 설정

ㅇ 창업로 중심의 통합디자인(Total Design)

ㅇ 기본 디자인계획의 구체화 (상세디자인)

ㅇ 문화예술팩토리, 꿈틀로, 중앙상가의 동선 가로경관 개선 및 연계성 강화 방안

ㅇ 경관조명을 활용한 야간경관 개선 도입

5) 상위 가이드라인, 법령 검토와 주민의견 반영, 심의, 자문 수행

ㅇ 포항시 도시계획, 도시재생전략계획, 활성화계획, 공공디자인 가이드라인 등 각종 계획과 관계부처 및 인접지역 사업시행자들의 사업계획 등에 부합되도록 계획

ㅇ 기본계획 사항 각종 시설사업 관계 법령 기준 검토

ㅇ 도시재생위원회, 경관위원회 등 필요시 행정절차 검토 및 이행

6) 실시설계(실현화) 시행

ㅇ 기본설계 결과의 검토

ㅇ 디자인 개발 사항의 구체적 실시설계

ㅇ 도로, 경관, 시설물, 식재, 전기, 통신 등의 실시설계

ㅇ 각 공종별 상세설계 및 주요 상세도 작성

ㅇ 시방서, 단가산출서, 수량산출서, 설계내역서, 폐기물처리 등 작성

ㅇ 공사원가의 적정성 검토와 공사비 분석 및 공사기간 산정

ㅇ 기본공정표 및 상세공정표의 작성과 유지관리지침서 작성

7) 기타 본 건의 과업목적 달성을 위해 “발주기관”이 요구하는 사항

Ⅱ. 과업수행 지침

1. 과업수행 및 책임한계

가. 과업내용서의 준수

1) 본 과업내용에서는『중앙 예술문화 창업로 조성사업』에 대한 과업을 원활히 수행하기 위한 필요 사항을 정하며, 과업은 과업지시서에 의하여 수행하고 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령 및 포항시청의 방침, 정부제정 표준시방서(토목, 조경, 건축, 전기 등)에 의거 수행하여야 하며, 발주청과 협의하여 수행하여야 한다.

2) 본 과업을 충실히 수행하기 위하여 기본설계기간 중 분야별 전문가의 자문 및 주민의견을 충분히 수렴하여 진행하며, 과업 수행과정에서 주민 서면통보, 주민설명회, 주민공람, 시의회 의견 청취 등의 행정절차 이행이 필요한 경우에는 발주자의 지시에 따라 위의 절차를 수행하여야 한다.

3) 본 과업내용서에 명시되지 않은 사항일 경우에도 필요하다고 인정되는 사항은 감독관과 협의하여 결정하고 필요한 경우 관계기관의 충분한 협의(인·허가, 승인 또는 협의에 필요한 서류의 작성, 제출 포함)를 거쳐야 하며 기타 경미한 사항에 대하여 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.

4) 계약상대자는 본 과업 내용서와 발주청에서 제공하는 자료 등에 따라 과업을 충실히 이행하여야 한다.

5) 본 과업을 공동 수행하는 경우, 공동수행 계획서에 업무분담 및 책임분담을 명확히 구분하여 작성하고, 공동도급업체와 협조체제 유지 및 과업수행에 차질이 없도록 조치하여야 하며 주계약자가 주도적으로 업무수행 및 조정의 역할을 이행하여야 한다.

6) 과업성격상 특정분야의 전문지식과 인력이 필요한 경우에는 발주청에 보고하여 특정기관 및 업체에게 과업의 일부를 의뢰하여 시행할 수 있다.

7) 기본 및 실시설계 용역 완료 후에도 공사 시행중 발주청의 자문에 응해야 한다.

8) 계약상대자는 성과품에 포함되어 있는 추정공사비 산출시 발주자와 사전 협의하여 적정 공사비로 조정한 후 제출하여야 한다.

9) 과업내용 중 입찰참가자격의 대표사에서 수행할 수 없는 사항에 대하여는 전기, 소방, 전기통신 등의 설계 필요 시 대상사업의 자격업체에 하도급의 형식으로 용역을 수행하여 성과물을 제출하여야 하며, 이외에 과업수행을 함에 있어서 주민들의 의견수렴과정에서 과업내용이 변경되는 경우에도 해당 과업의 실시설계에 필요한 자격업체에 하도급의 형식으로 용역을 수행하여 성과물을 제출하여야 한다.

나. 과업의 수행자

1) 본 과업에 참여하는 계약상대자의 참여기술자는 과업내용서 내용에 따라 디자인, 경관, 도로, 조경, 도시계획, 건축, 도시재생 등 관련분야에 대한 학식과 경험이 풍부한 기술능력 보유자로 과업수행 팀을 구성하여야 하며, 분야별 책임기술자 이상의 기술자로 하여금 효율적인 과업이 추진될 수 있도록 하여야 한다.

2) 과업수행은 전문가(관련 분야 전문가 및 관련기술사 중 1인)를 총괄책임기술자로 하고, 과업내용서 및 발주자의 지시를 총괄책임기술자 책임 하에 성실히 수행하여야 한다.

3) 계약상대자는 발주자가 지정한 감독관의 지휘 감독을 받아 과업을 수행한다.

4) 사업책임기술자 및 분야별 참여기술자는 착수계에 제출한 기술자를 본 용역에 투입하여야 한다. 단, 퇴직․질병 등 특별한 사유가 있어 변경하고자 할 때에는 동등 기술자(자격, 경력, 학력) 이상의 자로 사전에 승인을 득하여야 하고, 과업수행 도중에 부득이 변경하여야 할 경우 또한 같다.

5) 발주청이 용역 착수계에 명시된 과업수행 인원이 부족하여 본 과업수행에 어려움이 있다고 판단하여 참여기술자 충원을 요구할 때는 계약상대자는 즉시 적정인원을 충원하여야 하며, 과업수행 중 참여기술자가 과업수행에 부적합하다고 인정될 때에는 계약상대자에게 참여기술자의 교체를 요구할 수 있으며, 계약상대자는 특별한 사유가 없는 한 즉시 교체하여야 한다.

다. 책임한계

1) 발주청의 승인을 받은 성과품이라 할지라도, 계약대상자의 잘못으로 발생한 모든 하자에 대하여 계약대상자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 계약대상자는 용역 준공 후에도 이러한 사항에 대해 발주자의 수정ㆍ보완 요구가 있을 때에는 계약대상자 부담으로 시정ㆍ조치하여야 한다.

2) 계약대상자가 발주청에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청 또는 이의제기는 서면으로 하여야만 그 효력이 발생한다.

3) 보안사항

“계약상대자”는 보안관계 법규 등에 저촉되는 일이 없도록 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 “계약상대자”가 져야한다.

4) 안전관리 : 본 과업수행에 따른 안전관리 미흡으로 발생되는 모든 민․형사상의 책임은“계약상대자”가 진다.

5) 문서의 기록비치

“계약상대자”는 이 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, “발주기관”의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 내용을 문서로 작성․비치하여야 하며, “발주기관”의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

6) 법률준수의 의무

“계약상대자”는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야한다.

2. 과업기간 변경

과업의 추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질 없이 수행하여야 하며, 다음의 경우에는 발주청의 승인을 얻어 과업기간을 변경할 수 있다.

1) 천재지변으로 과업수행에 차질이 있을 때

2) 발주청의 계획변경 등 방침에 따라 과업중단 또는 과업내용의 현저한 변경이나 증감이 있을 때

3) 당초 과업수행에서 예기치 못하였던 사항의 발생으로 변경이 불가피할 때

4) 기타 과업과 관련된 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을 때

3. 설계변경 등

가. 발주기관은 다음과 같은 경우에 설계변경을 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에 따라야 한다.

1) 발주청의 시책변동이나 기타 사정으로 과업수행의 변경이 불가피할 때

2) 당초 과업 예측 과정에서 예기치 못한 중대한 사항이 발생한 경우

3) 사업계획 변경에 따라 과업범위가 상당히 변경되는 경우

4) 기타 불가피한 상황이 발생된 경우

나. 계약상대자는 ‘가’의 세부 사유가 발생한 경우 발주기관과 협의하여 설계변경을 요구할 수 있다. 다만, 과업내용서 등의 과업면적(길이)는 개략적인 예측자료로서 용역과업 검토결과 과업내용서 상의 면적(길이)보다 사업구역 면적이 증가되는 부분을 원인으로 설계변경을 요구할 수 없다.

다. 계약상대자는 용역수행 중에 주요 과업내용에 대한 변경 없이 경미한 변경사항이 발생한 경우 타당성 여부를 면밀히 검토하고, 발주기관의 지시를 받아 우선 과업을 변경하여야 한다.

라. 주요 과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주기관에 서면 보고하여 승인을 얻은 후 변경하여야 하며, 과업내용 변경에 필요한 내역서 등 관련 자료를 발주기관에게 제출하여야 한다.

마. 용역비 산정은 추정공사비에 의하여 산출한 것이며, 본 과업 완료 후 실제 공사비에 맞추어 설계변경(감액정산) 할 수 있다.(단, 실시설계 공사비가 추정공사비 이상일 경우에는 차액분에 대한 용역비는 지급하지 아니한다.)

4. 계약의 해지

다음과 같은 사유로 과업수행이 불가하다고 판단될 경우 계약을 해지할 수 있다.

가. 계약상대자의 과업수행이 불가능하다고 판단될 경우

나. 과업내용이 목적에 부합되지 않거나 과업내용서 및 기타 지시사항을 성실히 이행하지 않을 경우

다. 과업 성과물의 수준이 현저히 미달된다고 판단되는 경우

라. 상호 간 협의에 의하여 결정한 사항 또는 기타 발주기관의 정당한 요구사항을 이행하지 않을 경우

5. 착수신고서 및 기타 제출서류

“계약상대자”는 다음 서류를 각 2부 제출하여야 한다.

가. 착수신고서

1) 사업착수 보고서

2) 참여기술자 명단 및 사업책임기술자 선임계(이력서, 자격증사본 첨부)

3) 기술용역 수행 예정공정표

나. 분야별 참여기술자 및 조직 편성표, 기술자별 작업계획서

다. 보안대책 및 보안각서

라. 기타 계약공무원이 지정한 사항

6. 과업수행계획서

가. 과업수행계획서 제출

“계약상대자”는 계약상대자는 착수계 제출 후 현장여건 등을 검토하고 15일 이내 이내에 세부과업 수행계획서를 작성 발주청에 제출하여 검토를 받아야 한다.(공동수급일 경우 공동계약상대자 상호간의 과업분할 협의서 첨부 2부를 작성, 제출하여 발주청의 승인을 받아야한다.)

1) 세부 공정계획서

2) 공정계획에 따른 세부추진계획

3) 과업의 단계별 성과품 제출계획서

4) 과업수행 조직 및 인력(장비) 투입계획서

5) 참여기술자 참여 과업내용과 참여 예상기간

6) 보안대책, 기타 과업수행을 위하여 필요한 사항 등

나. 참여기술자 서명

과업수행계획서에 참여기술자(총괄 및 분야 책임기술자) 본인의 이름을 직접 기재한 명단을 작성 제출함으로서 설계자 책임의식 고취 등 설계수준을 향상시킬 수 있도록 설계 실명제의 내실화를 기하여야 한다.

7. 과업수행 보고

가. 착수보고

1) 계약대상자는 용역착수 후 발주청이 정한 날에 착수보고회를 해야 한다.

2) 착수보고는 사업 책임기술자가 직접 보고하되 과업내용을 중심으로 세부과업수행계획을 보고하여야 한다.

3) 착수보고회시 착수보고서에는 과업수행계획, 과업 분야별 세부추진계획, 분야별 참여기술자 명단, 분야별 세부추진일정 등이 포함되어야 하며, 기타 발주자가 요청하는 내용을 포함하여야 한다.

나. 주간공정보고(필요시)

계약대상자는 과업수행기간 중 다음 사항을 포함한 주간 공정보고를 매주 월요일 서면으로 보고하여야 한다.

1) 과업추진내용 및 공정현황

2) 과업수행상 중요 문제점 및 대책

3) 다음주 과업수행계획

다. 월간공정보고

계약대상자는 과업수행기간 중 다음 사항을 포함한 주간 공정보고를 매월 5일 이내 서면으로 보고하여야 한다.

1) 과업추진내용 및 공정현황

2) 각종자료 및 도서수발현황(승인자료 포함)

3) 과업수행상 중요 문제점 및 대책

4) 참여기술자 현황

5) 다음달 과업수행계획

라. 중간보고(수시보고)

다음 각각의 경우에는 관련 자료를 제출하고 발주청에서 정한 날에 책임기술자로 하여금 보고회를 하여야 한다.

1) 주요 단계별 과업이 종료되었을 때

2) 주요계획 및 방침의 설정과 변경 시

3) 발주청이 용역수행 상 필요하거나, 자문 및 심의 개최 계획에 의한 요구 시

4) 도시재생 추진기관, 주민협의체, 의회 설명회 시

※ 중간보고 시에는 중간 보고서를 제출하여야 하며 중간보고는 과업 수행내용 전체에 대한 종합적인 보고가 되도록 한다.

마. 용역준공 전 종합보고

계약대상자는 용역준공 20일전까지 용역수행 결과를 종합하여 용역준공 전 종합보고회를 발주청이 정한 날에 해야 하며, 책임기술자가 직접 보고해야 한다.

바. 기타 회의보고 등

1) 계약상대자는 용역수행과 관련하여 발주자 등 관계기관과 협의한 사항에 대해서는 회의록 및 관련 자료를 작성 제출하여야 한다.

2) 과업진행 및 세부내용 검토 등을 위해 발주자의 요구(구두 및 서면 지시 포함)가 있을 때에는 필요한 자료제출 또는 보고를 하여야 하며, 보고시 제시되는 의견 및 도출된 문제점은 검토 보완하여 그 결과를 보고하여야 한다.

8. 관련기관 인․허가 및 협조

계약상대자는 본 과업과 관련하여 다음과 같은 관련기관의 인․허가 및 협의 주체는 발주청이 되며, 계약상대자는 설계공정 진행에 따라 인․허가 요청시기에 작성․제출하여야 하며 작성 자료에 대하여는 계약상대자가 책임을 진다

9. 용역감독 등

가. 용역감독

발주청은 과업을 수행함에 있어 수시로 계약상대자에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인ㆍ감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

1) 기술인력 동원현황

2) 용역단계별 과업추진내용 및 공정현황

3) 기타 확인에 필요한 사항

나. 용역점검

발주청은 설계품질 확인 및 원활한 용역업무 수행을 위해 계약상대자에 대한 정기 또는 수시점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 계약상대자는 용역감독자와 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

9. 주민의견 수렴 및 회의 개최

계약상대자는 다음과 같이 주민의견 수렴 및 회의를 개최하여 주민들의 의견을 직접 수렴하여야 하고, 이와 관련한 회의록 및 의견을 요약하여 제출하도록 한다.

1) 관련 이해관계자가 직접 참여하여 의사 표명을 할 수 있도록 설명회 진행

2) 과업기간 내 사업 시행 공론화 과정 시행

3) 사업 종료시까지 지역주민 회의 주관 및 활동 지원

4) 지역주민이 자발적으로 사업에 참여 유도 및 주민 의견 통합

5) 경관협정이 필요한 경우, 주민 및 상인 등 협의 이행

6) 사업구상·실행을 위한 사업설명회 및 주민공청회 등 개최

10. 재료선정

가. 우선적으로 포항 지역자재를 우선 사용토록 한다.

나. 공사에 사용하는 각종재료와 제품은 한국산업규격(K.S), 각종 표준시방서 규정에 적합한 것으로 경제성, 사용성, 내구성, 유지보수의 용이성 등을 고려하여 적정재료를 선정하여 설계에 반영하며, 이를 적용할 수 없는 재료 또는 제품에 대하여는 발주청의 승인을 받되, 설계서에 KS, 표준시방서 규정과 동등 이상의 규격을 사용하도록 공사시방서 및 설계도면에 명시하여야 한다.

다. 최종 자재의 선정은 포항시 발주청과 협의하여 결정한다.

11. 타 계약 상대자와 업무한계

본 과업을 수행함에 있어 공동계약에 의거 과업을 수행할 때는 계약자 상호간에 과업분할 협의서를 작성 수행하여야 한다.

12. 사용언어 및 문자

가. 과업 수행상 사용언어는 한글로 작성하며, 업무상 필요한 통역, 번역에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.

나. 사용단위는 “계량 및 측정에 관한 법률”에서 규정한 단위를 사용한다.

다. 사용언어의 해석에 있어 “발주청”과 “계약상대자”간에 의견을 달리하여 분쟁이 야기될 수 있으므로 이해가 상충되거나, 그 뜻이 분명치 못한 용어는 알기 쉽게 풀이하여 정의한 후 사용하여야 한다

13. 환경 친화적 설계

주변경관 파괴, 토양오염, 소음, 진동 및 분진의 발생을 최소화 할 수 있는 공법과 기술을 고려한 환경 친화적인 설계기법을 도입하여 설계에 반영하여야 한다.

14. 보안대책

1) 계약상대자는 착수계 제출과 동시에 과업수행 기간 중과 과업종료 후의 보안대책을 수립하고 대표자 및 참여기술자의 보안각서를 제출하여야 한다.

2) 계약상대자는 과업수행에 따른 보안대책을 수립하여 보안상 결격사항이 없도록 조치한다.

3) 본 과업의 보고 문건 및 메모, 지시사항 등 모든 자료(문서 및 파일, 관련내역을 포함한다), 성과품은 절대로 계약상대자가 소유하거나 임의로 복사 또는 내·외부로 유출시켜서는 아니 되며 자료의 외부 누설과 보안사항 불이행 등으로 문제가 발생될 시에는 계약상대자는 민·형사상 모든 사항에 대한 책임을 진다.

4) 계약상대자는 계약체결 후 과업수행에 필요한 제반 보안절차를 필하여 보안대책을 수립한 후 착수보고시 참여회사(대표자) 및 과업참여자(과업책임자 및 부문별 책임자)의 보안각서를 제출해야 한다.

5) 계약상대자는 본 과업의 수행중이나 과업이 완료되었다 하더라도 최종 확정 발표 전까지는 그 내용을 대외비에 준해 관리하며 이를 공개하지 않도록 한다.

6) 계약상대자는 본 과업과 관련하여 수집한 자료 및 정보를 포함한 모든 서류 및 자료를 본 과업에 관계없는 목적으로 사용할 수 없으며 발주처의 사전 승인 없이 타인이나 기관에 제공할 수 없다.

7) 각종 보고회, 보고서 등 자료는 과다 발간을 금지하고 필요이상 잔여분은 보안업무 관리지침에 따라 처리하여야 한다.

8) 과업과 관련하여 발주자가 제공하는 각종 도서는 보안규정에 따라 보안관리 책임자가 관리하여야 한다.

9) 전산작업 시 수행내용에 대하여는 관리자의 비밀번호 부여 등으로 내용 유출이 없도록 하여야 하고, 보고서 및 도면의 외부 인쇄 시는 보안관리 책임자 입회하에 실시하여 유출이 없도록 하여야 한다.

10) 계약상대자의 잘못으로 인한 보안사고 발생 시 계약상대자가 전적으로 책임을  진다.

11) 계약상대자는 과업참여 기술자의 변경 시는 보안각서와 함께 승인을 득한 후 인계인수를 철저히 하여 내용이 유출되지 않도록 하여야 한다.

12) 본 용역과업의 보고서 및 도면 인쇄와 자료의 관리는 보안업무 관리지침에 따라야 한다.

15. 기  타

본 과업내용에 명시되지 아니한 사항(관계기관 협의사항, 자문 등 이행사항, 주민요구 사항, 기타) 등에 대해서도 발주청의 지시가 있을 때는 성실히 수행하여야 한다.

Ⅳ. 세부설계 기준

1. 설계 일반 사항

가. 설계 안내 사항

1) 시공 중 설계변경 및 공사비 증액이 최소화 되도록 계획한다.

2) 실시설계 중 시설물에 대하여 필요한 경우 관련 전문가의 확인을 받은 후 설계한다.

3) 환경개선 및 조경은 자연친화적이고 밝고 깨끗한 이미지를 심어줄 수 있도 록 계획한다.

4) 모든 재료는 원칙적으로 산업표준화법에 의한 규격표시의 인증을 받은 것으로써 KS 표시품을 사용하여야 하며, KS 표시품이 없는 경우에는 관계법령에 의한 표준품 이상의 시중 최상품을 사용한다.

5) 특수한 자재를 사용하고자 하는 경우에는 그 사유와 성능, 경제성, 시공성, 사양서 및 기타 필요한 사항을 발주처에 제시한다.

6) 주민참여 및 의견수렴을 위하여 주민설명회 개최 등 필요한 절차를 이행하여야 한다.

7) 주민설명회 개최, 각종 심의 및 자문, 주민 홍보 등에 필요한 자료, 도면, 팜플렛 등을 발주자의 요구에 따라 작성·제출하여야 하며, 이에 따른 비용은 계약상대자가 부담하여야 한다.

나. 기타사항

1) 본 설계에 관한 모든 과업은 관계법령에 의한 제 규정 및 계약내용에 적합하게 수행하여야 하며, 관계법령 및 계약문서에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 발주자와 협의하여 처리해야 한다.

2) 본 설계도서의 자료일체, 저작권 및 기타 법률적인 행위의 권한 일체를 발주자의 소유로 한다.

2. 적용기준 및 시방서

가. 적용기준 및 시방서 등

1) 콘크리트 구조 기준(국토교통부)

2) 콘크리트 표준시방서(국토교통부)

3) 토목공사 일반표준시방서(국토교통부)

4) 건축공사 표준시방서(국토교통부)

5) 도로안전시설설치 및 관리지침(국토교통부)

6) 구조물 기초설계기준(국토교통부)

7) 도로포장 설계 ․ 시공지침(국토교통부)

8) 도로의 구조 ․ 시설기준에 관한 규정(국토교통부)

9) 지하매설물 안전관리 요령(국토교통부)

10) 도로조명기준 KSA3701(공업진흥청)

11) 도로설계요령〈제1권～제5권〉(한국도로공사)

12) 설계용역 과업이행요청서

13) 기타 관련 표준시방서, 지침서, 기준 등

14) 관련규정 및 시방서가 개정된 경우 용역완료 3개월 전까지 수정된 최신기준을 적용하고 특별히 규정되지 않은 사항은 “발주자”와 협의하여 적용한다.

나. 관련법령 및 기준

1) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

2) 건설기술진흥법 - 건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정

3) 엔지니어링기술진흥법 - 엔지니어링 사업대가의 기준

4) 시설물의 안전관리에 관한 특별법

5) 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 - 도시계획 시설기준에 관한규정

6) 건축법

7) 전력기술관리법

8) 시설물의 안전관리에 관한 특별법령

9) 기타 관련법규 및 기준

3. 대상지 조사 및 자료수집

가. 대상지 현황 조사

1) 계약상대자는 중앙 예술문화 창업로 조성사업을 위한 기초조사와 사전조사를 실시하여야 하며, 도시의 특성에 따라 일반현황 등의 사항을 포항시 중앙동 일원 지역의 여건에 맞도록 조사하여야 하고, 중앙동 일원지역 도시재생활성화계획에 의하여 제시된 사항을 참고하여 조사항목을 협의하여 설정하고 조사하여야 한다.

2) 중앙동 일원지역의 주민 이용현황 및 역사·문화 등 지역자산과 기존시설, 식생, 공가, 각종 지장물 등 자료를 수집·분석하여 개발 잠재력 파악

3) 현장조사를 실시하여 현지여건, 지형, 주변도로, 용지조건 등을 상세히 파악하고, 실시설계로 이어질 수 있도록 현장 측량을 통해 필요한 측량 보완(지장물 포함)

4) 본 사업과 관련된 도로, 보행로, 교통시설 등 교통 관련 현황 및 확충계획 등을 조사한다.

5) 본 과업에 편입되는 용지 및 지장물을 정확히 조사하고, 지목별, 지장물별(가옥, 수목 등)로 지번과 소유자를 확인하여야 한다.

6) 본 과업과 관련된 제반 사업계획을 조사하여 연관성 있게 상세히 검토‧반영하여야 한다.

7) 기 조사된 자료가 있으나 충분치 못한 경우에는 추가 조사범위, 조사물량 등 필요한 조사내용을 기재한다.

나. 경관 현황분석

1) 계약상대자는 발주처에서 제공하는 자료 외 경관기본설계에 필요한 자료를 수집하여 대상지 전반적으로 경관의 유형별, 권역별, 요소변 경관현황 및 문제점을 도출하고 경관구조 분석을 시행한다.

2) 경관 현황조사를 정리하여 종합분석도를 작성하여 과제 추출 및 해결방안을 모색한다.

3) 국내·외 경관 관련제도 및 우수 사례를 조사·분석하고 본 과업 수행에 있어 참고할 사항과 창의적인 방안을 도입하는데 도움이 될 만한 사항을 추출하여 미래지향적이고 지속가능한 경관을 조성하도록 본 설계에 반영하여야 한다.

4) 과업 지역의 상직적 지역이미지, 역사문화자원, 행사 등 경관자원도 포함하여 경관현황 분석을 시행한다.

5) 문헌조사와 현장조사를 병행하여, 이 지역의 긍정적, 기회적, 부정적, 제약적 자원을 분석대상에 포함하여야 한다.

다.. 국내외 사례조사

문화예술로, 가로환경개선사업, 특화거리, 테마거리 및 경관거리 조성 등 국내ㆍ외 우수사례와 실패사례를 조사

4. 기본구상

1) “Ⅱ.과업세부내용”을 기본으로 한다.

2) 보행자 편의의 도로 구조로 개선되어야 하며 사고예방 및 보행자 편의를 위한 시스템을 제시하여야 한다.

3) 상가 활성화를 위한 전략 구상, 이용자의 행태를 고려한 공간조성을 검토하여야 하며, 보행의 편익을 도모하는 가로시설을 확충에 예술테마가 있는 거리가 조성되도록 계획하여야 한다.

4) 상징적인 가로조성 계획수립 가로별 특성에 맞는 상징적인 가로조성 계획을 수립한다.

5) 중앙 예술문화창업로 조성구역에 인접하여 시행되되거나, 계획하고 있는 우리시의 사업들을 사전 검토,분석하여 연계성 있는 사업이 될 수 있도록 검토한다.

6) 주변지역과 보행자 순환체계를 형성하여야 한다.

7) 주민 참여를 적극적으로 유도하는 방안을 모색하여야 한다.

5. 기본설계

가. 일반지침

1) 조사 및 자료수집 단계에서 수행된 성과품을 검토, 분석하여 조사 ․ 계획 ․ 설계업무의 각 결과치를 실시설계에 최대한 활용하며, 만일 조정이 필요한 경우 발주기관의 승인을 받아 다시 실시하도록 한다.

2) 교통량추이 변화, 주변여건의 변화 등으로 전 단계에서 수행된 교통수요 예측의 결과치가 상이할 경우가 있으므로 교통수요에 대한 검토는 발주처와 협의하여 실시하도록 한다.

3) 계약상대자는 조사 및 자료수집 단계에서 다음사항이 여건변경이 있는지, 부적합한 사항이 있는지 조사·검토하여 설계에 반영하여야 한다.

ㅇ 각종 조건의 변경사항

ㅇ 설계시방서, 설계기준의 사항

ㅇ 관련계획의 사항

ㅇ 주민의견 청취 후 건의사항에 대한 검토

ㅇ 기타 주요한 사항

ㅇ 관련기관 협의내용 사항

4) 조사 및 자료수집을 토대로 성과품을 검토하여 다음과 같은 계획·설계 등의 타당성을 확인하여 설계에 반영하여야 한다.

ㅇ 평면 및 종단선형

ㅇ 설치구조물의 형식 및 설치방법(공법)

ㅇ 주민의견 청취 후 조치내용

ㅇ 민원유발 사항 검토

ㅇ 지장물 조사현황

ㅇ 기타 관련 사업계획 등

나. 관련계획 검토

1) 상위계획 및 관련계획 검토

ㅇ 계획구간 내 도시계획 현황, 토지이용계획 등 상위계획과 관련사업계획을 조사하고 주변여건을 충분히 조사 검토하여 일관성 있는 사업계획이 수립되도록 한다.

2) 제반 사업의 연관성

ㅇ 본 과업과 관련된 제반 사업계획을 조사하여 연계성을 검토한다.

ㅇ 다음 사항에 대하여 대상여부를 면밀히 검토하고 사업대상에 해당될 경우 관련규정에 의거 협의도서 작성

- 도시계획시설(변경) 결정 등

- 각종 심의 및 협의

- 기타 각종 영향 및 평가 대상 등

다. 기본 디자인(구상) 계획 검토 및 반영

1) 현황조사 및 여건분석, 종합분석

ㅇ 보행환경, 가로경관, 가로시설물 등 현황조사

ㅇ 여건분석 및 종합분석(지역특성 및 이미지 분석, 이동동선 및 성향분석 등)

ㅇ 디자인 개발 기본방향 제시

2) 통합디자인 컨셉 제시

ㅇ 지역특성을 고려하여 하나의 이미지로 거리 전체 통합디자인 컨셉 제시

ㅇ 개선된 거리를 대표하는 변경 전·후 모습 제시(종합조감도 제출-2개구간)

※ 여건분석 및 종합분석을 통한 전체 이미지 부여

3) 거점구역 주요부분 디자인 제시

ㅇ 지역 전체 통합디자인을 고려한 주요장소별 개선안 검토 및 제시

ㅇ 주요 장소별 개선된 변경 전·후 모습 제시

4) 주변지역 및 관련개발계획 등과 연계한 기본구상

5) 종합적 야간경관 계획 및 이미지 연출 제시

ㅇ 야간경관의 독립적이고 체계적인 디자인 검토 및 제시

ㅇ 야간경관 계획은 색상 중심이 아닌 연출방법, 연출 이미지 중심의 디자인 검토 및 제시

※ 주변 상가·인근주택 등 지역특색별 조명 디자인

6) 거리 주요부분 디자인 제시 및 스토리텔링 개발

ㅇ 가로이미지 정립 및 공간 배치계획 방향 설정, 조성계획을 수립

ㅇ 거리 전체 통합디자인을 고려한 주요 장소별 개선안 검토

ㅇ 창의성이 있고 실용적이어야 하며, 지역경제 활성화 유도 및 볼거리가 제공 될 수 있는 디자인을 제시

ㅇ 지역자원의 특색을 반영한 스토리텔링 개발 하여야 하며, 지역전문가의 자문을 반영

ㅇ 먹거리, 볼거리, 체험거리를 거리 특성에 맞춰 건물 소유자등과 협의 합 리적으로 배치

7) BI 및 브랜딩 제시(필요시)

ㅇ 중앙동 일원 지역의 역사ㆍ문화적 자원을 상징적으로 표현하고 조형물, 안내표지판 등 다양한 시설물에 도입가능 BI를 개발(심볼마크, 로고타입, 전용색상  등)

ㅇ 다양하게 적용 가능한 BI 디자인 제시

ㅇ 당해 사업으로 발생된 지적재산권(특허, 실용실안, 디자인, 상표권), 유형적발생품(디자인 최종안), 시작품 등은 모두 발주기관 소유로 함.

ㅇ 디자인개발 결과물의 구조 또는 실용적인 기능 등이 아닌 오직 디자인에 관한 지적재산권 분쟁 발생 시 그 책임은 용역수행자가 져야 함

8) 광고물 정비방안 수립(필요시)

ㅇ 구간별 정비 방안을 작성(유관부서 협의)

ㅇ 광고물 정비시 주민들이 자발적으로 참여할 수 있는 방안을 제시

ㅇ 주변광고물 디자인은 건축물의 규모, 영업장의 형태에 따라 각각의 특성을 해치지 않게 디자인하되, 전체 가로디자인과 조화로운 대표적인 디  자인으로 방안을 제시

ㅇ 창의성이 있고 실용적이어야 하며, 지역경제 활성화 유도 및 볼거리가 제공 될 수 있도록 문화시설이 확보된 공간 조성

ㅇ 간판의 경우 글씨서체, 색체, 건물파사드 부착방법 및 부착위치에 대한 기본틀(안) 마련

ㅇ 건물 및 옥외광고물의 종류별로 규격·수량·표시위치 및 방법·색체·서체·픽토그램 등에 대한 적용기준(Guide line) 제시

마. 구조물 형식ㆍ공법 결정

1) 구조물 설계

ㅇ 구조물 및 부속시설물은 주변과의 조화, 구조적 안전성, 시공성, 경제성 및 미관 등을 고려하여 형식과 연장, 공법을 비교·검토하고 향후 운영 및 유지관리에 편리한 구조형식을 제시한다.

ㅇ 주요 구조물의 공법 비교·검토는 공사 중과 운영시 주변시설물과 환경 등에 미치는 영향을 검토하여 민원을 최소화하고 환경오염이 적은 방법을 강구토록 한다.

2) 민원 최소화 공법 검토

ㅇ 본 계획으로 인한 일시적 사유지 저촉, 진출·입 장애에 따른 민원 대처방안 및 환경피해 최소방안을 검토 제시하여야 하며 지역여건, 주변개발사업, 민원발생 등으로 인한 공사 시행 시 애로사항 등을 예측 판단하고 이에 대한 해소 방안을 검토 제시한다.

바. 기  타

ㅇ 설계도서는 각종 법규, 지침, 시방서 및 설계기준 등을 적용하여 작성하되, 실시설계시 적용이 용이하도록 하여야하며, 심의를 거쳐서 확정한다.

6. 실시설계

가. 설계조건

1) 설계기준은 특별히 필요한 부분이 있는 경우 작성한다.

2) 전 단계과업에서 지반조사, 환경영향평가, 교통분석 및 대책수립 등의 자료가 있을 때는 이를 기재한다.

3) 전 단계과업에서 수행된 현장답사 및 조사내용을 기재한다.

4) 주요 구조물 및 주요 도로시설물의 위치, 형식 등을 기재한다.

5) 일반적인 설계방법, 시방서 및 지침 이외의 특정한 사항이 요구되는 경우에는 드시 발주기관이 요구하는 설계방법, 기준, 시방서 및 지침 등에 대해 기재한다.

6) 자재의 종류, 설계강도 등과 같은 특성, 공급방법 등을 기재한다.

7) 주요자재 및 재료의 기준을 기재한다.

8) 장애자를 위한 시설이 필요할 때는 이에 대한 특기사항을 기재한다.

9) 내진 및 피로설계를 적용하도록 기재한다.

나. 선형 설계(필요시)

1) 평면선형과 종단선형이 조화를 이뤄 차량 주행성 및 안정성을 확보하여야 한다.

2) 선형설계의 측점은 20m 간격으로 한다.

3) 선형 제원은 가급적 기준치 이상의 바람직한 값을 사용하여야 한다.

4) 평면선형의 곡선부는 충분한 완화구간을 설치하여야 한다.

다. 배수 설계(필요시)

1) 배수공이라 함은 계획도로의 노면배수, 지하배수, 계획도로를 횡단하는 배수관, 배수암거, 통로암거, 계획도로에 연접한 일체의 측구를 말한다.

2) 기존 자료 및 현지답사, 수리 및 수문조사 결과를 활용하여 용․배수계통 계획 및 구조물의 형식, 단면을 검토하도록 한다.

3) 수리계산시 유역면적은 축척 1/25,000～1/50,000 지형도상에서 산출하도록 하며, 자세한 검토가 요구되는 부분은 축척 1/5,000 이내의 정밀한 지형도를 사용하여야 한다.

4) 중요 배수시설물에 대한 설계빈도 및 강우강도는 설계조건에 기재하여 설계에 반영되도록 한다.

5) 계획홍수량은 “도로배수시설 설계 및 관리 지침”의 규정에 따라 산출한다.

6) 기타의 방법으로 배수 구조물설계를 반영하고자 할 때는 설계조건에 기재하도록 한다.

마. 소구조물공 설계

1) 도로의 선형, 지형조건, 구조물의 특성과 조화가 이루어져야 한다.

2) 표준설계도가 있는 구조물은 응력계산을 검토 후 사용하여야 하며, 표준설계도가 없는 구조물은 구조계산을 실시하고 일반도 및 배근도를 작성하여야 한다.

바. 포장공 설계

1) 포장설계는 토질, 기후, 골재 및 교통량 등에 관한 조사자료를 기초로 포장구조 및 포장두께를 결정한다.

2 포장구조 및 공법은 기본설계에서 제시된 사항을 적용하는 것을 원칙으로 하나 지역여건, 지형여건, 경제여건이 변화할 경우에는 변경도 가능하며, 이 경우 구체적인 검토가 필요하다.

3) 포장구조 및 단면해석에 필요한 포장특성치와 물성치는 도로포장에 적용할 포장공법으로부터 설정토록 한다.

4) 구조물과 접속부 및 신구포장 경계면에서 발생하는 단차가 포장파손의 원인이 되므로 이에 대한 대책을 수립 설계에 반영하여야 한다.

사. 부대시설 설계

1) 출입시설

ㅇ 출입시설은 진출입시 운전자에게 혼동을 일으키지 않도록 하고, 본선 접속부 및 연결로의 기하구조는 기준치 이상을 확보하여 주행차량의 안정성을 도모하여야 한다.

ㅇ 출입시설의 가․감속차로는 기준치 이상의 연장을 확보하여 안전성을 확보하고 본선 교통지체 현상을 방지하여야 한다.

ㅇ 출입시설 내에는 배수시설과 녹지조성이 되도록 설계하여야 한다.

ㅇ 출입시설 설계에 있어서 최대교통량 발생시간(Peak Time)에 혼잡이 최소화되도록 검토하여 설계하도록 한다.

ㅇ 연결도로와의 접속부 처리방법은 기본설계에서 제시된 사항을 원칙으로 하되 지자체 및 관계기관과의 협의가 필요하다.

2) 부대시설

ㅇ 휴게시설, 교차로, 주차장, 버스정류장 등의 주요 도로시설물은 도로구조가 허용하는 한 이용객의 편의가 우선되도록 설계되어야 한다.

ㅇ 주요 도로시설물의 설계시 장래 확장, 주변여건의 변화 등을 고려하여 충분한 사용기간을 갖도록 강구되어야 한다.

ㅇ 지장물 및 지하매설물의 이설이 필요할 때는 설계조건에 기재하여 설계에 반영하도록 한다.

ㅇ 교통안전시설(시선유도표지, 횡단보도육교, 방호울타리, 조명시설, 표지병, 충격흡수시설, 과속방지시설, 도로반사경 등)은 “도로안전시설 설치 및 관리기준(국토교통부)”과 “교통안전시설 실무편람(경찰청)”을 참조하여 설계한다.

ㅇ 교통관리시설(안전표지, 노면표지, 긴급연락시설, 도로정보안내표지, 교통감시시설, 교통신호기 등)은 도로교통법과 “도로의 구조․시설기준”에 관한 규정을 참조하여 설계한다.

ㅇ  도로의 표지판은 운전자의 편의 및 안전을 고려하여 검토되어야 하며, 재질은 내구성과 경제성을 비교 검토하여 선정한다.

ㅇ 방음․방진시설은 소음․진동 저감효과 등을 고려하여 종류, 재질, 크기 등을 계획하여야 한다.

ㅇ 차선 도색은 관련법에 따라 재질, 색깔, 크기, 형태 등을 계획한다.

아. 조경설계

1) 쌈지공원 및 차도, 보도는 물론 주변 지역 환경과 어울리는 종합적인 조경계획안 수립

2) 수목선정 및 식재방안은 생태적, 기능적, 미적인 측면과 식재기반, 기후, 토양조건, 공해 등을 고려

3) 식재설계는 계절감과 변화를 느낄 수 있도록 하되, 상징광장과 이미지 통합을 이룰 수 있도록 계획

4) 쌈지공원 등에서 예측되는 활동 및 행태를 고려하여 공간별 식재

5) 기능성과 함께 경제성, 심미성 있게 설계한다.

6) 과업지역 내 설치되는 시설물은 전체적으로 통일된 분위기를 연출하도록 한다.

자. 경관조명 설계

1) 발주자의 상징성에 부합되고, 주변경관과 조화를 이룰 수 있는 환경        친화적이고 입체감 있는 경관조명이 되도록 설계

2) 조경계획과 연계하여 발주자의 개성적인 분위기를 창출하고 독특한 아름다움을 연출할 수 있도록 계획

3) 각 시설물의 통일성을 유지하기 위한 공원등, 조명기구, 램프, 안정기 디자인을 설계

차. 시설물 설계

1) 시설물은 최소한으로 설치하거나 시설물의 위치 이동 또는 탈부착이 용이하도록 계획

2) 시설물을 설치할 경우 시야와 공간적인 활동에 제약이 되지 않는 범위내에서 계획하고, 또한 노약자나 장애인의 접근과 이용에 장애가 없도록 계획 (장애인 편의시설 설치 매뉴얼 참조)

3) 가로시설물은 다른 지역과는 차별화되는 디자인으로 고유성을 가져야 하며 각각의 시설들이 품격을 가질 수 있도록 통일된 디자인을 제시

4) 보행휴식시설, 조명(가로수조명, 경관조명 등), 배너폴 등의 보행자들의 편의와 경관상의 목적을 위한 시설물을 설치할 수 있으며 설계자의 의도에 따라 대상 시설물의 설계 여부를 판단하여 제시

5) 공용공간의 상징성을 표현할 수 있는 친수공간에 대한 검토 - 필요시 점적 또는 선적인 개념 도입 가능

카. 옥외 전기ㆍ통신설비 설계

1) 전기 및 통신시설은 거리의 기능을 충족할 수 있는 설비로서 다음 사항에 적합하게 시설한다.

ㅇ 건물 및 주변 조경물과 유기적으로 조화를 이루어야 한다.

ㅇ 야간 이용객의 편의를 도모하고, 우범지대화를 방지하여야 한다.

ㅇ 조명률 이용 극대화를 통한 관리·운영비를 저렴하게 유지할 수 있어야 한다.

ㅇ 전기사업법, 전기공사업법, 전기용품 안전 관리법, 건축법, 전기통신법,    소방법 등 관련 법규에 적합하게 시설한다.

타. 랜드마크 활용방안(필요시)

1) 기본원칙

ㅇ 특색 있는 공간조성을 위한 랜드마크를 통해 인지도 증진효과 방안을 제시하여야 한다.

2) 상징조형물 등 설치

ㅇ 보행의 안전성, 쾌적성이 최우선으로 고려된 디자인을 개발하여야 한다.

ㅇ 관광객 및 보행자들의 관심과 흥미를 끌 수 있는 상징물이어야 한다.

ㅇ 지역의 정체성을 기반으로 한 친환경적 디자인을 개발하여야 한다.

ㅇ 조형물과 조형물, 주변 환경, 수요자간의 관계성을 고려하여 전체적인 맥락을 고려한 디자인을 구현하여야 한다.

ㅇ 유지·관리가 용이한 디자인을 개발하여야 한다.

파. 지장물 이설 설계(필요시)

1) 지장물 이설 계획 및 이설비의 산출

ㅇ 시공 장비, 작업공간, 고압선 등 시공장비 사용에 지장을 주는 지장물을 포함하여 지장물 중 이설이 필요한 시설(전신주, 가로등, 맨홀, 상·하수도관, 가스관, 통신케이블, 고압케이블, 송유관 등)은 해당기관과 협의하여 모든 시설물(분전함, 개폐기, 관로, 케이블, 소화전 등)이 완전지중화가 되거나 인접건물내부로 이전설치 되도록 설계하여야 한다.

2) 이설공사 시기 등

ㅇ 이설 계획은 지장시설물 관리부서의 확인을 거쳐 모든 지장물은 지중으로 이설토록 설계하고 공사 착공 후 이설 시기 등을 협의하여 그 결과를 설계도서에 반영하여야 하고, 지장물 이설공사 순서를 설계에 반영하여야 하며, 이설에 필요한 기간을 공사기간에 산입하여야 한다.

하. 유지관리시설

ㅇ 사업완료 후 유지관리에 필요한 유지관리시설의 종류, 점검항목 등을 검토하여 제안한다.

Ⅴ. 성과품 작성

1. 성과품 작성

가. 일반사항

1) 성과품 작성기준

ㅇ 계약상대자는 성과품 작성 시‘건설공사의 설계도서 작성기준(국토교통부)’에 의하여 작성하여 발주기관의 검토 후 제출하여야 한다.

ㅇ 사업 분야 및 공종별로 분리하여 작성하여야 한다.

2) 성과품의 인쇄

ㅇ 모든 성과품 인쇄는 발주자와 협의 후 인쇄하여야 하며 발주자의 요구에 따라 작성 제출하여야 한다.

3) 도면상의 문자, 숫자

ㅇ 도면상의 문자는 한글 및 영어를 혼용할 수 있으나, 한글사용을 원칙으로 하고 숫자는 아라비아 숫자를 사용한다.

나. 성과품의 구성 및 내용

1) 설계보고서 작성

ㅇ 표지

ㅇ 제출문(용역수행업체의 대표이사 명의)

ㅇ 참여기술자(명단, 주민등록번호, 업무내용, 업무에 실제 참여한 기간 및 서명)

ㅇ 목차

ㅇ 위치도

ㅇ 과업의 목적

ㅇ 과업의 개요(내용), 과업수행지침

ㅇ 조사 및 분석

ㅇ 설계기준

ㅇ 관련계획 검토사항

ㅇ 기본설계 내용검토

◦ 경관디자인 등 기본구상

ㅇ 기본설계

ㅇ 실시설계내용(설계기준, 토공, 포장, 구조물, 조경, 부대시설, 기타)

ㅇ 시공 및 유지관리 시설계획(공사 공정예정표, 시공순서, 시공방법, 공사중 교통처리, 지장물이설, 유지관리시설)

ㅇ 부록(각종 조사자료, 각종 회의, 심의 및 자문회의결과 및 지적사항 조치와 설계반영내용, 주요설계도면 협의 및 지시사항, 주요자재 및 공법 선정비교, 용역일지 등 추진과정 기록화 포함)

ㅇ 기타 발주기관 요구사항

2) 구조계산서 작성

ㅇ 개 요

ㅇ 구조계획도(구조물 일반도 주요단면도)

ㅇ 설계조건(구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재 특성, 지반조건 및 물성치, 사용 PROGRAM, 설계기준 및 지침, 기타)

ㅇ 구조계산(개요, 구조해석방법 및 모델, 사용자재, 단면상수, 하중조합, 구조해석, 설계단면력, 단면응력검토, 기초허용지지력, 안정성 검토)

ㅇ 가시설(개요, 구조해석방법 및 모델, 사용자재, 단면상수, 하중조건, 설계단면력, 단면응력검토, 안정검토)

ㅇ 구조계산서 작성방법

-  입력자료의 근거, 사용공식의 출처 명시 구조계산서는 정확하고 상세하게 정리 수록하여 검토가 용이하게 작성되어야 한다. 특히 프로그램의 입 ․ 출력 자료는 모든 CASE별로 이해하기 쉽게 정리되어 구조계산서에 포함하여야 한다. 또한 입력자료의 근거를 명시하고, 사용공식의 출처를 명확히 하여야 하며, 그에 대한 출력자료가 정리되어 있어야 한다.

-  구조계산 프로그램 명시 : 각종 계산서에 사용한 전산PROGRAM명과 판번호, 발표일자 등과 이를 이용하여 설계한 사항 또는 부재 등을 정리 수록한다.

-  구조계산서의 구성 : 전산PROGRAM을 사용하여 구조해석을 수행한 경우 입 ․ 출력자료는 별책부록으로 하되, 구조계산서에는 구조해석 모델, 경계조건, 하중, 사용한 유한요소의 종류, 주요해석결과 (최대․최소 단면력, 최대변위 등)를 명시하며, 출력자료가 구조계산서의 형태 및 순서로 정리되어 인쇄된 경우에는“발주기관”과 협의 후 본 구조계산서의 해당항목에 수록한다.

-  가정값의 표기 : 구조계산서 주요 설계계수가 가정값인 경우 반드시 가정값임을 표시하여야 하며, 시공시 확인이 필요한 경우에는 관련도면 및 공사시방서에 변동사항을 명기하여야 한다.

-  단위의 사용 : 구조계산서에 사용하는 단위는 C.G.S단위를 사용하며, 특수단위가 필요한 경우에는 “발주자”와 협의하여 사용한다.

3) 설계도면

ㅇ 설계도면에 포함될 사항

-  표지, 목차

-  표준단면도(건축물, 도로, 옹벽 등), 종·평면도, 횡·단면도

-  구조물도 및 상세도

-  부대시설도 및 상세도

ㅇ 설명문의 기입 : 설계도면은 이해가 쉽도록 상세히 작성하여야 하며, 도면내용이 시공자가 이해하기 어렵거나, 해석상 혼란이 발생할 소지가 있는 부분은 설명문을 기입하여야 한다.

ㅇ 설계방법의 표시 : 실시설계의 구조물도면에는 설계방법(허용응력설계법 또는 강도설계법)에 대하여 표시하여야 한다.

ㅇ 표제란 : 도면 하단의 표제란의 형식은 발주기관과 협의하여 결정한다.

ㅇ 서명, 날인 : 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여야 한다.

ㅇ 특기사항의 반영 및 발주기관의 승인 : 설계도면에는 주석(NOTE)란을 만들어 구조물 설계방법, 재료의 종류, 강도등과 같은 주요 설계조건과 시공시 유의하여야 할 사항 등 해당도면 공사내용에 대한 특기사항을 수록하되 시공시 불가피하게 조사, 확인, 검토 등을 하여야하는 조항을 둘 경우 발주기관의 승인을 받아야 하며, 이에 대한 비용도 반드시 설계내역서에 반영하도록 하여야 한다.

ㅇ 관련도면의 표기 : 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면의 내용과 주요 관련있는 도면의 번호 도면명을 표기한다.

ㅇ 도면의 전산작성 : 설계도면 작성시 전산프로그램(CAD 등)으로 작성한다.

ㅇ 도면의 작성기준 : 설계도면은 KSA0005(제도통칙)와 KSF1001(토목제도통칙), 건축제도통칙 등 관련규정에 따라 작성한다.

4) 유지관리지침 작성

ㅇ 유지관리지침은 다음사항을 포함하여 작성한다.

-  개요 : 구조형식, 설계하중, 사용자재, 기타

-  구조계획도 : 구조물일반도, 주요단면도 등

-  구조특성 : 구조의 역학적 특성, 주요 구조부재의 특징

-  유지관리시설 : 시설 및 장비의 종류, 목적, 사용방법, 전기 및 기계장비  사양서 요약

-  보수방법 : 도장, 용접부위, 유지관리 및 교체에 대한 사항 등

-  유지관리 장비, 안전 점검 시 점검 항목 및 점검 방법, 기타 유지관리에  필요한 사항

5) 공사시방서 작성

ㅇ 공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로, 해당 표준시방서 및 전문시방서 등을 근간으로 설계자의 의도가 정확히 반영될 수 있도록 한다.

ㅇ 공사시방서는 공사에 사용되는 각 공종별 시공방법, 자재에 대한 시방을 상세하게 수록하고 ‘공사시방서 작성요령(국토교통부)’의 공종분류체계에 맞추어 알기 쉽게 작성한다.

ㅇ 시방내용이 표준시방서에 저촉되거나, 공사시방서 내용 상호간에 중복되지 않도록 작성하여야 한다.

ㅇ 특별히 포함되어야 할 사항

-  자재, 장비사용에 관한 사항 또는 과업에 따른 설계자의 공사지침, 방법  등에 대한 규정 등으로 용역과업 수행 시 규정되어야 할 사항

-  공사에 사용될 자재의 성능, 규격 및 시험 등 자재에 관한 사항과 시공  방법, 허용오차 등 시공에 관한 사항, 공사 전반에 관한 주의사항과 절   차 등 기술적인 사항

6) 설계예산서 작성

ㅇ 예산서의 구성 : 설계예산서는 설계설명서, 설계내역서, 일위대가, 수량 및 단가산출서로 구별하여 작성한다.

ㅇ 설계예산서 : 설계예산서는 총공사비와 공사개요를 기재한다.

ㅇ 총괄내역서 : 총괄내역서에는 제경비의 산출근거가 포함되어야 한다.

ㅇ 노임의 기준 : 노임기준은 납품전 공사노임단가(당해년도 최근 대한건설협회 발표)를 기준으로 한다.

ㅇ 품  셈 : 품셈은 당해연도‘건설공사 표준품셈’에 준한다.

ㅇ 유류가 : 유류가는 산업자원부 고시가격 등으로“발주기관”과 협의하여야 한다.

ㅇ 재료비 : 재료비는‘정부구매물자 가격정보’를 포함하여 3개 이상의 물가정보지를 조사하여 산출한다.

ㅇ 중기손료 : 당해 연도 초 외환은행 전신환 매도율을 기준으로 함을 원칙으로 한다.

ㅇ 견 적 서 : 공사비 산출을 위한 견적서는 3개 업체 이상의 것을 기준으로 하되, 부득이한 경우에는 “발주기관”과 협의하여 1개 또는 2개 업체의 견적서를 기준으로 할 수 있다. 단, 견적가가 사회통념과 상당한 차이가 있다고 판단될 때는 시장조사 등을 실시하여 설계하여야 한다.

ㅇ 원가계산 : 원가계산은 회계예규‘원가계산에 의한 예정가격 작성 준칙’에 의거 작성한다.

ㅇ 설계내역서의 수록사항

-  설계서의 표지

-  설계설명서(공사목적, 개요, 위치, 기간, 규모, 물량, 관급자재 등)

-  공사예정공정표

-  설계내역총괄(설계예산, 도급공사, 원가계산서, 총괄내역, 공종별 내역서,  일위대가 등)

-  설계내역서(도급비, 관급비, 이전비, 기타)

-  일위대가표(단가산출근거, 중기사용료, 단가조서, 견적서, 운반거리, 조견표 등)

ㅇ 수량산출서의 작성 : 수량산출서는 별책으로 작성한다.

-  각 공종별로 수량을 산출집계 하여야 한다.

-  각 공종별 단위수량은 표준품셈 적용기준에 의하여 산출하여야 한다.

-  각 품목별 단가는 품명 규격을 표시하고 적용근거를 명시하여야 한다.

7) 설계내역서 작성

ㅇ 행정안전부예규에 의거 원가계산에 의한 예정가격 작성 시 주요기준을 참고로 작성한다.

-  측량용역대가의 기준(국토교통부 고시)

-  건축사용역의 범위와 대가기준(국토교통부 공고)

-  소프트웨어사업대가의 기준(고시)

-  건설업 산업안전보건관리비계상 및 사용기준(고시)

-  공사원가계산 제비율 적용기준(조달청)

-  정부구매물자 가격정보(조달청)

-  지정폐기물 공공처리시설 반입 수수료(고시)

-  시중노임단가 기준

· 공사부분노임단가 기준(대한건설협회)

· 제조부분노임단가 기준(중소기업협동조합중앙회)

ㅇ 설계내역서는「원가계산 및 예정가격 작성요령」을 참고하여 작성한다.

8) 용지도·지장물 조서 및 인·허가 서류(필요시)

ㅇ 용지도 및 용지조서 작성

-  용지도 : 용지도는 작성자가 확인 날인하여야 하며, 용지도상에는 도로   부지 경계선 및 중심선을 표시하고 행정구역, 지번, 지적, 축척 등을 기입   하고 주요건물(가옥, 전주, 지하매설물 등)을 표시하여야 한다.

-  용지조서 : 용지조서에는 지번, 지적, 지목, 소유자의 주소, 성명이 표시  되어야 하고, 지적에는 당초지적과 계획도로로 분할될 지적을 구분하여  작성하여야 한다.

-  특기사항

· 소유권 이외의 권리(저당권, 지상권, 지역권 등)가 설정되어 있거나 예고등기, 가등기 등이 설정되어 있는 경우에는 그 내용을 기입하고 공유물일 때에는 공유지분을 기입한다.

· 지적도상의 토지 중 등기가 되어 있지 않거나 토지대장에도 미등록된 토지는 소유자란에 별도 기재하여야 한다.

-  발주기관에 제출 : 용지조서 작성에 사용한 토지대장, 건축물관리대장, 지  적도, 등기부등본은 성과품 납품 시 함께 제출하여야 한다.

ㅇ 보상대상 및 지장물 조서 작성

-  조사대상 : 과업 구역 내 보상대상 및 지장물은 종류별로 상세하게 조   사하여 기입하여야 한다.

-  대상의 범위 : 보상대상 및 지장물은 발주기관과 협의하여 그 범위 등   을 조사하여야 한다.

-  지장수목 : 과업시행으로 인하여 훼손되는 지장수목의 현황을 조사하여  기재하여야 한다.

ㅇ 도시계획사업 실시계획인가 서류작성

-  계약상대자는 발주기관의 요구에 따라 도시계획사업 실시계획인가 서류를 작성 제출하여야 한다.

9) 기 타

ㅇ 수량산출서 작성시 자재할증, 손율 등은 건설공사품셈에 준한다.

ㅇ 도면의 크기는 KSF5201의 A0~A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.

ㅇ 모든 보고서, 계산서, 시방서, 지침 등은 A4크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 도면, 집계표 등을 위해 A3크기의 용지를 사용할 수 있다.

ㅇ 관련시방서, 지침에 규정된 사항 또는 주요자재(강판, 강관, 철근 등) 허용오차의 변경이 필요할 때는 발주기관과 협의하여 변경근거 및 변경사항을 기술심의(자문회의) 자료에 명시하여 검토 받아야 한다.

ㅇ 현장설명회 자료작성 : 공사발주시 사용할 현장 설명용 자료는 다음 내용을 포함하여 작성 제출한다.

-  설계목적 및 배경    -  설계도서 내용

-  특수공법 적용 및 내용    -  관련기관 협의내용 및 인허가 관련사항

-  기타공사와 관련된 유의사항

ㅇ 공사발주 시 평가지침이 필요한 것으로 판단되면 별도 평가지침을 작성토록 명시한다.

2. 성과품 납품

계약상대자는 과업완료 전이라도 발주에 필요한 관계도서에 대한 납품요구가 있을 때에는 우선 납품하여야 한다.

가. 성과품의 종류와 납품부수

* 기본 및 실시설계 중간보고 및 최종 성과품

납 품 목 록	수 량	비 고
1. 중간보고서(기본설계보고서)(A4)	10부	사업분야별
2. 최종(종합)보고서(A4)	10부	“
3. 최종(종합) 보고서((A4) - 요약본	10부	“
4. 실시설계도서 - 설계설명서, 시방서(일반, 특기, 자재), 설계예산서, 수량, 일위대가, 단가산출서(A4) - 설계도면(A3)	5부	설계도면 (A3 접철 2부)
5. 조감도	2매	사업구간별 조감도 발주기관 협의
6. 인허가 및 부서(기관) 협의도서	지정매수
7. 각종보고서, 도면, 조사분석 자료 등이 수록된 성과품 USB	2SET	용역 수행 과정에서 만들어진 각종 원자료(psd, ai, shp, xls)도 포함.
8. 기타(심의, 자문, 협의 및 인허가 서류)	필요부수
9. 기타 감독원이 요구하는 서류 일체 1식.

※ 각 분야별로 납품하고, 과업의 특성 및 발주자의 요구에 따라 관계서류의 규격 및 소요부수는 변경 가능

나. 성과품의 소유

1) 본 과업수행으로 생산된 각종 보고서와 도면(리플렛), USB 등의 성과품은 발주자의 소유로 하고, 발주자의 승인 없이 제3자에게 제공하거나 본 과업목적 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 과업 완료시 발주자에게 모두 제출하여야 한다.

2) 본 용역 과업 결과로 생산된 성과품은 발주자가 사용하며, 용역수행자는 본 용역과 저작권법에 의한 복제권과 2차적 저작물 등의 작성권을 행사할 수 없다.

3) 본 과업과 관련된 저작권은 본 과업이 완료된 날로부터 발주자에게 귀속된다.

4) 본 용역 수행에 있어 제3자의 권리의 대상으로 되어 있는 특허권 등을 사용할 때에는 계약상대자가 사용에 관한 일체의 책임을 진다.  끝.