육거리 스마트 보행환경 조성 기본 및 실시설계

과 업 지 시 서

2020. 9 .

도시재생과

			목 차

Ⅰ. 과 업 개 요	………………………	3
Ⅱ. 과업 세부내용	………………………	5
Ⅲ. 과업 수행지침	………………………	8
Ⅳ. 성과품 작성	………………………	14

Ⅰ. 과업개요

1. 과업명

ㅇ 육거리 스마트 보행환경 조성 기본 및 실시설계 용역

2. 과업의 배경 및 목적

ㅇ 2017년 국토교통부 도시재생 뉴딜사업 공모 선정 사업(2018.8월 확정)

- 육거리 스마트 보행환경 조성(단위과제)

ㅇ 사업대상지 일원 문화예술을 활용한 청년인구 유입으로 지역 활력 창출

ㅇ 쾌적한 보행환경 조성 및 창업 창작거리 조성을 통한 유동인구 증가 및 일자리 창출

3. 과업의 개요

ㅇ 용역비 : 55,000,000원

ㅇ 공간적 범위 : 중앙동 중심시가지형 도시재생지 일원

ㅇ 내용적 범위

1. 관련계획 자료조사 및 수집, 선행 및 연계사업에 대한 조사·분석

2. 대상지 여건 평가

3. 국내·외 유사 우수사례 조사 및 분석

4. 스마트 기술을 도입한 기본 및 실시설계(H/W 60%, S/W 40%)

- 도출된 「중앙동 일원 중심시가지 도시재생활성화계획」 및 「중앙동 도시재생뉴딜사업 스마트시티 기본구상」을 바탕으로 보행환경 조성의 대상구역 선정 및 비전ㆍ목표 정립 등 기본 및 실시설계

5. 주민의견 수렴 및 전문가 자문

6. 기타 본 건의 과업목적 달성을 위해 “발주기관”이 요구하는 사항

ㅇ 총사업비 : 금778,000,000원 (부가세 포함)

※ 연계사업 분석 및 대상지 여건 평가,‘주민의견 수렴 및 전문가 자문’, 활성화계획 및 기본구상 등의 타당성 검토 후 보행환경 조성 대상지를 선정하고 비전과 목표를 제시하여 예산의 범위 안에서 아래의 스마트서비스를 포함하는 기본 및 실시설계 수행

1. 하드웨어 465,000,000원

예) 신호체계 개선, 스마트 횡단보도·이정표·가로등·밴치ㆍ방역,

도시데이터 수집센서 등

2. 소프트웨어 313,000,000원

예) -안심귀가 서비스, 스마트 Way-Finding(AR/VR을 이용한 종합정보안내체계)

-문화·예술·레저·여가 등 다양한 도시문화활동 관련 콘텐츠/프로그램

-중심시가지 종합정보 안내시스템(키오스크 설치, DB수집, 상가ㆍ편의시설ㆍ화장실ㆍ주차장ㆍ대중교통ㆍ행사 등)

-상가홍보 지원체계(상인회가 주도적으로 블로그, SNS 등에 홍보할 수 있도록 지원하는 체계 정립)

-스마트 일자리 정보(청년 취업 및 창업 정보 제공)

ㅇ 과업기간 : 착수일로부터 100일

구 분	추진일정(일)
	10		20		30		40		50		60		70		80		90		100
1. 관련계획 자료조사·수집 선행사업 및 연계사업 분석
2. 현지조사 등
3. 스마트 기술을 도입한 기본구상 및 실시설계
4. 주민의견 수렴 및 전문가 자문
5. 착수, 중간, 완료보고

ㅇ 발주기관 및 연락처 : 포항시 도시재생과(054-270-3713)

Ⅱ. 과업 세부내용

1. 일반원칙

ㅇ 기본 및 실시설계 용역 성과품은 공사수행에 필요한 전반적인 사항을 명확히 작성하여 본 사업이 차질 없게 추진되도록 하여야 한다.

ㅇ 과업의 수행은 관련법령, 조례, 지침 등에 적합하여야 하며, 기타 법령과 기준의 범위를 벗어나는 사항에 대하여는 사전에 발주자와 협의하여 결정한다.

ㅇ 최신의 전문기술 및 지식을 활용하여 충실히 수행하여야 하며, 과학적이고 능률적인 결과 도출을 위해 데이터에 기반한 전산처리에 의해 결과를 도출해야 한다.

ㅇ 과업의 주요내용은 본 과업을 진행하는 과정에서 지역주민·상인, 유관기관 및 단체와 협의 중 조정될 수 있으며, 과업의 추진은 중앙동 도시재생현장지원센터·포항문화재단, 주민협의체 등과 긴밀한 협조를 통해 진행한다.

ㅇ 본 과업내용에서 제시하지 않은 사항일지라도 과업내용의 추가가 필요한 경우에는 발주자의 추가 요청에 따라 특별한 사유가 없는 경우, 수행하여야 한다.

2. 과업수행 세부내용

가. 과업의 기본방향

포항시에서 제공하는 「중앙동 일원 중심시가지 도시재생활성화계획」 및 「중앙동     도시재생 뉴딜사업 스마트시티 기본구상」을 바탕으로 보행환경 조성의 대상구역을     선정하고,‘스마트도시기반시설’구축과 스마트 보행안내 등 스마트서비스 개발,     AR/VR를 포함하는 콘텐츠 제작·개발을 통하여 육거리 일원의 보행환경을      스마트화하기 위한 기본 및 실시설계를 추진한다.

나. 과업의 주요내용

1) 관련계획 자료조사 및 수집(선행 및 연계사업에 대한 조사·분석)

ㅇ 사업대상지 및 주변지역 현황 조사 및 분석

ㅇ 대상지 일대 선행사업 및 연계사업에 대한 조사 및 분석

- 원도심 가로경관 개선사업, 중앙 예술문화 창업로 조성, 중심시가지형 스마트서비스 시범사업, 송도 및 신흥동 도시재생 사업 등

ㅇ 지역특성 파악 및 스토리텔링 발굴

2) 대상지 여건 평가

ㅇ 관련 법규 및 관련 계획 검토

ㅇ 교통특성 : 방향별, 차종별(대형차 혼입율 등), 평균속도, 주차, 교통규제상황 등

ㅇ 유동인구 분석 : (거주지, 연령, 방문빈도, 목적, 재방문율 등)

ㅇ 보행상황 : 상가 및 광고물, 장애물, 보도유무 등

ㅇ 기존 스마트서비스 : 스마트장비, 스마트서비스, 홈페이지 등

ㅇ 경관분석(주·야간), 공간특성(구조), 가로현황(구조, 시설물, 가로등 등)

ㅇ 범죄·재난현황·인구활동 형태 등 물리적, 인문학적 환경 조사

3) 국내·외 유사 우수사례 조사 및 분석

ㅇ 가로공간을 대상으로 스마트 기술 적용을 통한 지역발전 기여 사례

ㅇ 가로환경개선을 통해 지속가능한 지역발전 동기를 부여한 사례

ㅇ 최신 스마트시티 트랜드, 특화거리, 테마 및 경관거리 조성 등 국내ㆍ외 우수사례와 실패사례를 조사

4) 스마트서비스 구현방안 설계

ㅇ 활성화계획 및 기본구상을 구체화하여 스마트시티 비전 및 목표 설정

ㅇ 보행환경 개선(하드웨어 공사비 465백만원)

- 활성화계획 및 기본구상을 토대로 스마트 서비스의 비전과 목표를 도출하고, 주민협의체 등 거주자 및 방문객의 만족도가 높은 스마트 서비스를 제시한다.

- 보행자 편의의 도로 구조로 개선할 콘셉트, 비전 및 구역을 확정한 후 신호체계 개선, 스마트 횡단보도·이정표·가로등·밴치·방역, 도시데이터 수집센서 등의 스마트서비스를 설치하여 보행자의 편의증진과 사고예방을 위한 시스템을 제시하여야 한다.(필요시 경관 디자인 추가)

- 상가 활성화를 위한 전략 구상, 이용자의 행태를 고려한 공간조성을 검토하여야 하며, 보행의 편익을 도모하며 주차문제 해결 및 긴급통행로 확보하여 안전한 거리가 조성되도록 계획하여야 한다.

- 육거리 일원 신호체계를 조사하여 보행자 위주 신호체계의 도입 가능여부를 검토하고, 무신호 횡단보도에 대한 스마트횡단보도 설치 방안을 제시한다.

ㅇ 스마트 종합정보시스템·AR/VR콘텐츠 제작 등(소프트웨어 개발비 313백만원)

※ 아래의 서비스를 포함하는 종합정보시스템 구축 및 AR/VR 콘텐츠 제작을    목표로 하되, 발주처와 협의를 통해 변경할 수 있다.

- AR/VR을 이용한 도시공간 종합정보안내체계 및 Smart Way_Finding 설계

- 꿈틀로, 실개천 거리, 주차장 등 대상지내 특색 있는 정보를 실시간으로 제공

- 문화, 예술, 레저, 행사, 상가, 여행 등 다양한 도시활동 정보안내 서비스 제시

ㅇ 주민협의체(꿈틀로 및 중앙동 상인회 등) 회의 및 방문객 설문을 통해 서비스를 도출하고 타당성분석, 정보구조정의, 시스템구축 전략에 대해 기술

ㅇ 도출된 스마트서비스의 개발 목적과 비전을 제시하고 도입 후의 미래상을 제시

ㅇ 서비스별 목표고객, 제공가치, 서비스모델, 기대효과 제시

ㅇ 서비스별 적용기술 및 운영, 활용 및 홍보방안 수립

ㅇ 서비스별 상세 구현 시나리오 작성, 환경, 기능 설계

ㅇ 서비스별 구성도

- 서비스별 시스템 구현 기술 조사 및 분석

- 서비스별 정보시스템 요구사항 분석

- 정보시스템 구성 실시설계

ㅇ 논리적 및 물리적 구성

- 도면, 내역서, 시방서 작성

- 하드웨어 및 소프트웨어 내역 산정 등

ㅇ SW 기본설계

- 기본설계 → 시스템화 업무 프로세스 정의 → 논리 데이터 모델 정의 → 화면    정의 → 기본설계 계량화 → 규모(FP) 산정 → 비용산정의 단계를 제시

- 데이터 집합(entity)을 도출하고, 데이터의 관계도(entity relationship diagram)를 작성

- AR/VR 콘텐츠 제작비용 산출

5) 주민의견 수렴 및 전문가 자문

ㅇ 과업기간 내 사업시행 홍보와 설문조사 및 주민설명회 등 공론과정 시행

ㅇ 주민 동의서 징구(필요시) 및 관계기관 협의

ㅇ 사업 종료 시 까지 지역주민 회의 주관 및 활동 지원

ㅇ 지역주민의 자발적 참여 유도 및 주민 의견 통합

ㅇ 경관협정이 필요한 경우, 주민 및 상인 등 협의 이행

ㅇ 사업구상·실행을 위한 사업설명회 및 주민공청회 등 개최

Ⅲ. 과업수행 지침

1. 과업수행 및 책임한계

가. 과업내용서의 준수

1) 본 과업내용에서는『육거리 스마트 보행환경 조성』에 대한 과업을 원활히 수행하기 위한 필요 사항을 정하며, 과업은 과업지시서에 의하여 수행하고 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령 및 포항시청의 방침, 정부제정 표준시방서(토목, 전기, 통신, 전산 등)에 의거 수행하여야 하며, 발주청과 협의하여 수행하여야 한다.

2) 본 과업을 충실히 수행하기 위하여 기본설계기간 중 분야별 전문가의 자문 및 주민의견을 충분히 수렴하여 진행하며, 과업 수행과정에서 주민 서면통보, 주민설명회, 주민공람, 시의회 의견 청취 등의 행정절차 이행이 필요한 경우에는 발주자의 지시에 따라 위의 절차를 수행하여야 한다.

3) 본 과업내용서에 명시되지 않은 사항일 경우에도 필요하다고 인정되는 사항은 감독관과 협의하여 결정하고 필요한 경우 관계기관의 충분한 협의(인·허가, 승인 또는 협의에 필요한 서류의 작성, 제출 포함)를 거쳐야 하며 기타 경미한 사항에 대하여 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.

4) 본 과업을 공동 수행하는 경우, 공동수행 계획서에 업무분담 및 책임분담을 명확히 구분하여 작성하고, 공동도급업체와 협조체제 유지 및 과업수행에 차질이 없도록 조치하여야 하며 주계약자가 주도적으로 업무수행 및 조정의 역할을 이행하여야 한다.

5) 과업내용 중 입찰참가자격의 대표사에서 수행할 수 없는 사항에 대하여는 필요 시 대상사업의 자격업체에 하도급의 형식으로 용역을 수행하여 성과물을 제출하여야 하며, 이외에 과업수행을 함에 있어서 주민들의 의견수렴과정에서 과업내용이 변경되는 경우에도 해당 과업의 실시설계에 필요한 자격업체에 하도급의 형식으로 용역을 수행하여 성과물을 제출하여야 한다.

나. 과업의 수행자

1) 본 과업에 참여하는 계약상대자의 참여기술자는 과업내용서 내용에 따라 디자인, 경관, 교통, 도시재생, 정보통신, 스마트시티, 소프트웨어 개발 등 관련분야에 대한 학식과 경험이 풍부한 기술능력 보유자로 과업수행 팀을 구성하여야 하며, 분야별 책임기술자 이상의 기술자로 하여금 효율적인 과업이 추진될 수 있도록 하여야 한다.

2) 사업책임기술자 및 분야별 참여기술자는 착수계에 제출한 기술자를 본 용역에 투입하여야 한다. 단, 퇴직․질병 등 특별한 사유가 있어 변경하고자 할 때에는 동등 기술자(자격, 경력, 학력) 이상의 자로 사전에 승인을 득하여야 하고, 과업수행 도중에 부득이 변경하여야 할 경우 또한 같다.

3) 발주청이 용역 착수계에 명시된 과업수행 인원이 부족하여 본 과업수행에 어려움이 있다고 판단하여 참여기술자 충원을 요구할 때는 계약상대자는 즉시 적정인원을 충원하여야 하며, 과업수행 중 참여기술자가 과업수행에 부적합하다고 인정될 때에는 계약상대자에게 참여기술자의 교체를 요구할 수 있으며, 계약상대자는 특별한 사유가 없는 한 즉시 교체하여야 한다.

다. 책임한계

1) 발주청의 승인을 받은 성과품이라 할지라도, 계약대상자의 잘못으로 발생한 모든 하자에 대하여 계약대상자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 계약대상자는 용역 준공 후에도 이러한 사항에 대해 발주자의 수정ㆍ보완 요구가 있을 때에는 계약대상자 부담으로 시정ㆍ조치하여야 한다.

2) 보안사항

“계약상대자”는 보안관계 법규 등에 저촉되는 일이 없도록 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 “계약상대자”가 져야한다.

3) 안전관리 : 본 과업수행에 따른 안전관리 미흡으로 발생되는 모든 민․형사상의 책임은“계약상대자”가 진다.

4) 문서의 기록비치

“계약상대자”는 이 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, “발주기관”의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 내용을 문서로 작성․비치하여야 하며, “발주기관”의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

2. 과업기간 변경

과업의 추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질 없이 수행하여야 하며, 다음의 경우에는 발주청의 승인을 얻어 과업기간을 변경할 수 있다.

1) 천재지변으로 과업수행에 차질이 있을 때

2) 발주청의 계획변경 등 방침에 따라 과업중단 또는 과업내용의 현저한 변경이나 증감이 있을 때

3) 당초 과업수행에서 예기치 못하였던 사항의 발생으로 변경이 불가피할 때

4) 기타 과업과 관련된 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을 때

3. 설계변경 등

가. 발주기관은 다음과 같은 경우에 설계변경을 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에   따라야 한다.

1) 발주청의 시책변동이나 기타 사정으로 과업수행의 변경이 불가피할 때

2) 당초 과업 예측 과정에서 예기치 못한 중대한 사항이 발생한 경우

3) 사업계획 변경에 따라 과업범위가 상당히 변경되는 경우

4) 관계법령이 정하는 설계변경 사유에 해당될 때

5) 기타 불가피한 상황이 발생된 경우

나. 주요 과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주기관에 서면 보고하여 승인을 얻은 후 변경하여야 하며, 과업내용 변경에 필요한 내역서 등 관련 자료를 발주기관에게 제출하여야 한다.

다. 용역비 산정은 추정공사비에 의하여 산출한 것이며, 본 과업 완료 후 실제 공사비에 맞추어 설계변경(감액정산) 할 수 있다.(단, 실시설계 공사비가 추정공사비 이상일 경우에는 차액분에 대한 용역비는 지급하지 아니한다.)

4. 계약의 해지

가. 계약상대자의 과업수행이 불가능하다고 판단될 경우

나. 과업내용이 목적에 부합되지 않거나 과업내용서 및 기타 지시사항을 성실히 이행하지 않을 경우

다. 과업 성과물의 수준이 현저히 미달된다고 판단되는 경우

라. 상호 간 협의에 의하여 결정한 사항 또는 기타 발주기관의 정당한 요구사항을 이행하지 않을 경우

5. 착수신고서 및 기타 제출서류

“계약상대자”는 다음 서류를 각 2부 제출하여야 한다.

가. 착수신고서

1) 사업착수 보고서

2) 참여기술자 명단 및 사업책임기술자 선임계(이력서, 자격증사본 첨부)

3) 기술용역 수행 예정공정표

나. 분야별 참여기술자 및 조직 편성표, 기술자별 작업계획서

다. 보안대책 및 보안각서

6. 과업수행계획서

가. 과업수행계획서 제출

“계약상대자”는 계약상대자는 착수계 제출 후 현장여건 등을 검토하고 15일 이내에 세부과업 수행계획서를 작성 발주청에 제출하여 검토를 받아야 한다.(공동수급일 경우 공동계약상대자 상호간의 과업분할 협의서 첨부 2부를 작성, 제출하여 발주청의 승인을 받아야한다.)

1) 세부 공정계획서

2) 공정계획에 따른 세부추진계획

3) 과업의 단계별 성과품 제출계획서

4) 과업수행 조직 및 인력(장비) 투입계획서

5) 참여기술자 참여 과업내용과 참여 예상기간

6) 보안대책, 기타 과업수행을 위하여 필요한 사항 등

나. 참여기술자 서명

과업수행계획서에 참여기술자(총괄 및 분야 책임기술자) 본인의 이름을 직접 기재한 명단을 작성 제출함으로서 설계자 책임의식 고취 등 설계수준을 향상시킬 수 있도록 설계 실명제의 내실화를 기하여야 한다.

7. 과업수행 보고

가. 착수보고

1) 계약대상자는 용역착수 후 발주청이 정한 날에 착수보고회를 해야 한다.

2) 착수보고는 사업 책임기술자가 직접 보고하되 과업내용을 중심으로 세부과업 수행계획을 보고하고, 관련계획, 선행사업, 현지조사로부터 도출된 용역의 추진방향에 대하여 보고하여야 한다.

3) 착수보고회 시 착수보고서에는 과업수행계획, 과업 분야별 세부추진계획, 분야별 참여기술자 명단, 분야별 세부추진일정 등이 포함되어야 하며, 기타 발주자가 요청하는 내용을 포함하여야 한다.

나. 주간공정보고

계약대상자는 과업수행기간 중 다음 사항을 포함한 주간 공정보고를 매주 월요일 서면으로 보고하여야 한다.

1) 과업추진내용 및 공정현황

2) 과업수행상 중요 문제점 및 대책

3) 다음주 과업수행계획

다. 중간보고(수시보고)

다음 각각의 경우에는 관련 자료를 제출하고 발주청에서 정한 날에 책임기술자로 하여금 보고회를 하여야 한다.

1) 주요 단계별 과업이 종료되었을 때

2) 주요계획 및 방침의 설정과 변경 시

3) 발주청이 용역수행 상 필요하거나, 자문 및 심의 개최 계획에 의한 요구 시

4) 도시재생 추진기관, 주민협의체, 의회 설명회 시

※ 중간보고 시에는 중간 보고서를 제출하여야 하며 중간보고는 과업 수행내용 전체에 대한 종합적인 보고가 되도록 한다.

라. 용역준공 전 종합보고

계약대상자는 용역준공 20일전까지 용역수행 결과를 종합하여 용역준공 전 종합보고회를 발주청이 정한 날에 해야 하며, 책임기술자가 직접 보고해야 한다.

마. 기타 회의보고 등

1) 계약상대자는 용역수행과 관련하여 발주자 등 관계기관과 협의한 사항에 대해서는 회의록 및 관련 자료를 작성 제출하여야 한다.

2) 과업진행 및 세부내용 검토 등을 위해 발주자의 요구(구두 및 서면 지시 포함)가 있을 때에는 필요한 자료제출 또는 보고를 하여야 하며, 보고 시 제시되는 의견 및 도출된 문제점은 검토 보완하여 그 결과를 보고하여야 한다.

8. 관련기관 인․허가 및 협조

계약상대자는 본 과업과 관련하여 다음과 같은 관련기관의 인․허가 및 협의 주체는 발주청이 되며, 계약상대자는 설계공정 진행에 따라 인․허가 요청시기에 작성․제출하여야 하며 작성 자료에 대하여는 계약상대자가 책임을 진다

9. 주민의견 수렴 및 회의 개최

계약상대자는 다음과 같이 주민의견 수렴 및 회의를 개최하여 주민들의 의견을 직접 수렴하여야 하고, 이와 관련한 회의록 및 의견을 요약하여 제출하도록 한다.

1) 관련 이해관계자가 직접 참여하여 의사 표명을 할 수 있도록 설명회 진행

2) 과업기간 내 사업 공론화 과정 시행

3) 사업 종료시까지 지역주민 회의 주관 및 활동 지원

4) 지역주민이 자발적으로 사업에 참여 유도 및 주민 의견 통합

5) 경관협정이 필요한 경우, 주민 및 상인 등 협의 이행

6) 사업구상·실행을 위한 사업설명회 및 주민공청회 등 개최

10. 보안대책

1) 계약상대자는 착수계 제출과 동시에 과업수행 기간 중과 과업종료 후의 보안대책을 수립하고 대표자 및 참여기술자의 보안각서를 제출하여야 한다.

2) 계약상대자는 과업수행에 따른 보안대책을 수립하여 보안상 결격사항이 없도록 조치한다.

3) 본 과업의 보고 문건 및 메모, 지시사항 등 모든 자료(문서 및 파일, 관련내역을 포함한다), 성과품은 절대로 계약상대자가 소유하거나 임의로 복사 또는 내·외부로 유출시켜서는 아니 되며 자료의 외부 누설과 보안사항 불이행 등으로 문제가 발생될 시에는 계약상대자는 민·형사상 모든 사항에 대한 책임을 진다.

4) 계약상대자는 본 과업과 관련하여 수집한 자료 및 정보를 포함한 모든 서류 및 자료를 본 과업에 관계없는 목적으로 사용할 수 없으며 발주처의 사전 승인 없이 타인이나 기관에 제공할 수 없다.

5) 과업과 관련하여 발주자가 제공하는 각종 도서는 보안규정에 따라 보안관리 책임자가 관리하여야 한다.

6) 전산작업 시 수행내용에 대하여는 관리자의 비밀번호 부여 등으로 내용 유출이 없도록 하여야 하고, 보고서 및 도면의 외부 인쇄 시는 보안관리 책임자 입회하에 실시하여 유출이 없도록 하여야 한다.

7) 계약상대자의 잘못으로 인한 보안사고 발생 시 계약상대자가 전적으로 책임을 진다.

8) 본 용역과업의 보고서 및 도면 인쇄와 자료의 관리는 보안업무 관리지침에 따라야 한다.

Ⅳ. 성과품 작성

1. 성과품 작성

가. 일반사항

1) 제반 산출근거를 명확히 하고 근거를 반드시 기록한다.

2) 일련번호로 페이지를 기록한다.

3) 단위 공종별, 아이템(ITEM)별 색지로 간지를 넣어 편철한다.

나. 성과품의 구성 및 내용

1) 보고서는 설계전반에 대한 업무수행결과를 기초로 기본 및 실시설계서를 작성한다.

2) 자문결과, 각종 조사자료 및 관계기관 협의자료 등을 부록에 수록하여야 한다.

3) 보고서 작성 시 내용을 인용한 경우 자료의 출처 및 근거자료를 제시하여야 한다.

4) 설계도면

ㅇ 설계도면에 포함될 사항

-  표지, 목차, 표준단면도, 종·평면도, 횡·단면도, 상세도

ㅇ 설명문의 기입 : 설계도면은 이해가 쉽도록 상세히 작성하여야 하며, 이해하기 어렵거나 해석상 혼란이 발생할 소지가 있는 부분은 설명문을 기입하여야 한다.

ㅇ 서명, 날인 : 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여야 한다.

ㅇ 특기사항의 반영 및 발주기관의 승인 : 설계도면에는 주석(NOTE)란을 만들어 재료의 종류, 강도등과 같은 주요 설계조건과 시공시 유의하여야 할 사항 등 해당도면 공사내용에 대한 특기사항을 수록하되 시공시 불가피하게 조사, 확인, 검토 등을 하여야하는 조항을 둘 경우 발주기관의 승인을 받아야 하며, 이에 대한 비용도 반드시 설계내역서에 반영하도록 하여야 한다.

ㅇ 관련도면의 표기 : 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면의 내용과 주요 관련있는 도면의 번호 도면명을 표기한다.

ㅇ 설계도면은 KSA0005(제도통칙)와 KSF1001(토목제도통칙) 등 관련규정에 따라 전산프로그램(CAD)으로 작성한다.

5) 공사시방서 작성

ㅇ 공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로, 해당 표준시방서 및 전문시방서 등을 근간으로 설계자의 의도가 정확히 반영될 수 있도록 한다.

ㅇ 공사시방서는 공사에 사용되는 각 공종별 시공방법, 자재에 대한 시방을 상세하게 수록하고 ‘공사시방서 작성요령(국토교통부)’의 공종분류체계에 맞추어 알기 쉽게 작성한다.

ㅇ 시방내용이 표준시방서에 저촉되거나, 공사시방서 내용 상호간에 중복되지 않도록 작성하여야 한다.

ㅇ 특별히 포함되어야 할 사항

-  자재, 장비사용에 관한 사항 또는 과업에 따른 설계자의 공사지침, 방법 등에 대한 규정 등으로 용역과업 수행 시 규정되어야 할 사항

-  공사에 사용될 자재의 성능, 규격 및 시험 등 자재에 관한 사항과 시공 방법, 허용오차 등 시공에 관한 사항, 공사 전반에 관한 주의사항과 절차 등 기술적인 사항

6) 설계예산서 작성

ㅇ SW부분은 SW사업 대가산정 가이드에 따른 FP방식으로 산정하고,    AR/VR 등 콘텐츠 제작이 필요할 경우 별도 작성한다.

ㅇ 예산서의 구성 : 설계예산서는 설계설명서, 설계내역서, 일위대가, 수량 및 단가산출서로 구별하여 작성한다.

ㅇ 설계예산서 : 설계예산서는 총공사비와 공사개요를 기재한다.

ㅇ 총괄내역서 : 총괄내역서에는 제경비의 산출근거가 포함되어야 한다.

ㅇ 품  셈 : 품셈은 당해연도‘정보통신 표준품셈’에 준한다.

ㅇ 재료비 : 재료비는‘정부구매물자 가격정보’를 포함하여 3개 이상의 물가정보지를 조사하여 산출한다.

ㅇ 견적서 : 견적이 필요할 경우 3개 업체 이상의 것을 기준으로 한다.

ㅇ 원가계산 : ‘원가계산에 의한 예정가격 작성 준칙’에 의거 작성

ㅇ 일위대가 : 단가산출근거, 중기사용료, 단가조서, 견적서, 운반거리, 조견표 등

ㅇ 수량산출서의 작성 : 수량산출서는 별책으로 작성한다.

-  각 공종별로 수량을 산출집계 하여야 한다.

-  각 공종별 단위수량은 표준품셈 적용기준에 의하여 산출하여야 한다.

-  각 품목별 단가는 품명 규격을 표시하고 적용근거를 명시하여야 한다.

7) 설계내역서 작성

ㅇ 행정안전부예규에 의거 원가계산에 의한 예정가격 작성 시 주요기준을 참고로 작성한다.

-  소프트웨어사업대가의 기준(고시)

-  공사원가계산 제비율 적용기준(조달청)

-  정부구매물자 가격정보(조달청)

-  시중노임단가 기준

· 공사부분노임단가 기준(대한건설협회)

· 제조부분노임단가 기준(중소기업협동조합중앙회)

· SW부분노임단가(소프트웨어 기술자 노임단가)

ㅇ 설계내역서는「원가계산 및 예정가격 작성요령」을 참고하여 작성한다.

2. 성과품 납품

계약상대자는 과업완료 전이라도 발주에 필요한 관계도서에 대한 납품요구가 있을 때에는 우선 납품하여야 한다.

가. 성과품의 소유

1) 본 과업수행으로 생산된 각종 보고서와 도면(리플렛), USB 등의 성과품은 발주자의 소유로 하고, 발주자의 승인 없이 제3자에게 제공하거나 본 과업목적 이외의 용도로 사용할 수 없다.

2) 본 과업과 관련된 저작권은 본 과업이 완료된 날로부터 발주자에게 귀속된다.

3) 본 용역 수행에 있어 제3자의 권리의 대상으로 되어 있는 특허권 등을 사용할 때에는 계약상대자가 사용에 관한 일체의 책임을 진다.

나. 성과품의 종류와 납품부수

납 품 목 록	수 량	비 고
1. 중간보고서(기본설계보고서)(A4)	10부	사업분야별
2. 최종(종합)보고서(A4)	10부	“
3. 최종(종합) 보고서((A4) - 요약본	10부	“
4. 기본 및 실시설계도서 - HW부분 : 설계설명서, 시방서(일반, 특기, 자재), 설계예산서, 수량산출서, 일위대가, 단가산출서(A4), 자재, 노임, 견적단가, 설계도면(A3) - SW부분 : 기본설계, 기능명세서, 업무흐름도 (work flow), 업무목록, 개체 관계도 작성(ERD), 기능점수 산출, DB 정의서, 콘텐츠 제작 등 기타 산출내역	5부	설계도면 (A3 접철 2부)
5. 인허가 및 부서(기관) 협의도서	지정매수
6. 각종보고서, 도면, 조사분석 자료 등이 수록된 성과품 USB	2SET	용역 수행 과정에서 만들어진 각종 원자료(psd, ai, shp, xls)도 포함.
7. 기타(심의, 자문, 협의 및 인허가 서류)	필요부수
8. 기타 감독원이 요구하는 서류 일체 1식.

※ 각 분야별로 납품하고, 과업의 특성 및 발주자의 요구에 따라 관계서류의 규격 및 소요부수는 변경 가능

붙 임 1

보  안  각  서

(수급인용)

본인은    년    월   일 귀 청과 계약 체결한 용역을 시행함에 있어

다음사항을 준수할 것을 이에 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서 및 과업내용서상의 제반

보안사항을 철저히 이행할 것임은 물론 용역수행전에 용역참여자에

대하여 보안교육을 실시하고 보안각서를 징구하여 용역시행부서에

제출할 것임.

2. 본인은 물론 당 회사 직원이 보안사항을 외부에 누설시켜 문제점을 야기하였을 경우에는 누설자가 보안관계 제 법규에 의거 처벌받음은 물론 회사에 대한 용역업의 등록취소, 부정당업자의 입찰참가 자격제한 등 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

년     월     일

소속 :

직위 :

성명 :                     (인)

포 항 시 장  귀하

붙 임 2

보  안  각  서

(용역참여자용)

본인은    년    월   일 귀 청과 계약 체결한 용역을 시행함에 있어

다음사항을 준수할 것을 이에 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서 및 과업내용서상의 제반 보안

사항을 철저히 이행할 것임.

2. 보안사항을 외부에 누설시켜 문제점을 야기하였을 경우에 보안관계

법령에 의거 처벌받음은 물론 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를

제기하지 않을 것임.

년    월    일

소 속 :

직 위 :

성 명 :                       (인)

포 항 시 장  귀하