포항융합기술산업지구 용수공급시설 실시설계용역(추가)

과 업 지 시 서

2020. 10.

포  항  시

- 목      차 -

Ⅰ. 총   칙	1

1.1 과업명	1

1.2 과업의 목적	1

1.3 과업의 범위	1

1.4 과업수행기간	2

1.5 과업수행방법	2

Ⅱ. 과업수행내용	5

2.1 기초조사 및 기본계획검토	6

2.2 실시설계	7

2.3 사업집행 계획수립	11

Ⅲ. 과업의 성과	12

Ⅳ. 예정공정표	13

Ⅴ. 특별과업지시서	13

Ⅰ. 총   칙

1.1 과 업 명

포항융합기술산업지구 용수공급시설 실시설계용역(추가)

1.2 과업목적

본 사업은 포항융합기술산업지구에 용수공급을 위한『실시설계용역(추가)』으로 생활 및 공업용수를 지구내로 안정적으로 공급하여 외국인투자기업의 경영환경과 외국인의 생활여건을 개선, 외국인투자를 촉진하여 지역 경쟁력 강화와 지역경제 활성화를 도모하고자 함.

1.3 과업범위

본 과업은 설계에 필요한 모든 자료의 수집분석, 조사측량 및 지질조사 등을 실시하며 이에 따라 공사집행을 위한 기본 및 실시설계 도서를 작성하는 것으로 다음 사항을 포함한다.

1.3.1 과업개요

가. 기초조사 및 기본계획검토

1) 기초자료 수집 및 분석

2) 관련계획 및 기본계획 검토

3) 조사측량

∙ 지형현황 측량 : 613㎡

∙ 수도 노선측량 : 1.37km

4) 토질조사 (NX) : 1식

나. 실시설계(변경)

- 송수가압장 : 2개소(생활용수 가압장 구조변경, 공업용수 위치변경)

- 송수관로 부설 (D800 ~ 350mm), L = 1.37km

- 배수지 : 1개소(STS물탱크)

- 부대시설 : 건축, 기계, 전기, 계장, 조경

다. 각종 인․허가 : 1식

1.4 과업수행기간

본 과업의 기간은 착수일로부터 120일로 하며 단, 아래와 같은 사유가 발생 했을 시는 감독관과 협의하여 용역기간을 조정할 수 있다.

가. 과업수행 중 정책적인 변화가 있을시

나. 불가항력적인 사유가 발생하였을 경우

다. 포항시의 사정에 의한 행정절차상 용역기간이 추가 소요될 경우

1.5 과업수행방법

가. 적용기준

1) 모든 과업은 시설기준과 기타 관련시설의 설계 및 시공에 관한 제규정 및 시방서 등의 기준에 따라 최신 국내의 분석기법 및 기술을 적용하여 수행하여야 한다.

2) 기본조사시 관련상위계획을 고려하여야 하며, 구체적인 목표를 제시하고 이를 달성하기 위한 합리적, 효율적인 수단을 개발함과 동시에 모든 자료는 산출근거와 자료출처를 명확히 하여야 한다.

나. 감독 및 보고

1) 본 과업은 포항시가 지정하는 감독관의 지시, 감독하에 수행하여야 한다.

2) 계약체결 후 15일 이내 과업수행을 위한 세부계획서 및 참여기술자의 자격 및 경력 등을 명기한 서류를 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

3) 과업기간 중 매월 말 공정보고를 익월 10일 이내에 제출하여야 하며 과업수행 중 해결하여야 할 중요한 사항이 발생하였을 때는 그 내용을 별도 보고하여야 한다.

4) 과업수행방법 및 성과의 세부내용을 검토하기 위하여 감독관의 요구가 있을 때에는 필요한 자료를 제출하고, 해당 전문기술자로 하여금 설명토록 하고 감독관의 지시사항에 대하여 성실히 수행하고 조치결과를 즉시 보고하여야 한다.

5) 본 과업수행에 있어 과업지시상 문맥해석 등에 대하여 계약 쌍방간의 의견이 상이할 시는 감독관의 의견을 따라야 한다.

6) 본 과업수행 중 기록이 될 수 있는 중요한 부분과 기타 필요한 부분은 반드시 칼라사진을 촬영하여 사진첩에 정리, 원판과 함께 제출하여야 한다.

7) 용역기술자

본 용역에 참여하는 전문기술자는 충분한 전문지식과 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며 감독관이 과업의 정당한 수행을 위하여 부적격하다고 판단할 경우 교체를 요구할 수도 있으며 용역자는 이에 응하여야 한다.

다. 과업의 변경

1) 본 과업지시서에 기술되어 있는 모든 사항은 상호 보완적이며 명기되어 있지 않는 사항이라도 일반적 관행에 따라 당연히 수행되어야 할 사항에 대하여는 감독관의 지시에 따라 용역자 부담으로 시행하여야 한다.

2) 중대한 사항의 발생이나 현지조사 결과에 따라 과업내용을 변경하여야 할 경우에는 상호 협의하여 과업의 범위, 비용 및 과업시행기간 등을 변경할 수 있다.

3) 본 과업에 아래와 같은 사유가 발생하였을 설계 변경 정산한다.

- 과업지서서의 내용 및 수량의 실제차이가 있을시

- 조사측량 및 지질조사 결과에 의한 물량변동

4) 본 과업을 수행함에 있어 도급자는 항상 국가의 이익을 보호하는 입장에서 과업을 수행하며 경비를 최소한으로 절감하는데 모든 정당한 조치를 취하여야 한다.

5) 사업인가 및 설계자문등 각종 승인 및 인가에 필요한 도서는 도급자 부담으로 제작하며, 용역이 완료된 후에도 성과품의 미비 및 보완상황이 발생시는 도급자 부담으로 즉시 보완 제출하여야 한다.

라. 보안대책 및 기타

1) 계약체결 후 15일 이내에 용역대표자 및 과업종사자의 보안각서를 제출하여야 한다.

2) 용역과업 자료의 분실, 도난, 누출을 방지하고, 자료의 철저한 보안을 위하여 보관함을 별도로 설치하여 관리책임자(정,부)를 지정하여야 한다.

3) 보안사항은 감독관과 협의하여 보안상 결함이 없도록 하여야 하며 이의 불이행으로 인한 책임은 도급자가 져야 한다.

4) 본 과업수행 종사자의 변동이 있을 시는 인수인계를 철저히 하고 자료의 외부유출을 방지하여야 한다.

5) 과업수행시 안전관리를 철저히 하여야 하며, 과업수행중 사고(인명, 재산포함)가 발생 했을시는 도급자는 손해배상 및 민 ․형사상 모든 책임을 져야 하며, 도급자 부담으로 보상 또는 원상복구 등을 시행한다.

Ⅱ. 과업 수행내용

2.1 기초조사 및 기본계획검토(기설계내용중 변경사항 검토)

가. 기초자료수집 및 분석

1) 일반현황 자료조사

- 자연적 조건인 지형, 기온, 풍향, 풍속, 강우 등의 조사와 사회적인 특성인 행정구역, 지역경제, 산업계획 등의 조사를 실시하여 계획수립시 반영하여야 한다.

2) 상수도 현황조사

- 계획지역 상수도 시설현황을 조사

나. 관련계획조사

1) 도시기본계획 등의 토지이용계획 및 주변도로계획을 조사하여 이를 반영하여야 한다.

2) 수도정비기본계획 등 상수도 관련계획을 검토하여 이를 반영하여야 한다.

3) 현지조사시 지형, 표고, 주변현황 및 지장물 위치를 파악, 시설물 위치 검토자료로 활용하여야 한다.

다. 조사측량

1) 배수지의 지형현황측량

- 축척 1:1,000으로 지형현황측량을 실시하여야 한다.

- 국립지리원 기본 수준점 성과를 이용하여 배수지 위치에 매설한 표석의    수준측량을 실시하여야 한다.

- 장래 시공시 성과를 용이하게 이용할 수 있도록 계획 위치에 표석을    매설하고 삼각측량성과 및 수준측량성과를 제출하여야 한다.

2) 관로노선 측량

- 관로노선 측량은 1:1,000으로 시행하며 관로의 중심선 측량은 40m로    하되 종단의 변화가 심한곳은 반드시 중간측점을 설치하고 관로노선의    측량폭은 30m로 시행하여 구조물, 지형변화 등을 상세히 표시하며    지하매설물도 동시에 조사하여야 한다.

3) 일반사항

- 본 조사측량은 공공측량 작업규정 및 측량표준품셈에 의한다.

- 수준점과 삼각점은 국립지리원에서 설치한 것을 사용한다.

- 측량구역은 감독관과 협의하여 결정하며 측량결과에 따라 정산한다.

라. 수도정비기본계획 검토

1) 기 시행된 수도정비 기본계획 검토

2) 기 검토사항 및 수정사항을 기본으로 도상작업 및 개략적 선정도나 계획 시설물들의 위치에 대하여 상세한 현지조사를 시행하여야 한다.

마. 급수수요량 및 공급방안 검토

1) 급수수요량

- 급수대상 지역별 기존 시설의 현황 및 이용실태 자료를 수집하여 현황을    분석하여야 한다.

- 급수수요량은 인구증가. 수도정비 기본계획, 도시계획, 기타 개발계획을    고려하여 단계별로 산정하여야 한다.

- 급수구역은 배수관로의 확장성 및 시급성을 검토하여 우리시와 협의후    결정토록 한다.

- 급수대상 지역별 지역특성을 고려, 수요 부하 특성을 검토하여야 한다.

2) 공급방안 수립

- 본 과업급수대상 구역의 시설물(배수지, 관로 등) 시설제원, 급수체계,    공급량 등의 자료를 이용하여 기존 상수도공급 체계 및 용수배분상    불균형등 제반 문제점을 분석하여야 한다.

- 상기 분석결과에 따라 기존시설과 연계 공급방안을 검토하여 구조물의    최적설계가 이루어지도록 하여야 한다.

2.2 실시설계(기설계내용중 변경사항 설계)

가. 실시설계

1) 설계적용기준

- 설계기준 : 환경부 제정 상수도시설기준, 관련 설계기준, 설계지침

- 적용품셈 : 건설공사 표준품셈

- 적용단가 : 시중노임단가, 조달청 발행 가격정보, 물가자료등

- 시 방 서 : 토목등 관련 전문시방서, 과업 일반시방서

- 설계하중, 재료의 단위중량, 절토구배, 성토구배, 안전율, 공법적용은    “안”을 작성하여 감독관과 협의 사용한다.

- 구조형식, 배수처리, 부대시설 등에 대하여는 가장 경제적이고 안정된    구조로 비교 설계하여야 하며 시공상세도의 작성과 설계도면에 설계법을    명시하여야 한다.

- 관매설 토피는 지역의 동결심도, 상부하중을 고려하여 충분한 매설    깊이를 확보하여야 한다.

2) 토   공

- 토공이동량이 최소화되도록 계획하여야 하며, 성토구배 및 비탈면    처리방법을 검토하여 설계하여 하며, 공사중 취락지구 통과때는 소음   대책을 고려하여야 한다.

- 구조물의 운영상 편리하고, 양호한 기초지반을 확보하도록 계획한다.

- 모든 굴착 및 성토사면은 토질조사 결과를 적용하여야 하며, 사면안정   검토를 실시한 후 그 결과를 설계에 반영하여야 한다.

3) 관   로

- 관로는 생․공용수 분리 및 통합 부설방안을 검토하여 최적의 방안을   강구토록 하고 관로노선 선정시에는 공사비, 공사의 난이도, 부지확보,   유지관리 등을 종합적으로 검토 몇가지 대안을 제시한 후 협의하여   가장 적합한 것을 채택하여야 한다.

- 특히 송․배수관로 노선선정은 추진중인 도시계획사업의 도로확장 구간에   매설하는 것을 원칙으로 하며, 계획도로부설이 난이할 시 노선부지

를 확보하여 전용도로 건설을 실시토록 하여야 한다.

- 관내의 부압, 지질여건, 안전성 및 경제성을 고려하여 관종을 결정하여야   한다.

- 관내의 수압, 차량하중, 토피 등을 고려하여 관두께를 결정하여야 한다.

- 곡관부의 보호공, 하천횡단, 기타 구조물횡단 및 기타 부대시설물 설계는   안전성을 고려하여 설계하여야 한다.

- 관로의 유지관리를 위하여 적정위치에 각종 제수밸브, 공기밸브, 배출수   설비등을 설치하여야 한다.

- 관로의 매설깊이는 동결심도와 도로법 및 관계법령에 따라 결정하며,   도로 하중을 고려하여 할 위치에 관을 부설할 경우에는 차량하중을   검토하여 결정하여야 한다.

- 노선설계시 전용도로가 필요할 시 유지관리용 장비의 원활한 진행에   지장이 없는 구조와 폭을 확보하여야 한다.

- 하천횡단 구간등은 관보호공을 설치하여야 한다.

4) 구조물(가압장 등)

- 기초설계는 기초지반의 지내력 및 침하량에 충분한 허용치를 보유하도록   설계하여야 한다.

- 토공 및 정지계획등은 구조물의 운영상 편리하고 기초지반을 확보할 수   있도록 계획하되 토공 이동량이 최소가 되도록 하여야 한다.

- 기능상 최대의 기능을 발휘할 수 있도록 설계하고, 구조적으로 안전하게   설계하여야 하며, 구조물을 경제적인 단면으로 설계하되 부력, 전도,   활동 및 지진하중에 대하여 우선적으로 검토하여야 한다.

5) 건축설비

- 건물은 용도와 기능에 맞도록 적정한 면적을 확보하여야 한다.

- 건물의 적절한 배치와 기능상 편리하고 유지관리가 용이하도록 설계   하여야 하며 건축법상 제규정을 준수하여야 한다.

- 구조설계는 설계조건에 적합하고 안전한 구조로 하되 경제적인 단면이   되도록 한다.

- 평면설계는 동선계획, 시설물 설치공간, 각실의 환경을 고려하여 계획한다.

- 입면설계는 주위와의 조화, 형태 및 기능, 유지관리를 고려하여 계획하고,   외부마감은 미려하고 경제적이 되도록 한다.

- 바닥, 문틀, 창호 위생설비등은 부식 및 마모에 견디는 재료로 한다.

6) 기계설비

- 기종선정은 기기의 효율, 기능 및 유지관리의 난이도와 경제성을 고려하여   선정하여야 한다.

- 에너지 절감을 고려한 기종 선정하여야 한다.

7) 전기설비

- 수전계획은 공사기간, 완료시의 전력 및 상황을 고려하여야 한다.

- 수전방식은 설비의 운영(건설, 운전, 유지관리)에 가장 적합한 방식을   선정하여 방침을 정하여야 한다.

- 설비형식은 현장의 주위상황, 조건에 대한 고려하고, 장래증설에 대한   안정성 및 유지관리에 대한 에너지 절감을 고려하여 선정하여야 한다.

- 조명설비는 옥내․외로 구분하며 주변환경에 적합한 건축화 조명을    실시하고 고효율 기기로 선정하여야 한다.

- 전기설비는 전기기술 기준령, 전기공급규정, 배전규정 및 내선규정등을   근거로 시설물의 특성에 가장 적합하게 설계한다.

8) 계장설비

- 계장설비는 감시제어 및 계측 시스템의 구성 등으로 시설물 설치로   운영 및 관리에 만전을 기할 수 있도록 CCTV, 각종 제어설비 등을   설치 및 운영방안은 제시하여야 한다.

- 계장설비의 시스템 구성, 배치, 조작, 감시제어방안은 신뢰성, 안정성,   경제성, 기능성, 장래 확장성 등을 비교 검토하여 가장 효율적인 방안   으로 설계하여야 한다.

- SYSTEM 기능은 감시제어 대상에 대한 원격 및 현장조작이 가능하도록   설계하여야 한다.

- 시설 전체를 대상으로 하여 아래사항을 충분히 검토하여야 하며,

주요내용을 포함하여야 한다.

9) 기타 부대설비

- 우․배수설비는 홍수시 원활히 우수를 배제할 수 있는 용량으로 설계   하여야 한다.

- 조경시설은 주위 경관과 잘 어울리도록 계획을 하여야 한다.

- 울타리 및 방호설비는 관계법규에 의하여 설치하여야 한다.

- 기타 부대시설은 관련시설물 설계규정 및 기준에 적합하도록 설계하여야   한다.

10) 도면작성

- 설계도면을 위한 작성은 KS1001, 토목제도 통칙 KS 150A, 건축제도   통칙에 준하여야 한다.

- 설계도서의 규격은 건교부 표준규격 및 토목규정에 준한다.

- 설계도의 각종 재룔 및 재료규격을 상세히 표시하여야 하며, 배수지등의   시설물 위치도는 1:50,000 ~ 1:5,000, 일반평면도 및 단면도는         1:100(200)으로 작도하고 단위 구조물에 대한 평면도, 단면도는 1:50   또는 1:100, 부대시설 및 조경도는 1:200 축척으로 하되, 상세도는     1 :10, 1:20, 1:30 또는 None Scale로 작도한다.

- 대내외 인․허가자료는 허가관청 축척으로 제출한다.

- 도면표기는 미터법 단위로 표기하며 사용문자는 국문으로 하되 필요한   경우에는 영문으로 표기할 수 있다.

- 도면은 CAD로 작성하고 CD로 제출하여야 한다.

- 도면은 시방서의 기술사항과 일치하여야 한다.

- 설계도면상에 측량성과도에 의한 BM, 도로점의 좌표, 표고를 표시한다.

11) 설계서 작성

- 실시설계에 대한 공사비산출은 내역서  및 일위대가표, 단가산출서,   수량계산서로 구분하여 작성하되 국토부 제정 표준품셈, 중기사용료   및 국내 물가시세표(가격정보등)에 의거 산출하여야 하며, 그 외 사항은   감독과 협의하여야 한다.

- 시방서는 정부제정 각종 시설규정, 지침 및 KS, KWWA, AWWA, JIS,   ASTM 등의 관계규정에 의건 각 공정별로 작성하여야 한다.

- 기자재 구입시방서는 가능한 명확히 기술하여야 하며 일반경쟁 입찰이   가능하도록 하여야 한다.

- 설계예산서는 원가계산서에 의한 예정가격 작성준칙에 의하여 작성   하여야 한다.

- 각 공정별로 재료산출근거 및 단가산출근거를 사용에 편리하도록 작성   하여야 한다.

- 시방서 작성은 장비를 포함한 자재 및 공사를 총망라하여 일반시방서,   특별시방서, 안전관리 시방서를 작성하고 설계서 및 시방서 작성시에는   공정별 안전관리계획을 수립하여야 한다.

- 공사용 자재는 KS표시품을 사용하여야 한다.

2.3 사업집행 계획수립(기설계내용중 변경사항 설계)

가. 사업비 산정

공사비, 보상비, 예비비 등을 주요 공정별로 세부적으로 산출하여야 한다.

나. 년차별 투자계획 및 제원조달 계획

사업집행을 위한 주요 공정별 년차별투자계획 및 재원조달계획을 수립하여야 한다.

Ⅲ. 과업의 성과

본 과업수행 결과에 대한 과업성과품을 다음과 같이 작성 제출하되 초안을 작성하여 감독관의 사전 검토를 받은 후 제출하여야 한다.

1) 시방서 및 자재구입시방서                                    5부

2) 수량산출서                                                  5부

3) 단가산출서 및 일위대가표                                    5부

4) 설계서(공내역)                                               5부

5) 설계예산서                                                  5부

6) 설계도면(A3)                                                 5부

7) 인허가 서류                                                 1식

8) 기타 현장조사(측량, 지질) 성과품                              1식

9) 납품도서 CD 제작                                           1식

Ⅳ. 예정공정표

공 종	과 업 기 간 (120일)												비고
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
1. 기초조사 및 자료분석
가) 기초자료 조사
나) 조 사 측 량
다) 지 질 조 사
2. 기본계획검토
가) 시설물 위치 및 규모결정
나) 송수관로 노선결정
3. 실시설계
가) 설계기준정립
나) 실 시 설 계
1) 구 조 물 (가압장, 배수지등)
2) 송 수 관 로
3) 부 대 시 설
4. 성과품 작성 및 납품

Ⅴ. 특별과업지시서

5.1 기 납품된 기본 및 실시설계중 수정이 필요한 부분은 검토 후 수정     하여 제출한다.

5.2 기 납품된 기본 및 실시설계의 설계도서 검토내용을 충분히 검토하여     반영한다.

5.3 생활용수 가압장은 과업착수와 동시에 관련기관 및 이인지구도시     개발조합과의 협의를 거쳐 설계서를 납품하기 전 토목공사를 우선     시공할 수 있도록 설계도면(토목구조물)을 빠른 시일 내 제출한다.

5.3 생활용수 가압장 설계시 유수지(포항시 안전총괄과)에 저촉되지      않도록 하여야 하며, 기존 수목이식 설계시 이인지구도시개발조합과의     협의를 거쳐 최소한의 비용으로 이식될 수 있도록 반영한다.

5.3 생활용수 가압장은 주변 주택(개발사업완료시)가에 소음 및 진동이     발생되어 민원이 발생되지 않도록 대책을 수립하여 반영한다.

5.4 공업용수 가압장은 철도안전법에 의거 행위허가에 대한 안정성검토를     실시하여 허가서류를 작성 제출한다.(해당시)

5.5 생활용수 송수관로(D800) 국도7호선 추진구간은 흥해읍 이인리 남천교     교량하부를 통과하여 가압장으로 유입될 수 있도록 관계기관과 협의 후     반영한다.

5.6 기 납품된 기본 및 실시설계중 신설 또는 위치변경 되는 구간의     수리계산을 재실시하여 감독관과 협의 후 후속공정을 진행한다.

5.7 기 납품된 기본 및 실시설계중 가압장(생활,공업)부지내에 유출부     제수변실 및 이토변실을 설치(또는 위치이동)하여 펌프실내 배관등의     유지관리에 용이토록 반영하고 구내배관에 보호공을 설치한다.

5.8 최종 납품되는 설계도서는 변경되는 부분이 기 납품된 설계도서와     구분이 용이하도록 작성한다.