정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

2021-34

① 정책사업명	환호지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업
② 추진배경	◦환호공원 해안도로 측 급경사지 구간의 토사 및 암석의 반복적인 붕괴를 예방
③ 사업개요	◦위 치 : 포항시 북구 환호동 산65-1번지 일원 ◦사업기간 : 2017. ~ 2022. ◦사업내용 : 사면정비 및 보강(L=540m, H=50m) ◦사 업 비 : 173억원(국86.5 도26.9 시59.6)
④ 사업부서	공원과		⑤ 담당자		시설5급 성용우 시설7급 이상환
⑥ 선정기준	10억원 이상의 예산 투입 사업		⑦ 사업기간		‘17. 10. ~ ’22. 6 .
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계용역 착수 ※ 환호지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 실시설계용역 시행		‘17.10.13		이강덕 시장 최 웅 부시장 오훈식 국장 황성기 과장 여훈기 팀장 이상훈 주무관
○ 사전설계검토 1차(행안부)		‘18. 7.25		하영길 국장 황성기 과장 여훈기 팀장 이상훈 주무관
○ 사전설계검토 2차(행안부)		‘18.10.17		하영길 국장 황성기 과장 여훈기 팀장 이상훈 주무관
○ 정비사업 계약의뢰 및 원가심사 (조달청) ※ 환호지구 급경사지 붕괴위험지역 정비공사 시행		‘19. 4.12		이강덕 시장 송경창 부시장 하영길 국장 황성기 과장 이선경 팀장 서정대 주무관
○ 공사 착수		‘19.6.14		하영길 국장 황성기 과장 이선경 팀장 서정대 주무관
○ 문화재지표조사 제출		‘19.8.30		최규진 국장 이상배 과장 이선경 팀장 서정대 주무관
○ 문화재입회조사용역 착수 ※ 환호지구 급경사지 붕괴위험지역 문화재 입회조사 용역		‘19.12.10		최규진 국장 이상배 과장 이선경 팀장 서정대 주무관
○ 토사절취 등 공사시행 중		~ 현재		권혁원 국장 최창호 과장 김경현 팀장 서정대 주무관
○ 설계변경 시행(1회) ※ 환호지구 급경사지 붕괴위험지역 정비공사 설계변경(1회)		‘21.06.18		이강덕 시장 김병삼 부시장 권혁원 단장 최창호 과장 김경현 팀장 서정대 주무관
○ 일상감사 중간검사 시행		‘22.03.18		성용우 과장 김경현 팀장 이상환 주무관
○ 설계변경 시행(2회) ※ 환호지구 급경사지 붕괴위험지역 정비공사 설계변경(2회)		‘22.05.10		김현구 단장 성용우 과장 김경현 팀장 이상환 주무관
○ 공사 완료 및 준공검사 예정		~ 현재		성용우 과장 김경현 팀장 이상환 주무관