정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

2021-22

① 정책사업명	석곡기념관 건립
② 추진배경	◦석곡기념관을 통해 근대 한의학의 선구자이자 실학자인 석곡 선생의 업적 재조명
③ 사업개요	◦위 치 : 남구 동해면 도구리 607번지 외 3필지(면적 1,974㎡) ◦사업규모 : 지상2층(연면적 981.55㎡) ◦사 업 비 : 53.5억원(도 28.6, 시 24.9) ◦주요시설 : 전시실, 영상관, 수장고, 소장고 등
④ 사업부서	문화예술과	⑤ 담당자	행정5급 신대섭 행정6급 김혜정 시설8급 손근아
⑥ 선정기준	10억원 이상의 예산 투입 사업	⑦ 사업기간	‘21. 1. ~ ‘23. 5.
<그간 주요 추진내용>
○ 공공건축 사업계획 사전검토 심의		‘21. 2. 5.	최무형 문화예술과장 문종명 문화산업팀장 김성대 문화산업팀 주무관
○ 공공건축 사업계획 사전검토 결과 회신		‘21. 4. 8.	최무형 문화예술과장 문종명 문화산업팀장 김성대 문화산업팀 주무관
○ 건축심의 요청		‘21. 4. 22.	최무형 문화예술과장 문종명 문화산업팀장 김성대 문화산업팀 주무관
○ 실시설계 용역		‘21. 9. 28. ~ ‘22. 4.	정경원 행정안전국장 정연학 문화예술과장 문종명 문화산업팀장 김성대 문화산업팀 주무관
○ 전시시설 우선협상자 선정 및 계약		‘22. 6.	정연학 문화예술과장 김성대 문화산업팀 주무관
○ 착공		‘22. 7.	신대섭 문화예술과장 이희정 문화산업팀장 손근아 문화산업팀 주무관
○ 전시시설 제작 및 설치 용역 착수		‘22. 8.	신대섭 문화예술과장 이희정 문화산업팀장 손근아 문화산업팀 주무관