정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	2020 삼정리항 어촌뉴딜300사업
② 추진배경	해양레저, 수산자원 등 다양한 해양관광자원을 이용하여 어촌의 혁신성장을 주도할 수 있는 관광 콘텐츠를 발굴하여 매력적인 어촌으로 재탄생 시키고자 함
③ 사업개요	<사업의 필요성> ◦ 삼정항은 지방어항으로 어항 개발사업이 기완료 되었으나, 일부 미비한 어항시설 개선 및 기능편익시설 보완으로 안전하고 편리한 어항환경 마련 필요 ◦ 바다, 섬, 해양레저, 자연경관 등 다양한 해양관광자원을 보유하고 있으나 기본적인 인프라 및 콘텐츠 부족 ◦ 구룡포권역거점개발사업, 해파랑길(14코스) 등의 연계로 시너지 효과 창출 <사업비> 9,945백만원 (국비 6,962 도비 895 시군비 2,088) <사업내용> ◦ 공통사업 - 접안시설 보강 : 파제제 L=220m, 파도막이 L=420m 보강 - 안전시설 설치 : 안전난간 7m, 경관조명 96개소 - 어항구역 경관개선 : 선양장 정비 A=320㎡ - 어항친수시설 설치 : 어구작업장 A=800㎡, 해녀공동작업장 A=275㎡ ◦ 특화사업 - 씨프론트 조성 : 프롬나드(367m), 해송쉼터(3,500㎡) - 삼정공원 정비 : 산책로, 앉음벽 설치(1,376㎡) - 삼정섬 경관개선 : 갯바위 경관조명 설치 - 어촌주거개선 : 마을회관 정비(679㎡), LED 가로등 교체, CCTV 설치 5개소
④ 사업부서	수산정책과	⑤ 담당자	수산5급 정철영 시설7급 권혁진
⑥ 선정기준	국정과제	⑦ 사업기간	2020~2023(4년)

<그간 주요 추진내용>
○‘삼정리항 어촌뉴딜300사업’ 공모사업 선정	`19.12.19.	일자리경제실장 김종식 수산진흥과장 정종영 수산시설팀장 김보연 주무관 이정욱 주무관 변은영
○‘삼정리항 어촌뉴딜300사업’기본계획 수립용역 시행	‘20.05.24.	일자리경제실장 김종식 수산진흥과장 정종영 수산시설팀장 김보연 재정관리과장 강성태 계약팀장 김기훈 주무관 이정욱
○‘삼정리항 어촌뉴딜300사업’기본계획 고시	‘21.01.29.	수산진흥과장 정종영 수산시설팀장 강원태 주무관 송하동 주무관 정진수
○ 지역역량강화사업 시행	‘21.06.17.	수산진흥과장 정종영 수산시설팀장 강원태 주무관 송하동 주무관 정진수
○ 이안제 보강공사 시행	‘22.01.14.	시장 이강덕 부시장 이장식 일자리경제국장 손정호 재정관리과장 김기출 계약1팀장 이남극 수산진흥과장 정철영 수산시설팀장 강원태 주무관 전지환 주무관 정진수
○‘삼정리항 어촌뉴딜300사업’시행계획 고시	‘22.04.21.	일자리경제국장 손정호 수산정책팀장 오정흥 수산시설팀장 강원태 주무관 전지환
○ 파제제 보강공사 시행	‘22.04.13.	행정안전국장 정경원 일자리경제국장 손정호 재정관리과장 김기출 계약1팀장 이남극 수산진흥과장 정철영 수산시설팀장 강원태 주무관 전지환

○ 해안방풍림, 해변산책로 조성사업 시행	‘22.04.27.	부시장 이장식 일자리경제국장 손정호 재정관리과장 김기출 계약1팀장 이남극 수산진흥과장 정철영 주무관 전지환
○ 삼정교류센터 건립(건축) 시행	‘22.06.20.	시장 이강덕 부시장 이장식 일자리경제국장 손정호 재정관리과장 김기출 계약1팀장 이남극 수산진흥과장 정철영 수산시섵팀장 강원태 주무관 전지환 주무관 정진수
○ 삼정2리 어촌계공동작업장 환경정비사업(건축) 시행	‘22.07.15.	부시장 이장식 일자리경제국장 손정호 재정관리과장 김기출 계약1팀장 이남극 수산시섵팀장 강원태 주무관 전지환
○ 삼정1리 공동작업장(건축) 시행	‘22.07.19.	부시장 이장식 일자리경제국장 손정호 재정관리과장 김기출 계약1팀장 이남극 수산진흥과장 정철영 수산시섵팀장 강원태 주무관 전지환
○ 파제제 보강공사 준공	‘22.09.21.
○ 이안제 보강공사 준공	‘22.12.12.