[서식 1]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	다목적 행정선 건조사업
② 추진배경	기존 노후 어업지도선(경북207호)을 대체 건조하여 동해안 해역의 수산재해 예찰 및 어업지도·불법어업 단속 업무 수행
③ 사업개요	총톤수 130톤급 다목적행정선 1척 제조구매
④ 사업부서	수산정책과		⑤ 담당자	담당자 김수아 부서장 정철영
⑥ 선정기준	국정과제		⑦ 사업기간	`20. 6.~`22. 11.
<그간 주요 추진내용>
다목적 행정선 건조계획 수립		`19.08.27.	이강덕 시장 송경창 부시장 김종식 일자리경제실장 정종영 과장 정인화 팀장 김지환 주무관
2019년도 제7차 수시분 공유재산 관리계획 수립		`19.09.16.	이강덕 시장 송경창 부시장 김종식 일자리경제실장 정종영 과장 정인화 팀장 김지환 주무관
2020~2024 중기지방재정계획 반영		`19.09.18.	이강덕 시장 송경창 부시장 김종식 일자리경제실장 정종영 과장 정인화 팀장 김지환 주무관
경상북도 계약원가 심사(설계용역)		`20.04.09.	이강덕 시장 송경창 부시장 김종식 일자리경제실장 정종영 과장 오영환 팀장 김지원 주무관
경상북도 지방재정투자심사		`20.04.13.	이강덕 시장 송경창 부시장 김종식 일자리경제실장 정종영 과장 오영환 팀장 김지원 주무관

<그간 주요 추진내용>
기본 및 실시설계용역 발주	`20.06.19.	이강덕 시장 송경창 부시장 김종식 일자리경제실장 정종영 과장 오영환 팀장 김지원 주무관
설계용역 착수보고회	`20.07.23.	이강덕 시장 송경창 부시장 김종식 일자리경제실장 정종영 과장 오정흥 팀장 김지원 주무관
주요장비 선정 심의위원회	`20.10.06.	이강덕 시장 송경창 부시장 김종식 일자리경제실장 정종영 과장 오정흥 팀장 김지원 주무관
설계용역 중간보고회	`21.01.25.	이강덕 시장 김병삼 부시장 김종식 일자리경제실장 정종영 과장 오정흥 팀장 김지원 주무관
설계용역 최종보고회	`21.03.22.	이강덕 시장 김병삼 부시장 김종식 일자리경제실장 정종영 과장 오정흥 팀장 김지원 주무관
설계 납품(완료)	`21.03.30.	이강덕 시장 김병삼 부시장 김종식 일자리경제실장 정종영 과장 오정흥 팀장 김지원 주무관
포항시 일상감사(130톤급 다목적 행정선 1척 제조구매)	`21.04.28.	이강덕 시장 김병삼 부시장 김종식 일자리경제실장 정종영 과장 오정흥 팀장 김지원 주무관
건조사 선정	`21.07.20.	이강덕 시장 김병삼 부시장 김종식 일자리경제실장 이재곤 과장 오정흥 팀장 김지원 주무관
건조 착공	`21.08.11.	이강덕 시장 김병삼 부시장 김종식 일자리경제실장 이재곤 과장 오정흥 팀장 김지원 주무관

<그간 주요 추진내용>
내부 인테리어 선정협의회	`21.12.13.	이강덕 시장 김병삼 부시장 김종식 일자리경제실장 이재곤 과장 오정흥 팀장 김지원 주무관
선명 확정	`22.07.29.	이강덕 시장 이장식 부시장 손정호 일자리경제국장 정철영 과장 오정화 팀장 김지원 주무관
진수식 개최	`22.08.29.	이강덕 시장 이장식 부시장 손정호 일자리경제국장 정철영 과장 오정화 팀장 김지원 주무관
건조 준공 및 인도	`22.10.26.	이강덕 시장 이장식 부시장 손정호 일자리경제국장 정철영 과장 오정화 팀장 김지원 주무관
취항식 개최	`22.11.25.	이강덕 시장 이장식 부시장 손정호 일자리경제국장 정철영 과장 오정화 팀장 김지원 주무관

<기재항목>

① 정책사업명 : 온-나라시스템 상의 단위과제카드명과 정책사업명 일치 권고

② 추진배경 : 정책의 추진계기 등 발단에 대해 상세하게 적시

③ 사업개요 : 사업목적, 추진내용 등 사업 전반에 대해 개괄

④ 사업부서 : 소속 기관명, 부서명(과 단위) 기재

⑤ 담당자 : 現 사업 담당자 및 사업부서장을 직급(직위)과 함께 기재

⑥ 선정기준 : 국정과제 / 국민신청 / 대규모예산 / 연구용역 / 법령 등 개폐 / 기타 中 택1

⑦ 사업기간 : 사업의 시작 및 (예상)종료 시점 기재

※ <그간 주요 추진내용> : 중점관리 대상사업으로 선정되기 이전 진행되어 온 주요 추진사항 및 기타 주요내용 등을 기재

※ 일시 및 관련자 : 최종결재 날짜 기준으로 내림차순, 결재라인 직급 순으로 실명 기재