[별지 제1호 서식]

정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	포항시 생활폐기물 에너지화시설 민간투자사업
② 추진배경	- 생활폐기물 자원화 및 재활용을 통한 직매립최소화 - 버려지는 생활쓰레기를 이용한 자원순환형 폐기물처리시설 구축
③ 사업개요	- 위치 : 포항시 남구 호동 39-3번지 일원 - 사업규모 : 연료화시설 500톤/일, 발전시설 270톤/일 - 총사업비 : 1,292억원(불변가) / 1,552억원(경상가) - 공사기간 : 2016. 6. 24 ~ 2019. 1. 18 - 사업방식 : 수익형민자사업(BTO) - 사업시행자 : 포항이앤이 주식회사 - 운영기간 : 15년간
④ 사업부서	포항시 자원순환과		⑤ 담당자	자원순환과장 박상근 공업8급 전주한
⑥ 선정기준	대규모예산		⑦ 사업기간	2009.7.31. ~ 2019.1.18.
<그간 주요 추진내용>
○ 민간투자사업 최초제안서 접수 ※ 청소과-8259		‘09.07.31	박승호 포항시장 윤정용 부시장 김보미 주민생활지원국장 최규석 청소과장 김병오 청소시설담당 김학덕 주무관
○ 제3자공고 ※ 청소과-13645		‘10.12.30	박승호 포항시장 김성경 부시장 이동익 복지환경국장 한일도 청소과장 김병오 청소시설담당 김학덕 주무관
○ 기획재정부 중앙민투심의 완료 ※ 기획재정부 민간투자정책과-462		‘14.07.16	김재홍 포항시 부시장 최규석 복지환경국장 정철영 청소과장 전유학 청소시설담당 이동현 주무관

○ 실시협약체결 및 사업시행자 지정 ※ 청소과-7030	‘15.06.09	이강덕 포항시장 김재홍 부시장 이점식 복지환경국장 최규진 청소과장 전유학 청소시설담당 이환우 주무관
○ 실시계획 승인 및 고시 ※ 청소과-7333	‘16.05.20	김종식 복지환경국장 최규진 청소과장 권태중 청소시설팀장 강봉균 주무관
○ 공사착수 ※ 청소과-9087	‘16.06.24	최규진 청소과장 권태중 청소시설팀장 강봉균 주무관
○ 총사업비 변경. ※ 자원순환과-1743	‘17.08.14	이광희 자원순환과장 정규덕 자원시설팀장 강봉균 주무관
○ 준공 ※ 자원순환과-861	‘19.01.18	안승도 자원순환과장 정규덕 자원시설팀장 황의호 주무관
○ 상업운전 개시 ※ 자원순환과-2039	‘19.02.18	안승도 자원순환과장 정규덕 자원시설팀장 황의호 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

2020-20

① 정책사업명	호동2매립장 순환이용 정비사업
② 추진배경	◦ 호동2매립장 매립율이 90% 이상으로 2022년말 사용종료 예상됨 ◦ 기존 매립장을 순환형으로 정비하여 추가매립 용량 확보(20년)
③ 사업개요	◦ 위 치 : 포항시 남구 호동 38번지 호동2매립장 일원 ◦ 사 업 비 : 40,779백만원(국 20,389, 지방 20,390) ◦ 사 업 량 : 굴착 791,455㎥, 조성:976,947㎥
④ 사업부서	포항시 자원순환과		⑤ 담당자	공업5급 박상근 시설7급 신우성
⑥ 선정기준	10억원 이상의 건설사업		⑦ 사업기간	2019년 ~ 2025년
<그간 주요 추진내용>
○ 포항시 제3차 폐기물처리기본계획 변경계획서 제출		‘17.3.24	이광희 자원순환과장 서상덕 매립장관리담당 윤기태 주무관
○ 순환이용정비사업 타당성조사용역		‘17.5.29	이광희 자원순환과장 서상덕 매립장관리담당 윤기태 주무관
○ 기본 및 실시설계 용역 착수		‘19.5.23	안승도 자원순환과장 서상덕 매립장관리담당 정재원 주무관
○ 굴착폐기물 선별공법 선정		‘20.1.31	신정혁 자원순환과장 최태환 매립장관리담당 정재원 주무관
○ 경북도청 지방건설기술심의		‘20.11.29	신정혁 자원순환과장 최태환 매립장관리담당 정재원 주무관
○ 총사업비 변경 승인 (371억원→408억원 증액)		‘21.6.22	신정혁 자원순환과장 최태환 매립장관리담당 정재원 주무관
○ 감리용역 발주		‘21.8.24	신정혁 자원순환과장 최태환 매립장관리담당 정재원 주무관
○ 공사착공		‘21.12.27	신정혁 자원순환과장 최태환 매립장관리담당 정재원 주무관
○ 가설건축물허가(2건)		‘22.3.11‘22.4.8	신정혁 자원순환과장 박상근 자원시설담당 신우성 주무관
○ 매립쓰레기 굴착/선별 시행		‘22.12.19	박상근 자원순환과장 조상수 자원시설담당 신우성 주무관