11

주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

우리 포항시에서 ‘13년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

사업명	총사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척율(%)
호미곶 해맞이광장 경관디자인 명소화사업	2,550	1,575	975	-	2013	2010 *	100
새마을운동체험 공원조성	4,200	1,800	2,400	-	2014	2010	90
내연산 진경산수 발현지 조성	3,000	-	200	2,800	2015	2012	10
포항중앙도서관 건립	24,000	1,000	5,212	17,788	2015	2010	45
동해안 연안 녹색길 조성	2,897	-	143	2,754	2015	2012 *	0
신라문화탐방 바닷길 조성	47,836	7,339	9,641	30,856	2017	2009	20
오천읍체육회관건립	4,228	1,005	2,823	400	2014	2011 *	70
포항시 CCTV통합 관제센터 구축	2,664	-	2,664	-	2013	2012 *	100
흥해시장 장옥 개축	8,400	-	-	8,400	2015	2013	3
근로자종합복지 회관 건립	15,500	8,000	7,500	-	2013	2009	100
연안바다목장조성	5,000	1,000	1,000	3,000	2016	2011	60
청정해수 공급시설 설치	3,000	1,000	1,000	1,000	2015	2010 *	66
과메기산업화 가공단지 조성	38,000	20,800	4,200	13,000	2015	2008	80
복합낚시공원 조성	1,200	78	21	21	2014	2008	82.5
포항북구장애인 종합복지관 건립	7,958	316	2,639	5,003	2014	2011	70
충혼탑 건립	3,511	1,959	1,552	-	2013	2011 *	100
구룡포청소년수련원 증축	6,000	-	70	5,930	2016	2012	5
형산생태유수지조성	8,206	200	1,405	6,601	2015	2009	37
공공재활용기반 시설 설치	7,732	6,732	1,000	-	‘13	2011	100
한전～남부서간 도로(대2-2)개설	14,000	2,230	2,000	9,770	2016	2013 *	40
신광～흥해 매산리간 도로 확포장	20,000	500	1,000	18,500	2020	2012	12

(단위: 백만원, %)

사업명	총사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척율(%)
청림동 도시계획 도로(중1-23)개설	6,217	4,700	1,517	-	2013	2010 *	100
한신공영～이인리간 도로(대3-27)개설	28,700	-	2,253	26,447	2020	2012 *	10
흥해 성곡 도시계획 도로(중1-58)개설	29,000	-	203	28,797	2018	2010 *	2
대송 도시계획 도로(중1-17)개설	22,000	5,300	2,093	14,607	2018	2010 *	37
보경사 군립공원 진입도로 확포장	7,000	3,200	787	3,013	2018	2010	66
연일 오천리 도시 계획도로(중1-12)개설	11,700	8,500	1,390	1,810	2015	2009 *	92
오천 세계리 남문 ～장승백이간 도로(대2-3)개설	11,200	10,300	900	-	2013	2008	100
흥해 성내 도시계획 도로(중1-99)개설	8,200	4,400	484	3,316	2016	2008 *	66
기계 현내리 도시 계획도로(중2-78)개설	2,600	-	300	2,300	2017	2013 *	10
신광 기일리 (리도213) 도로 확포장	6,500	1,650	1,600	3,250	2016	2012	50
흥해 약성선 (농도301호)확포장	6,200	-	2,200	4,000	2015	2012	35
연일 자명리(중2-175) 도로 개설	9,000	200	1,000	7,800	2018	2012	10
효곡동 도시계획 도로(중3-133)개설	3,200	200	1,000	2,000	2017	2012 *	80
운제산 삼림욕장 조성	4,000	50	1,000	2,950	2015	2013	20
철기농경문화 테마공원 조성	10,000	-	400	9,600	2016	2012	5
포항청초롬광역 친환경농업단지조성	10,056	690	1,188	8,178	2014	2010	20
뱃머리마을도시계획도로(중1-125)확장	5,010	-	3,530	1,480	2014	2013 *	95
포항운하 건설	140,000	132,071	7,929	-	2014	2011	100
장량공공하수처리 시설 증설	27,900	-	1,200	26,700	2016	2012	실시설계중
하수처리수재이용 사업	140,004	56,774	58,791	24,439	2014	2008	99
이동배수지 신설	11,000	1,581	2,000	7,419	2015	2013 *	36
상수도블록화 시스템 구축	11,100	3,100	4,950	3,050	2015	2012 *	25

‣ (대상사업) 투융자심사(중앙․도 의뢰, 자체 * 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2013년에

추진한 사업

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

호미곶 해맞이광장 경관디자인 명소화사업

담당자

테라노바담당관 조재진(☎270-3753)

□ 사업목적 및 필요성

○ 호미곶 해맞이 광장을 재디자인하여 해양관광 문화도시 기반 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 11 ~ 2013. 12.

○ 위 치 : 호미곶면 226번지 일원

○ 규 모 : 전망대 증축(4층 134㎡), 야외무대 신축(2층 601㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,550백만원(국비 1,274, 도비 382, 시비 894)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	2,550	1,575	975	-	-
국 비	1,274	787	487	-	-
시 도 비	382	236	146	-	-
시군구비	894	552	342	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(완료 : 100%)

○ 2010. 12. : 광특회계 국비지원 확정

○ 2012. 11. : 문화재 현상변경 허가

○ ‘11. 12~ ’13. 12 : 공사착공 및 준공

□ 향후계획

○ 없음

□ 사업변경 내역

○ 없음

사업명

새마을운동 체험공원 조성

담당자

새마을봉사과 권용구(☎054-270-2453)

□ 사업목적 및 필요성

○ 새마을운동의 변천사를 몸으로 느낄 수 있는 공간 조성

○ 제2의 새마을운동 재점화 및 기업, 학교, 행정 새마을 교육장 필요성 대두

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010년 ~ 2014년

○ 위 치 : 포항시 북구 기계면 문성리 357-1번지 일원

○ 규 모 : 새마을 체험공원(3,900㎡), 고택활용 인성교육관 건립(995㎡)

발상지 기념관 내 녹지정비 및 전시관 리모델링

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,200백만원                                   (단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	4,200	1,800	2,400	-	-
국 비	2,100	900	1,200	-	-
시 도 비	630	270	360	-	-
시군구비	1,470	630	840	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2014. 8.18 준공예정

□ 사업변경 내역

○ 사업비 변경

- 당초 : 21,000백만원(국비 8,400, 도비 3,500, 시비 8,100, 민자 1,000)

- 변경 :  4,200백만원(국비 2,100, 도비 630, 시비 1,470)

※ 타시․군 중복투자 사업으로 인한 국비지원 축소에 따른 변경

사업명

내연산 진경산수 발현지 조성

담당자

관광진흥과 김옥동(☎270-2243)

□ 사업목적 및 필요성

○ 겸재정선 진경산수 발현지인 내연산과 전통사찰인 보경사 등 문화유적과

연계한 관광자원화 및 문화관광 체험 관광벨트 구축

□ 사업개요

○ 위    치 : 포항시 북구 송라면 보경사 군립공원 일원

○ 사 업 량 : A=1,830㎡

○ 사 업 비 : 30억원( 국비 15, 도비 4.5, 시비 10.5 )

○ 사업기간 : 2011 ~ 2015

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원                               (단위: 백만원)

구 분		총 사업비	기 투 자	‘13년 투자	‘14년 투자	‘15년 이후
계		3,000	50	150	400	2,400
공정별	설계․용역	200	50	150
	보 상 비
	공 사 비	2,800			400	2,400
재원별	국 비	1,500			200	1,300
	도 비	450		40	60	350
	시 비	1,050	50	110	140	750
	민자 등

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2013.  10월 : 기본계획 및 실시설계 완료

◦ 2014. 4. 15 : 총괄계약 25억원 (도급액 15억원, 시공자 : 신성종합건설(주))

◦ 2014. 4. 21 : 1차분 공사착공 (기간 : 4.21 ~ 10.17)

□ 향후계획

○ 2015년 : 탐방로 정비, 전망대 정자설치 및 관광편의시설 설치완료

사업명	포항 중앙도서관 건립	담당자	문화예술과 박종율(☎270-2264)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 53만 시민의 지식정보 제공을 위한 수준 높은 지식문화 인프라 구축 ○ 환동해 중심 경북 제1의 도시위상에 걸맞은 중심도서관 건립 ○ 선진문화교육 및 지식정보 제공으로 시민들의 삶의 질 향상에 기여 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2011. 1. ~ 2015. 6. ○ 위 치 : 포항시 북구 덕수동 35-19 ○ 시 공 사 : (주)화인종합건설, (주)성진건설 ○ 사업규모 : 연면적 9,812㎡(지하 1층/ 지상 6층 건물) □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 24,000백만원(국비 9,600, 도비 800, 시비 13,600) ○ 지금까지 집행액 : 8,683백만원 ○ 향후 소요액 : 15,317백만원 □ 추진상황 ○ 2011. 8. : 포항 중앙도서관 건립 부지 선정 ○ 2012. 6. ~ 2013. 2. : 포항 중앙도서관 건립 실시설계 완료 ○ 2013. 3. ~ 5. : 구 도서관(포은도서관) 철거 및 폐기물 처리 ○ 2013. 6. : 포항 중앙도서관 건립 착공 □ 향후계획 ○ 2015. 6. : 포항 중앙도서관 건립 준공

사업명

동해안 연안녹색길 조성

담당자

관광진흥과 김광열(☎270-2884)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동해안 지역 도보 중심의 관광벨트 조성을 위한 다채로운 해안문화를

즐기는 탐방루트를 조성하여 탐방객의 건강증진과 볼거리 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 포항시 북구 흥해읍 칠포리 ∼ 오도리 일원

○ 사 업 량 : 탐방로 L = 0.9km

○ 사 업 비 : 29억원(국비 20억원, 도비 3억원, 시비 6억원)

○ 사업기간 : 2013 ~ 2015

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,897백만원                               (단위: 백만원)

구 분		총 사업비	기 투 자	‘13년 투자	‘14년 투자	‘15년 이후
계		2,897		143	0	2,754
공정별	설계․용역	143		143
	보 상 비
	공 사 비	2,754				2,754
재원별	국 비	2,028		100	0	1,928
	도 비	261		13	0	248
	시 비	608		30	0	578
	민자 등

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  0%)

○ 2011.  4월 : 3대문화권사업 예비타당성조사 (문화체육관광부)

○ 2012. 11월 : 지방재정 투 ․ 융자 심사

○ 2013. 3.5 ~ 2014. 9월  기본 및 실시설계용역

[ 금143백만원 (국 100, 도 13, 시 30), ㈜ 지엔지 종합엔지니어링 ]

○ 2013. 9.11 : 설계용역중지 (기본 안 미확정)

□ 향후계획

○  2015년 예산확보 후 착공

사업명

신라문화탐방길 바닷길 조성

담당자

관광진흥과 김광열(☎270-2884)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우리지역의 연오랑세오녀 역사자원을 스토리텔링한 복합 체험형 관광

인프라를 구축하여 동해안의 수려한 자연관광 자원을 연계함으로써

신라문화권의 관광경쟁력 확보

□ 사업개요

○ 위    치 : 포항시 남구 동해면 임곡리, 오천읍 세계리 일원

○ 사업규모 : A=105,921㎡

○ 총사업비 : 478억원(국 281, 지방 156, 민자 41)

○ 사업기간 : 2011 ~ 2017

○ 사업내용 : 연오랑세오녀테마파크-294억원(82,637㎡), 일월테마파크

-100억원(23,284㎡), 연계탐방로 2개소 - 84억원(15km)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 47,836백만원                             (단위: 백만원)

구 분		총 사업비	기 투 자	‘13년 투자	‘14년 투자	‘15년 이후
계		47,836	7,339	9,641	9,943	20,913
공정별	설계․용역	1,100	1,100
	보 상 비	14,300	1,500	4,500	4,300	4,000
	공 사 비	32,436	4,739	5,141	5,643	16,913
재원별	국 비	28,076	5,138	4,555	5,000	13,383
	도 비	3,708	660	586	643	1,819
	시 비	16,052	1,541	4,500	4,300	5,711
	민자 등

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2014. 1. ~ 2014. 6. 12 : 연오랑세오녀테마파크 부지매입 (14필지 20,662㎡)

보상비 : 3,505 백만원

○ 2014. 5.16 : 전기공사계약 (계약금액: 337백만원, 시공사 문경전기정보통신)

○ 2014. 5.16 : 통신공사계약 (계약금액: 87백만원, 시공사 ㈜부금정보)

□ 향후계획

○ 연오랑세오녀 테마파크, 일월테마파크, 탐방바닷길 등 기반시설 조성

사업명

포항시 CCTV통합관제센터 구축

담당자

안전정책과 박성욱(☎270-3853)

□ 사업목적 및 필요성

○ 방범, 재난, 교통 등 부서별 상황실 운영으로 인한 업무 효율성 저하

○ 늘어가는 아동, 여성, 노약자 대상 범죄에 실시간 대응 필요

□ 사업개요

○ 기    간 : 2013. 1. ~ 2014. 1.

○ 위    치 : 포항시청 문화동 2층

○ 사업규모 : 건물증축공사(면적 600㎡), 재난종합상황실, 교통정보센터,

방범(어린이보호), 재난, 교통, 주정차단속, 산불감시 등

상황실 통합 및 CCTV 연계 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,664백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	2,664		2,664
국 비	912		912
시 도 비
시군구비	1,552		1,552
지 방 채
민간자본
기타(교육청)	200		200

□ 추진상황(추진단계 : 건물증축공사 및 시스템구축 완료, 진도 : 100%)

○ 2013. 1. 28 ~ 3. 28 : 통합관제센터 시스템 구축 및 건축 설계용역

○ 2013. 6.  7 ~ 9. 14 : 통합관제센터 건립공사 건축 준공

○ 2013. 6. 14 ~ 2014. 1. 10 : 통합관제센터 시스템 구축 준공

○ 2014. 1. 20 : 포항시 통합관제센터 개소식

○ 2014. 2.  3 : 포항시 통합관제센터 관리·운영 업무협약식

○ 2014. 2. 19 ~ : 포항시 통합관제센터 모니터링 위탁 및 운영

사업명

오천읍 체육회관 건립

담당자

체육지원과 김일동(☎270-2804)

□ 사업목적 및 필요성

○ 오천읍의 오랜 숙원사업이었던 체육회관건립으로 지역균형 발전과

주민 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011 ~ 2014

○ 위 치 : 포항시 남구 오천읍 냉천로 580

○ 규 모 : 대지면적 11,913㎡, 건축(연)면적 2,041㎡(2,741㎡) 지상2층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,228백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	4,228	1005	2,823	400
국 비
시 도 비	600	300	300
시군구비	3,628	705	2523	400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2011. 11. 11 : 지방재정투융자 심사 (조건부)

○ 2012. 01. 06 ~ 2012. 05. 25 : 테라노바 공모 실시

○ 2012. 07. 05 ~ 2013. 04. 25 : 설계용역 시행 및 준공

○ 2013. 07. 01 ~ 2014. 04. 15 : 공사 시행 및 준공

□ 사업변경 내역

구분	사업비	사업기간	비고
당초	40억	2012 ~ 2013
변경	42억	2012 ~ 2014

사업명

흥해시장 장옥 개축

담당자

경제노동과 한창수(☎270-2434)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대형 유통업체와 기업형 수퍼마켓의 무차별 진출에 따른 전통시장 붕괴로

북구권의 대표적 시장인 흥해시장을 시설 현대화 추진

○ 농축수산물을 농어민과 소비자간 공급처로 조성하여 상인 및 주변  지역

민들의 소득 증대에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2015(3개년)

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 성내리 43번지 일원

○ 규 모 : 장옥개축 및 주차장설치(지상2층, 연면적 4,000㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,400백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	8,400			2,100	6,300
국 비	500			200	300
시 도 비
시군구비	7,900			1,900	6,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

○ 2013.  2 ~ 2014. 6 : 주민설명회 개최(5회)

○ 2014.  2 : 건축물 설계 발주(설계 진행중)

□ 향후계획

○ 2014.  8 : 건축물 설계완료

○ 2014.  8 ~ 10 : 토지보상

○ 2014. 12 ~ 2015 12. : 장옥공사 착공 및 완료

사업명

근로자종합복지회관 건립

담당자

경제노동과 김교섭(☎270-2443)

□ 사업목적 및 필요성

○ 근로자 공공복지 증진을 위한 다양한 문화공간 제공 및 건전한 노사문화

기반구축과 각종 편의시설 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010. 1 ~ 2013. 10

○ 위 치 : 포항시 대도동 뱃머리마을 주민개발지역 내

○ 규 모 : 부지면적 6,194㎡, 건축면적 5,346㎡, 바닥면적 1,236㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,500백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	15,500	8,000	7,500	-	-
국 비	6,000	4,600	1,400
시 도 비	1,000	1,000	-
시군구비	8,500	2,400	6,100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 부지매입완료(1,100백만원) - 2011년

○ 기본 및 실시설계 용역, 건축공사 총괄발주(우진건설)

○ 공사착공일 : 2011. 12. 28, 공사준공일 : 2013. 10. 31

□ 건축현황

○ 지하 1층, 지상 4층

○ ․지하1층(2,149㎡) : 기계실 외 수영장, 사무실, 체력단련실 등

․지상1층(999㎡)  :  로봇전시관, ․지상2층(1,230㎡) :  프로그램실

․ 지상3층(1,175㎡) : 대공연장 ,  ․ 지상4층(152㎡) : 기계실

․ 옥외시설 : 주차장, 놀이시설 등

사업명

연안바다목장 조성사업

담당자

수산진흥과 최근광(☎270-2742)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인공 해조장 및 수산자원 조성으로 수산물의 지속적인 생산 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ~ 2016(5년간)

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 오도 1, 2리 지선

○ 규 모 : 155.2ha(인공어초, 레져 및 유어낚시터 조성, 수산자원조성등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	5,000	1,000	1,000	1,000	2,000
국 비	2,500	500	500	500	1,000
시 도 비	500	100	100	100	200
시군구비	2,000	400	400	400	800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2009. 11. 25 ~ 2010. 12. 31 기본계획수립 용역

○ 어류용 어초 13기, 패조류용 어초 426개 조성, 수산자원 조성 등

□ 향후계획

○ 어초시설, 수산자원조성, 수중테마공원 조성 등

○ 사업비 20억원(국비 10, 도비 2, 시비 8)

사업명

청정해수 공급시설 설치

담당자

수산진흥과 김기창(☎270-2764)

□ 사업목적 및 필요성

○ 죽도시장 어판장 및 활선어 판매상가에 안정적인 해수 공급으로

청결하고 위생적인 안전한 수산물 판매 및 소득증대

□ 사업개요

○ 기  간 : 2010년 ~ 2015년 (6년)

○ 위  치 : 포항수협 죽도위판장, 신축 활어위판장

○ 사업량 : 관로 3.4km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,000	1,000	1,000	2	1,000
국 비
시 도 비	400	200			200
시군구비	1,200	600			600
지 방 채
민간자본	400	200			200
기 타	1,000		1,000	2

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 66%)

○ 송수관로 L=3.4km

□ 향후계획

○  수원공 보강 1식

사업명

과메기산업화 가공단지 조성

담당자

수산진흥과 김창식(☎270-2857)

□ 사업목적 및 필요성

○ 과메기를 생산·판매·유통·체험관광의 클러스터를 통한 부가가치 증대로

고용창출과 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2009년 ~ 2015년 (7년)

○ 위 치 : 포항시 남구 구룡포읍 구룡포항 및 특구일원

○ 규 모 : 부지면적 25,662㎡(문화거리,냉동공장, 연구센터 및 홍보관 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  38,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	38,000	20,800	4,200	4,300	8,700
국 비	19,000	10,400	2,100	2,200	4,300
시 도 비	5,700	3,100	600	600	1,400
시군구비	13,300	7,300	1,500	1,500	3,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 생산기반 시설 및 과메기 문화거리 조성 : 75억원

○ 과메기 폐수 처리시설(구룡포 하수처리장 시설개선 1개소) : 28억원

○ 가공공장 및 냉동창고 건립(1동, 5,698㎡) : 105억원

○ 과메기 연구센터 및 홍보관 건립 설계 및 착공 : 156억원

□ 향후계획

○ 2015년 과메기 연구센터 및 홍보관 건립 준공 및 판매장 건립(16억원)

사업명

복합낚시공원 조성 사업

담당자

수산진흥과 김기창(☎270-2762)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어촌의 자연 환경,생활문화를 체험하기 위해 어촌을 찾는 도시민들에게

관광기반시설을 조성하여 쾌적한 여가 공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2009. 1 ~ 2012. 12

○ 위 치 : 포항시 남구 구룡포읍 장길리 일원

○ 규 모 : 낚시터, 자원조성, 전망대, 해안산책로, 어촌생태 체험장 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,000 백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	12,000	7,800	2,100	2,100	-
국 비	6,000	3,900	1,050	1,050	-
시 도 비	1,800	1,170	315	315	-
시군구비	4,200	2,730	735	735	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 82.5%)

○ 안내센터 건립 1동(592㎡), 진입도로 개설 L=176m, 주차장설치(44대)

○ 전망대 진입로 L=160m, 산책로 L=251m, 잔디공원 L=80m

○ 보릿돌 연결교량 L=200m, 정자 1식

○ 전망대설치 A=190㎡, 전망대 부속건물 A=373㎡

○ 군부대 호미곶초소 대체시설 1식

□ 향후계획

○ 조경시설 1식, 쉼터조성, 부대시설 보강 1식

사업명

북구장애인종합복지관 건립

담당자

노인장애인복지과 박충락(☎270-2954)

□ 사업목적 및 필요성

○ 북부지역에 장애인종합복지관을 추가 건립하여 이용 장애인의

불편해소 및 다양한 프로그램 운영으로 장애인 복지 욕구 충족

□ 사업개요

○ 기 간 :  2011. 1 ～ 2014. 11

○ 위 치 : 포항시 북구 새천년대로 1486 외 17필지

○ 규 모 : 부지9,150㎡, 지하1층/지상3층, 연면적 2,988.48㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  7,958백만원(국비 795, 도비 1,500, 시비 5,663)

(단위: 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	7,958	316	2,639	5,003
국 비	795	316	479	0
시 도 비	1,500		783	717
시군구비	5,663		1,377	4,286
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  70%)

○ 2012. 12월 : 건축공사 계약 및 착공

○ 골조공사 완료 및 내부공사 진행중

□ 향후계획

○ 2014. 8~ 9월 : 수탁운영 법인 공모 및 위․수탁 협약 체결

○ 2014. 12월 : 개관

사업명

충혼탑 건립

담당자

주민복지과 신희란(☎270-2919)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 충혼탑의 노후화 및 봉안실 누수 등에 따라 순국선열과 호국영령들의

위패를 새로이 모시기 위한 충혼시설을 건립함으로써 시민들의 호국

정신 함양 및 국가유공자 유족들의 자긍심 고취

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ~ 2013. 9월

○ 위 치 : 포항시 북구 덕수동 산4-3

○ 규 모 : 충혼탑 1식(H=21.5m), 위패봉안실(248.28㎡)

관리실(101.58㎡), 참배광장(34.2m×25.0m)

부조 1명, 군상(2식, 6인상), 전시시설 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,511백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,511	1,959	1,552	0
국 비
시 도 비	145		145
시군구비	2,931	1,959	972
지 방 채
민간자본
기타(교부세)	435		435

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2013. 9. 3 충혼탑 건립 준공

□ 향후계획

○ 충혼탑 및 주변시설 관리운영을 위한 필수 인력 1명 채용

사업명

구룡포청소년수련원 증축

담당자

여성가족과 이동삼(☎270-3053)

□ 사업목적 및 필요성

○ 1995년 건물로 편의시설 및 숙박시설 부족과 학교별 1개 학년(300~400명)의       동시 수용 불가로 시설 이용 불편

○ 다목적체육관이 없어 우천시 및 겨울철 청소년 프로그램 운영 불가로 이용률 저조

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 1. 1 ~  2016. 6. 31

○ 위 치 : 포항시 남구 명월길 51

○ 규 모 :  2,575.53㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :   6,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	6,000	-	70	2,930	3,000
국 비	3,000		38	1,462	1,500
시 도 비
시군구비	3,000		32	1,468	1,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 지방재정 투용자 심사 : 2012. 3. 7

○ 중기지방재정계획 반영 : 2012. 10. 4

○ 실시설계 완료 : 2014. 3. 24

○ 공사 착공 : 2014. 6. 9

□ 향후계획

○ 해송관(283㎡ 8실 60명) 철거 : 2014. 8월

○ 공사준공 및 시설운영 : 2016. 6월

□ 사업변경 내역

○  사업규모 : 당초 1,800㎡/변경 2,575.53㎡

○  총사업비 : 당초 50억원/ 변경 60억원

○ 사업기간 : 당초 2013 ~ 2014년/ 변경 2013 ~ 2016년

※ 변경사유 : 다목적체육관 건립에 따른 면적 및 예산 증가

사업명

형산 생태유수지 조성사업

담당자

환경관리과 김성현(☎270-3114)

□ 사업목적 및 필요성

○ 유수지활용 비점오염저감

□ 사업개요

○ 기 간 :  2012.01 ~2015.12

○ 위 치 :  포항시 남구 상도동 498-1

○ 규 모 :  유수지 A=46,700㎡(31,300㎥/일 처리)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,206백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	8,206	200	1,405	3,167	3,434
국 비	4,103		719	1,615	1,769
시 도 비	1,231		215	484	532
시군구비	2,872	200	471	1,068	1,133
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 37%)

○ J.S.P 그라우팅 및 폐토사 처리

○ 사토정리

□ 향후계획

○ 구조물공

○ 조경 및 전기 시설

사업명

공공재활용 기반시설 설치사업

담당자

청소과 김우현(☎270-3164)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활폐기물 재활용률 향상으로 처리비 절감 및 매립장 사용기간 연장

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011.01 ~ 2013.04

○ 위 치 : 포항시 남구 호동 65번지 일원

○ 규 모 : 재활용 선별처리시설 60톤/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,732백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	7,732	6,732	1,000
국 비	2,160	1,509	651
시 도 비	400	200	200
시군구비	5,172	5,023	149
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2011.09 : 부지보상 및 실시설계

○ 2011.12~2013.04 : 착공, 설치완료, 종합시운전 및 준공

○ 2013.01~ : 위탁운영 시행(포항시 시설물관리공단)

□ 사업변경 내역

○ 건축면적 : 2,066.55㎡ ⇒ 2,465.34㎡

○ 연 면 적 : 2,417.77㎡ ⇒ 2,841.62㎡

사업명

한전~남부서간 도로(대2-2)개설

담당자

건설과 정병조(☎270-3423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로기반시설 확충으로 주민생활편익 제공

○ 도로신설로 지역주민들의 교통소통 원활

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008 ~ 2016

○ 위 치 : 남구 상도동 한전 앞 ～ 남부경찰서 앞

○ 규 모 : 도로개설 L=0.48㎞(B=15m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	14,000	2,230	2,000	5,000	4,770
국 비
시 도 비
시군구비	14,000	2,230	2,000	5,000	4,770
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 괴동선(임시선) 지반개량 및 선로부설 L=918m

※ 상도도시개발지구에서 반폭 개설 L=0.46km, B=15m

○ 도로 개설 L=0.48km, B=15m

□ 향후계획

○ 도로 개설 L=0.48km, B=15m

사업명

신광~흥해 매산리간 도로 확포장

담당자

건설과 김민술(☎270-3284)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로기반시설 확충으로 주민생활편익 제공

○ 도로확장으로 지역주민들의 교통소통 원활

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010 ~ 2020

○ 위 치 : 북구 신광면 사정리 ~ 흥해읍 매산리

○ 규 모 : 도로확포장 L=3.84km, B=16.5m, 토지보상 49,107㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기 투 자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	20,000	500	1,000	1,000	17,500
시 도 비	100	100	0	0	0
시군구비	19,900	400	1,000	1,000	17,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 12%)

○ 토지보상 37,688㎡

□ 향후계획

○ 토지보상 11,419㎡

○ 도로확포장 L=3.84km, B=16.5m

사업명

청림동 도시계획도로(중1-23) 개설

담당자

건설과 오성훈(☎270-3285)

□ 사업목적 및 필요성

○ 철강공단(청림지구) 물동량 수송을 위해 주간선도로 연결도로 필요

○ 지역주민 교통소통 및 주민생활편익을 위해 도로 확충 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 1998 ~ 2013

○ 위 치 : 남구 청림동

○ 규 모 : 도로개설 L=0.78km, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,217백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기 투 자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	6,217	4,700	1,517	0	0
시 도 비	2,100	1,300	800	0	0
시군구비	4,117	3,400	717	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 도로개설 L=0.78km, B=20m

사업명	한신공영~이인리간 도로(대3-27)개설	담당자	건설과 이원중(☎270-3424)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 포항국도대체우회도로의 이인IC와 우현동, 흥해읍 이인리를 연결하는 도로로서 ○ 신항만 및 공단지역의 물동량수송으로 물류비용 절감 ○ 새천년대로등 기존도로의 차량분산으로 교통소통 기여 ○ KTX 포항신역사 연결도로로 이용객들의 교통편의 제공 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2012~2020 ○ 위 치 : 북구 우현동 ～ 흥해읍 이인리 ○ 사업규모 : L=2.74㎞(B=25.0m), 편입토지 132,384㎡ □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 28,700백만원(시도비 13,900, 시군구비 14,800) ○ 지금까지 집행액 : 2,253백만원 ○ 향후 소요액 : 26,447백만원 □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%) ○ 총괄 발주(1구간) L=260m ○ 편입토지 보상 □ 향후계획 ○ 실시설계용역 완료 ○ 잔여구간 총괄 발주 ○ 편입토지 보상

사업명

흥해 성곡 도시계획도로(중1-58) 개설

담당자

건설과 김영환(☎270-3283)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로기반시설 확충으로 주민생활편익 제공

○ 도로확장으로 지역주민들의 교통소통 원활

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010 ~ 2018

○ 위 치 : 북구 흥해읍 성곡리 ~ 북구 창포동

○ 규 모 : 도로확포장 L=2.62km, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기 투 자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	29,000	0	203	0	28,797
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	29,000	0	203	0	28,797

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

○ 실시설계용역 완료

□ 향후계획

○ 도로개설 L=2.62km, B=20m

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
사 업 량	L=0.85km	L=2.62km
총사업비	74억원	290억원
사업기간	2010 ~ 2012	2010 ~2018

사업명

대송 도시계획도로(중1-17) 개설

담당자

건설과 오성훈(☎270-3285)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로기반시설 확충으로 공단 물동량 수송 원활

○ 지역주민들의 교통소통 원활 및 주민생활편익 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010 ~ 2018

○ 위 치 : 남구 신기동삼거리 ~ 대송면 송동리

○ 규 모 : 도로개설 L=2.1km, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기 투 자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	22,000	5,300	2,093	700	13,907
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	22,000	5,300	2,093	700	13,907

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 37%)

○ 도로개설 L=1.25km, B=20m

□ 향후계획

○ 도로개설 L=0.85km, B=20m

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
사업기간	2010 ~ 2015	2010 ~2018

사업명

보경사 군립공원 진입도로 확포장

담당자

건설과 김민술(☎270-3284)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시기발시설 확충으로 주민생활편익 제공

○ 기존도로 노폭 협소로 인한 지역주민들 교통사고 위험 해소 및

관광성수기 교통정체 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010 ~ 2018

○ 위 치 : 북구 송라면 광천리 ~ 중산리

○ 규 모 : 도로확포장 L=4.2km, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기 투 자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	7,000	3,200	787	600	2,413
시 도 비	3,506	1,600	400	300	1,206
시군구비	3,494	1,600	387	300	1,207

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 66%)

○ 도로확포장 L=1.94km, B=11m

□ 향후계획

○ 도로확포장 L=2.26km, B=11m

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
사 업 량	L=4.2km, B=20m	L=4.2km, B=11m
총사업비	280억원	70억원
사업기간	2010 ~ 2013	2010 ~2018

사업명

연일 오천리 도시계획도로(중1-12) 개설

담당자

건설과 김영환(☎270-3283)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기간 미집행 도시계획사업의 추진으로 민원 해소

○ 도시기반시설 확충에 따른 지역 균형개발 촉진 및 숙원사업해결

□ 사업개요

○ 기 간 : 1996 ~ 2015

○ 위 치 : 남구 연일읍 생지리 ~ 오천리

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.51km, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,700백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기 투 자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	11,700	8,500	1,390	800	1,010
시 도 비	800	800	0	0	0
시군구비	10,900	7,700	1,390	800	1,010

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 92%)

○ 도로개설 L=1.19km, B=20m

□ 향후계획

○ 도로개설 L=0.32km, B=20m

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
사 업 량	L=1.43km	L=1.51km
총사업비	140억원	117억원
사업기간	1996 ~ 2012	1996 ~2015

사업명	오천 세계리 남문~장승백이간 도로개설	담당자	건설과 이원중(☎270-3424)
□ 필요성 및 기대효과 ◦ 영일만대로의 세계IC와 조성 완료된 문덕구획정리지구, 원동구획정리지구를 연결하는 간선 도로로서 영일만항 및 철강공단 지역의 물동량 수송 원활로 물류비용 절감 ◦ 군부대 훈련차량으로 인한 정체 해소 및 오천읍, 장기면 주민 교통편의 제공 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2010~2013 ○ 위 치 : 남구 오천읍 세계리 ○ 사업규모 : L=2.0㎞(B=30m), 편입토지 39,300㎡ □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 11,200백만원 (국비 5,600 시도비 560, 시군구비 5,040) ○ 지금까지 집행액 : 11,200백만원 □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%) ○ 도로개설 완료 L=2.0km

사업명

흥해 성내 도시계획도로(중1-99) 개설

담당자

건설과 김민술(☎270-3284)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기간 미집행 도시계획사업의 추진으로 민원 해소

○ 도시기반시설 확충에 따른 지역 균형개발 촉진 및 숙원사업해결

□ 사업개요

○ 기 간 : 2006 ~ 2016

○ 위 치 : 북구 흥해읍 성내리

○ 규 모 : 도로확포장 L=0.4km, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,200백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기 투 자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	8,200	4,400	484	500	2,816
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	8,200	4,400	484	500	2,816

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 66%)

○ 도로개설 L=0.24km, B=20m

□ 향후계획

○ 도로개설 L=0.16km, B=20m

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
사업기간	2006 ~ 2012	2006 ~2016

사업명

기계 현내리 도시계획도로(중2-78) 개설

담당자

도로과 소병현(☎270-3435)

□ 사업목적 및 필요성

○ 면소재지내 도로로 주변 교통정체 해소 및 주민불편 민원 해소
○ 장기미집행 도시계획시설 조기 개설 및 지역경기 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2017

○ 위 치 : 포항시 북구 기계면 현내리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=310m, B=15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,600백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	2,600		300	300	2,000
국 비
시 도 비	1,050			50	1,000
시군구비	1,550		300	250	1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2013년 : 실시설계 및 보상협의

○ 2014년 : 보상협의(보상률 10%)

□ 향후계획

○ 2015 ~ 2016 : 보상협의

○ 2017년 : 도로개설 L=310m

사업명

신광 기일리(리도213) 도로확포장

담당자

도로과 이상협(☎270-3433)

□ 사업목적 및 필요성

○ 좁은 도로로 인해 차량교행 불가

○ 도로확장으로 안전사고 방지 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010 ~ 2016

○ 위 치 : 포항시 북구 신광면 기일리

○ 규 모 : 도로 확포장 L=3.43km(B=7m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,500백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	6,500	1,650	1,600	600	2,650
국 비
시 도 비	3,075	650	800	300	1,325
시군구비	3,425	1,000	800	300	1,325
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  50%)

○ 2013 까지 : 도로 확포장 L=3.43km중 L=1.96km 완료

○ 2014 추진 : 도로 확포장 L=0.36km

□ 향후계획

○ 2015 ~ 2016 : 도로 확포장 L=1.11km

사업명

흥해 약성선(농도301호)도로 확포장

담당자

도로과 이상협(☎270-3433)

□ 사업목적 및 필요성

○ 좁은 도로로 인해 차량교행 불가

○ 도로확장으로 안전사고 방지 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2015

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 약성리 ~ 흥안리

○ 규 모 : 도로 확포장 L=2.2km(교량개체 L=0.165km 포함)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,200백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	6,200		2,200	2,000	2,000
국 비	3,100		1,100	1,000	1,000
시 도 비
시군구비	3,100		1,100	1,000	1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 2013 까지 : 도로 확포장 L=1.81km 완료

○ 2014 추진 : 교량 하부공 설치 및 보호공 1식

□ 향후계획

○ 2015 : 교량상부공 및 접속도로 1식

사업명

연일 자명리(중2-175)도로개설

담당자

도로과 김용덕(☎270-3445)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 확장개설로 지역경기 활성화 및 교통소통 원활

○ 영일만도로 개설에 따른 통행량 증가로 인한 기반시설 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. ~  2018.

○ 위 치 : 남구 연일읍 유강리~자명리 지내

○ 규 모 : 도로개설 L=3,100m, B=15~20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :   9,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	9,000	200	1,000	0	7,800
국 비
시 도 비	4,500	100	500	0	3,900
시군구비	4,500	100	500	0	3,900
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10%)

○ 2012년 실시설계용역 완료

○ 2013년 토지보상 추진 (보상률 20%)

□ 향후계획

○ 토지보상 추진 및 도로개설

- 1차(지곡삼거리~자명초) L=460m, B=20m

- 2차(자명초~유강철도건널목) L=2,640m, B=15m

사업명

효곡동 도시계획도로(중3-133) 개설

담당자

도로과 박진섭(☎270-3444)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설을 통한 주민 통행 불편 해소 및 지역경기 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011년 ~ 2017년

○ 위 치 : 포항시 남구 효자동 일원

○ 규 모 : 도시계획도로개설 L=1,400m, B=13.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,200백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,200	200	1,000	460	1,540
국 비
시 도 비	1,600	100	500	230	770
시군구비	1,600	100	500	230	770
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 보상추진 80%)

○ 2011.  .  : 기본 및 실시설계 완료

○ 2013까지 : 보상추진

○ 2014.  .  : 보상추진 ⇒ 현재 보상율 80%(12필지/15필지)

□ 향후계획

○ 보상완료 및 도로개설사업 시행

사업명

운제산 산림욕장 조성

담당자

도시녹지과 이선경(☎270-3254)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수려한 자연경관과 오어사 신라천년 고찰이 자리하고 있는 운제산에

해병과 시민이 함께하는 산림휴양시설 조성 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012~2015(3년)

○ 위 치 : 포항시 남구 대송면 대각리 산105번지 일원

○ 규 모 : 9.6ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	4,000	50	1,000	500	2,450
국 비	1,500			200	1,300
시 도 비	450			60	390
시군구비	2,050	50	1,000	240	760
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 운제산 산림욕장 조성승인(경상북도, ‘13. 3. 22)

○ 기본계획완료 및 실시설계 발주

□ 향후계획

○ 2014.9~.12 : 주차장 조성, 진입로, 탐방로 조성

○ 2015.2~12. :  방문자 안내소, 화장실 습지생태관찰원 조성완료 후 준공

□ 사업변경 내역

○ 2015년 계획 5억 → 4억(지특 국비2억, 지방비2억)확보

사업명

철기농경문화 테마공원조성

담당자

친환경농정과 정병훈(☎270-5444)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기계 봉좌지구의 향토자원을 토대로 농경철기문화 테마공원을 조성하여

농촌주민과 도시민에게 자연친화적인 휴식·레저·체험공간을 제공함으로써

도농교류 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2016 (4개년)

○ 위 치 : 포항시 북구 기계면 봉계리(여제계 숲) 일원

○ 규 모 : 28,991㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	10,000		400	1,000	8,600
국 비	5,000		200	500	4,300
시 도 비	1,500		60	100	1,340
시군구비	3,500		140	400	2,960
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)

○ 2013.02.14. 한국농어촌공사 포항·울릉지사와 위(수)탁 계약체결

○ 2014.01.27./04.14. 기본계획 승인 협의중(경북도)

□ 향후계획

○ 기본 및 시행계획 승인에 따른 년차별 사업 추진

사업명

포항청초롬광역친환경농업단지조성

담당자

친환경농정과 이상범(☎270-2683)

□ 사업목적 및 필요성

○ 저비용 고효율의 광역친환경단지 조성으로 포항농업의 신성장 동력 확보

○ 친환경농산물의 안정적 생산 및 유통체계 구축으로 농산물 수입개방 대응

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011 ~ 2014(4년간)

○ 위 치 : 포항시 북구 4개면(기계, 죽장, 기북, 신광면)

○ 규 모 : 농축산순환자원화센터 외 4개 친환경농업기반시설 설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,056백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	10,056	690	1,188	8,178
국 비	3,000	190	415	2,395
시 도 비	1,500	95	207	1,198
시군구비	3,500	222	329	2,949
지 방 채
민간자본	2,056	183	237	1,636
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 친환경농업 교육·홍보관 준공(531.9㎡/지상2층)

○ 미확보 사업부지 확보

□ 향후계획

○ 채소APC 신축(1,095.93㎡/지상2층), 과일APC 개보수(3,845.37㎡/지상2층)

○ 농축산순환자원화센터(1개소), 친환경벼저장고(1,200톤규모)

□ 사업변경 내역

○ 당초 투융자 심사시 대비 사업비(자부담) 56백만원 증액

- 친환경농업교육관 신축시 56백만원 사업주체 추가 부담

사업명

뱃머리마을 도시계획도로(중1-125) 확장

담당자

업무시설과 강호철(☎270-5254)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공공복지시설 조성에 따른 진입도로 확장으로 대형버스의 원활한 통행        및 주민통행불편해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 7 ~ 2014. 8

○ 위 치 : 포항시 남구 상도동 188-2번지 일원

○ 규 모 : 도로확장 L=350m, B=24m, 철도횡단시설 확장(B=10m→24m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,010백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	5,010		3,530	1,480
국 비
시 도 비
시군구비	5,010		3,530	1,480
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 철도횡단시설 확장(철도공사 분) 구조물 완료 및 하로판형교 철거 중(90%)

○ 연결도로 확장 U-Type 구조물 시공완료(90%)

□ 향후계획

○ 2014. 8월중 공사 준공

사업명

포항운하 건설

담당자

업무시설과 이도형(☎270-5255)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동빈내항과 형산강간 포항운하를 건설 동비내항 정체수역의 수질개선

○ 지역상권 회복과 도시재생, 관광활성화 등 환경도시 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2006 ～ 2013

○ 위 치 : 남구 송도·해도, 북구 죽도동 일원

○ 규 모 : 운하건설 L=1.3km(유원지 96,455㎡, 폭원 15∼22m, 수심 1.7∼2.2m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 140,000백만원(국비 12,209, 도비 2,346, 시비 15,445, 기타 110,000)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	140,000	132,071	7,929
국 비	12,209	10,209	2,000
시 도 비	2,346	2,089	257
시군구비	15,445	12,773	2,672
지 방 채
민간자본
기 타	110,000	107,000	3,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

○ LH공사 사업시행 세부협약 체결(’09. 4.10)

○ 도시계획시설 사업 실시계획인가(’09. 6.29)

○ 보상완료 : ’10. 5. 18 ∼ ’12. 5. 9

○ 포항운하 건설공사 착공(’12. 5. 9)

○ 포항운하 준공(’14. 1.28)

□ 향후계획

○ 세계 4대 미항으로서의 포항운하 적극 홍보

사업명

장량공공하수처리시설 증설

담당자

업무시설과 정현주(☎270-5253)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장성, 양덕지구 급속한 인구증가로 장량하수처리장 증설이 시급함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 4 ∼ 2016. 12

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 신덕로 34-34일원

○ 규 모 : 처리용량 15,000㎥/일→21,000㎥/일(6,000㎥/일 증설)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 27,900백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	27,900	-	1,200	600	26,100
국 비	7,700			500	7,200
시 도 비	800			100	700
시군구비	19,400		1,200		18,200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계중)

○ 기본 및 실시설계 중으로 설계VE 시행중(80%)

□ 향후계획

○ 경상북도 건설기술 심의

○ 환경부 국비지원 재원협의 후 실시설계 완료(12월 경)

○ 공공수도 설치인가(경상북도) 후 공사발주(‘15. 2월)

사업명

하수처리수 재이용사업

담당자

하수재생과 정요찬 (☎270-5283)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하수처리장 방류수를 공업용수로 재이용하여 부족한 수자원 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008 ~ 2014

○ 위 치 : 포항시 남구 상도동 125 (포항하수처리장 내)

○ 규 모 : 처리용량 100,000톤/일, 관거 11.71㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,40,004백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	140,004	56,774	58,791	24,439
국 비	75,602	24,914	33,161	17,527
시 도 비	3,092	1,272	1,236	584
시군구비	5,308	1,588	3,176	544
지 방 채
민간자본	56,002	29,000	21,218	5784
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 99%)

○ ‘08.05.07 : 환경부 하수처리수 재이용사업 추진 확정

○ ‘11.08.18 : 실시협약체결(포항시, 주식회사피워터스)

○ ‘12.02.01 : 재이용사업 공사 착공

○ ‘13.09.24 : 지상철골공사 시공

○ ‘14.05.01 : 종합시운전 실시

□ 향후계획

○ ‘14.07.31 : 재이용시설 준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경 : 물가상승율(3.5%) 반영 조정

구분	총사업비	국비	도비	시비	민자	비고
당초	125,843	67,955	3,775	3,775	50,338
변경	140,004	75,602	4,200	4,200	56,002
증감	14,161	7,647	425	425	5,664	물가상승률 반영

사업명

이동배수지 건설

담당자

상수도과 김현우(☎270-5353)

□ 사업목적 및 필요성

○ 배수지 건설을 통한 대이동 및 양학동 급수구역의 안정적 수돗물 공급        및 시가지 배수구역의 수요조절 원활 목적

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 ~ 2015년

○ 위 치 : 남구 대이동 및 양학동 일원

○ 규 모 : 배수지 V=11,000㎥, 송수펌프동 1개소, 송배수관로 L=2.9km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	11,000	1,581	2,000	4,000	3,419
국 비
시 도 비
시군구비	11,000	1,581	2,000	4,000	3,419
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 36%)

○ 배수지 부지정비 및 진입도로 개설, 배수지 구조물 1식

○ 송배수관로 L=0.5km, 토지보상 1식(3필지)

□ 향후계획

○ 송배수관로 L=2.5km, 가압시설 개량 1식

○ 배수지 V=11,000㎥

사업명

상수도 블록화시스템 구축사업

담당자

상수도과 최영훈(☎270-5373)

□ 필요성 및 기대효과

○ 상수도 유수율을 제고하여 만성적인 공기업 경영수지를 개선하고, 누수

및 수질오염 사고시 단수구역 최소화로 주민불편을 해소하고자 하며,

○ 수돗물 원가절감으로 공기업 경영개선 및 깨끗한 수돗물의 안정적 공급

․ 목표 유수율 : ‘11년 62% → ’15년 82%

□ 사업개요

○ 기간 : 2012 ~ 2015

○ 위치 : 포항시내 급수구역

○ 시공사 : 용역(도화엔지니어링외 2개사), 공사(두류종합건설(주))

○ 사업규모 : 포항시내 급수구역 44블록 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,100백만원(시비)                        (단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	11,100	3,100	4,950	1,050	2,000
국 비
시 도 비
시군구비	11,100	3,100	4,950	1,050	2,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 용역 50%, 공사 15%)

○ 블록구축 용역 시행 중(블록구역 고립 확인, 격점공사시행 확인)

○ 블록구축 공사 시행 중(확인굴착 및 격점공사 시행 중)

□ 향후계획

○ 격점공사를 통한 블록구역 고립 및 유량계실 설치공사

○ 유량계실 내 유량계 및 각종 밸브 설치 예정

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 :  당초 2012~2014 → 변경 2012~2015

11-2. 지방채 발행사업

우리 포항시에서 ‘13년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
포항운하건설	140,000	2,000	12,209	2,346	13,445	110,000	2,000	100
뱃머리마을건립	29,875	10,000	-	-	19,875	-	10,000	100
뱃머리마을 종합개발사업	38,922	15,000	-	500	22,222	1,200	15,000	100

▸ (대상사업) 지방채 발행사업 중 2013년에 추진한 사업

▸ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

▸ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

11-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

포항운하 건설

담당자

업무시설과 이도형(☎270-5255)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동빈내항과 형산강간 포항운하를 건설 동비내항 정체수역의 수질개선

○ 지역상권 회복과 도시재생, 관광활성화 등 환경도시 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2006 ～ 2014

○ 위 치 : 남구 송도·해도, 북구 죽도동 일원

○ 규 모 : 운하건설 L=1.3km(유원지 96,455㎡, 폭원 15∼22m, 수심 1.7∼2.2m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 140,000백만원(국비 12,209, 도비 2,346, 시비 15,445, 기타 110,000)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	140,000	132,071	7,929	-	-
국 비	12,209	10,209	2,000
시 도 비	2,346	2,089	257
시군구비	13,445	10,773	2,672
지 방 채	2,000	2,000	-
민간자본
기 타	110,000	107,000	3,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ LH공사 사업시행 세부협약 체결(’09. 4.10)

○ 도시계획시설 사업 실시계획인가(’09. 6.29)

○ 보상완료 : ’10. 5. 18 ∼ ’12. 5. 9

○ 포항운하 건설공사 착공(’12. 5. 9)

○ 포항운하 준공(’14. 1.28)

□ 향후계획

○ 세계 4대 미항으로서의 포항운하 적극 홍보

사업명

뱃머리마을 건립

담당자

업무시설과 조용주(☎054-270-5233)

□ 사업목적 및 필요성

○ 문화․복지기반시설 등의 확충으로 개성화 ․ 다양화 ․ 고도화된 수요자의

욕구 충족 및 주민 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기    간 : 2008 ～ 2013. 7. 20

○ 위    치 : 포항시 남구 상도동 111번지 일원

○ 사업규모 : 부지 54,525㎡, 연면적 12,827㎡ (지하 1층, 지상4층)

(어르신․주민복지․여성․자원봉사자회관, 청소년수련관, 도서관)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,875백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	29,875	20,475	9,400	-	-
지 방 채	10,000	10,000	-
국 비	-	-	-
시 도 비	-	-	-
시군구비	19,875	10,475	9,400
기 타	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2004.  6. 21 : 뱃머리마을 종합개발 타당성조사 용역

○ 2005. 10.  4 : 포항 도시계획시설사업결정(변경)

○ 2009. 12. 16 : 도시계획변경 결정

○ 2010.  6. 29 : 기본 및 실시설계

○ 2010. 12.  7 : 공사 착공

○ 2013.  7. 20 : 공사 준공

사업명

뱃머리마을 종합개발사업

담당자

업무시설과 정미화(☎054-270-5237)

□ 사업목적 및 필요성

○ 포항 하수처리장(2단계)증설로 인한 지역주민의 불만해소

○ 낙후지역에 공공복지시설 조성으로 주거 생활환경 개선

□ 사업개요

○ 기    간 : 2004 ～ 2013 (10년)

○ 위    치 : 포항시 남구 상도동 111번지 일원

○ 사업규모 : 토지보상 400필지 155,775㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 38,922백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	38,922	38,574	348	-	-
지 방 채	15,000	15,000	-
국 비	-	-	-
시 도 비	500	500	-
시군구비	22,222	21,874	348
기 타	1,200	1,200	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2005. 07. : 토지보상 46,310㎡

○ 2008. 06. : 토지보상 37,176㎡

○ 2010. 02. : 토지보상 53,548㎡

○ 2011. 12. : 토지보상 9,497㎡

○ 2012. 06. : 토지보상 7,394㎡

○ 2013. 07. : 토지보상 1,850㎡

○ 2013. 12. : 사업종료

11-3. 민간투자사업

우리 포항시에서 ‘13년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’12년까지 부담액	’13년 부담액	’14년 이후 부담 예정액
BTL	‘07하수관거 정비사업	포항맑은물(주)	114,700	-	-	312,446	‘14.4.13~ ‘34.4.12
	‘09하수관거 정비사업	포항맑은물길(주)	68,300	-	-	169,877	‘14.7.1~ ‘34.6.30
	‘10하수관거 정비사업	청정포항(주)	88,900	-	-	210,707	‘16.4.1~ ‘36.3.31
BTO	포항하수처리장	포항수질환경(주)	228,949	68,100	14,335	146,514	‘07.11.1~ ‘22.10.31
	장량하수처리장	푸른장량(주)	103,157	6,311	4,346	92,500	‘11.1.1~ ‘30.12.31
	청하․기계하수처리장	포항엔텍(주)	81,046	4,100	12,546	64,400	준공후 20년 운영
	포항하수처리수 재이용사업	㈜피워터스	84,002	27,774	37,573	18,655	〃
	생활폐기물 에너지화사업	(가칭)포항이앤이 [포스코,포스코건설]	129,215	6,795	-	122,420	준공후 15년 운영

▸ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2013년까지는 집행액(결산기준), 2014년 이후는 추정액

▸ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

11-3-1. 개별 민간투자사업 현황

사업명

‘07BTL 하수관거 정비사업

담당자

하수도과 권순호(☎270-5422)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사회기반시설의 조기 확충 및 연안오염 방지 둥 수질개선

□ 사업개요

○ 기간 : 2009 ~ 2014

○ 위치 :   북부,중부,학잠,대잠,남부처리분구

○ 민간사업자 : 포항 맑은물(주)[SK건설사외 5개사]

○ 총사업비 : 1,147억원

○ 사업규모 : L=101km

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(임대료 및 운영비, 기간 : ‘14.4.13~’34.4.12)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	312,448			10,187	302,261
국 비	200,323			6,677	193,646
시 도 비
시군구비	112,125			3,510	108,615
기 타

□ 추진단계(운영중)

○ 2014. 4. 13 ~ 2034. 4. 12까지 민간사업자 운영

○

□ 향후계획

○ 향후 20년간 임대료 및 운영비 지급

사업명

‘09BTL 하수관거 정비사업

담당자

하수도과 권순호(☎270-5422)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사회기반시설의 조기 확충 및 연안오염 방지 둥 수질개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011~2014

○ 위 치 : 남부처리분구(죽도,용흥,대잠동 일원)

○ 민간사업자 : 포항 맑은물길(주)[SK건설사외 6개사]

○ 총사업비 : 683억원

○ 사업규모 : L=39km

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(임대료 및 운영비, 기간 : ‘14.7.1 ~ ’34.6.30)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	169,838			4,139	165,699
국 비	107,554			2,689	104,865
시 도 비
시군구비	62,284			1,450	60,834
기 타

□  추진단계(운영중)

○ 2014. 7. 1 ~ 2034. 6. 30까지 민간사업자 운영

□ 향후계획

○ 향후 20년간 임대료 및 운영비 지급

사업명

‘10BTL 하수관거 정비사업

담당자

하수도과 권순호(☎270-5422)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사회기반시설의 조기 확충 및 연안오염 방지 둥 수질개선

□ 사업개요

○ 기간 : 2012~2016

○ 위치 : 남부처리분구(죽도,상대,해도동 일원)

○ 민간사업자 : ㈜청정포항[SK건설사외 4개사]

○ 총사업비 : 889억원

○ 사업규모 : L=48km

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(임대료 및 운영비, 기간 : ‘16.4.1 ~ ’36.3.31)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	210,707				210,707
국 비	133,179				133,179
시 도 비
시군구비	77,528				77,528
기 타

□ 추진단계(공사중)

○ 2012. 6. 1 착공

□ 향후계획

○ 2016. 3. 31 준공예정

○ 2016. 4. 1 ~ 2036.3.31.까지 민간사업자 운영

사업명

포항하수처리장 운영

담당자

하수재생과 박경덕(☎270-5284)

□ 사업목적 및 필요성

○ 민간투자사업(BTO)으로 시행한 민간위탁 운영

□ 사업개요

○ 기 간 : 2007. 11. 1 ~ 2022. 10. 31(15년)

○ 위 치 : 포항시 남구 형산강북로 203 (남구 상도동 125번지)

○ 민간사업자 : 포항수질환경(주)

○ 총사업비 : 228,949백만원

○ 사업규모 : 처리용량 232,000톤/일

□ 재정부담 현황

○ 계약기간 : 2007. 11. 1 ~ 2022. 10. 31(15년)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	228,949	68,100	14,335	13,592	132,922
국 비
시 도 비
시군구비	228,949	68,100	14,335	13,592	132,922
기 타

□ 추진단계

○ 민간위탁 운영중

사업명

장량하수처리장 운영

담당자

하수재생과 박경덕(☎270-5284)

□ 사업목적 및 필요성

○ 민간투자사업(BTO)으로 시행한 민간위탁 운영

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 1. 1 ~ 2030. 12. 31(20년)

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 해안로 681-18 (북구 흥해읍 죽천리 369번지)

○ 민간사업자 : 푸른장량(주)

○ 총사업비 : 103,157백만원

○ 사업규모 : 처리용량 15,000톤/일

□ 재정부담 현황

○ 계약기간 : 2011. 1. 1 ~ 2030. 12. 31(20년)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	103,157	6,311	4,346	3,903	88,597
국 비
시 도 비
시군구비	103,157	6,311	4,346	3,903	88,597
기 타

□ 추진단계

○ 민간위탁 운영중

사업명

청하·기계 하수처리시설 건설

담당자

업무시설과 정현주(☎270-5253)

□ 사업목적 및 필요성

○ 읍·면 지역 하수처리시설 확대를 위해 민간투자사업(BTO)으로 추진

○ 주거환경 개선을 통한 삶의 질 향상 및 연안해역 수질 보전

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008.10 ~ 2016. 3

○ 위 치 : 포항시 북구 청하면, 기계면 일원

○ 민간사업자 : 포항엔텍(주)

○ 총사업비 : 81,046백만원

○ 사업규모 : 청하 1,900㎥/일「관거 56Km」,기계 1,000㎥/일「관거 28Km」

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 사용료 4,085.91원/㎥, 준공 후 20년 운영

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	81,046	4,100	12,546	21,500	42,900
국 비	50,631	3,700	6,131	13,600	27,200
시 도 비	3,286	300	386	900	1,700
시군구비	5,726	100	626	2,000	3,000
기 타	21,403		5,403	5,000	11,000

□ 추진단계

○ 시공중

○ 전체공정율 36%

□ 향후계획

○ 2015년 10월 공사 완료 후 종합시운전

○ 2016년 3월 준공

사업명

포항하수처리수 재이용사업

담당자

하수재생과 정요찬(☎270-5283)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하수처리장 방류수를 공업용수로 재이용하여 부족한 수자원 확보

□ 사업개요

○ 기      간 : 2012. 2. 1 ~ 2014. 7. 31

○ 위      치 : 포항시 남구 상도동 125번지 (포항하수처리장 내)

○ 민간사업자 : (주)피워터스

○ 총 사 업 비 : 125,843백만원 (국 ․ 도 ․ 시비 : 84,002백만원, 민자 : 41,841백만원)

○ 사 업 규 모 : 처리용량 100,000톤/일, 관거 11.71㎞

□ 재정부담 현황

○ 지금까지 재정부담액 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액			부담예정액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	84,002	27,774	37,573	18,655
국 비	75,602	24,914	33,161	17,527
시 도 비	3,092	1,272	1,236	584
시군구비	5,308	1,588	3,176	544
기 타

□ 추진단계

○ 시공중

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경 : 물가상승율(3.5%) 반영 조정

구분	총사업비	국비	도비	시비	민자	비고
당초	125,843	67,955	3,775	3,775	50,338
변경	140,004	75,602	4,200	4,200	56,002
증감	14,161	7,647	425	425	5,664	물가상승률 반영

사업명

생활폐기물에너지화시설사업

담당자

청소과 이동현(☎270-3163)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활폐기물의 장기적 및 안정적 처리로 매립장 사용기간 연장

○ 버려지는 폐기물로부터 가용 에너지를 회수하여 녹색성장 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2009. 2 ~ 2017. 12

○ 위 치 : 포항시 남구 호동 39-3번지 일원

○ 민간사업자 : (가칭)포항이앤이(주)[미래에셋자산운용(주), 포스코건설]

○ 총사업비 : 1,292억원[2009. 2. 2 불변금액 기준]

○ 사업규모 : 전처리시설 500톤/일, 전용보일러시설 270톤/일

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 준공후 15년 운영

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	129,215	6,795	23,292	35,500	57,452
국 비	55,658	6,545	-	5,796	43,317
시 도 비	3,789	250	-	-	3,539
시군구비	-	-	-	-	-
기타(민간)	69,768	6,176	23,292	29,704	10,596

□ 추진단계

○ 시공준비중(중앙민투심의중)

□ 향후계획

○ 2014. 7 : 실시협약 체결 및 사업시행자 지정

○ 2015. 5 : 실시설계 완료

○ 2015. 6 : 실시계획 승인

○ 2015. 7 : 공사착공(공사기간 30개월)

○ 2017.12 : 공사준공 및 운영개시