물류산업육성
13개 과제

시장공약사항 추진상황

공 약 명

영일만항 복합물류단지 조성

관리번호

22

추진부서

해양항만과

협업부서

투자유치담당관, 강소기업육성과,

일자리창출과

사업기간

2012 ~ 2020

소요예산

1,088억원(국비)

□ 공약내용

○ 주변 산업단지 지원 기능 제고와 대북방 물류거점으로 육성

○ 복합물류단지 조성으로 항만 및 지역경제 활성화 기여

※ 항만배후단지 조성사업과 연계 추진

□ 사업개요

가. 사업개요

○ 위    치 : 포항시 북구 흥해읍 우목리 전면 해상

○ 사업기간 : 2012 ~ 2020

○ 사 업 량 : 1,264,248㎡

○ 사 업 비 : 1,088억원(국비)

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	‘14년까지	‘15	‘16	‘17	‘18	‘19년 이후
계	1,088	218	93	100	150	150	377
국 비	1,088	218	93	100	150	150	377
도 비	-	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	-
민자등	-	-	-		-	-	-

□ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추 진 내 용	비 고
’11.12.	배후단지 1-1단계(423천㎡) 조성공사(매립) 착공 (매립 진도율 20%)

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
′14년 12월 현재	218	218	-	-	-

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진
	○

□ 향후계획

○ ’15.12월 : 배후단지 1-1단계(423천㎡) 조성공사(매립) 완료

○ ‘16년 : 배후단지 1-1단계 상부 기반시설(도로, 상․하수도, 전기·통신, 도시가스 등) 설치

○ ’17년 이후 : 배후단지 1-2단계(312,653㎡), 2단계(528,595㎡) 조성 및 기업 등 투자 유치

시장공약사항 추진상황

공 약 명

영일만항 남방파제 및 국제여객부두 조성

관리번호

23

추진부서

해양항만과

협업부서

사업기간

2012 ~ 2020

소요예산

7,326억원(국비)

□ 공약내용

○ 외해(外海)로부터 밀려오는 파랑을 막고 안정성을 확보해 선박의 출입, 정박 및

하역작업을 할 수 있도록 정온도(靜穩度) 유지

○ 환동해권 관광산업 기반 마련 및 새로운 물동량 창출 기여

□ 사업개요

가. 사업개요

《남방파제》

○ 위    치 : 포항시 북구 흥해읍 우목리 전면 해상

○ 사업기간 : 2012 ~ 2020

○ 사 업 량 : 3.24㎞(1단계 1.3㎞, 2단계 1.3㎞, 3단계 0.64㎞)

○ 사 업 비 : 6,783억원(국비)

《국제여객부두》

○ 위    치 : 포항시 북구 흥해읍 우목리 전면 해상

○ 사업기간 : 2015 ~ 2018

○ 사 업 량 : 310m(1선석)

○ 사 업 비 : 543억원(국비)

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	‘14년까지	‘15	‘16	‘17	‘18	‘19년 이후
계	7,326	1,364	273	8	300	300	5,081
국 비	7,326	1,364	273	8	300	300	5,081
도 비	-	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	-
민자등	-	-	-		-	-	-

□ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추 진 내 용	비 고
’13. 6.	남방파제 1단계 1공구(800m) 착공(진도율 90%)
’13. 11.	남방파제 1단계 2공구(500m) 완공
’15. 1.	국제여객부두 축조 예비타당성조사 대상사업 신청(기획재정부)

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
′14년 12월 현재	1,364	1,364	-	-	-

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진
	○

□ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

○ 2012년 일반부두 준공 후 부두공사 중단

- ’15년말 항만배후단지 1-1단계(423천㎡), 남방파제 1단계 1공구(800m) 준공 이후

국제여객부두 축조사업의 예비타당성조사 대상사업 탈락으로 인해  신규로

추진되는 사업이 없어 항만건설 중단사태 발생

- 국제여객부두 축조 시급

나. 해소방안

○ 영일만항 적기 건설의 선결 과제인 국제여객부두 축조 예비타당성 조사 대상

사업 선정을 위해 지역 국회의원에게 당위성 설명 및 중앙부처 지속 건의

□ 향후계획

○ ’15.12월 : 남방파제 1단계 1공구(800m) 준공

○ 국제여객부두 축조 예타 대상사업 선정 시 기본 및 실시설계 용역비 확보, 공사 착공

○ 남방파제 2·3단계(1.94㎞) 축조 등

시장공약사항 추진상황

공 약 명

항로 다변화를 통한 영일만항 활성화

관리번호

24

추진부서

해양항만과

협업부서

사업기간

소요예산

비예산

□ 공약내용

○ 동북아 및 북방물류 거점 항만 도약을 위한 지속적인 성장 동력 마련

○ 신규항로 개설에 따른 물동량 추가 유치로 항만의 안정적 운영 및 대외 경쟁력 확보

□ 사업개요

가. 사업개요

○ 운항 항로

- 3개 항로(동남아, 일본, 러시아)

- 5개국(러시아, 일본, 중국, 말레이시아, 싱가포르)

- 17개항, 주 6항차

○ 추가 개설 항로

- 원양 항로 : 미주, 유럽

- 동남아 항로 : 인도네시아

- 러시아 항로 : 자루비노(블라디보스톡 항로 기 운항)

- 일본 항로 : 하카타

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	‘14년까지	‘15	‘16	‘17	‘18	‘19년 이후
계	-	-	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	-
민자등	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추 진 내 용	비 고
’14. 7.25	∙ 일본 마쯔다자동차 러시아 5만대 수출 달성 기념식

년. 월	추 진 내 용	비 고
’14. 11. 13	∙ 대경권 수출입기업 대상 포트세일 - 아진산업, 상신브레이크, 루셈 등 70개사
’14. 11. 27	∙ 구미 상공인 대상 포트세일
’14. 12. 10	∙ 대구 상공인 대상 포트세일
’14. 12. 22	∙ 영일만항 배후단지 물류단지 건립 MOU 체결
’15. 1~2	∙ 원양항로 개설 협의 3회, 동남아항로 개설 협의 1회 - 포스코와 머스크해운간 협의

나. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진
	○

□ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

○ 대구·경북권 물동량 확보 부진(전체 물동량의 1%)

나. 해소방안

○ 대구·경북권 500여개사 대상 1:1 타깃 포트세일 강화

○ 서울지역 대형 선사 10개사 맨투맨 포트세일

□ 향후계획

○ ’15. 2월 : 원양항로(미주, 유럽) 시범 운항

○ ’15. 4월 : 원양항로(미주, 유럽) 정식 운항

○ ’15. 5월 : 동남아항로(인도네시아) 개설 추진

○ ’15. 6월 : 일본항로(하카타) 개설 추진

시장공약사항 추진상황

공 약 명

울산~포항간 고속도로 조기개통

관리번호

25

추진부서

건설과

협업부서

사업기간

2009 ~ 2016

소요예산

1조 9,917억원

□ 공약내용

○ 포항~울산공단과 항만간 연결로 국토균형개발과 산업경쟁력 제고

○ 동북아 물류허브 기능강화를 위한 국가간선도로망 확충으로 물류비용 절감

□ 사업개요

가. 사업개요

○ 위치 : 울산광역시 범서면 ~ 포항시 남구 오천읍 문덕리

○ 사업기간 : 2009 ~ 2016

○ 사업량 : L=53.7km, B=23.4m (우리시 구간 L=10.74km)

○ 사업비 : 1조 9,917억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	″14년까지	″15	″16	″17	″18	19년 이후
계	19,917	14,887	3,360	1,670
국 비	14,887	8,317	1,357	668
도 비
시 비
도 공	9,575	6,570	2,003	1,002

□ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추 진 내 용	비 고
‘09. 05	타당성조사, 기본 및 실시설계 완료
‘09. 06 ~	공사 착공(공정률 : 전체 76%, 포항구간 86%)

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	도공	비고
′14년 12월 현재	14,887	8,317			6,570

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진
	○

□ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

○ 남경주~동경주 간 양남터널 공사지연(23개월 정도 소요)

나. 해소방안

○ 공법 조정 시행중

□ 향후계획

○ 부분 개통예정일

- 동경주IC~남포항IC 개통(‘15. 12월)

- 울산~남경주IC 개통(‘15. 12월)

- 남경주IC~동경주IC 개통(‘16. 6월)

○ 전구간 개통예정일(‘16. 6월 경)

시장공약사항 추진상황

공 약 명

울산~포항간 동해남부선 복선전철화

관리번호

26

추진부서

건설과

협업부서

사업기간

2003 ~ 2018

소요예산

2조 3,347억원

□ 공약내용

○ 경부고속철도의 연계를 위한 철도망 구축으로 교통편의 제공

○ 동해안 지역개발 촉진 및 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

가. 사업개요

○ 위치 : 울산 ~ 경주 ~ 포항

○ 사업기간 : 2003 ~ 2018

○ 사업량 : 복선전철화 L=76.5km (우리시 구간 3.6km)

○ 사업비 : 2조 3,347억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	″14년까지	″15	″16	″17	″18	19년 이후
계	23,347	12,018	3,762	3,000	4,000	567
국 비	23,347	12,018	3,762	3,000	4,000	567
도 비
시 비
민간 등

□ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추 진 내 용	비 고
‘03. 11	타당성 조사 및 기본계획수립
‘08. 12	노반 실시설계 완료
‘09. 04 ~	공사 착공(공정률 56%)

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민간 등	비고
′14년 12월 현재	12,018	12,018

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진
	○

□ 향후계획

○ KTX노선(경주~포항 구간) 개통(‘15. 3월말)

○ 전 구간 개통예정(‘18. 12월)

○

○

시장공약사항 추진상황

공 약 명

포항~삼척간 동해중부선 철도건설

관리번호

27

추진부서

건설과

협업부서

사업기간

2002 ~ 2018

소요예산

3조 3,785억원

□ 공약내용

○ 환동해권 철도망 구축으로 국가 기간철도망 구축

○ 영일만항 배후산업단지 및 철강공단의 물동량 수송분담 기여

□ 사업개요

가. 사업개요

○ 위치 : 포항 ~ 영덕 ~ 울진 ~ 삼척

○ 사업기간 : 2002 ~ 2018

○ 사업량 : 단선철도건설 L=165.8km (우리시 구간 27.6km)

○ 사업비 : 3조 3,785억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	″14년까지	″15	″16	″17	″18	19년 이후
계	33,785	7,953	4,540	7,000	7,000	7,292
국 비	33,785	7,953	4,540	7,000	7,000	7,292
도 비
시 비
민간 등

□ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추 진 내 용	비 고
‘00. 12	타당성 조사 및 기본계획수립
‘04. 12	노반 실시설계 완료
‘08. 03 ~	공사 착공(공정률 23%)

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민간 등	비고
′14년 12월 현재	7,953	7,953

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진
	○

□ 향후계획

○ 포항~영덕 구간 개통(‘16. 12월)

○ 전 구간 개통예정(‘18. 12월)

시장공약사항 추진상황

공 약 명

포항~영덕간 고속도로 건설

관리번호

28

추진부서

건설과

협업부서

사업기간

2013 ~ 2021

소요예산

1조 2,430억원

□ 공약내용

○ 남북 7축 국가간선도로망 구축으로 낙후된 동해안 지역의 경제 활성화

○ 21세기 환동해권의 물류허브 기능 강화

□ 사업개요

가. 사업개요

○ 위치 : 포항시 북구 흥해읍 ~ 영덕군 강구면

○ 사업기간 : 2013 ~ 2021

○ 사업량 : L=30.9km, B=23.4m (우리시 구간 L=18.32km)

○ 사업비 : 1조 2,430억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	″14년까지	″15	″16	″17	″18	19년 이후
계	12,430	289	150	2,000	2,000	2,000	5,991
국 비	12,415	289	135	2,000	2,000	2,000	5,991
도 비
시 비
도 공	15		15

□ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추 진 내 용	비 고
‘11. 09	타당성조사
‘13. 08	기본설계 완료
‘14. 03 ~	실시설계용역 중

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	도공	비고
′14년 12월 현재	289	289

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진
	○

□ 향후계획

○ 공사 착공예정(‘15년 하반기)

시장공약사항 추진상황

공 약 명

국도31호선 흥해~기계간 확장

관리번호

29

추진부서

건설과

협업부서

사업기간

2003 ~ 2016

소요예산

1,606억원

□ 공약내용

○ 국도31호선의 교통량 증가 대비로 교통혼잡 해소

○ 경북 내륙지방에서 발생되는 물동량 수송원활 및 지역개발 촉진

□ 사업개요

가. 사업개요

○ 위치 : 포항시 북구 흥해읍 대련리 ~ 기계면 인비리

○ 사업기간 : 2003 ~ 2016

○ 사업량 : L=16.6km, B=20m

○ 사업비 : 1,606억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	″14년까지	″15	″16	″17	″18	19년 이후
계	1,606	708	394	504
국 비	1,606	708	394	504
도 비
시 비
민간 등

□ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추 진 내 용	비 고
‘07. 12	타당성조사 및 기본설계 완료
‘10. 06	실시설계 완료
‘11. 04 ~	공사 착공(공정률 44%)

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민간 등	비고
′14년 12월 현재	708	708

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진
	○

□ 향후계획

○ 공사 준공예정(‘16년 12월)

시장공약사항 추진상황

공 약 명

국도31호선 기계~안동간 확장

관리번호

30

추진부서

건설과

협업부서

사업기간

2009 ~ 2022

소요예산

4,832억원

□ 공약내용

○ 국도31호선의 교통량 증가 대비로 교통혼잡 해소

○ 경북 내륙지방에서 발생되는 물동량 수송원활 및 지역개발 촉진

□ 사업개요

가. 사업개요

○ 위치 : 포항시 북구 기계면 ~ 안동시 길안면

○ 사업기간 : 2009 ~ 2022

○ 사업량 : L=62.3km, B=20m (우리시 구간 19.6km)

○ 사업비 : 4,832억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	″14년까지	″15	″16	″17	″18	19년 이후
계	4,832	123	114	660	660	660	2,615
국 비	4,832	123	114	660	660	660	2,615
도 비
시 비
민간 등

□ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추 진 내 용	비 고
‘07. 12	타당성조사 완료
‘13. 08	기본설계 완료
‘13. 03 ~	4공구 공사 착공(공정률 30%)

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민간 등	비고
′14년 12월 현재	123	123

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진
	○

□ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

○ 전체 4개 공구중 4공구(안동 구간)은 공사중이며 2,3공구는 실시설계중이나

1공구(우리시 구간)은 실시설계 미반영

나. 해소방안

○ 금년에 1공구 실시설계 착공계획 중

□ 향후계획

○ 1공구 실시설계 착공(‘15년 상반기)

시장공약사항 추진상황

공 약 명

포항영일만항 인입철도 건설

관리번호

31

추진부서

건설과

협업부서

사업기간

2009 ~ 2018

소요예산

1,558억원

□ 공약내용

○ 영일만항 배후산업단지의 원활한 물동량 수송 분담 기여

○ 산업 기반시설 확충으로 기업동량 수송분담 기여

□ 사업개요

가. 사업개요

○ 위치 : 포항시 북구 흥해읍 이인리 ~ 용한리(영일만항)

○ 사업기간 : 2009 ~ 2018

○ 사업량 : 단선전철 L=11.3km

○ 사업비 : 1,558억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	″14년까지	″15	″16	″17	″18	19년 이후
계	1,558	160	420	300	400	278
국 비	1,558	160	420	300	400	278
도 비
시 비
민간 등

□ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추 진 내 용	비 고
‘10. 12	타당성 조사 및 기본계획수립
‘12. 12	노반 실시설계 완료
‘13. 12 ~	공사 착공(공정률 11%)

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민간 등	비고
′14년 12월 현재	160	160

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진
	○

□ 향후계획

○ 공사 준공예정(‘18. 12월)

시장공약사항 추진상황

공 약 명

국지도20호선 효자~상원 건설(교량)

관리번호

32

추진부서

건설과

협업부서

사업기간

2014 ~ 2018

소요예산

562억원

□ 공약내용

○ 영일만항과 철강공단을 연결하는 도로개설로 산업물동량 수송 원활

○ 시가지 교통정체 해소 및 공단 물동량 수송 원활

□ 사업개요

가. 사업개요

○ 위치 : 포항시 남구 송도동 ~ 북구 항구동(영일대해수욕장)

○ 사업기간 : 2014 ~ 2018

○ 사업량 : L=1.2km(4차로)

○ 사업비 : 562억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	″14년까지	″15	″16	″17	″18	19년 이후
계	562	5	10	180	180	187
국 비	562	5	10	180	180	187
도 비
시 비
민간 등

□ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추 진 내 용	비 고
‘12. 02	제3차 국도․국지도 5개년 계획반영 및 기본계획고시
‘14. 12 ~	기본계획수립 용역 중

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민간 등	비고
′14년 12월 현재	5	5

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진
	○

□ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

○ 총사업비가 20%이상 증가될 경우 기획재정부 협의 등으로 사업이 지연됨

□ 향후계획

○ 총사업비 변경 및 기본계획수립 용역 완료(‘15. 10월)

○ 대형공사 입찰방법 심의(‘15. 11월)

○ 턴키공사 입찰공고(‘16. 1월)

○ 설계심의 및 평가, 실시설계 적격자 선정 및 심의, 낙찰자 결정(‘16. 3월)

시장공약사항 추진상황

공 약 명

포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업

관리번호

33

추진부서

도시계획과

협업부서

사업기간

2009 ~ 2019

소요예산

7,360억원

□ 공약내용

○ 기계·철강·선박 등 부품소재산업 생산기반 구축으로 대외무역 적자 해소

○ 새로운 성장 동력산업 육성으로 정체된 지역경제 활성화

□ 사업개요

가. 사업개요

○ 위   치  : 포항시 남구 구룡포읍 및 동해면, 장기면 일원

○ 사업기간 : 2009 ~ 2019

○ 사 업 량 : 산업단지 6,119천㎡

○ 사 업 비 : 7,360억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	″14년까지	″15	″16	″17	″18	19년 이후
계	7,360	1,969	914	1,186	1,532	1,200	559
국 비
도 비
시 비
민자등	7,360	1,969	914	1,186	1,532	1,200	559

□ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추 진 내 용	비 고
2008. 5	포항 국가산업단지 조성 실무협약 체결
2009. 9	산업단지계획 승인 고시
2014. 10	1단계 공사 착공

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
′14년 12월 현재	1,969				1,969

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진
	○

□ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

○ 보상과 관련하여 이주민들에 대한 실질적인 지원대책 마련이 필요

나. 해소방안

○ 주민들의 생계대책 마련을 위한 사업시행자와 주민들의 협의 중재

□ 향후계획

○ 산업시설용지 분양 공고(‘15. 7월)

○ 2단계 공사 착공(‘15. 12월)

○ 1단계 공사 준공(‘16. 12월)

○ 2단계 공사 준공(‘16. 09월)

시장공약사항 추진상황

공 약 명

영일만4 일반산업단지 조성

관리번호

34

추진부서

도시계획과

협업부서

투자유치담당관

사업기간

2008.~2020.(1단계 : 2017)

소요예산

9,295억원

□ 공약내용

○ 새로운 산업단지 조성으로 고용증대 및 지역경제 자립기반 강화

○ 항만기능의 증대와 환동해권 중심도시로의 도약을 위한 기틀 마련

□ 사업개요

가. 사업개요

○ 위    치 : 포항시 북구 흥해읍 죽천․우목․용한․곡강리 일원

○ 사업기간 : 2008 ~ 2020 (1단계 : 2017)

○ 사 업 량 : 4,216천㎡ (1단계 2,599, 향후 1,617)

○ 사 업 비 :  9,295억원 (1단계 4,960, 향후 4,335) 억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	″14년까지	″15	″16	″17	″18	19년 이후
계	9,295	260	2,300	2,379	1,300	2,056	1,000
국 비	933	20	110	184	300	319
시 비	52	52
민자등	8,310	188	2,190	2,195	1,000	1,737	1,000

□ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추 진 내 용	비 고
'10.11.	산업단지 지구지정 승인
'11.10.	산업단지계획 승인
'12.05.	우선공급지 공사 준공
'13.07.	진입도로 개설공사 착공 ⇒ 준공('16.04.)

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
′14년 12월 현재	222	20		52	150

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진		시행사 선정 및 SPC법인 설립 지연	시행사 조속 선정 및 후속절차 이행
		O

□ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

○ 사업추진 역량을 갖춘 시행사 선정

○ 산업시설 용지 조성 분양

나. 해소방안

○ 시행사 선정 위한 홍보전략 강화

○ 선분양 포함한 기업유치 총력

□ 향후계획

○ 기반조성 공사 진행 및 기업유치 위한 홍보활동 강화

○ 특수목적법인(SPC) 설립 운영

○ 토지보상 및 공사착공, 분양 시행