11

주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

우리 포항시에서 ‘14년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2013년까지 집행사업비	2014년 소요사업비	2015년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척률(%)
새마을운동 체험공원 조성	4,200	1,800	2,400			2010	100
오천읍 주민복지회관 건립	3,800			3,800	2016	2014	20
동해면 주민복지회관 건립	3,000			3,000	2016	2014	10
포항생활문화센터 조성사업	3,000			3,000	2016년	2014	1
포항중앙도서관 건립	24,000	6,211	10,240	7,549	2015	2010	100
양덕생활체육시설확충공사	1,600			1,600	2016	2013	5
구룡포청소년수련원 증축	5,600		70	5,530	2016	2012	30
흥해시장 장옥 개축	8,400			8,400	2016	2013	10
과메기산업화 가공단지 조성사업	38,000	25,000	4,300	8,700	2015	2008	86
죽도시장 청정해수공급시설	1,000		1,000		2014	2010	100
장길리 복합낚시 공원 조성	12,000	9,900	2,100		2014	2008	100
연안바다목장 조성사업	5,000	2,000	1,000	2,000	2016	2011	80
흥해읍 이인리 도로(대2-47)개설	14,000			14,000	2018	2013	4
한전~남부서간 도로(대2-2)개설	13,000	2,230	2,000	8,770	2016	2013 *	70
한신공영～이인리간 도로(대3-27)개설	47,800	400	2,000	45,400	2020	2014	20
연일읍사무소~인주IC간 도로(광3-4)개설	24,000	130		23,870	2020	2011	3
오천 문덕 도시계획도로 (대2-6)개설	19,800	500	1,500	17,800	2017	2014*	40
양학동 체육관 ~ 용흥동 한빛교통간 도로개설	28,000	140	-	27,860	2020	2014 *	0.5
연일 달전리 도시계획도로(중1-119)개설	6,000	-	-	6,000	2018	2014*	0
신광～흥해 매산리간 도로 확포장	20,000	500	1,000	18,500	2020	2012	13
흥해 성곡 도시계획 도로(중1-58)개설	29,000	-	203	28,797	2018	2010 *	2
대송 도시계획 도로(중1-17)개설	22,000	5,300	2,093	14,607	2018	2010 *	37
보경사 군립공원 진입도로 확포장	7,000	3,200	787	3,013	2018	2010	66
연일 오천리 도시 계획도로(중1-12)개설	11,700	8,500	1,390	1,810	2016	2009 *	92
흥해 성내 도시계획 도로(중1-99)개설	8,200	4,400	484	3,316	2018	2008 *	66
운제산 산림욕장 조성	4,000	1,050	500	2,450	2017	2013	50
보경사군립공원 자연학습장 조성	4,500	1,000	1,000	2,500	2017	2013	45%
하수처리수재이용 사업	140,004	115,565	24,439		2014	2008	100
이동배수지 건설공사	12,500	1,581	2,000	8,919	2015	2012	70
상수도 블록화 구축공사	11,100	6,250	936	3,914	2015	2008	75

‣ (대상사업) 투융자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2014년에 추진한 사업

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

새마을운동 체험공원 조성

담당자

새마을민원과 천영필(☎270-3832)

□ 사업목적 및 필요성

○ 새마을운동의 변천사를 몸으로 느낄 수 있는 공간 조성

○ 제2의 새마을운동 재점화 및 기업, 학교, 행정 새마을 교육장 필요성 대두

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010년 ~ 2014년(5년간)

○ 위 치 : 포항시 북구 기계면 문성리 357-1번지 일원

○ 규 모 : 새마을 체험공원(3,900㎡), 고택활용 인성교육관 건립(995㎡)

발상지 기념관 내 녹지정비 및 전시관 리모델링

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	4,200	4,200
국 비	2,100	2,100
시 도 비	630	630
시군구비	1,470	1,470
지 방 채

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2010년 : 기본계획수립 용역, 지방재정 투융자 심사, 중기지방재정계획 반영

○ 2011년 : 새마을운동 체험공원 조성사업 설계용역 및 부지매입

○ 2012년 : 인성교육관 고택(995㎡)매입 및 복원, 전시관람 콘텐츠 개발

○ 2013년 ~ 2014년 : 체험장조성, 상징조형물설치, 전시관 보완등

○ 2014년 8월 : 새마을운동 체험공원 조성사업 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업비 변경

- 당초 : 21,000백만원(국비 8,400, 도비 3,500, 시비 8,100, 민자 1,000)

- 변경 :  4,200백만원(국비 2,100, 도비 630, 시비 1,470)

※ 타시․군 중복투자 사업으로 인한 국비지원 축소에 따른 변경

사업명

오천읍 주민복지회관 건립

담당자

새마을민원과 천영필(☎270-3832)

□ 사업목적 및 필요성

○ 5만여 오천읍민에게 다양한 복지서비스 제공 및 지역주민들의 복리증진

○ 지역주민의 여가선용과 취미생활, 주민화합등 지역발전을 위한 장소제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2016년(3년간)

○ 위 치 : 포항시 남구 오천읍 원리 940번지 일원

○ 규 모 : 복지회관 1동(지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	3,800		2,500	600	700
국 비	1,500		1,500
시 도 비	300			300
시군구비	2,000		1,000	300	700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2014. 3. 25. : 지방재정 투융자 심사

○ 2014. 7. 15. : 건축설계 현상공모(당선 : 건축사사무소 LIM)

○ 2014. 8. 14. : 주민설명회 개최

○ 2015. 6. 15. : 공사착공 - ㈜금매건설(준공예정일 2016.6.13.)

□ 향후계획

○ 2016. 6. : 오천읍 주민복지회관 건립 준공

사업명

동해면 주민복지회관 건립

담당자

새마을민원과 천영필(☎270-3832)

□ 사업목적 및 필요성

○ 포항공항으로 수십년동안 소음등 생활권의 침해를 받은 동해면 주민을

위한 다양한 복지서비스 제공 및 지역주민들의 복리증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2016년(3년간)

○ 위 치 : 포항시 남구 동해면 약전리 370-3번지 일원

○ 규 모 : 복지회관 1동(지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	3,000		1,500	500	1,000
국 비	1,500		1,500
시 도 비
시군구비	1,500			500	1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2014. 10. 31. : 지방재정 투융자 심사

○ 2014. 12. 01. : 중기재정계획 반영

○ 2015. 02. : 주민설명회 개최

○ 2015. 02. : 실시설계 시행(건축사무소 이림)

□ 향후계획

○ 2015. 08. : 실시설계 완료

○ 2015. 09. ~ 2016. 12. : 공사착공 및 준공

사업명

포항생활문화센터 조성사업

담당자

문화예술과 허정선

(☎270-2553)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시민들의 문화향유 욕구증가와 기존 공공 문화시설 부족으로

마방을 리모델링하는 생활문화시설 공모사업에 선정됨에 따라

○ KTX 시대를 맞아 지역특성에 맞는 다양한 특화 문화콘텐츠를

개발하여 전시민의 생활문화놀이터로 조성

□ 사업개요

○ 기 간 :  2014. 6. ~ 2016. 11.

○ 위 치 :  포항시 북구 양덕동 68번지 일원

○ 규 모 :  마사 2개동(마사A 891㎡, 마사B 780㎡)  리모델링

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :     3,000 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	3,000			65	2,935
국 비	1,140			24	1,116
시 도 비	408			9	399
시군구비	1,452			32	1,420
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10  %)

○  2015. 1. 22 : 생활문화센터조성 추진 상황보고(상임위원회)

○  2015. 2. 24 : 집중컨설팅 실시 (문체부 및 예술경영지원센터)

○  2015. 3. 27 : 생활문화센터 공간구성에 따른 설문조사(읍면동)

☞ 대  상 : 924명(읍면동 이·통장 및 동아리회원, 예술단체)

○  2015. 4. 14 : 공간구성(안) 보고(상임위원회)

○  2015. 7. 31 : 기본 및 실시설계 용역 공고

□ 향후계획

○ 2015. 12 : 공사 착공

○ 2016. 11 : 준공 및 개관

사업명

포은 중앙도서관 건립

담당자

문화예술과 김남경(☎2263)

□ 사업목적 및 필요성

○ 53만 시민의 지식정보 제공을 위한 수준 높은 지식문화 인프라 구축

○ 환동해 중심 경북 제1의 도시위상에 걸맞는 중심도서관 건립

○ 선진문화교육 및 지식정보 제공으로 시민들의 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기  간 : 2011. 1. ~ 2015. 8

○ 위  치 : 포항시 북구 삼호로 31

○ 규  모 : 연면적 9,812㎡, 지하 1층/ 지상 6층

○ 사업비 : 240억원(국비 96, 도비 8, 시비 136)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  24,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	24,000	6,211	10,240	7,549
지 방 채	5,000	2,500	2,500
국 비	9,600	2,411	2,440	4,749
시 도 비	800	560	240
시군구비	8,600	740	5,060	2,800
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘12. 6월 : 포은 중앙도서관 건립 실시 설계

○ ‘13. 6월 : 포은 중앙도서관 건립공사 착공

○ ‘15. 7월 : 포은 중앙도서관 건립공사 준공

□ 향후계획

○ ‘15. 11월 : 포은 중앙도서관 개관

사업명

양덕생활체육시설 확충공사

담당자

체육지원과

김일동(☎270-2804)

□ 사업목적 및 필요성

○ 체육시설·지도자·프로그램을 통합제공하는 자립형 클럽을 조성하여 남녀노소 누구나 생활체육 활동에 참여, 100세 시대 대비 건강 증진 및 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 :  2013 ~ 2017

○ 위 치 : 포함시 북구 양덕동 68

○ 규 모 : 연면적 2,625㎡(실내승마장 → 생활체육아카데미)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	1,600		1,000		600
국 비
시 도 비	1,600		1,000		600
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2013. 11 : 투융자심사(조건부)

○ 2015. 02 ~ 07 : 실시설계용역 시행

□ 향후계획

○ 2015. 08 : 재정심사 및 건축협의

○ 2015. 09 ~ 2016. 03 : 공사시행

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

구룡포청소년수련원 증축

담당자

여성가족과 송인로(☎270-3053)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청소년수련시설 확충으로 건전 청소년 육성기반 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 포항시 남구 구룡포읍 명월길 51(석병리 산11)

○ 위 치 : 2013. 01 ~ 2016. 06

○ 규 모 : 건축 연면적 2,575㎡(지하 1, 지상 3)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	5,600	1,000	2,000	600	2,000
국 비	2,500	500	1,000		1,000
시 도 비
시군구비	3,100	500	1,000	600	1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 기본 및 실시설계 완료 : 2014. 03. 24

○ 공사착공 : 2014. 06. 09

○ 기초공사완료 및 2층 골조공사 중

□ 향후계획

○ 2016. 06 공사준공 예정

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경

(단위 : 백만원)

구 분	당 초	변 경	증감액
총사업비	5,000	5,600	600

○ 예산증액사유 : 당초 다목적체육관(1층)과 생활관(2-4층)을 설치하려고 했으나 건물하중에 따른 장기적인 침하로 체육관과 생활관 분리 건축에 따른 기반공사 및 체육관 농구코트 규격화로 예산증가

사업명

흥해시장 장옥 개축

담당자

경제노동과 한창수(☎270-2434)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대형 유통업체와 기업형 수퍼마켓의 무차별 진출에 따른 전통시장 붕괴로

북구권의 대표적 시장인 흥해시장을 시설 현대화 추진

○ 농축수산물을 농어민과 소비자간 공급처로 조성하여 상인 및 주변  지역

민들의 소득 증대에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2016(4개년)

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 성내리 43번지 일원

○ 규 모 : 장옥개축 및 주차장설치(지상2층, 연면적 7,800㎡)

⇒ 1차공사  : 지상1층 5개동 연면적 491.32㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,400백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	8,400		2,100	500	5,800
국 비	4,600		200	300	4,100
시 도 비
시군구비	3,800		1,900	200	1,700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2013.  2 ~ 2015. 7 : 주민설명회 개최

○ 2015.  1 : 1구간 공사착공

○ 2015.  5 : 1구간 상인 임시상점 추첨

○ 2015.  6 ~ 8 : 임시상가 설치완료 및 이주

□ 향후계획

○ 2015.  1 ~ 12 : 상인 및 토지∙건물 소유주 보상협의

○ 2015. 12 : 1차공사 완료

○ 2016.  1 ~ 12 : 2차공사 장옥공사 착공 및 완료

사업명

과메기산업화 가공단지 조성사업

담당자

수산진흥과 김강희(☎270-2858)

□ 사업목적 및 필요성

○ 과메기 생산시설 현대화로 식품의 안전성 확보

○ 생산․가공․유통․체험 관광시설 조성으로 과메기 부가가치 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2009. 1 ~ 2016. 2

○ 위 치 : 포항시 남구 구령포읍 구룡포항 및 특구일원

○ 규 모 : 부지면적 25,662㎡

(문화거리, 냉동공장, 시설현대화, 연구센터 및 해양전시관)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :   38,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	38,000	25,000	4,300	8,700
국 비	19,000	12,500	2,200	4,300
시 도 비	5,700	3,700	600	1,400
시군구비	13,300	8,800	1,500	3,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 86%)

○ 기본 및 실시설계, 생산기반시설, 과메기문화거리 조성

○ 과메기 가공공장 및 냉동창고 건립, 진입도로 개설

○ 과메기 연구센터 및 해양전시관 건립 중

□ 향후계획

○ 과메기 연구센터 및 해양전시관 2016. 2. 준공

사업명

죽도시장 청정해수공급시설

담당자

수산진흥과 김기창

(☎054-270-2764)

□ 사업목적 및 필요성

○ 죽도시장 어판장 및 활선어 판매상가에 안정적인 해수공급

해수공급시설 설치로 청결하고 위생적인 안전한 수산물 판매

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014.1~2014.10

○ 위 치 : 포항시 북구 죽도동 지내(죽도시장~송도위판장)

○ 규 모 : 해수관로 L=2.2km×2열, 해수여과기 2기(150t/hr)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,000백만원 (교부세)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	1,000		1,000
국 비
시 도 비
시군구비	1,000		1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 사업완료

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

장길리 복합낚시공원조성

담당자

수산진흥과 김기창

(☎054-270-2764)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다양한 해양테마 제공과 새로운 소득원 개발로 지역경제 활성화

○ 인근 관광지와 연계하여 체류형 휴식공간 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2009.~2015

○ 위 치 : 포항시 남구 구룡포읍 장길리

○ 규 모 : 낚시공원조성  7,792㎡(건축: 3동 1,189.3㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	12,000	9,900	2,100
국 비	6,000	4,950	1,050
시 도 비	1,800	1,485	315
시군구비	4,200	3,465	735
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 사업완료

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

연안바다목장 조성사업

담당자

수산진흥과 김재선(☎270-2742)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인공 해조장 및 수산자원 조성으로 수산물의 지속적인 생산 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ~ 2016(5년간)

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 오도 1, 2리 지선

○ 규 모 : 155.2ha(인공어초, 레져 및 유어낚시터 조성, 수산자원조성등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	5,000	2,000	1,000	1,000	1,000
국 비	2,500	1,000	500	500	500
시 도 비	500	200	100	100	100
시군구비	2,000	800	400	400	400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2009. 11. 25 ~ 2010. 12. 31 기본계획수립 용역

○ 어류용 어초 13기, 패조류용 어초 426개 조성, 수산자원 조성 등

□ 향후계획

○ 어초시설, 수산자원조성, 수중테마공원 조성 등

○ 사업비 10억원(국비 10, 도비 2, 시비 8)

사업명

흥해읍 이인리 도로(대2-47)개설

담당자

건설과 김영환(☎270-3423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로기반시설 확충으로 주민생활편익 제공

○ 도심을 연결하는 도로망 확충으로 지역균형개발 촉진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008 ~ 2018

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 대련리 ~ 흥해읍 성곡리

○ 규 모 : 도로개설 L=4.1km, B=30m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	14,000		550		13,450
국 비
시 도 비
시군구비	14,000		550		13,450
지 방 채
민간자본
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 4%)

○ 편입토지 보상 1식

□ 향후계획

○ 도로개설 L=4.1km

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

한전~남부서간 도로(대2-2)개설

담당자

건설과 김영환(☎270-3423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로기반시설 확충으로 주민생활편익 제공

○ 도심을 연결하는 도로망 확충으로 지역균형개발 촉진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008 ~ 2016 (당초 2011~2015)

○ 위 치 : 포항시 남구 상도동 한전 ~ 남부경찰서

○ 규 모 : 도로개설 L=0.48km, B=15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,000백만원(당초 14,000백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	13,000	4,230	5,000	1,000	2,770
국 비
시 도 비
시군구비	8,000	4,230		1,000	2,770
지 방 채	5,000		5,000
민간자본
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 철도기면상승 1식(상도지하도 설치)

○ 편입토지 보상 완료

□ 향후계획

○ 도로개설 L=0.48km

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

한신공영~이인리간 도로(대3-27)개설

담당자

건설과 김영환(☎270-3423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로기반시설 확충으로 주민생활편익 제공

○ 흥해 이인리 신역사 연결도로 개설로 교통소통원활

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011 ~ 2020

○ 위 치 : 포항시 북구 우현동 ~ 흥해읍 이인리

○ 규 모 : 도로개설 L=2.74km, B=25m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 47,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	47,800	2,400	6,000	1,500	37,900
지 방 채	5,000		5,000
국 비
시 도 비	5,700	700			5,000
시군구비	37,100	1,400	1,000	1,500	33,200
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 도로개설 L=0.26km

○ 편입토지 보상중

□ 향후계획

○ 도로개설 L=2.47km

○ 편입토지 보상

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

연일읍사무소~인주IC간도로

(광3-4)개설

담당자

건설과 이원중(☎270-3424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로기반시설 확충으로 주민생활편익 제공

○ 주요 간선도로 연결 도로 개설로 교통소통원활

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011 ~ 2020 (당초 2011~2017)

○ 위 치 : 포항시 남구 연일읍 괴정리 ~ 인주리

○ 규 모 : 도로개설 L=1.56km, B=40m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 24,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	24,000	130	500	500	22,870
국 비
시 도 비
시군구비	24,000	130	500	500	22,870
지 방 채
민간자본
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

○ 편입토지 보상중

□ 향후계획

○ 도로개설 L=1.56km

○ 편입토지 보상

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

오천 문덕 도시계획도로(대2-6)개설

담당자

건설과 이원중(☎270-3424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 철강공단과 주택단지의 연결로 공단 근로자의 교통편의 제공

◦ 철강공단 물동량 수송로 확보로 물류비용 절감

□ 사업개요

○ 기 간 :  2012 ~ 2017

○ 위 치 : 포항시 남구 오천읍 문덕리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=1.24km, B=30m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  19,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	19,800	2,000	4,000	10,700	3,100
국 비	9,900	1,000	2,000	5,350	1,550
시 도 비	990	100	200	535	155
시군구비	8,910	900	1,800	4,815	1,395
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  30%)

○ 오천 문덕1교(대2-6)설치공사 공사중(공정율 60%)

○ 편입토지 보상중(20%)

□ 향후계획

○ 보상 완료

○ 문덕1교 설치 완료, 도로개설 완료 L=1.13km

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

양학동체육관~용흥동 한빛교통간 도로개설

담당자

건설과 김민술(☎270-3284)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로개설로 지역주민들의 교통소통 원활 및 주민생활편의제굥

○ 장기 미집행 도시계획도로 개설로 민원해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2006 ~ 2020

○ 위 치 : 북구 양학동 ~ 용흥동

○ 규 모 : 도로개설 L=1.0km, B=20m, 토지보상 36,285㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 28,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기 투 자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	28,000	140	0	800	27,060
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	28,000	140	0	800	27,060

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0.5%)

○ 실시설계 완료

○ 토지보상 1,500㎡

□ 향후계획

○ 토지보상 34,785㎡

○ 도로확포장 L=1.0km, B=20m

사업명

연일 달전리 도시계획도로

(중1-119) 개설

담당자

건설과 정병조(☎270-3283)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로기반시설 확충으로 지역균형발전

○ 지역주민들의 교통소통 원활 및 주민생활편익 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2018

○ 위 치 : 남구 연일읍 달전리

○ 규 모 : 도로개설 L=1.1km, B=20m, 토지보상 12,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기 투 자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	6,000	0	0	120	5,880
시 도 비		100	0	0	0
시군구비	6,000	0	0	120	5,880

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 실시설계 발주예정

□ 향후계획

○ 토지보상 12,000㎡

○ 도로개설 L=1.1km, B=20m

사업명

신광~흥해 매산리간 도로 확포장

담당자

건설과 김민술(☎270-3284)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로기반시설 확충으로 주민생활편익 제공

○ 도로확장으로 지역주민들의 교통소통 원활

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010 ~ 2020

○ 위 치 : 북구 신광면 사정리 ~ 흥해읍 매산리

○ 규 모 : 도로확포장 L=3.84km, B=16.5m, 토지보상 49,107㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기 투 자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	20,000	1,500	1,000	900	16,600
시 도 비	6,000	100	0	0	5,900
시군구비	14,000	1,400	1,000	900	10,700

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 13%)

○ 토지보상 41,688㎡

□ 향후계획

○ 토지보상 7,419㎡

○ 도로확포장 L=3.84km, B=16.5m

사업명

흥해 성곡 도시계획도로(중1-58) 개설

담당자

건설과 김민술(☎270-3284)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로기반시설 확충으로 주민생활편익 제공

○ 도로확장으로 지역주민들의 교통소통 원활

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010 ~ 2018

○ 위 치 : 북구 흥해읍 성곡리 ~ 북구 창포동

○ 규 모 : 도로확포장 L=2.62km, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기 투 자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	29,000	203	0	0	28,797
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	29,000	203.	0	0	28,797

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

○ 실시설계용역 완료

□ 향후계획

○ 도로개설 L=2.62km, B=20m

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
사 업 량	L=0.85km	L=2.62km
총사업비	74억원	290억원
사업기간	2010 ~ 2012	2010 ~2018

사업명

대송 도시계획도로(중1-17) 개설

담당자

건설과 정병조(☎270-3283)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로기반시설 확충으로 공단 물동량 수송 원활

○ 지역주민들의 교통소통 원활 및 주민생활편익 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010 ~ 2018

○ 위 치 : 남구 신기동삼거리 ~ 대송면 송동리

○ 규 모 : 도로개설 L=2.1km, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기 투 자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	22,000	7,393	687	950	12,970
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	22,000	7,393	687	950	12,970

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 37%)

○ 도로개설 L=1.28km, B=20m

□ 향후계획

○ 도로개설 L=0.82km, B=20m

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
사업기간	2010 ~ 2015	2010 ~2018

사업명

보경사 군립공원 진입도로 확포장

담당자

건설과 김민술(☎270-3284)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시기발시설 확충으로 주민생활편익 제공

○ 기존도로 노폭 협소로 인한 지역주민들 교통사고 위험 해소 및

관광성수기 교통정체 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010 ~ 2018

○ 위 치 : 북구 송라면 광천리 ~ 중산리

○ 규 모 : 도로확포장 L=4.2km, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기 투 자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	7,000	3,987	576	1,000	1,437
시 도 비	3,100	2,000	288	300	512
시군구비	3,900	1,987	288	700	925

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 66%)

○ 도로확포장 L=1.94km, B=11m

□ 향후계획

○ 도로확포장 L=2.26km, B=11m

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
사 업 량	L=4.2km, B=20m	L=4.2km, B=11m
총사업비	280억원	70억원
사업기간	2010 ~ 2013	2010 ~2018

사업명

연일 오천리 도시계획도로(중1-12) 개설

담당자

건설과 정병조(☎270-3283)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기간 미집행 도시계획사업의 추진으로 민원 해소

○ 도시기반시설 확충에 따른 지역 균형개발 촉진 및 숙원사업해결

□ 사업개요

○ 기 간 : 1996 ~ 2016

○ 위 치 : 남구 연일읍 생지리 ~ 오천리

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.51km, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,700백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기 투 자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	11,700	9,890	790	400	620
시 도 비	800	800	0	0	0
시군구비	10,900	9,090	790	400	620

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 92%)

○ 도로개설 L=1.455km, B=20m

□ 향후계획

○ 도로개설 L=0.055km, B=20m

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
사 업 량	L=1.43km	L=1.51km
총사업비	140억원	117억원
사업기간	1996 ~ 2015	1996 ~2016

사업명

흥해 성내 도시계획도로(중1-99) 개설

담당자

건설과 김민술(☎270-3284)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기간 미집행 도시계획사업의 추진으로 민원 해소

○ 도시기반시설 확충에 따른 지역 균형개발 촉진 및 숙원사업해결

□ 사업개요

○ 기 간 : 2006 ~ 2018

○ 위 치 : 북구 흥해읍 성내리

○ 규 모 : 도로확포장 L=0.4km, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,200백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기 투 자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	8,200	4,884	471	500	2,345
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	8,200	4,884	471	500	2,345

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 66%)

○ 도로개설 L=0.24km, B=20m

□ 향후계획

○ 도로개설 L=0.16km, B=20m

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
사업기간	2006 ~ 2016	2006 ~2018

사업명

운제산 산림욕장 조성

담당자

산림녹지과 김경현(☎270-3824)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수려한 자연경관과 오어사 신라천년 고찰이 자리하고 있는 운제산에 시민이 함께하는 산림휴양시설 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ~ 2017 (5년)

○ 위 치 : 포항시 남구 대송면 대각리 산105번지 일원

○ 규 모 : 9.6ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	4,000	1,050	500	1,000	1,450
국 비	1,500		200	200	725
시 도 비	450		60	60	217
시군구비	2,050	1,050	240	140	508
지 방 채
민간자본
특별교부세				600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 운제산 삼림욕장 조성 타당성 조사 및 기본계획 용역 완료

○ 운제산 산림욕장 조성사업 기반조성 완료

- 주차장 2개소, 진입도로, 광장조성, 전기·통신공사

□ 향후계획

○ 초화류 및 조경수목 식재 등

○ 화장실, 생태관찰원, 숲속놀이터, 방문자센터, 복합구장 등 조성

사업명

보경사군립공원 자연학습장 조성

담당자

산림녹지과 박명권(☎270-3223)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자연공원내 양호한 환경을 확보하며, 당해 지역을 계획적으로 조성하여       시민 휴식

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2017 (5년)

○ 위 치 : 포항시 북구 송라면 중산리 (군립공원 내)

○ 규 모 : 41,901㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	4,500	1,000	1,000	500	2,000
국 비
시 도 비
시군구비	4,500	1,000	1,000	500	2,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 토지보상 20필지 (17,208㎡), 지장물 1식

□ 향후계획

○ 토지보상 7필지 (11,478㎡) 및 자연학습장 조성

사업명

포항시 하수처리수 재이용시설

민간투자사업

담당자

하수재생과 박중칠

(☎270-5283)

□ 사업목적 및 필요성

○ 버려지던 하수처리장 방류수를 양질의 공업용수로 재처리하여 저렴하게       공급함에 따라 수요처의 경제적 부담 경감 및 지역의 만성적인 물 부족       문제를 해결하는 신규 수자원을 확보함

□ 사업개요

○ 공사기간 : 2012. 2. ~ 2014. 7.

○ 위    치 : 포항시 남구 형산강북로 203 (상도동)

○ 민간사업자 : ㈜피워터스

○ 총사업비 : 140,004백만원

○ 사업규모 : 시설용량 100,000㎥/일, 공급관로 11.71㎞

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 최소수익보장 없음, 운영기간 ‘14. 8. 1.~’34. 7. 31.

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	140,004	115,565	24,,439	-	-
국 비	75,602	58,075	17,527	-	-
시 도 비	3,092	2,508	584	-	-
시군구비	5,308	4,764	544	-	-
민 간	56,002	50,218	5,784	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영 중

□ 향후계획

○ 효율적이고 안정적인 운영

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 : 당초 125,800백만원, 변경 140,004백만원(‘12. 6. 28.)

사업명

이동배수지 건설공사

담당자

상수도과 이한국(☎270-5353)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대이동 및 양학동 급수구역의 안정적 수돗물 공급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ~2015

○ 위 치 : 대이동 및 양학동 일원

○ 규 모 : 배수지 V=12,000㎥, 송.배수관로 L=2.6km, 가압장개량, 조경 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,981백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	10,981	3,581	5,500	1,900
국 비
시 도 비
시군구비	10,981	3,581	5,500	1,900
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 배수지 V=12,000㎥ 완료

○ 관로 L=2.5km

□ 향후계획

○ 관로 L=0.1km

○ 가압장 개량 1식, 조경1식

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업비변경 : 당초 12,500백만원 → 변경 10,981백만원

사업명

상수도 블록화 구축공사

담당자

상수도과 최영훈(☎270-5373)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상수도 유수율을 제고하여 만성적인 공기업 경영수지 개선

○ 누수 및 수질오염 사고 시 단수구역 최소화로 시민불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 ~ 2015년

○ 위 치 : 포항시내 급수구역(양덕, 유강수계)

○ 규 모 : 블록화 51구역 → 기시행 7구역(2008년~2011년)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	11,100	7,186	1,050	2,864
국 비
시 도 비
시군구비	11,100	7,186	1,050	2,864
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 블록구축 및 유량계실 설치 44개소 중 31개소 완료

□ 향후계획

○ 블록 구역고립 확인 및 누수탐사수선 시행

○ 블록화 시스템 개선보완 및 유지관리로 유수율 제고

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초 2012년 ~ 2014년 → 변경 2012년 ~ 2015년

11-2. 지방채 발행사업

우리 포항시에서 ‘14년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
포은중앙도서관 건립	24,000	5,000	9,600	800	8,600		5,000	100
한신공영~이인리간 도로 (대3-27)개설	47,800	5,000		5,700	37,100		5,000	20%
한전~남부서간 도로(대2-2)개설	13,000	5,000			8,000		5,000	70%

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2014년에 추진한 사업

11-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

포은 중앙도서관 건립

담당자

문화예술과 김남경(☎2263)

□ 사업목적 및 필요성

○ 53만 시민의 지식정보 제공을 위한 수준 높은 지식문화 인프라 구축

○ 환동해 중심 경북 제1의 도시위상에 걸맞는 중심도서관 건립

○ 선진문화교육 및 지식정보 제공으로 시민들의 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기  간 : 2011. 1. ~ 2015. 8

○ 위  치 : 포항시 북구 삼호로 31

○ 규  모 : 연면적 9,812㎡, 지하 1층/ 지상 6층

○ 사업비 : 240억원(국비 96, 도비 8, 시비 136)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  24,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	24,000	6,211	10,240	7,549
지 방 채	5,000	2,500	2,500
국 비	9,600	2,411	2,440	4,749
시 도 비	800	560	240
시군구비	8,600	740	5,060	2,800
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘12. 6월 : 포은 중앙도서관 건립 실시 설계

○ ‘13. 6월 : 포은 중앙도서관 건립공사 착공

○ ‘15. 7월 : 포은 중앙도서관 건립공사 준공

□ 향후계획

○ ‘15. 11월 : 포은 중앙도서관 개관

사업명

한신공영~이인리간 도로(대3-27)개설

담당자

건설과 김영환(☎270-3423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로기반시설 확충으로 주민생활편익 제공

○ 흥해 이인리 신역사 연결도로 개설로 교통소통원활

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011 ~ 2020

○ 위 치 : 포항시 북구 우현동 ~ 흥해읍 이인리

○ 규 모 : 도로개설 L=2.74km, B=25m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 47,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	47,800	2,400	6,000	1,500	37,900
지 방 채	5,000		5,000
국 비
시 도 비	5,700	700			5,000
시군구비	37,100	1,400	1,000	1,500	33,200
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 도로개설 L=0.26km

○ 편입토지 보상중

□ 향후계획

○ 도로개설 L=2.47km

○ 편입토지 보상

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

한전~남부서간 도로(대2-2)개설

담당자

건설과 김영환(☎270-3423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로기반시설 확충으로 주민생활편익 제공

○ 도심을 연결하는 도로망 확충으로 지역균형개발 촉진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008 ~ 2016

○ 위 치 : 포항시 남구 상도동 한전 ~ 남부경찰서

○ 규 모 : 도로개설 L=0.48km, B=15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	13,000	4,230	5,000	1,000	2,770
지 방 채	5,000		5,000
국 비
시 도 비
시군구비	8,000	4,230		1,000	2,770
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 철도기면상승 1식(상도지하도 설치)

○ 편입토지 보상 완료

□ 향후계획

○ 도로개설 L=0.48km

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

11-3. 민간투자사업

우리 포항시에서 ‘14년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’13년까지 부담액	’14년 부담액	’15년 이후 부담 예정액
BTL	07년 포항 하수관거	포항맑은물(주)	113,988	-	9,879	272,706	20년
	09년 포항 하수관거	포항맑은물길(주)	67,559	-	3,552	142,612	20년
	10년 포항 하수관거	청정포항(주)	87,965	-	-	210,707	20년
	13년 포항 하수관거	포항새물길(주)	55,754	-	-	122,948	20년
BTO	청하기계하수처리장건설공사	㈜롯데건설외 5개사	82,332	-	-	99,712	20년
BTO	포항시 하수처리수 재이용시설 민간투자사업	㈜피워터스	125,800(당초) 140,004(변경)	65,347	18,655	-	‘14.8.1 ~ ‘34.7.31
BTO	포항하수 종말처리장 2단계(증설) 건설공사 민간투자사업	포항수질환경(주)	107,686	82,435	14,686	132,922	‘07.11.1 ~ ’22.10.31
BTO	포항시 장량하수 처리시설 민간투자사업	푸른장량 (주)	52,739	10,657	4,391	88,597	‘11.1.1 ~ ’30.12.31

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2014년까지는 집행액(결산기준), 2015년 이후는 추정액

11-3-1. 개별 민간투자사업 현황

개별 민간투자사업 현황

사업명

07년 포항 하수관거정비

담당자

하수도과 최문현(☎270-5424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우·오수를 분리하여 연안오염 방지 및 하수처리장 효율성 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2009.11.13 ~ 2014.04.12

○ 위치 : 포항시 용흥동, 중앙동, 학산동, 죽도동, 양학동, 대이동, 송도동 일원    ○ 민간사업자 : 포항맑은물(주)

○ 총사업비 : 113,988백만원

○ 사업규모 : 하수관로 101㎞, 배수설비 9,780가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	282,590	-	9,879	13,810	258,901
국 비	178,935	-	6,415	8,947	163,573
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	103,655	-	3,464	4,863	95,328
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영 중

○ 운영기간 : 2014. 4. 13 ~ 2034. 4. 12 (20년간)

□ 향후계획

○ 2034년까지 민간사업자(운영사)에서 운영 및 유지관리

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

09년 포항 하수관거정비

담당자

하수도과 최문현(☎270-5424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우·오수를 분리하여 연안오염 방지 및 하수처리장 효율성 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2011.1.1 ~ 2014.06.30

○ 위치 : 포항시 죽도동, 용흥동, 대이동 일원

○ 민간사업자 : 포항맑은물길(주)

○ 총사업비 : 67,559백만원

○ 사업규모 : 하수관로 39㎞, 배수설비 3,083가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	146,164	-	3,552	7,118	135,494
국 비	89,396	-	2,235	4,470	82,691
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	56,768	-	1,317	2,648	52,803
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영 중

○ 운영기간 : 2014. 7. 1 ~ 2034. 6. 30 (20년간)

□ 향후계획

○ 2034년까지 민간사업자(운영사)에서 운영 및 유지관리

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

10년 포항 하수관거정비

담당자

하수도과 최문현(☎270-5424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우·오수를 분리하여 연안오염 방지 및 하수처리장 효율성 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2012.6.1 ~ 2016.03.31

○ 위치 : 포항시 대잠동, 죽도동, 상대동, 해도동 일원

○ 민간사업자 : 청정포항(주)

○ 총사업비 : 87,965백만원

○ 사업규모 : 하수관로 48㎞, 배수설비 4,950가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	210,707	-	-	-	210,707
국 비	133,179	-	-	-	133,179
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	77,528	-	-	-	77,528
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 시공 중

○ 시공기간 : 2012. 6. 1 ~ 2016. 3. 31 (46개월간)

□ 향후계획

○ 2016년 3월 준공

○ 2036년까지 민간사업자(운영사)에서 운영 및 유지관리

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

13년 포항 하수관거정비

담당자

하수도과 이동영(☎270-5423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우·오수를 분리하여 연안오염 방지 및 하수처리장 효율성 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2015.7.1 ~ 2018.09.30

○ 위치 : 포항시 상대동, 해도동 일원

○ 민간사업자 : 포항새물길(주)

○ 총사업비 : 113,988백만원

○ 사업규모 : 하수관로 101㎞, 배수설비 9,780가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	122,948	-	-	-	122,948
국 비	72,010	-	-	-	72,010
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	50,938	-	-	-	50,938
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 시공 중

○ 시공기간 : 2015. 7. 1 ~ 2018. 9. 30 (39개월간)

□ 향후계획

○ 2018년 9월 준공

○ 2038년까지 민간사업자(운영사)에서 운영 및 유지관리

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

청하기계하수처리장건설공사

담당자

하수도과 강호철(☎270-5253)

□ 사업목적 및 필요성

○ 읍·면 지역 하수처리시설 확대로 주거환경개선과 연안해역 수질 보전을

통한 해양관광도시 건설

□ 사업개요

○ 기간 : 2013.01 ~2016.03 ○ 위치 : 포항시 북구 청하면, 기계면 일원       ○ 민간사업자 : ㈜롯데건설외 5개사 ○ 총사업비 : 82,332백만원

○ 사업규모 : 하수처리장 Q=2,900톤/일(청하 1,900, 기계 1,000)

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

- 준공후 관리운영설정기간 20년

○ 지금까지 재정부담액(운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	99,712				99,712
국 비
시 도 비
시군구비					99,712
기 타	99,712

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 시공중

○ 시공기간 : 2013. 1. 10 ~ 2016. 3. 15 (38개월간)

□ 향후계획

○ 2015. 10 : 종합시운전 실시

○ 2016.  3 : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간변경

내역	당초	변경	사유
사업기간변경	2013.01.10～2015.10.09	2013.01.10～2016.03.15	국비교부지연

○ 총사업비변경

내역	당초(백만원)	변경(백만원)	사유
총사업비변경	72,330	82,332	불변가→경상가

사업명

포항시 하수처리수 재이용시설

민간투자사업

담당자

하수재생과 박중칠

(☎270-5283)

□ 사업목적 및 필요성

○ 버려지던 하수처리장 방류수를 양질의 공업용수로 재처리하여 저렴하게       공급함에 따라 수요처의 경제적 부담 경감 및 지역의 만성적인 물 부족       문제를 해결하는 신규 수자원을 확보함

□ 사업개요

○ 공사기간 : 2012. 2. ~ 2014. 7.

○ 위    치 : 포항시 남구 형산강북로 203 (상도동)

○ 민간사업자 : ㈜피워터스

○ 총사업비 : 140,004백만원

○ 사업규모 : 시설용량 100,000㎥/일, 공급관로 11.71㎞

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 최소수익보장 없음, 운영기간 ‘14. 8. 1.~’34. 7. 31.

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	84,002	65,347	18,655	-	-
국 비	75,602	58,075	17,527	-	-
시 도 비	3,092	2,508	584	-	-
시군구비	5,308	4,764	544	-	-
기 타				-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영 중

□ 향후계획

○ 효율적이고 안정적인 운영

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 : 당초 125,800백만원, 변경 140,004백만원(‘12. 6. 28.)

사업명

포항하수종말처리장 2단계(증설)건설공사 민간투자사업

담당자

하수재생과 박중칠

(☎270-5283)

□ 사업목적 및 필요성

○ 민간투자사업(BTO)으로 하수처리장 증설, 기존 시설 고도화 및 위탁 운       영

□ 사업개요

○ 기    간 : 2007. 11. 1. ~ 2022. 10. 31.

○ 위    치 : 포항시 남구 형산강북로 203 (상도동)

○ 민간사업자 : 포항수질환경(주)

○ 총사업비 : 107,686백만원

○ 사업규모 : 시설용량 232,000㎥/일

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 최소수익보장 없음, 운영기간 ‘07. 11. 1.~’22. 10. 31.(15년)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	228,949	82,435	14,686	16,799	115,029
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	228,949	82,435	14,686	16,799	115,029
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영 중

□ 향후계획

○ 효율적이고 안정적인 운영

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 :

사업명

포항시 장량하수시설 민간투자사업

담당자

하수재생과 박중칠

(☎270-5283)

□ 사업목적 및 필요성

○ 민간투자사업(BTO)으로 하수처리장 신설 및 위탁 운영

□ 사업개요

○ 기    간 : 2011. 11. 1. ~ 2030. 12. 31.

○ 위    치 : 포항시 북구 흥해읍 해안로 681-18

○ 민간사업자 : 푸른장량(주)

○ 총사업비 : 52,739백만원

○ 사업규모 : 시설용량 15,000㎥/일

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 최소수익보장 없음, 운영기간 ‘11. 1. 1.~’30. 12. 31.(20년)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	103,157	10,657	4,391	5,069	83,040
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	103,157	10,657	4,391	5,069	83,040
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영 중

□ 향후계획

○ 효율적이고 안정적인 운영

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 :