건설공사 관리카드

등록번호 : 2016 - 77
① 관리부서	상수도과 (☎270-5353)		② 사 업 명		광명 일반산업단지 공업용수 건설공사
③ 사업위치	포항시 남구 오천읍, 제철동 일원
④ 사업개요	배수지 V=1,380㎥(공1300 생80), 관로 L=8.1km, 가압장 1식
⑤ 사업기간	‘13.05.21∼’16.12.30		⑥ 시공회사 (감리회사)		삼진건설(주) (도화,세원)
감독공무원	직 : 시설7급 성명: 김현우		준공검사공무원		직 : 성명:
⑦ 공 정 율	전체 : 84%, 당해연도 : 4차(16년) 1%
⑧ 총 사업비 : 5,509백만원 (도급: 2,643 , 관급: 2,744 , 폐기물: 122)
⑨ 위치도				⑩ 현장 사진

건설공사 관리카드

등록번호 : 2016 - 78
① 관리부서	상수도과 (☎270-5355)		② 사 업 명		양덕정수장 인입 원수관로 이설공사
③ 사업위치	포항시 북구 흥해읍 대련리 ~ 기계면 일원
④ 사업개요	관로이설(D1,100㎜) 5개소, L=2.07㎞
⑤ 사업기간	‘15.04.11∼’17.02.07		⑥ 시공회사 (감리회사)		(주)석전건설
감독공무원	정)시설6급,성명:김남진 부)시설8급,성명:임상운		준공검사공무원		직 : 성명:
⑦ 공 정 율	전체 : 60 %, 당해연도 : 20 %
⑧ 총 사업비 : 4,552백만원(도급: 2,452, 관급: 2,092, 폐기물: 8)
⑨ 위치도				⑩ 현장 사진

건설공사 관리카드

등록번호 : 2016 - 79
① 관리부서	상수도과 (☎270-5355)		② 사 업 명		2015년 장기지역 지방상수도 설치공사
③ 사업위치	포항시 남구 장기면 일원
④ 사업개요	배수관로(D35~200㎜) L=8.62km, 가압장 1개소, 감압변실 1개소
⑤ 사업기간	‘15.09.21∼’16.09.14		⑥ 시공회사 (감리회사)		(주)부경종합건설
감독공무원	직 : 시설8급 성명: 임상운		준공검사공무원		직 : 성명:
⑦ 공 정 율	전체 : 55 %, 당해연도 : 55 %
⑧ 총 사업비 : 1,200백만원(도급: 620, 관급: 490, 폐기물: 90)
⑨ 위치도				⑩ 현장 사진

건설공사 관리카드

등록번호 : 2016 - 80
① 관리부서	상수도과 (☎270-5355)		② 사 업 명		기계기북지역 지방상수도 설치공사
③ 사업위치	포항시 북구 기계면, 기북면 일원
④ 사업개요	배수관로(D35~250㎜) L=42.8km, 가압장 2개소
⑤ 사업기간	‘10.05.19∼’17.12.31		⑥ 시공회사 (감리회사)		동양종합건설(주)
감독공무원	정)시설6급,성명:김남진 부)시설8급,성명:임상운		준공검사공무원		직 : 성명:
⑦ 공 정 율	전체 : 65 %, 당해연도 : 25 % [7차분(’16년도)]
⑧ 총 사업비 : 7,040백만원(도급: 3,637, 관급: 2,819, 폐기물 등 기타: 584)
⑨ 위치도				⑩ 현장 사진

건설공사 관리카드

등록번호 : 2016 - 81
① 관리부서	상수도과 (☎270-5365)		② 사 업 명		동해면 약전리 배수관 부설공사
③ 사업위치	포항시 남구 동해면 약전리 일원
④ 사업개요	배수관 부설 D200 L=542m
⑤ 사업기간	‘16.02.18 ∼’16.04.29		⑥ 시공회사 (감리회사)		(주)대화건설
감독공무원	직 : 시설7급 성명: 박강혁		준공검사공무원		직 : 시설6급 성명: 신종석
⑦ 공 정 율	전체 : 100 %, 당해연도 : 100 %
⑧ 총 사업비 : 92백만원(도급: 44, 관급: 44, 폐기물: 4)
⑨ 위치도				⑩ 현장 사진

건설공사 관리카드

등록번호 : 2016 - 82
① 관리부서	상수도과 (☎270-5365)		② 사 업 명		오천읍 문덕리 배수관 부설공사
③ 사업위치	포항시 남구 오천읍 문덕리 일원
④ 사업개요	배수관 부설 D200 L=1,278m
⑤ 사업기간	‘16.03.14 ∼’16.05.18		⑥ 시공회사 (감리회사)		연속건설(주)
감독공무원	직 : 시설7급 성명: 박강혁		준공검사공무원		직 : 시설6급 성명: 신종석
⑦ 공 정 율	전체 : 100 %, 당해연도 : 100 %
⑧ 총 사업비 : 137백만원(도급: 74, 관급: 60, 폐기물: 3)
⑨ 위치도				⑩ 현장 사진

건설공사 관리카드

등록번호 : 2016 - 83
① 관리부서	상수도과 (☎270-5365)		② 사 업 명		오천읍 구정리 배수관 부설공사
③ 사업위치	포항시 남구 오천읍 구정리 일원
④ 사업개요	배수관 부설 D200 L=1,094m
⑤ 사업기간	‘16.03.18 ∼’16.06.15		⑥ 시공회사 (감리회사)		현대기업(주)
감독공무원	직 : 시설7급 성명: 박강혁		준공검사공무원		직 : 성명:
⑦ 공 정 율	전체 : 0 %, 당해연도 : 0 % (국도14호선 확장구간내 보상지연으로 공사중지: ’16.03.18)
⑧ 총 사업비 : 153백만원(도급: 77, 관급: 76, 폐기물: 0)
⑨ 위치도				⑩ 현장 사진

건설공사 관리카드

등록번호 : 2016 - 84
① 관리부서	상수도과 (☎270-5365)		② 사 업 명		이동 무소가압장 앞 배수관 부설공사
③ 사업위치	포항시 남구 이동 일원
④ 사업개요	배수관 부설 D80 L=517m
⑤ 사업기간	‘16.03.14 ∼’16.05.26		⑥ 시공회사 (감리회사)		혜성기업(주)
감독공무원	직 : 시설7급 성명: 박강혁		준공검사공무원		직 : 시설6급 성명: 신종석
⑦ 공 정 율	전체 : 100 %, 당해연도 : 100 %
⑧ 총 사업비 : 88백만원(도급: 37, 관급: 47, 폐기물: 4)
⑨ 위치도				⑩ 현장 사진

건설공사 관리카드

등록번호 : 2016 - 85
① 관리부서	상수도과 (☎270-5365)		② 사 업 명		용흥동 배수관 부설공사
③ 사업위치	포항시 북구 용흥동 일원
④ 사업개요	배수관 부설 D200~75 L=846m
⑤ 사업기간	‘16.03.24 ∼’16.06.21		⑥ 시공회사 (감리회사)		(주)쌍정건설
감독공무원	직 : 시설7급 성명: 박강혁		준공검사공무원		직 : 시설6급 성명: 신종석
⑦ 공 정 율	전체 : 100 %, 당해연도 : 100 %
⑧ 총 사업비 : 156백만원(도급: 73, 관급: 76, 폐기물: 7)
⑨ 위치도				⑩ 현장 사진

건설공사 관리카드

등록번호 : 2016 - 86
① 관리부서	상수도과 (☎270-5365)		② 사 업 명		송도동 배수관 부설공사
③ 사업위치	포항시 남구 송도동 일원
④ 사업개요	배수관 부설 D150 L=168m
⑤ 사업기간	‘16.03.24 ∼’16.06.21		⑥ 시공회사 (감리회사)		혜성기업(주)
감독공무원	직 : 시설7급 성명: 박강혁		준공검사공무원		직 : 시설6급 성명: 신종석
⑦ 공 정 율	전체 : 100 %, 당해연도 : 100 %
⑧ 총 사업비 : 48백만원(도급: 25, 관급: 21, 폐기물: 2)
⑨ 위치도				⑩ 현장 사진

건설공사 관리카드

등록번호 : 2016 - 87
① 관리부서	상수도과 (☎270-5365)		② 사 업 명		연일읍 중명리 배수관 부설공사
③ 사업위치	포항시 남구 연일읍 중명리 일원
④ 사업개요	배수관 부설 D200~150 L=1,833m
⑤ 사업기간	‘16.03.21 ∼’16.06.18		⑥ 시공회사 (감리회사)		대림토건(주)
감독공무원	직 : 시설7급 성명: 박강혁		준공검사공무원		직 : 시설6급 성명: 신종석
⑦ 공 정 율	전체 : 100 %, 당해연도 : 100 %
⑧ 총 사업비 : 462백만원(도급: 269, 관급: 173, 폐기물: 20)
⑨ 위치도				⑩ 현장 사진

건설공사 관리카드

등록번호 : 2016 - 88
① 관리부서	상수도과 (☎270-5365)		② 사 업 명		장기지역(금오리,계원리1) 지방상수도 설치공사(2단계)
③ 사업위치	포항시 남구 장기면 금오리 외 1개소 일원
④ 사업개요	배수관 부설 D100~35 L=4,842m
⑤ 사업기간	‘16.03.30 ∼’16.09.25		⑥ 시공회사 (감리회사)		재헌건설(주)
감독공무원	직 : 시설7급 성명: 박강혁		준공검사공무원		직 : 성명:
⑦ 공 정 율	전체 : 35 %, 당해연도 : 35 %
⑧ 총 사업비 : 540백만원(도급: 290, 관급: 188, 폐기물: 61)
⑨ 위치도				⑩ 현장 사진

건설공사 관리카드

등록번호 : 2016 - 89
① 관리부서	상수도과 (☎270-5365)		② 사 업 명		장기지역(임중리 외 3) 지방상수도 설치공사(2단계)
③ 사업위치	포항시 남구 장기면 임중리 외 3개소 일원
④ 사업개요	배수관 부설 D100~35 L=7,122m
⑤ 사업기간	‘16.05.02 ∼’16.10.28		⑥ 시공회사 (감리회사)		(주)영남
감독공무원	직 : 시설7급 성명: 박강혁		준공검사공무원		직 : 성명:
⑦ 공 정 율	전체 : 20 %, 당해연도 : 20 %
⑧ 총 사업비 : 617백만원(도급: 338, 관급: 205, 폐기물: 74)
⑨ 위치도				⑩ 현장 사진

건설공사 관리카드

등록번호 : 2016 - 90
① 관리부서	상수도과 (☎270-5375)		② 사 업 명		YG04블록 내 상수도 노후관 교체공사
③ 사업위치	포항시 남구 대도동, 해도동 일원
④ 사업개요	노후관 교체 L=4,036m
⑤ 사업기간	‘16.04.01 ∼’16.09.27		⑥ 시공회사 (감리회사)		삼부건설 대표 오상열
감독공무원	직 : 시설7급 성명: 김재우		준공검사공무원		직 : 성명:
⑦ 공 정 율	전체 : 10 %, 당해연도 : 10 %
⑧ 총 사업비 : 791백만원(도급: 513, 관급: 244, 폐기물 등 기타: 34)
⑨ 위치도				⑩ 현장 사진

건설공사 관리카드

등록번호 : 2016 - 91
① 관리부서	상수도과 (☎270-5375)		② 사 업 명		YG15-3블록 내 상수도 노후관 교체공사
③ 사업위치	포항시 남구 대도동, 해도동 일원
④ 사업개요	노후관 교체 L=4,231m
⑤ 사업기간	‘16.06∼’16.12		⑥ 시공회사 (감리회사)		코오롱글로벌 주식회사 대표 윤창운
감독공무원	직 : 시설7급 성명: 김재우		준공검사공무원		직 : 성명:
⑦ 공 정 율	전체 : 5 %, 당해연도 : 5 %
⑧ 총 사업비 : 515백만원(도급: 372, 관급: 131, 폐기물 등 기타: 12)
⑨ 위치도				⑩ 현장 사진

건설공사 관리카드

등록번호 : 2016 - 92
① 관리부서	상수도과 (☎270-5375)		② 사 업 명		YG15-1블록 내 상수도 노후관 교체공사
③ 사업위치	포항시 남구 대도동, 해도동 일원
④ 사업개요	노후관 교체 L=1,392m
⑤ 사업기간	‘16.06.17∼’16.10.14		⑥ 시공회사 (감리회사)		대원건설(주) 대표 김종목
감독공무원	직 : 시설7급 성명: 김재우		준공검사공무원		직 : 성명:
⑦ 공 정 율	전체 : 5 %, 당해연도 : 5 %
⑧ 총 사업비 : 209백만원(도급: 141, 관급: 62, 폐기물 등 기타: 6)
⑨ 위치도				⑩ 현장 사진

건설공사 관리카드

등록번호 : 2016 - 93
① 관리부서	상수도과 (☎270-5375)		② 사 업 명		YG15-2블록 내 상수도 노후관 교체공사
③ 사업위치	포항시 남구 대도동, 해도동 일원
④ 사업개요	노후관 교체 L=1,277m
⑤ 사업기간	‘16.06.17∼’16.10.14		⑥ 시공회사 (감리회사)		㈜보성건설 대표 노태호
감독공무원	직 : 시설7급 성명: 김재우		준공검사공무원		직 : 성명:
⑦ 공 정 율	전체 : 5 %, 당해연도 : 5 %
⑧ 총 사업비 : 175백만원(도급: 120, 관급: 51, 폐기물 등 기타: 4)
⑨ 위치도				⑩ 현장 사진

건설공사 관리카드

등록번호 : 2016 - 94
① 관리부서	상수도과 (☎270-5375)		② 사 업 명		YG08블록 내 상수도 노후관 교체공사
③ 사업위치	포항시 남구 대도동 일원
④ 사업개요	노후관 교체 L=1,058m
⑤ 사업기간	‘16.06.17∼’16.10.14		⑥ 시공회사 (감리회사)		㈜천지건설 대표 김성옥
감독공무원	직 : 시설7급 성명: 김재우		준공검사공무원		직 : 성명:
⑦ 공 정 율	전체 : 5 %, 당해연도 : 5 %
⑧ 총 사업비 : 170백만원(도급: 121, 관급: 45, 폐기물 등 기타: 4)
⑨ 위치도				⑩ 현장 사진

건설공사 관리카드

등록번호 : 2016 - 95
① 관리부서	상수도과 (☎270-5375)		② 사 업 명		우현동 대동우방 블록내 상수도 노후관 교체공사
③ 사업위치	포항시 북구 우현동 일원
④ 사업개요	노후관 교체 L=1,087m
⑤ 사업기간	‘16.05.11∼’16.09.07		⑥ 시공회사 (감리회사)		㈜제일산업 대표 손흥석
감독공무원	직 : 시설7급 성명: 김재우		준공검사공무원		직 : 성명:
⑦ 공 정 율	전체 : 15 %, 당해연도 : 15 %
⑧ 총 사업비 : 161백만원(도급: 113, 관급: 42, 폐기물 등 기타: 6)
⑨ 위치도				⑩ 현장 사진

건설공사 관리카드

등록번호 : 2016 - 96
① 관리부서	상수도과 (☎270-5375)		② 사 업 명		환여동 대도중학교 블록내 상수도 노후관 교체공사
③ 사업위치	포항시 북구 환여동 일원
④ 사업개요	노후관 교체 L=1,548m
⑤ 사업기간	‘16.05.13∼’16.09.09		⑥ 시공회사 (감리회사)		서진건설(주) 대표 신명순
감독공무원	직 : 시설7급 성명: 김재우		준공검사공무원		직 : 성명:
⑦ 공 정 율	전체 : 10 %, 당해연도 : 10 %
⑧ 총 사업비 : 220백만원(도급: 160, 관급: 52, 폐기물 등 기타: 8)
⑨ 위치도				⑩ 현장 사진