9

주요 투자사업 추진현황

9-1. 투자심사 대상사업

우리 포항시에서 ‘15년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2014년까지 집행사업비	2015년 소요사업비	2016년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
오천읍 주민복지회관 건립	3,800	64	879	2,857	2016	2014	95
동해면 주민복지회관 건립	3,090		189	2,901	2016	2014	80
구룡포청소년수련원 증축	5,600	3,000	1,200	1,400	2016	2012	75
흥해시장 장옥 개축	8,400		2,600	5,800	2018	2013	31
과메기산업화 가공단지 조성사업	38,000	25,000	4,300	8,700	2016	2008	95
연안바다목장 조성사업	5,000	3,000	1,000	1,000	2016	2011	90
흥해읍 이인리 도로(대2-47)개설	4,650	550		4,100	2020	2013	12
한전~남부서간 도로(대2-2)개설	12,300	9,300	1,000	2,000	2016	2013	84
한신공영～이인리간 도로(대3-27)개설	47,800	8,400	2,500	36,900	2020	2014	20
연일읍사무소~인주IC간 도로(광3-4)개설	24,000	630	500	22,870	2020	2011	11
오천 문덕 도시계획도로 (대2-6)개설	19,800	6,000	7,800	6,000	2017	2014	70
양학동 체육관 ~ 용흥동 한빛교통간 도로개설	28,000	140	1,200	26,660	2020	2014	5
연일 달전리 도시계획도로(중1-119)개설	6,000			6,000	2020	2014	0
신광～흥해 매산리간 도로 확포장	20,000	2,500	900	16,600	2020	2012	17
창포동~흥해 도시계획 도로(중1-58)개설	29,000	200	200	28,600	2020	2010	1
대송 도시계획 도로(중1-17)개설	22,000	7,393	1,657	12,950	2020	2010	37
보경사 군립공원 진입도로 확포장	7,600	4,600	1,000	2,000	2018	2010	73
연일 오천리 도시 계획도로(중1-12)개설	11,700	9,890	1,310	500	2016	2009	96
흥해 성내 도시계획 도로(중1-99)개설	8,200	5,400	700	2,100	2017	2008	74
운제산 산림욕장 조성	4,010	1,850	1,000	1,160	2017	2013	75
보경사군립공원 자연학습장 조성	5,500	1,800	500	3,200	2018	2013	45
상수도 블록화 구축공사	10,900	8,236	2,664		2016	2008	90
포항시 장량 국민체육 센터 건립	16,000		2,700	13,300	2017	2015	5
기계 화봉～계전리 (면도101) 도로 확포장	7,500	600		6,900	2020	2015	8
대이동 공영주차장 조성	9,500		600	8,900	2018	2015	63
구 포항역 횡단도로(중1-57) 개설	3,000		1,000	2,000	2018	2015	33
형산강 복류수 집수매거교체공사	4,600		80	4,520	2016	2015	5
2015 포항 스틸 아트페스티벌	900		900		2015	2015	100

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2015년에    추진한 사업

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황 (작성서식 예시)

사업명

오천읍 주민복지회관 건립

담당자

새마을 체육산업과

김미화(☎270-2454)

□ 사업목적 및 필요성

○ 5만여 오천읍민에게 다양한 복지서비스 제공 및 지역주민들의 복리증진

○ 지역주민의 여가선용과 취미생활, 주민화합등 지역발전을 위한 장소제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2016년(3년간)

○ 위 치 : 포항시 남구 오천읍 원리 940번지 일원

○ 규 모 : 복지회관 1동(지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	3,800		64	879	2,857
국 비	1,500			713	787
시 도 비	300				300
시군구비	2,000		64	166	1,770
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2014. 3. 25. : 지방재정 투융자 심사

○ 2014. 7. 15. : 건축설계 현상공모(당선 : 건축사사무소 LIM)

○ 2014. 8. 14. : 주민설명회 개최

○ 2014. 8. 20. : 실시설계 용역

○ 2015. 6. 15. : 공사착공(㈜금매건설)

○ 2016. 8.현재 : 내부마감 및 부대토목 공사(공정률 95%)

□ 향후계획

○ 2016. 9. 2. : 공사 준공 예정

사업명

동해면 주민복지회관 건립

담당자

새마을체육산업과

김미화(☎270-2454)

□ 사업목적 및 필요성

○ 포항공항으로 수십년 동안 소음 등 생활권의 침해를 받은 동해면 주민을

위한 다양한 복지서비스 제공 및 지역주민들의 복리증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2016년(3년간)

○ 위 치 : 포항시 남구 동해면 약전리 370-3번지 일원

○ 규 모 : 복지회관 1동(지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,090백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	3,090			189	2,901
국 비	1,500			127	1,373
시 도 비
시군구비	1,590			62	1,528
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2014. 10. 31. : 지방재정 투융자 심사

○ 2014. 12. 01. : 중기재정계획 반영

○ 2015.  2. 06. : 주민설명회 개최

○ 2015.  5. 15. : 실시설계 용역(건축사무소 이림)

○ 2015. 11. 25. : 공사착공(대양건설㈜)

○ 2016.  8.현재 : 내부마감 및 부대토목공사(공정률 80%)

□ 향후계획

○ 2016. 11. 23 : 공사 준공 예정

사업명

구룡포 청소년수련원 증축공사

담당자

주민복지과 김현수(☎3054)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청소년을 위한 숙박시설 확충 및 다목적 체육관을 건립하여 잠재 역량

개발과 건전한 문화정착으로 건강한 청소육 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. ∼ 2016

○ 위 치 : 포항시 남구 구룡포읍 명월길 51

○ 규 모 : 1872㎡(지하 1층 / 지상 3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	5,600	3,000	1,200	1,400
국 비	2,200	1,500		700
시 도 비	300		300
시군구비	3,100	1,500	900	700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 2014. 3.24 : 실시설계 완료

○ 2014. 6. 9 : 공사착공

○ 2015. 8.10 : 1차수 공사 준공

○ 2015. 8.11 : 2차수 공사 시행

○ 2016. 1. 6 : 3차수 계약

□ 향후계획

○ 2016. 3 준공예정

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

흥해시장 장옥 개축

담당자

일자리경제노동과

김창달(☎270-2434)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대형 유통업체와 기업형 수퍼마켓의 무차별 진출에 따른 전통시장 붕괴로

북구권의 대표적 시장인 흥해시장을 시설 현대화 추진

○ 농축수산물을 농어민과 소비자간 공급처로 조성하여 상인 및 주변  지역

민들의 소득 증대에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2018(6개년)

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 성내리 43번지 일원

○ 규 모 : 장옥개축 및 주차장설치(지상2층, 연면적 7,800㎡)

⇒ 1차공사  : 지상1층 5개동 연면적 391㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	8,400		2,600		5,800
국 비	4,600		500		4,100
시 도 비
시군구비	3,800		2,100		1,700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2013.  2 ~ 2015. 7 : 주민설명회 개최

○ 2015.  1 : 1구간 공사착공

○ 2015.  5 : 1구간 상인 임시상점 추첨

○ 2016.  5 : 1차 준공완료

□ 향후계획

○ 2016. 10 : 2차공사 기본설계, 주민설명회 개최 및 편입지장물 보상협의

사업명

과메기산업화 가공단지 조성사업

담당자

수산진흥과 정철영(☎270-2852)

□ 사업목적 및 필요성

○ 과메기 생산시설 현대화로 식품의 안전성 확보

○ 생산․가공․유통․체험 관광시설 조성으로 과메기 부가가치 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2009. 1 ~ 2016. 12

○ 위 치 : 포항시 남구 구령포읍 구룡포항 및 특구일원

○ 규 모 : 부지면적 25,662㎡

(문화거리, 냉동공장, 시설현대화, 연구센터 및 해양전시관)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :   38,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	38,000	25,000	4,300	8,700
국 비	19,000	12,500	2,200	4,300
시 도 비	5,700	3,700	600	1,400
시군구비	13,300	8,800	1,500	3,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 기본 및 실시설계, 생산기반시설, 과메기문화거리 조성

○ 과메기 가공공장 및 냉동창고 건립, 진입도로 개설

○ 과메기 연구센터 및 문화관 준공

□ 향후계획

○ 과메기 연구센터는 과메기 연구분야와 분석 검사장비를 공유할 수 있는       민간연구소, 대학, 포항테크노파크 등에 민간위탁 계획

○ 과메기 판매장, 아치조형물, 가로환경정비사업은 지역주민들의 의견을         수렴하여 추진 계획

사업명

연안바다목장 조성사업

담당자

수산진흥과 이성규(☎270-2742)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인공 해조장 및 수산자원 조성으로 수산물의 지속적인 생산 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ~ 2016(5년간)

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 오도 1, 2리 지선

○ 규 모 : 155.2ha(인공어초, 레져 및 유어낚시터 조성, 수산자원조성등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	5,000	3,000	1,000	1,000
국 비	2,500	1,500	500	500
시 도 비	500	300	100	100
시군구비	2,000	1,200	400	400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2009. 11. 25 ~ 2010. 12. 31 기본계획수립 용역

○ 어류용 어초 19기, 패조류용 어초 523개 조성, 수산자원 조성 등

□ 향후계획

○ 어초시설, 수산자원조성, 수중테마공원 조성 등

○ 어초시설 등의 지속적인 유지 관리

사업명

흥해읍 이인리 도로(대2-47)개설

담당자

건설과 정대혁(☎270-3424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로기반시설 확충으로 주민생활편익 제공

○ 도심을 연결하는 도로망 확충으로 지역균형개발 촉진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008~2020 (당초 2008 ~ 2018)

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 대련리 ~ 흥해읍 성곡리

○ 규 모 : 도로개설 L=0.52km, B=30m(당초 L=4.1km, B=30m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,650백만원(당초 14,000백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	4,650	550		1,000	3,100
국 비
시 도 비
시군구비	4,650	550		1,000	3,100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 12%)

○ 편입토지 보상 1식

□ 향후계획

○ 도로개설 L=0.52km

사업명

한전~남부서간 도로(대2-2)개설

담당자

건설과 정병조(☎270-3423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로기반시설 확충으로 주민생활편익 제공

○ 도심을 연결하는 도로망 확충으로 지역균형개발 촉진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008 ~ 2016 (당초 2011~2015)

○ 위 치 : 포항시 남구 상도동 한전 ~ 남부경찰서

○ 규 모 : 도로개설 L=0.48km, B=15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,300백만원(당초 14,000백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	12,300	9,300	1,000	2,000
국 비
시 도 비
시군구비	7,300	4,300	1,000	2,000
지 방 채	5,000	5,000
민간자본
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 84%)

○ 철도기면상승 1식(상도지하도 설치)

○ 편입토지 보상 완료

○ 도로개설 L=0.24km

□ 향후계획

○ 도로개설 L=0.24km

사업명

한신공영~이인리간 도로(대3-27)개설

담당자

건설과 서동기(☎270-3425)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로기반시설 확충으로 주민생활편익 제공

○ 흥해 이인리 신역사 연결도로 개설로 교통소통원활

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011 ~ 2020

○ 위 치 : 포항시 북구 우현동 ~ 흥해읍 이인리

○ 규 모 : 도로개설 L=2.74km, B=25m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 47,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	47,800	8,400	2,500	1,500	35,400
지 방 채	5,000	5,000
국 비
시 도 비	5,700	700	500	500	4,000
시군구비	37,100	2,700	2,000	1,000	31,400
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 23%)

○ 도로개설 L=0.26km

○ 편입토지 보상중

□ 향후계획

○ 도로개설 L=2.47km

○ 편입토지 보상

사업명

연일읍사무소~인주IC간도로

(광3-4)개설

담당자

건설과 서동기(☎270-3425)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로기반시설 확충으로 주민생활편익 제공

○ 주요 간선도로 연결 도로 개설로 교통소통원활

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011 ~ 2020 (당초 2011~2017)

○ 위 치 : 포항시 남구 연일읍 괴정리 ~ 인주리

○ 규 모 : 도로개설 L=1.56km, B=40m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 24,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	24,000	630	500	1,800	21,070
국 비
시 도 비				200	5,800
시군구비	24,000	630	500	1,600	15,270
지 방 채
민간자본
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 11%)

○ 편입토지 보상중

□ 향후계획

○ 편입토지 보상

○ 도로개설 L=1.56km

사업명

오천 문덕 도시계획도로(대2-6)개설

담당자

건설과 정대혁(☎270-3424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 철강공단과 주택단지의 연결로 공단 근로자의 교통편의 제공

◦ 철강공단 물동량 수송로 확보로 물류비용 절감

□ 사업개요

○ 기 간 :  2012 ~ 2017

○ 위 치 : 포항시 남구 오천읍 문덕리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=1.24km, B=30m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  19,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	19,800	6,000	7,800	1,500	4,500
국 비	9,900	3,000	6,900
시 도 비	990	300	690
시군구비	8,910	2,700	210	1,500	4,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  70%)

○ 오천 문덕1교(대2-6)설치공사 공사중(공정율 89%)

○ 편입토지 보상중(74%)

□ 향후계획

○ 보상 완료

○ 문덕1교 설치 완료, 도로개설 완료 L=1.13km

사업명

양학동체육관~용흥동 한빛교통간 도로개설

담당자

도로시설과

오성훈(☎270-3434)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로개설로 지역주민들의 교통소통 원활 및 주민생활편의 제공

○ 장기 미집행 도시계획도로 개설로 민원해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2006. 1. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 포항시 북구 양학동 ~ 용흥동

○ 규 모 : 도로개설 L=0.93km, B=20m, 토지보상 27,489㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 28,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	28,000	140	1,200	1,000	25,660
국 비
시 도 비	11,200	0	400	0	10,800
시군구비	16,800	140	800	1,000	14,860
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 실시설계 완료

○ 토지보상 8,766㎡

□ 향후계획

○ 토지보상 18,723㎡

○ 도로개설 L=0.93km, B=20m

□ 사업변경 내역 : 해당 없음

사업명

연일 달전리 도시계획도로

(중1-119) 개설

담당자

도로시설과

이정욱(☎270-3444)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로기반시설 확충으로 지역균형발전

○ 지역주민들의 교통소통 원활 및 주민생활편익 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2020

○ 위 치 : 남구 연일읍 달전리

○ 규 모 : 도로개설 L=1.1km, B=20m, 토지보상 12,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기 투 자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	6,000	0	0	0	6,000
시 도 비		0	0	0	0
시군구비	6,000	0	0	0	6,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○

□ 향후계획

○ 토지보상 12,000㎡

○ 도로개설 L=1.1km, B=20m

사업명

신광~흥해 매산간 도로(시도7호)

확포장

담당자

도로시설과

권용광(☎270-3313)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로기반시설 확충으로 주민생활편익 제공

○ 도로확장으로 지역주민들이 교통소통 원활

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010 ~ 2020

○ 위 치 : 북구 신광면 사정리 ~ 흥해읍 매산리

○ 규 모 : 도로확포장 L=3.84km, B=16.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	20,000	2,500	900	500	16,100
국 비
시 도 비	6,000	100			5,900
시군구비	14,000	2,400	900	500	10,200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 17%)

○ 2009. 3.   . : 중기 지방재정계획 반영

○ 2011. 8.   . : 기본 및 실시설계용역완료

○ 2012. 3. 27. : 경북도 투융자심사(조건부) 반영

○ 2016. 8월 현재 공사진도율 0%(총사업비 중 17% 집행)

□ 향후계획

○ 2016년 8월 계속공사 편입토지 보상협의

□ 사업변경 내역 : 해당 없음

사업명

창포동~흥해 성곡간(중1-58) 개설

담당자

도로시설과

오성훈(☎270-3434)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기간 미집행 도시계획사업의 추진으로 민원 해소

○ 도시기반시설 확충에 따른 지역 균형개발 촉진 및 숙원사업해결

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 1. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 포항시 북구 창포동 ~ 흥해읍 성곡리

○ 규 모 : 도로개설 L=2.7km, B=20m, 토지보상 84,428㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	29,000	200	200	200	28,400
국 비
시 도 비	8,700				8,700
시군구비	20,300	200	200	200	19,700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)

○ 실시설계 완료

○ 토지보상 295㎡

□ 향후계획

○ 토지보상 84,133㎡

○ 도로개설 L=2.7km, B=20m

□ 사업변경 내역 : 해당 없음

사업명

대송 도시계획도로(중1-17) 개설

담당자

도로시설과

이정욱(☎270-3444)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로기반시설 확충으로 공단 물동량 수송 원활

○ 지역주민들의 교통소통 원활 및 주민생활편익 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010 ~ 2020

○ 위 치 : 남구 신기동삼거리 ~ 대송면 송동리

○ 규 모 : 도로개설 L=2.1km, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기 투 자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	22,000	7,393	1,657	500	12,450
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	22,000	7,393	1,657	500	12,450

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 37%)

○ 도로개설 L=1.28km, B=20m

□ 향후계획

○ 도로개설 L=0.82km, B=20m

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
사업기간	2010 ~ 2015	2010 ~2020

사업명

보경사 군립공원 진입도로

확포장

담당자

도로시설과

권용광(☎270-3313)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로기반시설 확충으로 주민생활편익 제공

○ 기존도로 노폭 협소로 인한 지역 주민들의 교통사고 위험 해소 및 관광

성수기 교통정체 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010 ~ 2018

○ 위 치 : 북구 송라면 광천리 ~ 중산리

○ 규 모 : 도로확포장 L=4.2km, B=11.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	7,600	4,600	1,000	600	1,400
국 비
시 도 비	3,600	2,300	300	300	700
시군구비	4,000	2,300	700	300	700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 73%)

○ 2009.  3.   . : 중기 지방재정계획 반영

○ 2010.  5. 21. : 기본설계용역 완료

○ 2010. 10. 20. : 경북도 투융자심사 반영

○ 2016. 8월 현재 공사진도율 73%

□ 향후계획

○ 2016년 8월 계속공사 편입토지 보상협의

□ 사업변경 내역(해당시)

사업명

연일 오천리 도시계획도로(중1-12) 개설

담당자

도로시설과

이정욱(☎270-3445)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기간 미집행 도시계획사업의 추진으로 민원 해소

○ 도시기반시설 확충에 따른 지역 균형개발 촉진 및 숙원사업해결

□ 사업개요

○ 기 간 : 1996 ~ 2016

○ 위 치 : 남구 연일읍 생지리 ~ 오천리

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.51km, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,700백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기 투 자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	11,700	9,890	1,310	500	0
시 도 비	800	800	0	0	0
시군구비	10,900	9,090	1,310	500	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 도로개설 L=1.51km, B=20m

□ 향후계획

○ 없음

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
사 업 량	L=1.43km	L=1.51km
총사업비	140억원	117억원
사업기간	1996 ~ 2015	1996 ~2016

사업명

흥해 성내 도시계획도로(중1-99) 개설

담당자

도로시설과

오성훈(☎270-3434)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기간 미집행 도시계획사업의 추진으로 민원 해소

○ 도시기반시설 확충에 따른 지역 균형개발 촉진 및 숙원사업해결

□ 사업개요

○ 기 간 : 2006. 1. ~ 2017. 12.

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 성내리

○ 규 모 : 도로개설 L=0.4km, B=20m, 토지보상 5,617㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	8,200	5,400	700	2,100
국 비
시 도 비	100		100
시군구비	8,100	5,400	600	2,100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 74%)

○ 실시설계 완료

○ 토지보상 4,114㎡

○ 도로개설 L=0.25km, B=20m

□ 향후계획

○ 토지보상 1,503㎡

○ 도로개설 L=0.15km, B=20m

□ 사업변경 내역 : 해당 없음

사업명

운제산 산림욕장 조성

담당자

도시녹지과

유선혜(☎270-3824)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수려한 자연경관과 오어사 신라천년 고찰이 자리하고 있는 운제산에 시민       이 함께하는 산림휴양시설 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ~ 2017 (5년)

○ 위 치 : 포항시 남구 대송면 대각리 산105번지 일원

○ 규 모 : 9.6ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,010백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	4,010	1,850	1,000	360	800
국 비	980	200	200	180	400
시 도 비	294	60	60	54	120
시군구비	1,836	1,290	140	126	280
지 방 채
민간자본
특별교부세	900	300	600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 운제산 산림욕장 조성 타당성 조사 및 기본계획 용역 완료

○ 운제산 산림욕장 조성사업 기반조성 완료

- 주차장 2개소, 진입도로, 광장조성, 전기·통신공사, 가로등 설치, 조경식재 등

○ 2016.3~9 : 관리사 및 공중화장실 신축공사 및 CCTV 설치 추진중

숲가꾸기 사업 및 등산로 조성공사 추진중

□ 향후계획

○ 2017년 8억원(지특 4억원 포함)

- 숲속쉼터(파고라, 평상, 삼림욕벤치), 숲속놀이터 및 숲교실, 피크닉장,

음수대, 물놀이장, 다목적 구장, 하늘데크 등

사업명

보경사군립공원 자연학습장 조성

담당자

도시녹지과

이의준(☎270-3224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주5일 근무제 시행 확대로 여가 생활을 위한 시민 휴식공간 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2018

○ 위 치 : 북구 송라면 보경사 일대

○ 규 모 : A=41,901㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	5,500	1,800	500	500	2,700
국 비
시 도 비
시군구비	5,500	1,800	500	500	2,700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 2009년 군립공원 조성계획시 자연학습장 계획

2012. 7월 ~ 8월 : 기초 현황조사 및 주민의견청취

2012. 9. 5 : 공원 변경 계획(자연학습장) 보고회(1차)

2012. 11. 27 : 공원 변경 계획(자연학습장) 보고회(2차)

2012. 12. 20 : 포항시 공원계획위원회 심의

2013. 1. 1 : 군립공원 계획 결정 고시·공고

○ 현재 진행 : 토지 보상 24,904㎡ 28억원

· ‘15년까지 : 24필지, 20,667㎡, 23억원

· ‘16년 : 5필지, 4,237㎡, 5억원

□ 향후계획

○ ’17년 6월 : 토지보상완료 및 실시설계

○ ’17년 6월 : 공사착공

○ ’18년 5월 : 공사준공

□ 사업변경 내역

○ 2009년 17,041㎡ → 2013년 41,901㎡ 변경 확장

사업명

상수도 블록화 구축공사

담당자

상수도과

최영훈(☎270-5373)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상수도 유수율을 제고하여 만성적인 공기업 경영수지 개선

○ 누수 및 수질오염 사고 시 단수구역 최소화로 시민불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 ~ 2016년

○ 위 치 : 포항시내 급수구역(양덕, 유강수계)

○ 규 모 : 블록화 54구역 → 기시행 7구역(2008년~2011년)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15년	‘16년	‘17년 이후
계	10,900	8,236	2,664
국 비
시 도 비
시군구비	10,900	8,236	2,664
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 블록구축 및 유량계실 설치 47개소 중 33개소 완료

□ 향후계획

○ 블록 구역고립 확인 및 누수탐사수선 시행

○ 블록화 시스템 개선보완 및 유지관리로 유수율 제고

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초 2012년 ~ 2014년 → 변경 2012년 ~ 2016년

사업명

장량국민체육센터 건립

담당자

새마을체육산업과

권대웅(☎270-2803)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활체육 활성화를 위한 기반시설 확충으로 삶의 질 향상

○ 주민 건강증진 및 복지 체육의 필요성

□ 사업개요

○ 기 간 :  2013 ~ 2017

○ 위 치 : 포함시 북구 장성동 335-1외 8필지

○ 규 모 : 연면적 5,700㎡(체육관,수영장,문화센터)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017연도 이후
계	16,000		2,700	5,000	8,300
국 비	2,900		1,500	1,400
시 도 비
시군구비	13,100		1,200	3,600	8,300
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2015. 02 : 투융자심사(조건부)

○ 2015. 07 : 사업계획변경

○ 2015. 09 : 실시설계용역 시행

○ 2016. 08 : 사업 편입부지 보상

□ 향후계획

○ 2016. 12  : 공사착공

○ 2017. 12  : 공사준공

□ 사업변경 내역

○ 2015.07 : 사업비 변경 (당초 115억⇒ 변경 160억)

- 국민체육센터내 문화시설(1,700㎡-주민센터) 추가 건축

사업명

기계 화봉~계전리(면도101)

도로확포장

담당자

도로시설과

이창섭(☎270-3435)

□ 사업목적 및 필요성

○ 계전리와 면 소재지를 연결하는 농어촌도로(면도101)확포장을 통해

주민 및 차량통행 편의제공

○ 지역간 접근성 개선으로 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2020

○ 위 치 : 남구 기계면 화봉~계전리 지내

○ 규 모 : 도로개설 L=4.4km, B=8m,

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,500백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기 투 자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	7,500	600	0	300	6,600
시 도 비	3,700	250	0	150	3,300
시군구비	3,800	350	0	150	3,300

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 8%)

○ 실시설계용역 및 토지보상 1필지

□ 향후계획

○ 토지보상 3필지 1,826㎡

○ 지장물10건

사업명

대이동 공영주차장 조성공사

담당자

교통지원과

오대용(☎270-3634)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주택 및 상가가 밀집한 이동지역의 불법 주정차로 인한 교통체증 발생

○ 공영주차장 건립으로 주차환경개선 및 이동지역 상가 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1 ~ 2018. 12

○ 위 치 : 포항시 남구 이동 659번지

○ 규 모 : 지하주차장 10,000㎡(주차면수 310면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	9,500		600	5,400	3,500
국 비	4,750		300	2,700	1,750
시 도 비
시군구비	4,750		300	2,700	1,750
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 63%)

○ 2014.12월 : 주차환경개선지원사업 국비 확보

○ 2015. 9월 : 도시관리계획(주차장, 공원) 중복 결정

○ 2015.12월 : 도시계획시설 실시계획 인가 및 고시

○ 2016. 2월 : 대이동 3공원 공영주차장 조성공사 착공

□ 향후계획

○ 2016.11월 : 대이동 3공원 공영주차장 조성공사 준공

○ 2017. 2월 : 대이동 4공원 공영주차장 도시관리계획(주차장, 공원) 중복                  결정 및 실시설계 용역

○ 2018. 2월 : 대이동 4공원 공영주차장 조성공사 착공

○ 2018.12월 : 대이동 4공원 공영주차장 조성공사 준공

사업명

구.포항역 횡단도로(중1-57) 개설

담당자

도로시설과

오성훈(☎270-3434)

□ 사업목적 및 필요성

○ 역사이전에 따른 시가지 연겨도로 기능 회복 및 접근성 확보

○ 지역주민 통행불편 해소 및 구도심권 개발 촉진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1. ~ 2018. 12.

○ 위 치 : 포항시 북구 용흥동 ~ 중앙동(구.포항역사)

○ 규 모 : 도로개설 L=0.15km, B=20m, 토지보상 3,424㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,000		1,000	850	1,150
국 비
시 도 비
시군구비	3,000		1,000	850	1,150
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 33%)

○ 토지보상(철도공사) 매매계약

○ 도로개설 L=0.15km, B=20m

□ 향후계획

○ 토지보상(철도공사, 철도시설공단) 3,424㎡

□ 사업변경 내역 : 해당 없음

사업명

형산강 복류수 집수매거 교체공사

담당자

상수도과

박강혁(☎270-5353)

□ 사업목적 및 필요성

○ 집수매거 이탈, 세굴 등 노출로 표류수 유입됨에 따라 흐린물 발생으로

민원대응 및 복류수의 안정적인 취수원 확보로 수돗물 수질개선 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015~2016

○ 위 치 : 남구 연일읍 유강리 형산강 일원

○ 규 모 : 집수매거(D1200) L=1.1㎞, 접합정 15개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	4,600		80	4,520
국 비
시 도 비
시군구비	4,600		80	4,520
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2015. 12  실시설계용역 및 소규모환경영향평가용역 완료

○ 2016.  6  하천수사용허가 및 실시계획승인

□ 향후계획

○ 2016. 10  갈수기 사업시행

○ 2016. 12  사업준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

2016 포항스틸아트페스티벌

담당자

시립미술관

허정선(☎250-6023)

□ 사업목적 및 필요성

○ 스틸, 해양자원을 예술로 융복합한 문화관광산업 조성으로 경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 10. 16. ~ 11. 1.

○ 위 치 : 포항시 남구 해도공원

○ 규 모 : 스틸아트작품 설치 38점(작가 30, 철강기업 8), 아트웨이 투어,

대장간체험 등 시민참여프로그램 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  900백만원                                 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	900		900
국 비	100		100
시 도 비	300		300
시군구비	500		500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 2015. 4. 문체부 공모 신청 및 선정

○ 2015. 6. 계획수립,

○ 2015. 7. 철강기업작품 제작, 작가작품 선정, 시민참여작 프로그램 추진

○ 2015. 9. 작품 설치를 통한 아트웨이 조성

○ 2015. 10. 개막식 등 본 행사

○ 2015. 11. 평가

□ 향후계획

○ 스틸컨벤션시티로서 창조도시 포항의 미래 신성장 인프라 구축

○ 트리엔날레 형식의 국제규모 스틸축제 개최로 창조경제 모델 구축

□ 사업변경 내역(해당없음)

9-2. 지방채 발행사업:  ‘15년에 추진한 지방채 발행사업은 없음

우리 포항시에서 ‘15년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2015년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

9-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황 : 해당없음

9-3. 민간투자사업

우리 포항시에서 ‘15년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’14년까지 부담액	’15년 부담액	’16년 이후 부담 예정액
BTL	07년 포항 하수관거	포항맑은물(주)	113,568	9,879	13,782	258,929	‘14.4.13 ~ ‘34.4.12
	09년 포항 하수관거	포항 맑은물길(주)	66,805	3,552	7,104	135,508	‘14.7.1 ~ ‘34.6.30
	10년 포항 하수관거	청정포항 (주)	87,965			210,699	‘16.4.1 ~ ‘36.3.31
	13년 포항 하수관거	포항새물길(주)	55,754			122,919	‘18.10.1 ~ ‘38.9.30
BTO	포항시 하수처리수 재이용시설 민간투자사업	㈜피워 터스	139,086				‘14.8.1 ~ ‘34.7.31
	포항하수 종말처리장 2단계(증설) 건설공사	포항수질환경(주)	107,686	97,121	16,273	134,706	‘07.11.1~’22.10.31
	포항시 장량하수 처리시설 민간투자사업	푸른장량 (주)	52,739	15,048	3,841	77,921	‘11.1.1~’30.12.31
	포항시 청하‧기계하수처리시설 건설공사 민간투자사업 생활폐기물에너지화 사업	포항엔텍 (주)	64,447			99,712	‘16.2.26~’36.2.25

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2015년까지는 집행액(결산기준), 2016년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

☞ 재정부담액이 큰 사업 위주로 재정부담이 큰 사유를 설명

9-3-1. 개별 민간투자사업 현황

개별 민간투자사업 현황

사업명

07년 포항 하수관거정비

담당자

하수도과

최문현(☎270-5424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우·오수를 분리하여 연안오염 방지 및 하수처리장 효율성 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2009.11.13 ~ 2014.04.12

○ 위치 : 포항시 용흥동, 중앙동, 학산동, 죽도동, 양학동, 대이동, 송도동 일원

○ 민간사업자 : 포항맑은물(주)

○ 총사업비 : 113,568백만원

○ 사업규모 : 하수관로 101㎞, 배수설비 9,780가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	282,590	9,879	13,782	13,841	245,088
국 비	178,935	6,415	8,947	8,947	154,626
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	103,655	3,464	4,835	4,894	90,462
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영 중

○ 운영기간 : 2014. 4. 13 ~ 2034. 4. 12 (20년간)

□ 향후계획

○ 2034년까지 민간사업자(운영사)에서 운영 및 유지관리

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

09년 포항 하수관거정비

담당자

하수도과

최문현(☎270-5424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우·오수를 분리하여 연안오염 방지 및 하수처리장 효율성 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2011.1.1 ~ 2014.06.30

○ 위치 : 포항시 죽도동, 용흥동, 대이동 일원

○ 민간사업자 : 포항맑은물길(주)

○ 총사업비 : 66,805백만원

○ 사업규모 : 하수관로 39㎞, 배수설비 3,083가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	146,164	3,552	7,104	7,135	128,373
국 비	89,396	2,235	4,470	4,470	78,221
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	56,768	1,317	2,634	2,665	50,152
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영 중

○ 운영기간 : 2014. 7. 1 ~ 2034. 6. 30 (20년간)

□ 향후계획

○ 2034년까지 민간사업자(운영사)에서 운영 및 유지관리

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

10년 포항 하수관거정비

담당자

하수도과

최문현(☎270-5424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우·오수를 분리하여 연안오염 방지 및 하수처리장 효율성 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2012.6.1 ~ 2016.03.31

○ 위치 : 포항시 대잠동, 죽도동, 상대동, 해도동 일원

○ 민간사업자 : 청정포항(주)

○ 총사업비 : 87,965백만원

○ 사업규모 : 하수관로 48㎞, 배수설비 4,950가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	210,699	-	-	-	210,699
국 비	133,173	-	-	-	133,173
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	77,526	-	-	-	77,526
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 시공 중

○ 시공기간 : 2012. 6. 1 ~ 2016. 3. 31 (46개월간)

□ 향후계획

○ 2016년 3월 준공

○ 2036년까지 민간사업자(운영사)에서 운영 및 유지관리

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

13년 포항 하수관거정비

담당자

하수도과

이동영(☎270-5423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우·오수를 분리하여 연안오염 방지 및 하수처리장 효율성 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2015.7.1 ~ 2018.09.30

○ 위치 : 포항시 상대동, 해도동 일원

○ 민간사업자 : 포항새물길(주)

○ 총사업비 : 55,754백만원

○ 사업규모 : 하수관로 53㎞, 배수설비 4,412가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	122,919	-	-	-	122,919
국 비	71,990	-	-	-	71,990
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	50,929	-	-	-	50,929
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 시공 중

○ 시공기간 : 2015. 7. 1 ~ 2018. 9. 30 (39개월간)

□ 향후계획

○ 2018년 9월 준공

○ 2038년까지 민간사업자(운영사)에서 운영 및 유지관리

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

포항시 하수처리수 재이용시설

민간투자사업

담당자

하수재생과

박중칠(☎270-5283)

□ 사업목적 및 필요성

○ 버려지던 하수처리장 방류수를 양질의 공업용수로 재처리하여 저렴하게       공급함에 따라 수요처의 경제적 부담 경감 및 지역의 만성적인 물 부족       문제를 해결하는 신규 수자원을 확보함

□ 사업개요

○ 기    간 : 2014. 8. 1. ~ 2034. 7. 31.

○ 위    치 : 포항시 남구 형산강북로 203 (상도동)

○ 민간사업자 : ㈜피워터스

○ 총사업비 : 140,004백만원

○ 사업규모 : 시설용량 100,000㎥/일, 공급관로 11.71㎞

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 최소수익보장 없음, 운영기간 ‘14. 8. 1.~’34. 7. 31.

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영 중

□ 향후계획

○ 효율적이고 안정적인 운영

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 :

사업명

포항하수종말처리장 2단계(증설)

건설공사 민간투자사업

담당자

하수재생과

박중칠(☎270-5283)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시민 생활환경 개선 및 방류수역 수질보전에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2007. 11. 1. ~ 2022. 10. 31.

○ 위    치 : 포항시 남구 형산강북로 203 (상도동)

○ 민간사업자 : 포항수질환경(주)

○ 총사업비 : 228,949백만원

○ 사업규모 : 시설용량 232,000㎥/일

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 사용료수입 보장(연간 추정사용료 수입의 47%에 미달할

경우 미달분 지급), 운영기간 ‘07. 11. 1.~’22. 10. 31.(15년)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	248,100	97,121	16,273	17,012	117,694
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영 중

□ 향후계획

○ 효율적이고 안정적인 운영

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 :

사업명

포항시 장량하수시설 민간투자사업

담당자

하수재생과

박중칠(☎270-5283)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시민 생활환경 개선 및 방류수역 수질보전에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2011. 11. 1. ~ 2030. 12. 31.

○ 위    치 : 포항시 북구 흥해읍 해안로 681-18

○ 민간사업자 : 푸른장량(주)

○ 총사업비 : 103,157백만원

○ 사업규모 : 시설용량 15,000㎥/일

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 최소수익보장 없음, 운영기간 ‘11. 1. 1.~’30. 12. 31.(20년)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	96,810	15,048	3,841	3,891	74,030
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영 중

□ 향후계획

○ 효율적이고 안정적인 운영

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 :

사업명

포항시 청하‧기계하수시설 건설공사 민간투자사업

담당자

하수재생과

박중칠(☎270-5283)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시민 생활환경 개선 및 방류수역 수질보전에 기여

□ 사업개요

○ 공사기간 : 2013. 01. 10. ~ 2016. 02. 25.

○ 운영기간 : 2016. 02. 26. ~ 2036. 02. 25.

○ 위    치 : 포항시 북구 청하면 화두길 138-15, 기계면 학야길 17-116

○ 민간사업자 : 포항엔텍(주)

○ 총사업비 : 64,447백만원

○ 사업규모 :

- 청하하수처리시설 : 시설용량 1,900㎥/일, 관로 56.83㎞

- 기계하수처리시설 : 시설용량 1,000㎥/일, 관로 28.50㎞

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 최소수익보장 없음, 운영기간 ‘16. 2. 26.~’36. 2. 25.(20년)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	99,712	-	-	933	98,779
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영 중

□ 향후계획

○ 효율적이고 안정적인 운영

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 :