109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 포항시에서 ‘16년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2015년까지 집행사업비	2016년 소요사업비	2017년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
동해면민복지회관 건립	3,090	2,000	1,090	-	2016	2014	100
오천읍 주민복지회관건립	3,800	3,100	700	-	2016	2014	100
장량국민체육센터 건립	21,400	2,700	5,400	13,300	2018	2015	20
국민안전로봇 프로젝트사업	67,100	-	9,179	57,921	2021	2016	13
오픈-이노베이션센터 플랫폼 구축	20,240	-	6,740	13,500	2019	2016	10
구룡포해수욕장 특화개발사업	1,050	-	350	700	2018	2015	66
수산물 처리저장시설 (제빙냉동공장)	2,236	-	2,236	-	2016	2014	100
한전~남부서간도로 (대2-2)개설	12,300	10,300	2,000	-	2016	2016	100
장성~흥해간 도로 (광3-3)확장	4,400	1,000	3,200	200	2017	2016	100
형산강 상생로드 개설	2,000	-	2,000	-	2016	2015	100
형산강 수상레저타운조성	8,997		3,000	5,997	2018	2015	68
도심 해안변 포항워터폴리조성	5,000	1,000	1,000	3,000	2019	2014	40
대이동 공영주차장 건립	6,036	600	5,436	-	2016	2015	100
형산강 송도솔밭 도시숲 조성	6,000	-	3,000	3,000	2017	2015	35
흥해~신광 농어촌도로 (면도101,102)도로확포장	4,500	300	500	3,700	2020	2015	20
기계 계전리 (면도101) 도로확포장	7,500	600	300	6,600	2026	2015	14
형산강 복류수 집수매거 교체공사	4,600	3,100	1,500	-	2017	2015	100
효곡동주민센터 건립공사	5,000	300	2,900	1,800	2017	2014	41
영일만3일반산업단지 기반시설 조성공사	4,200	-	900	3,300	2018	2016	50
구룡포 청소년수련원 증축공사	5,600	4,200	1,400	-	2016	2012	100

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2016년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

동해면민복지회관 건립

담당자

새마을체육산업과

이정화(☎270-2454)

□ 사업목적 및 필요성

○ 포항공항으로 수십년 동안 소음 등 생활권의 침해를 받은 동해면 주민을

위한 다양한 복지서비스 제공 및 지역주민들의 복리증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2016년

○ 위 치 : 포항시 남구 동해면 약전리 370-3번지 일원

○ 규 모 : 복지회관 1동(지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,090백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,090	-	-	-	-
국 비	1,500	1,500	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,590	500	1.090	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2014. 10. 31. : 지방재정 투융자 심사

○ 2014. 12. 01. : 중기재정계획 반영

○ 2015.  2. 06. : 주민설명회 개최

○ 2015.  5. 15. : 실시설계 용역(건축사무소 이림)

○ 2015. 11. 25. : 공사착공(대양건설㈜)

○ 2016. 11. 23. : 준공

□ 향후계획

○ 없음

사업명

오천읍민복지회관 건립

담당자

새마을체육산업과

이정화(☎270-2454)

□ 사업목적 및 필요성

○ 5만여 오천읍민에게 다양한 복지서비스 제공 및 지역주민들의 복리증진

○ 지역주민의 여가선용과 취미생활, 주민화합 등 지역발전을 위한 장소제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2016년

○ 위 치 : 포항시 남구 오천읍 원리 940번지 일원

○ 규 모 : 복지회관 1동(지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,800	-	-	-	-
국 비	1,800	1,800	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,000	1,300	700	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2014. 3. 25. : 지방재정 투융자 심사

○ 2014. 7. 15. : 건축설계 현상공모(당선 : 건축사사무소 LIM)

○ 2014. 8. 14. : 주민설명회 개최

○ 2014. 8. 20. : 실시설계 용역

○ 2015. 6. 15. : 공사착공(㈜금매건설)

○ 2016. 9. 02. : 준공

□ 향후계획

○ 없음

사업명

장량국민체육센터 건립

담당자

새마을체육산업과

유승욱(☎270-2804)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활체육 활성화를 위한 기반시설 확충으로 시민들의 삶의 질 향상

○ 주민 건강증진 및 생활체육활성에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2018년

○ 위 치 : 포항시 북구 장성동 335-1외 8필지

○ 규 모 : 연면적 5,683㎡(체육관, 수영장, 문화센터)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	21,400	2,700	5,400	13,300	-
국 비	2,900	1,500	1,400	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	18,500	1,200	4,000	13,300	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2015. 12. ~ 2016. 12. : 실시설계용역 추진

○ 2017.  4. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2018.  4. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 2015. 12. : 사업비 변경 (당초 115억⇒ 변경 160억)

- 국민체육센터내 문화시설(1,700㎡-주민센터) 추가 건축

○ 2016.  8. : 사업비 변경 (당초 160억⇒ 변경 214억)

- 감정평가에 따른 편입토지 보상비 증액(54억) 반영

사업명

오픈-이노베이션센터 플랫폼 구축

담당자

미래전략산업과

신성민(☎054-270-2423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 포스텍 바이오분야의 우수한 연구역량과 제4세대 방사광가속기를 활용한

바이오벤처, 제약․생명공학 기업유치 및 기반 연구시설 구축 필요

○ 지역 바이오기업들이 포스텍의 우수한 연구시설을 활용할 수 있도록

전문연구소 인근 기업지원시설 구축을 통한 시너지효과 극대화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2019

○ 위 치 : 포스텍 생명공학연구센터 주차장 부지

○ 규 모 : 6,930㎡(2,100평), 지하1층/지상3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,240백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	20,240		6,740	5,500	8,000
국 비
시 도 비	4,250		2,250	2,000
시군구비	4,250		2,250	2,000
지 방 채
민간자본	11,740		2,240	1,500	8,000
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2016. 05 : 가속기클러스터협의회 신약개발분과위원회 출범

○ 2016. 11 : 신약개발 공동 합의문 발표 및 투자기업 MOU체결

○ 2016. 12 : 포스텍『바이오 오픈-이노베이션 센터(BOIC)』건립 최종 승인

○ 2017. 04 : 가속기활용 신약원천기술개발 공모사업 선정

○ 2017. 05 ~ : 신축건물 설계용역 발주

□ 향후계획

○ 2017. 12 : 바이오 오픈-이노베이션 센터 계약 및 착공

○ 2019. 02 : 『바이오 오픈-이노베이션 센터(BOIC)』건물 준공

□ 사업변경 내역

	당 초	현 재
사업기간	2016 ~ 2017	2016 ~ 2019
사 업 비	95억원(도 35, 시 35, 민 25)	202.4억원(도42.5, 시42.5, 민117.4)

사업명

구룡포해수욕장 특화개발사업

담당자

해양산업과

김종찬(☎270-5223)

□ 사업목적 및 필요성

○ 호미곶 반도길 선상에 위치한 구룡포해수욕장만의 차별화된 경관       등을 활용하여 해수욕장 관광객 유치를 위한 특화개발사업 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2018

○ 위 치 : 포항시 남구 구룡포해수욕장 일원

○ 규 모 : 해수욕장 특화개발 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,050백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	1,050		350	350	350
국 비
시 도 비	210		70	70	70
시군구비	840		280	280	280
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 66%)

○ 2016년 - 데크계단(L=43m), 막구조파고라 1개소, 잔디블록(주차장부지) 및 투수블록 포장(A=748㎡), 조명등 설치 등

○ 2017년 - 해수욕장 화장실2동 및 샤워장 리모델링(화장실 1동 증축), 파도막이 옹벽(L=200m), 파제벽(L=71m), 데크로드 및 전망대 1식

□ 향후계획

○ 보행로 설치(L= 200m), 주차장추가조성(A=500㎡), 편의시설 개축 1식

□ 사업변경 내역

구 분		당 초	변 경
사업규모	A구역 주상절리	판매시설건립 100㎡ 상징조형물 1식 공원조성 1,600㎡ 산책로 100m	막구조물 1개소 데크계단 L=43m 투수블록 및 잔디블록 A=748㎡ 조명시설 1식
	B구역 해수욕장	- 화장실 리모델링 1식 에어건 2식 음수대 1식 안내표지판 2식 관광안내도 1식 주차장 1식	파도막이 옹벽 및 보행로 200m 데크로드 및 전망대 1식 화장실 및 샤워장 리모델링 3동 화장실 증축 1동 주차장추가조성(A=500㎡) 편의시설 개축 1식
	C구역 관풍대	교량포장도색 및 휀스 1식 산책로 L=195m 정자설치 1식 보행로 조성 1식	해병대 군사작전지역으로 사업불가
총사업비		2,800백만원	1,050백만원

사업명

수산물처리저장시설(제빙냉동공장)

담당자

수산진흥과

장태호(☎270-2733)

□ 사업목적 및 필요성

○ 포항수협의 기존 냉동․냉장․제빙시설이 노후(건립년도 1968년, 개보수 1993년)되고 현재 수산물위판장 시설이 송도동으로 이전됨에 따라 어선접안 및 원활한 수산물 양육을 위해 신축 필요

○ 일시 다획 어획물의 원활한 냉동저장 시설 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 7. ~ 2017. 10.

○ 위 치 : 포항시 남구 희망대로 1310(송도동 253-109)

○ 규 모 : 연먼적 2,500㎡ (지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	11,000	-	6,727	4,273	-
국 비	2,400	-	2,018	382	-
시 도 비	1,170	-	605	565	-
시군구비	2,580	-	1,413	1,167	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	4,850	-	2,691	2,159	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2016.  7 : 착공

○ 2017.  3 : 보조금교부 결정

○ 2017.  6 : 수산물 처리·저장시설 3차 중앙투자심사 의뢰

□ 향후계획

○ 2017. 10 : 수산물 처리·저장시설 준공

사업명

한전~남부서간 도로(대2-2)개설

담당자

건설과 정병조(☎270-3423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로기반시설 확충으로 주민생활편익 제공

○ 도심을 연결하는 도로망 확충으로 지역균형개발 촉진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008년 ~ 2016년

○ 위 치 : 포항시 남구 상도동 한전 ~ 남부경찰서

○ 규 모 : 도로개설 L=0.48km, B=15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	12,300	10,300	2,000	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,300	5,300	2,000	-	-
지 방 채	5,000	5,000	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2016. 6. 29. : 준공

□ 향후계획

○ 없음

사업명

장성~흥해간 도로(광3-3)확장

담당자

건설과 정병조(☎270-3423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인구 밀집지역인 양덕ㆍ장성동의 상습교통체증 구간 해소

○ 도로기반시설 확충으로 주민생활편익 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2017년

○ 위 치 : 포항시 북구 양덕동 ~ 흥해읍 남송리

○ 규 모 : 도로확장 L=1.8km, B=20m→40m(4차선→8차선)

남송IC램프확장 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,400	1,000	3,200	200	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,700	300	1,400	-	-
시군구비	2,700	700	1,800	200	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017. 9. 29. : 준공예정

□ 향후계획

○ 없음

사업명

형산강 상생로드 개설

담당자

형산강사업과

김대원(☎270-4883)

□ 사업목적 및 필요성

○ 형산강의 뛰어난 경관 여건을 활용한 자전거 도로를 설치하여 생활 속의

교통수단으로 정착시키고 도민 삶의 질 향상에 기여

○ 포항과 경주로 이어지는 관문구역에 상생로드(자전거로드) 개설로

지역민들의 교류확대와 지역 관광자원화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 11.

○ 위 치 : 포항시 남구 연일읍 유강리(포항 유강IC∼경주 경계구간)

○ 규 모 : 자전거도로 L=2.3㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,000	-	2,000	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,000	-	1,000	-	-
시군구비	1,000	-	1,000	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 자전거도로 설치 L=2.3㎞ 완료

□ 향후계획

○ 지속적 유지보수 계획

사업명

형산강 수상레저타운 조성

담당자

형산강사업과

김대원(☎270-4883)

□ 사업목적 및 필요성

○ 포항~경주 상생협력사업인 「형산강 프로젝트」의 선도사업으로 역사·문화의 물길을 따라 도시순환형 레저관광 여건 조성

○ 시민들의 삶 질적 향상으로 수상레저 활동 수요가 증가됨에 따라 수상레포츠 교육시설 및 체험 인프라 구축을 통한 관광객 유치

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2018. 2.

○ 위 치 : 포항시 남구 상대동 일원(형산강변)

○ 규 모 : 수상레저타운(4층, A=957㎡), 보행교 L=35m

부대시설(부유시설 D35m, 상부시설 467㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,997백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	8,997	-	3,000	5,997	-
국 비	3,267	-	1,500	1,767	-
시 도 비	980	-	450	530	-
시군구비	4,750	-	1,050	3,700	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 68%)

○ 수상레저타운 골조 완료

○ 부유시설 진수 완료

□ 향후계획

○ 수상레저타운 기계, 설비 시공

○ 부유시설 막구조 설치

사업명

도심 해안변 포항워터폴리조성

담당자

도시재생과

신용철(☎270- 3753)

□ 사업목적 및 필요성

○ 형산강을 따라 주요관광자원을 연결하는 기점을 명소화 하여 관광 네트워크 형성하여 예술적 아름다움 제공

○ 해안경관과 어우러진 다양한 작품 설치로 새로운 관광자원화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2019년

○ 위 치 : 형산강 ∼ 여남동 해안변 일원

○ 규 모 : 도심 해안변 워터폴리 8개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,000	1,000	1,000		3,000
국 비	2,500	500	500		1,500
시 도 비	750	150	150		450
시군구비	1,750	350	350		1,050
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  40 %)

○ 영일대 및 송도 워터폴리 준공

○ 형산강 워터폴리 설치 중

□ 향후계획

○ 형산강 워터폴리 및 워터폴리 5개소 준공 예정

사업명

대이동 공영주차장 건립

담당자

교통지원과

오대용(☎270-3634)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상가밀집 지역의 주차시설 부족으로 인한 불법주정차 근절 및 교통흐름 개선

○ 주차환경 개선을 통한 접근성 향상으로 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2016년

○ 위 치 : 포항시 남구 이동 659번지(이동 제3공원)

○ 규 모 : A=4,975㎡(주차면수 168면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,036백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,036	600	5,436
국 비	3,018	300	2,718
시 도 비
시군구비	3,018	300	2,718
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2015년 도시관리계획 결정 및 실시설계완료

○ 2016년 주차장 시설공사 착공 및 준공

□ 향후계획

○ 없음

사업명

형산강 송도솔밭 도시숲 조성

담당자

그린웨이추진단

윤태휘(☎270-5594)

□ 사업목적 및 필요성

○ 천혜의 자연자원이 송도 해송 수림대를 활용하여 자연과 사람이 상생할 수

있는 지속가능한 도시숲 조성

○ 죽도시장, 포항운하, 송도해수욕장 복원 등 인근 관광지와 연계한 도심관광

벨트 구축 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2017년

○ 위 치 : 포항시 남구 송도동 254-100번지 일원

○ 규 모 : 도시숲 조성 20ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,000	-	3,000	3,000	-
국 비	3,000	-	1,500	1,500	-
시 도 비	900	-	450	450	-
시군구비	2,100	-	1,050	1,050	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 2016.  2. ~ 11. : 도시숲 조성 기본계획 용역시행

○ 2016.  5. ~  9. : 주민설명회 및 전문가 의견수렴

○ 2017.  3. : 도시숲 조성 실시설계 용역 완료

○ 2017.  4. : 도시숲 조성 착공

□ 향후계획

○ 2017. 12. : 도시숲 조성 준공

사업명

흥해~신광 농어촌도로

(면도101, 102) 도로확포장

담당자

도로시설과

김보연(☎270-3433)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로 미포장 및 협소로 인하여 지역주민 통행불편

○ 농촌주민 교통편익 제공 및 농수산물 운반 물류비 절감

□ 사업개요

○ 기 간 :  2011년 ~ 2020년

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 덕성리 ~ 신광면 만석리

○ 규 모 : 도로개설 L=2.8km, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,500	300	500	600	3,100
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,000	150	250	100	1,500
시군구비	2,500	150	250	500	1,600
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2011 ~ 2017 : 보상 71필지 중 43필지 완료

○ 2017 : 도로개설 L=0.5km, B=8.0m 공사중

□ 향후계획

○ 보상협의 28필지

○ 도로개설 L=2.3km, B=8.0m

사업명

기계 계전리(면도101) 도로확포장

담당자

도로시설과

김주욱(☎270-3435)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농어촌도로 확포장을 통한 주민 및 차량통행 편의 제공

○ 도시기반시설 확충으로 지역균형발전 및 주민숙원사업 해결

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2026년

○ 위 치 : 포항시 북구 기계면 화봉리~계전리 일원

○ 규 모 : L=4.42km, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	7,500	600	300	200	6,400
국 비
시 도 비	3,550	250	150	200	2,950
시군구비	3,950	350	150		3,450
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 14%)

○ 2014년 실시설계 완료

○ 2015 ~ 2016년 : 160필지 중 보상 6필지 완료

○ 2017년 : 보상 1필지, 지장물 철거 2동, 공사발주 L=150m, B=8.0m

□ 향후계획

○ 토지보상 153필지 및 도로개설 L=4.27km, B=8.0m

사업명

형산강 복류수 집수매거 교체공사

담당자

상수도과

박강혁(☎270-5352)

□ 사업목적 및 필요성

○ 집수매거 이탈, 세굴 등 노출로 표류수 유입됨에 따라 흐린 물 발생으로

민원대응 및 복류수의 안정적인 취수원 확보로 수돗물 수질개선 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2017년

○ 위 치 : 남구 연일읍 유강리 형산강 일원

○ 규 모 : 집수매거(D1200) L=1.1㎞, 접합정 15개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,600	3,100	1,500	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,600	3,100	1,500	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 집수매거(D1200) L=1.1㎞, 접합정 15개소 설치완료

○ 준공

□ 향후계획

○ 없음

사업명

효곡동주민센터 건립공사

담당자

재정관리과

이국환(☎270-2543)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현 주민센터 건물의 노후, 사무공간 협소 및 주차장 등 부대시설 부족

○ 지속적 인구증가에 따른 양질의 행정서비스 제공으로 주민숙원사업 해결

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 6 ~ 2017. 12.

○ 위 치 : 포항시 남구 지곡동 209-117번지 외 2필지

○ 규 모 : 부지면적 2,623㎡, 연면적 997.92㎡, 철근콘크리트조 1동 지하1/지상2층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,000	300	2,900	1,800	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,200	300	2,100	1,800	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타(특교)	800	-	800	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 41%)

○ 2013.  3. : 주민센터 이전 예정부지 건의(효곡동)

○ 2014. 10. : ‘14년 제3차 경상북도 지방재정 투자사업 심사

○ 2014. 12. : 공유재산관리계획 의결(시의회)

○ 2016.  6. : 부지매입 및 지장물 보상

○ 2016.  7 ~ 2017. 4. : 기본 및 실시설계

○ 2016. 12. : 기본설계 주민설명회 개최

○ 2017.  4. : 착공

□ 향후계획

○ 2017. 12. : 준공

○ 2018.  1. : 개청

사업명

영일만3 일반산업단지

기반시설 조성공사

담당자

도시계획과

황의호(☎270-3814)

박종원(☎270-3816)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산업단지계획 변경에 따른 교통 및 기반시설을 확보하여 미분양토지 분양

○ 산업단지 내 기반시설 확보로 쾌적한 산업단지조성 및 입주율 확대로

지역경제 활성화와 지역 일자리 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 9. ~ 2018. 7.

○ 위 치 : 경상북도 포항시 북구 흥해읍 용한리 일원

○ 규 모 : 도로개설(B=20m, L=253m/B=15m, L=830m/B=6m, L=44m)

및 녹지, 상·하수도

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,200	-	900	1,000	2,300
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,100	-	900	1,000	1,200
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	1,100	-	-	-	1,100
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2016년도 기반시설 조성공사 준공(B=20m, L=253m/B=15m, L=70m)

○ 2017년 9월 중 기반시설 조성공사 준공예정(B=15m, L=408m)

□ 향후계획

○ 2018년 식생호안블럭 공사(1,200) 및 민간자본개설구간(1,100백만원) 추진예정

사업명

구룡포 청소년수련원 증축공사

담당자

주민복지과

권영은(☎270-30550)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청소년을 위한 숙박시설 확충 및 다목적 체육관을 건립하여 잠재 역량

개발과 건전한 문화정착으로 건강한 청소년 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2016년

○ 위 치 : 포항시 남구 구룡포읍 명월길 51

○ 규 모 : 건축면적 2,575㎡

- 숙박시설 1,872㎡(지하 1층 / 지상 3층)

- 다목적체육관 703㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,600	4,200	1,400	-	-
국 비	2,200	1,500	700	-	-
시 도 비	300	300	-	-	-
시군구비	3,100	2,400	700	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2014. 3. 24 : 실시설계 완료

○ 2014. 6.  9 : 공사착공

○ 2015. 8. 10 : 1차수 공사 준공

○ 2015. 8. 11 : 2차수 공사 시행

○ 2016. 1.  6 : 3차수 계약

○ 2016. 3. 18 : 준공

□ 향후계획

○ 없음

10-2. 지방채 발행사업

우리 포항시에서 ‘16년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
한전~남부서간도로(대2-2)개설	12,300	5,000	-	-	7,300	-	5,000	100%
한신공영~이인리간도로(대3-27)개설	47,800	5,000	-	5,700	37,100	-	5,000	48%

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2016년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

한전~남부서간 도로(대2-2)개설

담당자

건설과 정병조(☎270-3423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로기반시설 확충으로 주민생활편익 제공

○ 도심을 연결하는 도로망 확충으로 지역균형개발 촉진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008년 ~ 2016년

○ 위 치 : 포항시 남구 상도동 한전 ~ 남부경찰서

○ 규 모 : 도로개설 L=0.48km, B=15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	12,300	10,300	2,000	-	-
지 방 채	5,000	5,000	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,300	5,300	2,000	-	-
기 타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 도로개설 L=0.48km

□ 향후계획

○ 없음

사업명

한신공영~이인리간 도로(대3-27)개설

담당자

건설과 김건우(☎270-3425)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로기반시설 확충으로 주민생활편익 제공

○ 흥해 이인리 신역사 연결도로 개설로 교통소통 원활화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011년 ~ 2020년

○ 위 치 : 포항시 북구 우현동 ~ 흥해읍 이인리

○ 규 모 : 도로개설 L=2.74km, B=25m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 47,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	47,800	10,900	1,500	1,000	34,400
지 방 채	5,000	5,000	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	5,700	1,200	500	500	3,500
시군구비	37,100	4,700	1,000	500	30,900
기 타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  28%)

○ 1단계구간 : 달전초등학교 ~ 영일만대로(이인IC) L=0.26km 사업완료

○ 2단계구간 : 영일만대로(이인IC) ~ 세화여고 L=1.49km 사업추진(보상)

□ 향후계획

○ 2단계구간 보상협의 추진(보상율 53.7%)

10-3. 민간투자사업

우리 포항시에서 ‘16년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’15년까지 부담액	’16년 부담액	’17년 이후 부담 예정액
BTL	07하수관거정비사업	㈜맑은물	159,110	18,493	12,540	222,777	20년
	09하수관거정비사업	㈜맑은물길	73,316	10,656	7,110	135,086	20년
	10하수관거정비사업	㈜청정포항	76,948	-	5,327	137,897	20년
	13하수관거정비사업	㈜포항새물길	55,754	-	-	111,771	20년
BTO	포항시 하수처리수재이용시설 민간투자사업	㈜피워터스	125,843	-	-	-	‘14.8.1~ ‘34.7.31
	포항하수종말처리장2단계(증설)건설공사	포항수질환경	107,686	113,394	15,896	118,810	‘07.11.1~’22.10.31
	장량하수처리시설 민간투자사업	푸른장량	52,739	18,889	3,959	73,962	‘11.1.1~ ’30.12.31
	청하·기계하수처리시설건설공사민간투자사업	㈜포항엔텍	72,147	-	2,773	96,939	‘16.2.26~’36.2.25

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2016년까지는 집행액(결산기준), 2017년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

개별 민간투자사업 현황

사업명

07년 포항 하수관거정비사업

담당자

하수도과 김경민(☎270-5423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우·오수를 분리하여 연안오염 방지 및 하수처리장 효율성 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2009. 11. 13 ~ 2014. 04. 12

○ 위치 : 포항시 용흥동, 중앙동, 학산동, 죽도동, 양학동, 대이동, 송도동 일원    ○ 민간사업자 : 포항맑은물(주)

○ 총사업비 : 159,110백만원

○ 사업규모 : 하수관로 101㎞, 배수설비 9,780가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

- 시설임대료 : 232,682 백만원(경상금액)

- 운영비 : 24,218 백만원(경상금액)

- 운영비 경상금액은 소비자물가지수 3%를 반영한 기준

- 기간 : 2014. 04. 13 ~ 2034. 04. 12

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	253,810	18,493	12,540	12,610	210,167
국 비	160,902	12,007	8,144	8,144	132,607
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	92,098	6,486	4,396	4,466	77,560
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계

○ 운영 중

○ 운영기간 : 2014. 4. 13 ~ 2034. 4. 12 (20년간)

□ 향후계획

○ 2034년까지 민간사업자(운영사)에서 운영 및 유지관리

사업명

09년 포항 하수관거정비

담당자

하수도과 김경민(☎270-5423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우·오수를 분리하여 연안오염 방지 및 하수처리장 효율성 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2011. 01. 01 ~ 2014. 06. 30

○ 위치 : 포항시 죽도동, 용흥동, 대이동 일원

○ 민간사업자 : 포항맑은물길(주)

○ 총사업비 : 73,316백만원

○ 사업규모 : 하수관로 39㎞, 배수설비 3,083가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건: 성과평가 등급별 운영비 인센티브 및 감액

(A: 100%지급, B: 90%지급, C: 80%지급, D: 70%지급, E: 서비스대가 지불정지)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	152,849	10,655	7,110	7,121	127,963
국 비	94,544	6,704	4,469	4,469	78,902
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	58,305	3,951	2,641	2,652	49,061
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영 중

○ 운영기간 : 2014. 7. 1 ~ 2034. 6. 30 (20년간)

□ 향후계획

○ 2034년까지 민간사업자(운영사)에서 운영 및 유지관리

사업명

10년 포항 하수관거정비

담당자

하수도과 김경민(☎270-5423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우·오수를 분리하여 연안오염 방지 및 하수처리장 효율성 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2012. 06. 01 ~ 2016. 03. 31

○ 위치 : 포항시 죽도동, 상대동, 해도동 일원

○ 민간사업자 : 청정포항(주)

○ 총사업비 : 76,948백만원

○ 사업규모 : 하수관로 39.6㎞, 배수설비 4,012가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건

-시설임대료(경상가) : 117,302 백만원(수익률 2.80%적용 지급)

-운영비(불변가) : 10,778 백만원 (직전분기말 소비자물가지수적용 지급)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	117,302	-	5,327	7,116	130,781
국 비	90,327	-	3,387	4,516	82,424
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	52,897	-	1,940	2,600	48,357
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영 중

○ 운영기간 : 2016. 4. 1 ~ 2036. 3. 31 (20년간)

□ 향후계획

○ 2036년까지 민간사업자(운영사)에서 운영 및 유지관리

사업명

13년 포항 하수관거정비

담당자

하수도과 최윤석(☎270-5424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우·오수를 분리하여 연안오염 방지 및 하수처리장 효율성 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2015. 07. 01 ~ 2018. 09. 30

○ 위치 : 포항시 상대동, 해도동 일원

○ 민간사업자 : 포항새물길(주)

○ 총사업비 : 55,754백만원

○ 사업규모 : 하수관로 53.515㎞, 배수설비 4,412가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 임대료, 운영비 지급은 운영개시일로부터 20년 (2018.10.01~2037.09.30)

○ 임대료(93,520)+운영비(18,251)=111,771백만원(부가세제외)

(임대료=국비70%,시비30%, 운영비=시비100%)

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	111,771	-	-	-	111,771
국 비	65,464	-	-	-	65,464
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	46,307	-	-	-	46,307
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 시공 중

○ 시공기간 : 2015. 7. 1 ~ 2018. 9. 30 (39개월간)

□ 향후계획

○ 2018년 9월 준공

○ 2038년까지 민간사업자(운영사)에서 운영 및 유지관리

사업명

포항시 하수처리수 재이용시설

민간투자사업

담당자

하수재생과 박중칠(☎270-5283)

□ 사업목적 및 필요성

○ 버려지던 하수처리장 방류수를 양질의 공업용수로 재처리하여 저렴하게       공급함에 따라 수요처의 경제적 부담 경감 및 지역의 만성적인 물 부족       문제를 해결하는 신규 수자원을 확보함

□ 사업개요

○ 공사기간 : 2012. 2. ~ 2014. 7.

○ 위    치 : 포항시 남구 형산강북로 203 (상도동)

○ 민간사업자 : ㈜피워터스

○ 총사업비 : 125,843백만원

○ 사업규모 : 시설용량 100,000㎥/일, 공급관로 11.71㎞

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 최소수익보장 없음, 운영기간 ‘14. 8. 1.~’34. 7. 31.

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영 중

□ 향후계획

○ 효율적이고 안정적인 운영

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 : 당초 125,800백만원, 변경 140,004백만원(‘12. 6. 28.)

사업명

포항하수종말처리장 2단계(증설)건설공사 민간투자사업

담당자

하수재생과 박중칠(☎270-5283)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사회기반시설 조기 확충으로 시민 생활환경 개선 및 방류수역 수질보전에         기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2004. 10. 15. ~ 2007. 11. 30.

○ 위    치 : 포항시 남구 형산강북로 203 (상도동)

○ 민간사업자 : 포항수질환경(주)

○ 총사업비 :  107,686백만원

○ 사업규모 : 시설용량 232,000㎥/일 중 2단계 152,000㎥/일

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 사용료수입 보장(연간 추정사용료 수입의 47%에 미달할 경                  우 미달분 지급), 운영기간 ‘07. 11. 1.~’22. 10. 31.(15년)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	248,100	113,394	15,896	16,296	102,514
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	248,100	113,394	15,896	16,296	102,514
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영 중

□ 향후계획

○ 효율적이고 안정적인 운영

사업명

장량하수시설 민간투자사업

담당자

하수재생과 박중칠(☎270-5283)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사회기반시설 조기 확충으로 시민 생활환경 개선 및 방류수역 수질보전에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2008. 4. 10. ~ 2010. 12. 28.

○ 위    치 : 포항시 북구 흥해읍 해안로 681-18

○ 민간사업자 : 푸른장량(주)

○ 총사업비 : 52,739백만원

○ 사업규모 : 시설용량 15,000㎥/일

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 최소수익보장 없음, 운영기간 ‘11. 1. 1.~’30. 12. 31.(20년)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	96,810	18,889	3,959	4,745	69,217
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	96,810	18,889	3,959	4,745	69,217
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영 중

□ 향후계획

○ 효율적이고 안정적인 운영

사업명

청하·기계하수시설 건설공사 민간투자사업

담당자

하수재생과 박중칠(☎270-5283)

□ 사업목적 및 필요성

○ 읍·면 지역 하수처리시설 확대로 주거환경개선과 연안해역 수질 보전을

통한 해양관광도시 건설

□ 사업개요

○ 기간 : 2013. 1. 10. ~ 2016. 2. 25.

○ 위치 : 포항시 북구 청하면, 기계면 일원

○ 민간사업자 : 포항엔텍㈜

○ 총사업비 : 72,147백만원

○ 사업규모 : 시설용량 2,900㎥/일(청하 1,900, 기계 1,000)

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 최소수익보장 없음, 운영기간 ‘16. 2. 26.~’36. 2. 25.(20년)

○ 지금까지 재정부담액(운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	99,712	-	2,773	3,642	93,297
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	99,712	-	2,773	3,642	93,297
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영중

□ 향후계획

○ 효율적이고 안정적인 운영

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간변경

내역	당초	변경	사유
사업기간변경	2013.01.10～2015.10.09	2013.01.10～2016.02.25	국비교부지연

○ 총사업비변경

내역	당초(백만원)	변경(백만원)	사유
총사업비변경	72,330	72,147	사업량 및 운영비용 변경