109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 포항시에서 ‘17년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2016년까지 집행사업비	2017년 소요사업비	2018년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
환여동행정복지센터 건립공사	4,000		1,700	2,300	2018	2017	46
포항운하 주차장 조성	9,000	-	375	8,625	2022	2017	5
창포동~흥해성곡간 도로(중1-58)개설공사	34,900	1,003	2,600	31,297	2020	2017	26
영일만4일반산업단지 곡강IC연결도로 개설공사	20,000	-	4,000	16,000	2019	2017	30
수산물 처리저장시설 (제빙냉동공장)건립	12,000	6,727	5,273	-	2017 (기완료)	2017	100
포항스틸아트페스티벌	9,880	5,060	1,060	3,760	2018	2017	100
포항시북구 치매안심센터 설치	3,263	-	10	3,253	2019	2017	10
국민안전로봇 프로젝트추진	67,100	9,200	14,000	43,900	2021	2017	23
고품질강관산업 육성을 위한 통합지원시스템구축	20,000	-	3,081	16,919	2021	2017	10
첨단기술사업화센터 구축	16,000	-	3,100	12,900	2020	2017	5
테크노파크 제5벤처동 건립지원	10,000	-	-	10,000	2019	2017	30
바이오 오픈이노베이션센터 구축	20,240	4,500	2,000	13,740	2019	2018	20
장량국민체육센터 건립	21,400	8,100	10,300	3,000	2018	2015	60
형산강 에코생태탐방로 조성	3,500	-	3,500	-	2017 (기완료)	2016	100
하수슬러지 에너지화사업	19,000	714	10,171	8,115	2022	2017	5
포항공항 완충지역 공원화 사업	7,400		1,800	5,600	2019	2017	65
송림마을 다움길 조성사업	6,000	-	400	5,600	2020	2017	5
포항시남구 치매안심센터 설치	2,478	-	-	2,478	2019	2017	5

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2017년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

환여동행정복지센터 건립공사

담당자

재정관리과 이국환(☎270-2543)

□ 사업목적 및 필요성

○ 행정복지센터 협소 및 주차공간 부족으로 주민이용 불편초래

○ 청사이전 건립을 통해 양질의 행정서비스 및 쾌적한 근무환경 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017.10.~2018.12.

○ 위 치 : 포항시 북구 환호동 378-6

○ 규 모 : 연면적 850.41㎡ 철근콘크리트조 1동

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,000	-	1,700	2,300	-
국 비
시 도 비
시군구비	4,000	-	1,700	2,300	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 461%)

○ 2017. 3. : 행정복지센터 부지선정

○ 2017. 7. : 공유재산관리계획 의결

○ 2017.10. : 부지매입

○ 2017.11. : 지방재정투자심사완료

○ 2018. 1 ~ 3. : 주민설명회(1,2차)

○ 2018. 6. : 착공

□ 향후계획

○ 20118.12. : 준공

사업명

포항운하 주차장 조성

담당자

공원과 이도형(☎270-3223)

□ 사업목적 및 필요성

○ 포항운하 관광객 증가와 주변 활성화를 위한 입지규제최소구역 지정에       따라 각종 건축제한 사항이 완화(부설 주차장설치 제외 등) 됨으로,           이에 따른 대체 주차시설 확보 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 12월 ～ 2022년 12월(5년)

○ 위 치 : 포항시 남구 해도동 550일원

○ 규 모 : 주차장조성 1식(A=7,593㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	9,000		375	1,414	7,211
국 비
시 도 비
시군구비	9,000		375	1,414	7,211
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2014. 04. 30 : 포항운하 준공

○ 2015. 11. 30 : 입지규제최소구역 결정

○ 2017. 06. 30 : 시설용지 매각 개시(LH공사 주관 : 블록 미 개별 필지)

○ 2017. 12.. 22 : 주차장 부지 계약

□ 향후계획

○ 2018. 1월 ~ 2022. 12월 : 주차장 부지 매입 및 조성

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

창포동~흥해 성곡간 도로(중1-58)개설

담당자

도로시설과 배종우

(☎054-270-3434)

□ 사업목적 및 필요성

○ 두호, 창포지구 도심지와 KTX포항역을 연결하는 간선도로 개설로

도시기반시설구축

○ 창포동 대단지 아파트 건축 및 기존 아파트단지로 인한 간선도로

교통체증 해소와 교통편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2020

○ 위 치 : 포항시 북구 창포동 ~ 흥해읍 성곡리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=2.71km, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 349백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	34,900	1,003	2,600	5,500	25,797
국 비
시 도 비	300		300
시군구비	34,600	1,003	2,300	5,500	25,797
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 2014. 04 : 실시설계용역 완료

○ 2016. 11 : 중기지방재정계획 반영

○ 2017. 03 : 중앙 투자심사 반영

○ 2018. 07 : 토지보상 협의 중(14,988㎡/84,428㎡)

□ 향후계획

○ 2018. 08~ : 토지보상협의 시행

○ 도로개설공사 L=2.71km, B=20m

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

영일만4일반산업단지

곡강IC연결도로 개설공사

담당자

도시계획과 소병현(☎270-3833)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영일만4 일반산업단지 진입도로가 2016. 12월 준공되었으나 영일만대로까지 단지 내 연결도로가 미개설되어 도로기능을 못하고 있는 실정으로 도로연결을 통한 물류수송의 조기 확보로 미진한 산업단지 조성 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 7. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 곡강리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=980m(B=20~30m), 교차로(IC) 1개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	20,000	-	4,000	10,000	6,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	20,000	-	4,000	10,000	6,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 편입토지 보상 협의(58필지 중 27필지)

○ 2018. 1. 공사 착공(토공 : 벌목제거 등)

□ 향후계획

○ 2019. 12. 곡강IC연결도로 개설공사 준공

사업명

수산물처리저장시설

(제빙냉동공장) 건립

담당자

수산진흥과 장태호

(054-270-2733)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수산물 처리․저장시설(제빙․냉동공장) 건립으로 산지 수산물의 신속한 처리․저장과 안전하고 신선한 수산식품 공급체계 구축을 통한 유통 기능강화 및 어업인 소득증대 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2017

○ 위 치 : 포항시 남구 희망대로 1310(송도동 253-109)

○ 규 모 : 수산물처리․저장시설 건립 : 4층 연면적 4,072.21㎡

- 냉동(40톤/일), 냉장(2,500톤), 제빙(200각/일), 제빙(1,300각)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	12,000	6,727	5,273	(사업완료)
국 비	2,400	2,018	382
시 도 비	1,170	605	565
시군구비	2,580	1,413	1,167
지 방 채
민간자본
기 타	5,850	2,691	3,159

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017. 12. 29. 준공

사업명

포항스틸아트페스티벌

담당자

시립미술관 허정선(☎250-6023)

□ 사업목적 및 필요성

◦ Steel의 문화化를 통한 지역문화 콘텐츠 구축과 창조도시가치 발굴

◦ 공연예술과 스틸아트의 만남을 통한 세계 유일의 문화예술 축제 구현

◦ 산업도시에서 문화창조도시로 거듭나고 있는 포항의 도시문화정책과 조응

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 9. 16. ～ 2018. 10. 14.(30일간)

○ 위 치 : 영일대해수욕장 외 Art Way 구간(포항운하, 환호공원, KTX 역사 등)

○ 규 모

1) 스틸조각작품 50여 점을 아트웨이 구간 및 포항시 일원에 설치

2) 시민참여체험프로그램 운영 및 융복합문화공연

3) 문화관광상품 : 포항운하 크루즈․도보․버스 투어 미술작품 체험

- Art Way와 Art Tourism을 연계한 문화관광상품 개발

4) 체험시설 - 스틸아트의 영역을 확장시킬 수 있는 스틸공예 등 스틸놀이터 등 체험

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,880백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	9,880	5,060	1,060	1,060	2,700
국 비	2,380	1,460	160	160	600
시 도 비	2,700	1,300	300	300	800
시군구비	4,800	2,300	600	600	1,300
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018까지 : 7,160백만원(국비 1,780, 도비 1,900, 시비 3,500)

- 2012년 ~ 2018년까지 7회 개최로 지역대표축제 기반 조성

- 2018년 : 1,060백만원(국비 160, 도비 300, 시비 600)

□ 향후계획

○ 2019년 : 1,300백만원(국비 300, 도비 400, 시비 600)

○ 2020년 : 1,400백만원(국비 300, 도비 400, 시비 700)

사업명

포항시 북구 치매안심센터 설치

담당자

건강관리과 이동순(☎270-4173)

□ 사업목적 및 필요성

○ 치매국가책임제 시행에 따른 치매안심센터 설치로 치매 고위험군 시기부

터 확진 이후 전체 돌봄 치료 및 가족지원의 치매통합관리 서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 :  2017. 12 ~ 2019. 10

○ 위 치 : 포항시 북구보건소(건강증진센터 철거 후 신축)

○ 규 모 : 1,200㎡(지상 3층)

- 통합건강증진센터, 치매카페, 강당, 사무실, 치매예방프로그램실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,263백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,263		10	1,079	2,174
국 비	1,128		8	863	257
시 도 비	84		0.6	65	18.4
시군구비	2,051		1.4	151	1,898.6
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10%)

○ 2018. 7월 말 : 치매안심센터 설계 완료

○ 2018. 8월 : 건강증진센터 건물 철거 완료

□ 향후계획

○ 2018. 9월 : 치매안심센터 공사 착공

○ 2019. 10월: 치매안심센터 공사 완공

□ 사업변경 내역(해당시)

○  총사업비 변경

- 당초: 1,983백만원   변경: 3,263백만원

→ 지진발생에 따른 보건소내 위치 변경 : 건강증진센터 철거 후 신축으로 인함

- 11.15 지진 발생에 따른 신축 위치 변경 : 예산법무과-3004(2018.4.23.)호

→ 제248회 포항시의회 본회의 의결

사업명

국민안전로봇 프로젝트

담당자

미래전략산업과 허애영(☎270-3563)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국가안전관리의 패러다임이 사후조치, 응급대응에서 사전 예측, 신속 대응으로

전환되고 있으나, 先 투입 가능한 신속 대응 수단 부재

○ 대형화되고 있는 재난사고에 신속한 재난대응을 통한 인명과 재산

피해 최소화를 위하여  첨단재난대응로봇개발

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2021년

○ 위 치 : 포항시 북구 영일만 3일반산업단지

○ 규 모 : 첨단안전로봇3종 및 핵심부품개발, 안전로봇실증단지구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  67,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	67,100	9,200	14,000	18,400	25,500
국 비	38,400	4,000	6,800	10,100	17,500
시 도 비	10,300	2,200	2,800	2,900	2,400
시군구비	10,300	2,200	2,800	2,900	2,400
지 방 채	-	-		-	-
민간자본	-	-		-	-
기 타	8,100	800	1,600	2,500	3,200

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2016. 07 : 사업공고 및 선정(주관기관 :한국로봇융합연구원)

○ 2016. 11. : 안전로봇실증단지구축을 위한 부지매입(19,800㎡

○ 2017. 11. : 안전로봇실증센터 착공식 개최

□ 향후계획

○ 2018. 01. : 안전로봇실증센터공사 및 안전로봇기술개발

○ 2019. 06. : 안전로봇실증센터 준공 및 안전로봇플랫폼 실증시험실시

사업명

고품질강관산업 육성을 위한

통합지원시스템구축

담당자

미래전략산업과

허애영(☎270-3563)

□ 사업목적 및 필요성

○ 세계 보호무역주의 확산, 악화된 수출여건 돌파를 위해 국내 및 지역

에너지강관사의 품질인증을 통한 제품 경쟁력 확보, 고부가가치 강관

생산 능력 증대 및 판로 다변화를 위한 기반구축이 반드시 필요

□ 사업개요

○ 기 간 :  2017~ 2021

○ 위 치 :  포항시 남구 블루밸리국가산단

○ 규 모 :  시험평가인증센터 구축 및 시험장비구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :   200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	20,000		3,081	4,214	12,705
국 비	10,000		1,500	1,010	7,490
시 도 비	3,000		790.5	1,602	607.5
시군구비	7,000		790.5	1,602	4,607.5
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)

○ 2017. 04 : 소재부품산업거점기관 지원사업 공모과제 선정

○ 2017. 06  : 2017년 제2차 지방재정 중앙투사사업 심사완료

○ 2017. 11 : 고품질강관 기술지원센터 부지매입

○ 2018. 04 : 건축실시설계 완료

□ 향후계획

○ 2018. 10 : 고품질강관 기술지원센터 착공

○ 2019. 06 :  고품질강관 기술지원센터 준공 및 장비구축

사업명

첨단기술사업화센터 구축

담당자

미래전략산업과

손은경(☎270-2423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 첨단기술분야 연구성과 사업화를 위한 전담센터 구축으로 신산업 창출 선도

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2020년

○ 위 치 : 포스텍 나노융합기술원 내

○ 규 모 : 연면적 7,500㎡, 지상5층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,000백만원(도3,600/시8,400/민자4,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	16,000	-	3,100	6,200	6,700
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	3,600	-	150	1,750	1,700
시군구비	8,400	-	350	4,050	4,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	4,000	-	2,600	400	1,000
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2017. 06 : 첨단유망기업 유치 협약 MOU 체결

○ 2017. 08 : 중앙투자심사 신청

○ 2017. 09 : 1차년도 사업추진 협약 체결(경북도, 포항시, 포스텍)

○ 2018. 03 : 센터 기본 및 실시 설계 착수

□ 향후계획

○ 2018. 12 : 착공(`19.12 준공 예정)

사업명

테크노파크 제5벤처동 건립지원

담당자

미래전략산업과

손은경(☎270-2423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지멘스 헬시니어스(주)에서 경주공장을 2020년 3월까지 포항으로 통합,

이전하고자 추가 입주공간을 요청함에 따라 제5벤처동 건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2019년

○ 위 치 : 포항테크노파크 내

○ 규 모 : 연면적 6,060㎡, 지하1층/지상4층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원(시5,000/포항TP5,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	10,000	-	-	2,000	8,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,000	-	-	2,000	3,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	5,000	-	-	-	5,000
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2017. 08 : 포항TP 제5벤처동 건립 타당성 조사 및 중앙 투자 사업 신청

○ 2017. 09 : 기업유치협약(MOU) 체결(포항시, 지멘스 헬시니어스㈜, 포항TP)

○ 2018. 03 : 외국기업 투자 유치 협약(MOU) 체결(경상북도, 포항시, 지멘스 헬시니어스㈜)

○ 2018. 07 : 공사별 입찰, 계약완료

□ 향후계획

○ 2018. 09 : 공사 착공

○ 2019. 07 : 제5벤처동 준공

○ 2020. 03 : 지멘스 헬시니어스(주) 경주공장 통합 이전 완료

사업명

바이오 오픈이노베이션센터 구축

담당자

미래전략산업과 손은경

(☎270-2423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 포스텍 바이오분야의 우수한 연구역량과 제4세대 방사광가속기를 활용한       바이오 벤처, 제약·생명공학 기업유치 및 기반 연구시설 구축 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2019년

○ 위 치 : 포스텍 생명공학연구센터 옆 주차장 부지

○ 규 모 : 연면적 7,933㎡, 지하1층/지상3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,240백만원(도비4,250/시비4,250/민자11,740)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	20,240	4,500	2,000	2,000	11,740
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	4,250	2,250	-	2,000	-
시군구비	4,250	2,250	2,000	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	11,740	-	-	-	11,740
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  20%)

○ 2017. 04 : 신축건물 설계용역 발주

○ 2018. 02 : 포스텍, 신축건물 건립계획안 확정

○ 2018. 05 : 기본설계 완료

○ 2018. 08 : 포스텍, 건물허가 신청

□ 향후계획

○ 2018. 11 : BOIC 신축건물 착공(예정)

○ 2019. 12 : BOIC 신축건물 준공(예정)

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
사업기간	`16. 6 ~ `18. 5	`16. 6 ~ `19. 11	2018.05.25. 승인
총사업비	172.4억원	202.4억원

사업명

장량국민체육센터 건립

담당자

새마을체육산업과

유승욱(☎270-2804)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활체육 활성화를 위한 기반시설 확충으로 시민들의 삶의 질 향상

○ 지역주민들의 건강증진 및 생활체육 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~2018년

○ 위 치 : 포항시 북구 장성동 335-1번지 외 8필지

○ 규 모 : 연면적 5,683㎡(체육관 및 수영장, 문화센터 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	21,400	8,100	10,300	3,000
국 비	2,900	2,900
시 도 비
시군구비	18,500	5,200	10,300	3,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2015. 12월 ~ 2016. 12월 : 실시설계용역

○ 2017. 04월 : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2018. 12월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 2015. 12월 : 사업비 변경(당초 115억원 → 변경 160억원)

- 국민체육센터 내 문화시설(주민센터 1,700㎡) 추가 신축

○ 2016. 08월 : 사업비 변경(당초 160억원 → 변경 214억원)

- 감정평가에 따른 편입토지 보상비 증액(54억원) 반영

사업명

형산강 에코생태탐방로 조성

담당자

형산강사업과

김대원(☎270-4883)

□ 사업목적 및 필요성

○ 멸종위기 조류 월동지로 유명한 중명, 유강일원에 희귀조류 탐조시설과

해설판 설치로 서식조류 생태환경 보호

○ 자연형 생태늪지 보존과 함께 자라나는 청소년들을 위한 친환경 생태학습       체험의 장으로 활용

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2017. 9

○ 위 치 : 포항시 남구 연일읍 중명, 유강리

○ 사업비 : 35억원(국비 17.5, 도비 5, 시비12.5)

○ 규 모 : 탐방로 1.7㎞, 생태환경전망대 1개소, 생태환경해설판 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2017년	2018년 이후
계	3,500	-	3,500	-	-
국 비	1,750	-	1750	-	-
시 도 비	500	-	500	-	-
시군구비	1,250	-	1250	-	-
지 방 채		-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 탐방로 L=1.7㎞ 완료, 생태환경전망대 1개소 완료

□ 향후계획

○ 에코생태전망대 주차장 계획

사업명

하수슬러지 에너지화사업

담당자

하수재생과

이동현(☎270-5293)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하수관거 정비사업 확대시행에 따른 슬러지 발생량 점진적 증가로

기존 연료화시설의 처리요량 한계와 이에 따른 외부처리비용

○ 슬러지 감량효율을 높여 에너지화 함으로써 자체 열원사용의 대체에너지로 활용

□ 사업개요

○ 위    치 : 남구 형산강북로 203(포항하수처리장내)

○ 사업규모 : 100톤/일(투자심사)

○ 처리방식 : 슬러지감량

○ 사업기간 : 2016 ~ 2022

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,000백만원(국13,300 도1,200 시4,500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	19,000	714	10,171.1	3,840	4,274.9
국 비	13,300	500	7,120	2,688	2,992
시 도 비	1,200	45	641	242	272
시군구비	4,500	169	2,410.1	910	1,010.9
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2016. 07. 07 : 사업타당성 조사용역 시행(2016.7.7. ~ 11.3)

○ 2017. 03. 06 : 지방재정 중앙투자심사 완료(적정)

○ 2017. 05. 22 : 업무대행 위·수탁협약 체결(한국환경공단)

○ 2017. 11. 22 : 기본 및 실시설계 용역 착수(착수일로부터 1년)

□ 향후계획

○ 2018. 12 : 기본 및 실시설계 용역 준공

○ 2019. 07 : 실시설계 적격자 선정

○ 2020. 06 : 공사착공

○ 2022. 07 : 시설준공(시운전 포함)

사업명

포항공항 완충지역 공원화 사업

담당자

그린웨이추진단

최홍조(☎270-5595)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 공항확장 과정에서 겪은 동해면민의 정신적, 물질적 피해와 60년

동안 공항소음 피해를 입고 있는 지역의 생활환경개선

◦ 공항·해병대동문 입구는 포항시 관문이므로 쾌적한 환경조성

◦ 우물재 노후지역 정비로 동성고등, 동해중 주변 학습분위기 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 7.~2019. 12.

○ 위 치 : 포항시 남구 동해면 도구리 529-9번지 일원

○ 규 모 : 공원조성 A=6,786㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,400	-	1,800	3,600	2,000-
국 비
시 도 비
시군구비	5,400	-	1,800	3,600	-
지 방 채
민간자본	2,000				2,000
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

◦ 2017.06.01. : 건축과→그린웨이추진단 업무이관

◦ 2017.06.15. : 기본 및 실시설계용역 발주

◦ 2017.07.12. : 감정평가(토지) 완료

◦ 2017.08.31. : 감정평가(지장물) 완료(25필지 25동)

◦ 2018.03.14. : 가옥1차철거 착공(4필지 5동)

◦ 2018.05.11. : 가옥2차철거 착공(9필지 9동)

◦ 2018.07.05. : 가옥3차철거 착공(3필지 4동)

□ 향후계획

◦ 2018. 11. : 토지 및 지장물 보상 완료

◦ 2019.  1.~12. : 공원조성 착공 및 준공(포스코 시행)

사업명

송림마을 다움길 조성사업

담당자

도시재생과

배효빈(☎270-3887)

□ 사업목적 및 필요성

○ 휴양·교육의 중심지에서 산업역군의 주거지로 번성했던 송도가 백사장 유실, 인구유입 감소 등의 요인으로 쇠퇴 지속

○ 풍부한 주변 환경과 지역자원을 이용, 통합적인 재생을 통해 과거의 “풍요로움이 회복된 송도”로 만들고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 포항시 남구 송림로 일원

○ 사업비 : 60억원(국비 30, 시비 30)

○ 규 모 : 송도학당(연면적539㎡,3층) 신축, 송림로 정비 L=364m

마을가꾸기 및 마을경관개선 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2017년	2018년 이후
계	6,000	-	400	-	5,600
국 비	3,000	-	200	-	2,800
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,000	-	200	-	2,800
지 방 채		-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 주민협의체 구성, 최종협의 완료

○ 기본 및 실시설계용역 완료

○ 총괄공사(건축,토목,조경 등) 및 개별공사(전기,통신,소방) 발주

□ 향후계획

○ 2018. 9. : 공사 착공

○ 2019.12. : 공사 준공 및 공동체 프로그램 개발·운영

○ 2020.12. : 공동체 프로그램 시범운영

사업명

포항시 남구 치매안심센터 설치

담당자

건강관리과 김순란(☎270-4074)

□ 사업목적 및 필요성

○ 치매국가책임제 시행에 따른 치매안심센터 설치로 치매 고위험군 시기부터       확진 이후 전체 돌봄 치료 및 가족지원의 치매통합관리 서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 :  2017. 12 ~ 2019. 6.

○ 위 치 : 포항시 남구 오천읍 원리 896(신축)

○ 규 모 : 987㎡(299평)/지상 3층

- 인지검사실, 치매카페, 사무실, 프로그램실, 강당 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,478백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,478		-	500	1,978
국 비	1,127		-	400	727
시 도 비	85		-	30	55
시군구비	1,266		-	70	1,196
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2018. 5월 : BF인증 완료

○ 2018. 8월 : 신축설계 용역 완료

□ 향후계획

○ 2018. 9월 : 치매안심센터 공사 착공

○ 2019. 6월: 치매안심센터 공사 완공 및 정식개소

□ 사업변경 내역(해당시)

○  총사업비 변경

- 당초: 2,178백만원   변경: 2,478백만원

→ 당초 사업계획 건물 규모 3층 800㎡로 계획했으나 강당, 프로그램실,     치매카페 등 건물면적증가로 인한 추가예산 편성

10-2. 지방채 발행사업

우리 포항시에서 ‘17년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
		해	당	없	음

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2017년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황 : 해당없음

※ 사업별로 서식(예시)에 따라 사업별 1장씩 별지 작성

※ 작성요령은 투자심사사업에 준하며, 재원에 지금까지 지방채 발행액 및 발행예정액을 필히 기재

10-3. 민간투자사업

우리 포항시에서 ‘17년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’16년까지 부담액	’17년 부담액	’18년 이후 부담 예정액
BTL	07년 포항 하수관로	포항맑은물(주)	282,100	37,453	13,856	230,791	‘14.4.13 ~ ‘34.4.12
	09년 포항 하수관로	포항맑은물길(주)	146,800	17,766	7,121	121,913	‘14.7.1 ~ ‘34.6.30
	10년 포항 하수관로	청정포항(주)	210,699	5,328	7,114	198,257	‘16.4.1 ~ ‘36.3.31
	13년 포항 하수관로	포항새물길(주)	122,800	-	-	122,800	‘18.10.1 ~ ‘38.9.30
BTO	포항하수종말처리장2단계(증설)건설공사	포항수질환경	107,686	129,290	15,883	79,415	‘07.11.1 ~ ’22.10.31
	장량하수처리시설 민간투자사업	푸른장량	52,739	22,848	4,642	60,346	‘11.1.1 ~ ’30.12.31
	청하·기계하수처리시설건설공사민간투자사업	㈜포항엔텍	72,147	2,773	3,746	71,174	‘16.2.26 ~ ’36.2.25

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2017년까지는 집행액(결산기준), 2018년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

개별 민간투자사업 현황

사업명

07년 포항 하수관로정비

담당자

하수도과 이의준(☎270-5424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우·오수를 분리하여 연안오염 방지 및 하수처리장 효율성 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2009.11.13 ~ 2014.04.12

○ 위치 : 포항시 용흥동, 중앙동, 학산동, 죽도동, 양학동, 대이동, 송도동 일원    ○ 민간사업자 : 포항맑은물(주)

○ 총사업비 : 113,568백만원

○ 사업규모 : 하수관로 101㎞, 배수설비 9,780가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	282,100	37,453	13,856	13,887	216,904
국 비	179,100	24,340	8,959	8,959	136,842
시 도 비	-
시군구비	103,000	13,113	4,897	4,928	80,062
기 타

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영 중

○ 운영기간 : 2014. 4. 13 ~ 2034. 4. 12 (20년간)

□ 향후계획

○ 2034년까지 민간사업자(운영사)에서 운영 및 유지관리

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

09년 포항 하수관로정비

담당자

하수도과 이의준(☎270-5424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우·오수를 분리하여 연안오염 방지 및 하수처리장 효율성 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2011.1.1 ~ 2014.06.30

○ 위치 : 포항시 죽도동, 용흥동, 대이동 일원

○ 민간사업자 : 포항맑은물길(주)

○ 총사업비 : 66,805백만원

○ 사업규모 : 하수관로 39㎞, 배수설비 3,083가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	146,800	17,766	7,121	7,196	114,717
국 비	91,400	11,424	4,570	4,570	70,836
시 도 비	-
시군구비	55,400	6342	2,551	2,626	43,881
기 타	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영 중

○ 운영기간 : 2014. 7. 1 ~ 2034. 6. 30 (20년간)

□ 향후계획

○ 2034년까지 민간사업자(운영사)에서 운영 및 유지관리

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

10년 포항 하수관로정비

담당자

하수도과 이의준(☎270-5424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우·오수를 분리하여 연안오염 방지 및 하수처리장 효율성 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2012.6.1 ~ 2016.03.31

○ 위치 : 포항시 대잠동, 죽도동, 상대동, 해도동 일원

○ 민간사업자 : 청정포항(주)

○ 총사업비 : 87,965백만원

○ 사업규모 : 하수관로 48㎞, 배수설비 4,950가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	210,699	5,328	7,114	7,146	191,111
국 비	133,173	3,387	4,516	4,516	120,754
시 도 비	-
시군구비	77,526	1,941	2,598	2,630	70,357
기 타	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영 중

○ 운영기간 :   (20년간)

□ 향후계획

○ 2036년까지 민간사업자(운영사)에서 운영 및 유지관리

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

13년 포항 하수관로정비

담당자

하수도과 김경민(☎270-5423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우·오수를 분리하여 연안오염 방지 및 하수처리장 효율성 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2015.7.1 ~ 2018.09.30

○ 위치 : 포항시 상대동, 해도동 일원

○ 민간사업자 : 포항새물길(주)

○ 총사업비 : 55,754백만원

○ 사업규모 : 하수관로 53㎞, 배수설비 4,412가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	122,800	-	-	1,470	124,270
국 비	72,000	-	-	900	71,100
시 도 비	-
시군구비	50,800	-	-	570	50,230
기 타	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 시공 중

○ 시공기간 : 2015. 7. 1 ~ 2018. 9. 30 (39개월간)

□ 향후계획

○ 2018년 9월 준공

○ 2038년까지 민간사업자(운영사)에서 운영 및 유지관리

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

포항하수종말처리장 2단계(증설)건설공사 민간투자사업

담당자

하수재생과 김기수(☎270-5284)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사회기반시설 조기 확충으로 시민 생활환경 개선 및 방류수역 수질보전 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2004. 10. 15. ~ 2007. 11. 30.

○ 위    치 : 포항시 남구 형산강북로 203 (상도동)

○ 민간사업자 : 포항수질환경(주)

○ 총사업비 :  107,686백만원

○ 사업규모 : 시설용량 232,000㎥/일 중 2단계 152,000㎥/일

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 사용료수입 보장(연간 추정사용료 수입의 47%에 미달할 경                  우 미달분 지급), 운영기간 ‘07. 11. 1.~’22. 10. 31.(15년)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	224,588	129,290	15,883	16,516	62,899
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	224,588	129,290	15,883	16,516	62,899
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영 중

□ 향후계획

○ 운영권 만료에 따른 포항하수처리장 관리이행 계획 수립

사업명

장량하수시설 민간투자사업

담당자

하수재생과 김기수(☎270-5284)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사회기반시설 조기 확충으로 시민 생활환경 개선 및 방류수역 수질보전에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2008. 4. 10. ~ 2010. 12. 28.

○ 위    치 : 포항시 북구 흥해읍 해안로 681-18

○ 민간사업자 : 푸른장량(주)

○ 총사업비 : 52,739백만원

○ 사업규모 : 시설용량 15,000㎥/일

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 최소수익보장 없음, 운영기간 ‘11. 1. 1.~’30. 12. 31.(20년)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	87,836	22,848	4,642	4,877	55,469
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	87,836	22,848	4,642	4,877	55,469
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영 중

□ 향후계획

○ 효율적이고 안정적인 운영

사업명

청하·기계하수시설 건설공사 민간투자사업

담당자

하수재생과 김기수(☎270-5284)

□ 사업목적 및 필요성

○ 읍·면 지역 하수처리시설 확대로 주거환경개선과 연안해역 수질 보전을

통한 해양관광도시 건설

□ 사업개요

○ 기간 : 2013. 1. 10. ~ 2016. 2. 25.

○ 위치 : 포항시 북구 청하면, 기계면 일원

○ 민간사업자 : 포항엔텍㈜

○ 총사업비 : 72,147백만원

○ 사업규모 : 시설용량 2,900㎥/일(청하 1,900, 기계 1,000)

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 최소수익보장 없음, 운영기간 ‘16. 2. 26.~’36. 2. 25.(20년)

○ 지금까지 재정부담액(운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	75,193	2,773	3,746	3,859	67,315
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	75,193	2,773	3,746	3,859	67,315
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영중

□ 향후계획

○ 효율적이고 안정적인 운영

□ 사업변경 내역

○ 사업기간변경

내역	당초	변경	사유
사업기간변경	2013.01.10～2015.10.09	2013.01.10～2016.02.25	국비교부지연

○ 총사업비변경

내역	당초(백만원)	변경(백만원)	사유
총사업비변경	72,330	72,147	사업량 및 운영비용 변경