109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 포항시에서 ‘18년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후
기능성점토 머드 축제	169	-	169	-	-	2018	2017	100
수출주력형 에너지강관산업 경쟁력 강화 기반구축 (고품질 강관산업 육성을 위한 통합지원 시스템 구축)	20,000	1,446.5	1,618.6	9,604.9	7,330	2021	2017	40
국민안전로봇 프로젝트	67,115	41,994	18,786	14,041	11,081	2021	2017	51
첨단기술사업화센터 구축사업	16,000	2,600	500	7,200	5,700	2020	2018	10
바이오오픈이노베이션센터구축	27,200	9,000	2,000	15,300	900	2020	2018	30
신재생에너지 융복합단지조성사업	3,246	-	3,246	-	-	2019	2018	85
제1차 한-러 지방협력포럼	600	-	600	-	-	2018	2018	100
죽도시장 공영주차장 건립공사	17,100	-	7,470	1,500	8,130	2020	2018	10
영일만친구 야시장 개장식 및 문화공연	150	-	-	150		2019	2018
포항운하 수문 개선사업	475	-	58	17	400	2020	2018	15
포항운하 주차장 조성	7,444	375	1,414	5,655	-	2019	2017	100
희망포항 K-POP드림콘서트	648		648	623	623	2020	2018	100
포항 해병대 문화축제	500		461	500	500		2018	100
문화관광해설사 전국대회	100		0	100	0		2018	100

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후
문덕초등학교 다목적강당 및 급식소 증축	4,530		136	752		2019	2018	89
유강초등학교 다목적강당 및 급식소 증축	4,552		663	254		2019	2018	100
장성초등학교 다목적강당 증축	2,827		82	471		2019	2018	87
설머리 물회지구 지중화사업	2,500	-	600	900	1,000	2021	2018	50
오천읍 구정리 도시계획도로(중3-10)개설	3,000	0	0	100	2,900	2022	2018	5
우창동 도시계획도로(중1-196)개설	0	0	0	0	0		2018	전액반납
2018 세계대학태권도선수권대회 겸 오픈대회	611		611				2018	100
K리그 주니어 챔피언십대회	500		500				2018	100
장기면 다목적복지회관 건립	5,850			641	5,209	2020	2018	10
천만송이 장미도시 조성사업	7,500	780	1,120	500	5,100	2021	2018	30
포항공항 완충지역 공원화사업	7,400	1,800	2,420	3,180		2020	2018	70
제6회 대한민국 국제해양레저위크	400		200	200	200		2018	100
형산강 마리나 계류장 조성사업	10,000	10,000	-	400	9,600	2022	2018	4
2019 시립미술관 개관 10주년 기념특별전개최	873		6	770	97	2020	2018	88
호동2매립장 순환이용 정비사업	37,100	-	-	3,000	34,100	2022	2018	8
초곡지구 진입도로 개설 공사	8,400	5,000	1,500	1,900	-	2019	2018	100

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후
영일만3일반산업단지 기반시설 조성공사	4,200	1,850	700	700	950	2021	2017	70
영일만4일반산업단지 곡강IC 연결도로 개설공사	21,800	4,000	10,000	7,800	-	2020	2017	50
창포동~흥해 성곡간도로(중1-58) 개설공사	35,000	3,603	5,500	500	25,397	2025	2017	27
포항 철강관리공단(1,2,3) 완충저류시설 설치사업	36,800		6,729	3,976	26,143	2021	2018	10
구무천 생태하천복원사업	20,000			5,500	14,500	2021	2018	5
차량구입지원 (시내버스 노선개편)	13,500	-	-	13,500	-	2019	2018(시) 2019(도)	0
포항시북구 치매안심센터 설치	3,265	10	221	3,034	-	2019	2017	45

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2018년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

기능성 머드 축제

담당자

미래전략산업과 정인숙(☎270-3563)

□ 사업목적 및 필요성

○ 포항시 고유자원인 벤토나이트를 활용하여 타 지자체와 차별화된 지역축제로      경제 활성화 도모

○ 점토 광물을 원자재로 활용한 펠로테라피(Pelotherapy) 산업의 관광자원화를      통한 신성장 산업 육성기여

□ 사업개요

○ 기    간 :  2018. 1 ~ 2018. 12

○ 위    치 : 영일대해수욕장 장미원 앞 공터

○ 규    모 : 참여인원 20,000명 정도

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 169백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	169
국 비
시 도 비
시군구비	135		135
지 방 채
민간자본	34		34
기 타

□ 추진상황

○ 2019. 6. 1. 포항시 머드축제 사용원료 안정성 검사 협조요청(포항TP)

○ 2019. 6. 21. 2018 기능성점토 머드축제 교부금 교부 결정 및 교부

○ 2018. 7. 17. ~ 7. 22. 2018 기능성점토 머드축제 개최

사업명

기능성 머드 축제

담당자

미래전략산업과 정인숙(☎270-3563)

□ 사업목적 및 필요성

○ 포항시 고유자원인 벤토나이트를 활용하여 타 지자체와 차별화된 지역축제로      경제 활성화 도모

○ 점토 광물을 원자재로 활용한 펠로테라피(Pelotherapy) 산업의 관광자원화를      통한 신성장 산업 육성기여

□ 사업개요

○ 기    간 :  2018. 1 ~ 2018. 12

○ 위    치 : 영일대해수욕장 장미원 앞 공터

○ 규    모 : 참여인원 20,000명 정도

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 169백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	169
국 비
시 도 비
시군구비	135		135
지 방 채
민간자본	34		34
기 타

□ 추진상황

○ 2019. 6. 1. 포항시 머드축제 사용원료 안정성 검사 협조요청(포항TP)

○ 2019. 6. 21. 2018 기능성점토 머드축제 교부금 교부 결정 및 교부

○ 2018. 7. 17. ~ 7. 22. 2018 기능성점토 머드축제 개최

사업명

수출주력형 에너지강관산업

경쟁력 강화 기반구축

(고품질 강관산업 육성을 위한

통합지원 시스템구축)

담당자

미래전략산업과 정인숙(☎270-3563)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 대표산업인 철강산업의 활성화를 위한 고부가가치 산업인 강관 산업의 경쟁력 향상

○ 시험․평가기반 구축 및 생산기술지원을 통해 신뢰성 있는 고품질 강관제품 개발 시급

□ 사업개요

○ 기    간 :  2017. 4 ~ 2021. 12.

○ 위    치 : 포항시 남구 블루밸리국가 산업단지

○ 규    모 :  고품질강관 기술센터 구축(부지 : 7,603㎡, 건물 : 2,725㎡)

- 시험평가동(강관 공정기술 지원 및 물성평가동), 이용기술지원동 건립

- 시험평가장비구축 : 복합환경부식시험기 등 22종

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 200,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	20,000	1,446	1,619	9,605	7,330
국 비	10,000	630	539	3,581	5,250
시 도 비	3,000	408	450	1,834	308
시군구비	7,000	408	630	4,190	1,772
지 방 채
민간자본
비 고

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  65%)

○ 2017. 9월 : 고품질강관 기술지원센터 구축을 위한 부지매입(7,603㎡)

○ 2018. 8월 : 기본 및 실시설계 완료

○ 2019. 3. 26. : 고품질강관 기술지원센터 착공식

□ 향후계획

○ 2019. 12월 : 고품질강관 기술지원센터 준공(예정)

○ 지역 강점산업인 에너지강관산업의 경쟁력 확보 블루밸리 국가산단 활성화를

위해 필요한 인프라 확보

사업명

국민안전로봇  프로젝트

담당자

미래전략산업과 박성대(☎270-3564)

□ 사업목적 및 필요성

○ 복합재난 현장에서 소방대원을 도와 초기 정찰 및 긴급대응작업을 수행하는 로봇 개발과 실증센터 구축을 통한 재난의 대형화를 방지하여 인명·재산 피해 최소화

□ 사업개요

○ 기    간 : 2016년 7월 ~ 2022년 6월 (6년간)

○ 위    치 : 포항시 북구 영일만3 일반산업단지 內 (2019년 완공)

○ 규    모 : 재난대응로봇기술개발, 안전로봇실증센터 구축

※ 안전로봇실증센터 : 부지 19,800㎡ , 건축연면적 7,508㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 67,115 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	67,115	41,994	18,786	14,041	11,081
국 비	38,372	21,272	10,479	8,383	8,717
시 도 비	10,297	7,867	2,877	1,813	617
시군구비	10,297	7,867	2,877	1,813	617
지 방 채
민간자본	8,149	4,988	2,553	2,032	1,130
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 51%)

○ (R&D) 시제품 제작 및 시스템 통합검증/개선

○ (인프라) 실증시험시설 구축 및 장비 구축

□ 향후계획

○ (R&D) 시스템 통합검증/개선, 모듈 개선 및 안정화

○ (인프라) 장비 구축 및 실증시설 활용

사업명

첨단기술사업화센터 구축사업

담당자

미래전략산업과 박준철(☎270-2423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 선진국형 산업구조로 진입하여 단순 제조업 중심의 산업육성 한계 봉착

☞ 4차 산업혁명 및 새로운 산업 패러다임에 적극적으로 대응하기 위하여

첨단기술사업화 지원 기반 마련 필요

□ 사업개요

○ 기    간 : 2017 ~ 2020

○ 위    치 : 포항시 남구 지곡동 산 183번지

○ 규    모 : 연면적 7,271㎡(지하1층/지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	16,000	2,600	500	7,200	5,700
국 비
시 도 비	3,600		150	1,740	1,710
시군구비	8,400		350	4,060	3,990
민간자본	4,000	2,600		1,400
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2018. 03. : 지방재정투자사업 심사 승인

○ 2019. 03. : 첨단기술사업화센터 실시설계 완료

□ 향후계획

○ 2019.  9 : 첨단기술사업화센터 착공

○ 2020. 11 : 첨단기술사업화센터 준공

사업명

바이오오픈이노베이션센터 구축

담당자

미래전략산업과 박준철(☎270-2423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 新산업 창출을 위한 원천기술 개발과 기업유치를 위한 플랫폼 구축을  위하여 「바이오 오픈-이노베이션 센터」를 구축

□ 사업개요

○ 기    간 : 2016 ~ 2019

○ 위    치 : 포항시 남구 지곡동 166-20

○ 규    모 : 연면적 10,576㎡(지하1층/지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 27,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	27,200	9,000	2,000	15,300	900
국 비
시 도 비	4,700	3,250	1,000		450
시군구비	4,700	3,250	1,000		450
민간자본	17,800	2,500		15,300

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2016. 12. 15. BOIC 건립안 승인

○ 2018. 05. 15. 설계용역사, 기본설계 완료보고

○ 2019. 02.  BOIC 착공식(‘19. 12월 준공 예정)

□ 향후계획

○ 2019. 12.  바이오오픈이노베이션센터 준공 및 제약·바이오기업 입주

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초 생명공학연구센터를 증축하는 것으로 계획하였으나, 바이오기업 입주수요 증가로 신축으로 변경

구 분	당초	변경
사업기간	2016~2017	2016~2019
총사업비	95억원	272억원
규 모	4,400㎡증축	10,579㎡신축

사업명

신재생에너지 융복합단지조성사업

담당자

미래전략산업과 김현기(☎270-3395)

□ 사업목적 및 필요성

○ 에너지 소외 농어촌에 융·복합 사업보급으로 신재생에너지 보급 확산 및 친환경 도시 이미지를 구축하고자 함

□ 사업개요

○ 기    간 : 2018. 01 ~ 2019. 12

○ 위    치 : 포항시 북구 읍면일원(신광, 청하)

○ 규    모 : 총 281개소( 주택 255개소, 상가 23개소, 공공건물 3개소)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,246백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,246		3,246
국 비	1,610		1,610
시 도 비	1,286		1,286
민간자본	350		350
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 신재생에너지원 및 모니터링 시스템 239개소 설치 완료

□ 향후계획

○ 신재생에너지원 42개소 설치지원 예정

□ 사업변경 내역

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된

상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

제1차 한-러 지방협력포럼

담당자

미래전략산업과 김미정(☎270-3845)

□ 사업목적 및 필요성

○ 환동해 북방경제 선도 도시의 위상을 대내외 알리고, 유라시아 공동 평화와

번영을 위한 화합의 장 마련

○ 한반도 주변 국제정세 변화로 인해 정부의 新북방정책에 대한 기대감이 고조

됨에 따라 초국경 협력사업 활성화 전망

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2018. 11.

○ 장    소 : 포항시(포스텍 체육관, 국제관 일원)

○ 주최/주관 : 경상북도 / 포항시

○ 협력기관 : NEAR 사무국, 한국무역협회, 한국경제통상학회, 포스텍

○ 참여인원 : 1,000명 정도

- 한국 및 러시아 극동지역 광역단체 26개 도시

- 사하공화국, 연해주, 하바롭스크주, 캄차카주, 아무르주, 마가단주, 사할린주, 유대인자치주, 추코트카주

- 중앙정부 및 산하기관 관계자, 유관기관, 국내외 전문가 및 언론사

- 한국무역협회, 상공회의소 등 경제단체, 대학교, 일반시민 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  600백만원(도비 200, 시비 400)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	600		600
국 비
시 도 비	600		600
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진경과 (추진단계 및 진도 :  100%)

○ 2017. 9. 6. 한-러 정상회담, 포럼 개최 합의(블라디보스톡)

○ 2018. 4. 5. 포럼 개최 신청(포항시.경북도 → 외교부 유라시아과)

○ 2018. 4. 11. 포럼 개최지 확정(외교부 → 포항시.경북도)

○ 2018. 6. 22. 한-러 정상회담, 공동성명 채택(모스크바)

○ 2018. 7. 20. 외교부 참가 지자체 대상 실무자 회의 개최

○ 2018. 10. 한-러 지방협력포럼 추진단 운영

○ 2018. 10. 30. 한-러 포럼 추진상황 최종보고회

○ 2018. 11. 1. 러시아 기념 광장 조성

○ 2018. 11. 7. ~ 11. 9. 제1차 한-러 지방협력포럼 개최

사업명

죽도시장 공영주차장 건립공사

담당자

일자리경제노동과 조용주

(☎270-2434)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 주차시설이 부족한 죽도시장에 주차장을 추가 확보하여 시장 활성화 및 명품 관광시장으로 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018~2020

○ 위 치 : 포항시 북구 죽도동 579-1번지 일대

○ 규 모 : 타워주차 5개층,  주차면 350면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	17,100		7,470	1,500	8,130
국 비	10,260		4,478	900	4,878
시군구비	6,840		2,992	600	3,252

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2018. 3.30.  : 경상북도 투자심사(조건부-공모선정,국비확보)

○ 2018. 9.    : 중기지방재정계획

○ 2019. 8.    : 전체 부지 6필지 2,932㎡ 중 3필지 2,368㎡ 매수

□ 향후계획

○ 2019.  9. : 설계 발주

○ 2020.  2. : 공사 발주

○ 2020. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

영일만친구야시장

개장식 및 문화공연

담당자

일자리경제노동과 나은경

(☎270-2435)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 문화‧관광자원과 연계한 야시장을 조성하여 침체된 전통시장

활성화로 지역경제 활력에 기여

○ 축제와 연계한 개장식 및 문화공연 개최로 야시장을 전국에 홍보하고

새로운 야간관광명소로 발돋움하는 계기를 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 201

○ 위 치 : 포항중앙상가 실개천 일원

○ 규 모 : 개장식 및 문화공연 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	150		-	150
국 비	75		-	75
시 도 비
시군구비	75			75
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황

○ 2018. 3. 13.    : 야시장 공모선정

○ 2018. 10. ~ 12. : 야시장 기본 및 실시설계

□ 향후계획

○ 2019. 7. 26.   : 개장식 행사

○ 2019. 8. ~ 12. : 문화공연 및 이벤트 행사 등

사업명

포항운하 수문 개선 사업

담당자

공원과 고상현(☎270-5173)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수문 개선을 통한 안정성 확보로 태풍 등으로 인한 강우 시 해도동 및

인근 지역 침수방지 및 효율적인 유지보수

□ 사업개요

○ 기  간 : 2016. ~ 2020.

○ 위  치 : 남구 희망대로 1040 포항운하 해도교 인근

○ 사업량 : 물막이(스톱로그) 제작 및 보관함 공사 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 475백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계			58	17	400
국 비
시 도 비
시군구비			58	17	400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2017. 9. ~ 2018. 3. : 포항운하 수문운영 개선방안 기본계획 수립용역

○ 2019. 4. ~ 7. : 실시설계 용역

□ 향후계획

○ 2020. 2. ~ 6. : 물막이(스톱로그) 제작

○ 2020. 1. ~ 6. : 물막이(스톱로그) 보관함 공사

□ 사업변경 내역

	당 초	현 재	비 고
사업비	4,120백만원	475백만원	2018. 12. 4. 예산안 상임위 예비심사에서 변경
사업방향	인양식 수문	물막이 제작

※ 변경사유 : 관광지로서의 미관을 고려하고 해도제2펌프장 신설에 따라

사업방향 변경

사업명

포항운하 주차장 조성

담당자

공원과 박가혜(☎270-3224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 포항운하 관광객 증가와 주변 활성화를 위한 입지규제최소구역 지정에   따라 각종 건축제한 사항이 완화(부설 주차장설치 제외 등) 됨으로,      이에 따른 대체 주차시설 확보 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 12 ～ 2019. 6

○ 위 치 : 포항시 남구 해도동 550일원

○ 규 모 : 부지매입 1식(A=7,593㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,444백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	7,444	375	1,414	5,655	-
국 비
시 도 비
시군구비	7,444	375	1,414	5,655	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2014. 04. 30 : 포항운하 준공

○ 2015. 11. 30 : 입지규제최소구역 결정

○ 2017. 06. 30 : 시설용지 매각 개시(LH공사 주관 : 블록 미 개별 필지)

○ 2017. 12. 22 : 주차장 부지 계약

○ 2018. 1월 ~ 2019. 6월 : 중도금 지급 및 부지 매입 완료

□ 향후계획(해당없음)

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

희망포항 K-POP 드림콘서트

담당자

국제협력관광과 이희정

(☎270-2243)

□ 사업목적 및 필요성

○ 11.15 지진으로 포항방문 관광객 격감 및 숙박, 여행, 음식업계 예약취소        등에 따른 포항 지역경기침체 극복을 위해 K-POP 드림 콘서트를 개최하여       지진의 고통을 극복하고 새롭게 도약하는 포항시민들에게 위로와 희망의        메시지를 전달

○ 10대, 20대 연령층은 물론 중국, 일본, 동남아 지역 아이돌 팬을 대상으로 한       콘텐츠 구성을 통해 한류문화 수용과 발전의 장 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 10. 27

○ 위 치 : 포항종합운동장

○ 규 모 : 아이돌 그룹 공연행사, 여행 패키지상품 운영 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 648백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	648		648	623
국 비
시 도 비	180		180	280
시군구비	300		300	280
지 방 채
민간자본
기 타	168		168	63

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   100%)

○ 2018년 희망포항 K-POP 드림콘서트 개최

- 일시 : 2018. 10. 27(토)

- 장소 : 포항종합운동장

- 내용 : 아이돌그룹 공연행사, 여행 패키지상품 운영 등

□ 향후계획

○ 2019년 WITH POHANG K-POP 콘서트 개최(2019.9.1)

사업명

포항 해병대 문화축제

담당자

국제협력관광과 이희정

(☎270-2243)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국가와 국민을 위하여 복무 후에도 지역사회 곳곳에서 교통봉사 등 해병대 정신으로 사회적 역할을 다하고 있는 해병인의 강한 자부심과 긍지를 해병의 본고장인 포항에 총집결하여 호국해병의 정신을 확산할 필요성이 있음

○ 「150만 해병인의 고향」포항의 도시브랜드를 활용하여 해병대 예비역과 가족, 관광객들이 찾아올 수 있게 지역의 대표적인 관광상품으로 개발하여 일자리 창출 및 지역경제 활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 10월 20일 ～ 2018년 10월 22일(3일간)

○ 위 치 : 포항시 일원

○ 규 모 : 해병대 시범‧공연‧체험행사, 해상퍼레이드‧상륙시범, 공연행사 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	500		461
국 비	200		184	100	100
시 도 비	90		83	45	45
시군구비	210		194	355	355
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018년 포항 해병대문화축제 개최 완료

- 일시 : 2018. 10. 20 ~ 10. 22

- 장소 : 포항종합운동장 및 해병대 1사단 일원

- 내용 : 해병대 시범행사, 공연행사, 체험행사, 특산품판매부스, 먹거리부스 등

□ 향후계획

○ 해병대문화축제 지속발전 계획 수립

○ 해병대문화축제 장소 및 시기 일원화 계획 수립

사업명

2018년 한국문화관광해설사

전국대회

담당자

국제협력관광과 유하나

(☎270-2374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국에서 활동하고 0있는 문화관광해설사간 정보공유 및 친목도모

○ 전문강의와 현장답사를 통한 문화관광해설사 역량 강화

○ 개최지 포항시의 산업과 해양관광 및 해돋이 역사 기행 홍보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 10월 1일~10월 2일(2일간)

○ 위 치 : 포항시 일원(시청 대잠홀, 포스코, 호미곶, 호미반도 해안둘레길, 포항크루즈, 죽도시장 등)

○ 규 모 : 전국 문화관광해설사 대상 총 500여명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	100	0	100	0	0
국 비	50		50
시 도 비	25		25
시군구비	25		25
지 방 채	0		0
민간자본	0		0
기 타	0		0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 사업종료

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

문덕초 다목적강당 및 급식소 증축

담당자

교육청소년과 김나영

(☎270-3063)

□ 사업목적 및 필요성

○ 학생들 교육활동공간 확보를 통한 교육환경개선 및 지역주민의 문화・체육       공간활용, 학교 급식환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1. ~ 2019. 9.

○ 위 치 : 포항시 남구 오천읍 해병로 397 문덕초등학교

○ 규 모 : 1,736㎡(1층 급식소 767㎡, 2층 다목적강당 969㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :      4,530백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,530		136	752
국 비
시 도 비
시군구비	888		136	752
지 방 채
민간자본
기 타	3,642

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  89%)

○ 2018. 2. 설계용역 착수

○ 2018. 7. 설계용역 완료

○ 2018. 11. 19. 공사착공

□ 향후계획

○ 2019. 9. 공사 준공예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

유강초 다목적강당 및 급식소 증축

담당자

교육청소년과 김나영

(☎270-3063)

□ 사업목적 및 필요성

○ 학생들 교육활동공간 확보를 통한 교육환경개선 및 지역주민의 문화・체육       공간활용, 학교 급식환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1. ~ 2019. 8.

○ 위 치 : 포항시 남구 연일읍9번길 39 유강초등학교

○ 규 모 : 1,605㎡(1층 급식소 704㎡, 2층 다목적강당 901㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :      4,552백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,552		663	254
국 비
시 도 비
시군구비	917		663	254
지 방 채
민간자본
기 타	3,635

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 2018. 2. 설계용역 착수

○ 2018. 7. 설계용역 완료

○ 2018. 10. 15. 공사착공

○ 2019.  8.  5. 공사완료

□ 향후계획

○

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

장성초 다목적강당 증축

담당자

교육청소년과 김나영

(☎270-3063)

□ 사업목적 및 필요성

○ 학생들 교육활동공간 확보를 통한 교육환경개선 및 지역주민의 문화・체육       공간활용

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1. ~ 2019. 10.

○ 위 치 : 포항시 북구 새천년대로 1123번길 6

○ 규 모 : 961.8㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :      2,827백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,827		82	471
국 비
시 도 비
시군구비	553		82	471
지 방 채
민간자본
기 타	2,274

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  87%)

○ 2018. 2. 설계용역 착수

○ 2018. 7. 설계용역 완료

○ 2018. 10. 15. 공사착공

□ 향후계획

○ 2019.  10.  5. 공사 준공예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

설머리 물회지구 지중화사업

담당자

도로시설과 정삼화(☎270-3323)

□ 사업목적 및 필요성

○ 설머리 물회지구 조성사업과 연계하여 가공 전선을 지중화하여 해안가        도시미관 개선 관광객 유치, 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 4. ~ 2021. 7.

○ 위 치 : 포항시 북구 두호동 1015-1 해안로 일원

○ 규 모 : 가공 전서 지중화 890m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,000		1,200	1,800	2,000
국 비
시 도 비
시군구비	2,500		600	900	1,000
지 방 채
민간자본
기 타	2,500		600	900	1,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2018. 2월 : 사업승인, 협약서 체결

○ 2018. 3월 ~ 7월 : 실시설계

○ 2018. 11월 ~ 2019. 8월 : 지중화 공사 진행중

□ 향후계획

○ 2019. 9월 ~ 2019. 12월 : 지중화 공사완료

○ 2020. 7월 : 사업비 분할 납부

○ 2021. 7월 : 사업비 분할 납부(사업완료)

사업명

오천읍 구정리 도시계획도로(중3-10) 개설

담당자

도로시설과 윤문일(☎270-3444)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역주민 민원해소

○ 주택 밀집지역 소방도로 확보 및 도시기반시설 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2022

○ 위 치 : 포항시 남구 오천읍 구정리 일원(우방신세계 옆)

○ 규 모 : 도로개설 L=380m, B=12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,000			100	2,900
국 비
시 도 비
시군구비	3,000			100	2,900
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2019. 03. 실시설계용역

○ 2019. 06. 편입토지보상

□ 향후계획

○ 2020. 12. 편입토지보상

○ 2022. 12. 공사완료

사업명

2018 세계대학태권도선수권 대회겸 오픈대회

담당자

새마을체육산업과 조효숙

(☎270-2793)

□ 사업목적 및 필요성

○ 세계 대학생들이 태권도를 통해 꿈과 이상을 실현하고 태권도 저변확대와

지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 7. 10. ∼ 7. 15.(6일간)

○ 위 치 : 포항체육관

○ 규 모 : 태권체조/팀대항종합경연) 50여개국가 선수, 임원 약 1,500여명

번외경기(초,중,고,일반,겨루기, 품새대회) 선수, 임원 약 1,500여명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 611백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	611		611
국 비	216		216
시 도 비	27		27
시군구비	248		248
지 방 채
민간자본	120		120
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ A그룹, B그룹 종목(겨루기/품새/창작품새/개인종합격파/

○ 태권체조/팀대항종합경연) 50여개국가 선수, 임원 약 1,500 여명

○ 번외경기(초, 중, 고, 일반, 겨루기, 품새대회) 선수, 임원 약 1,500 여명

□ 향후계획

○ 향후 계획없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

2018 K리그 유스챔피언십 대회

담당자

새마을체육산업과 조효숙

(☎270-2793)

□ 사업목적 및 필요성

○ 미래의 한국 축구 주역인 유소년(U14∼18)에게 경쟁의 기회를 제공하여

미래의 주역으로 성장해 갈 수 있도록 하기 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 :  2018. 7. 21. ～ 8. 11. (22일간)

○ 위 치 :  포항스틸야드 외

○ 규 모 :  77여개의 팀 3,000여명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	500		500
국 비
시 도 비
시군구비	300		300
지 방 채
민간자본	200		200
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 중등부 총 101경기(U15 : 53경기/ U14: 48경기)

○ 고등부 총 79경기 (U18: 45경기/ U17:34경기)

□ 향후계획

○ 중등부 총 117경기(U15 : 72경기/ U14: 45경기)

○ 고등부 총 83경기 (U18: 45경기/ U17:38경기)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

장기면다목적복지회관 건립

담당자

새마을체육산업과과 이정화

(☎270-2454)

□ 사업목적 및 필요성

○ 오지 농촌지역 고령화 특성에 맞는 복지회관 건립으로 삶의 질 향상 및       타 읍면동과의 문화격차를 해소하고 재난발생시 안전 대피소로 활용

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 12. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 포항시 남구 장기면 마현리 317-1 외 1필지

○ 규 모 : 대지 2,088㎡, 연면적 1,800㎡(지하1층, 지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,850백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,850			641	5,209
국 비
시 도 비
시군구비	5,850			641	5,209
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2019. 4. : 건축부지 매입 및 보상

○ 2019. 7. : 기본 및 실시설계 용역 시행

□ 향후계획

○ 2019. 11. : 실시설계용역 완료

○ 2020.  1. : 공사발주 및 착공

○ 2020. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

포항공항 완충지역 공원화사업

담당자

그린웨이추진단 김호흥

(☎270-5594)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공항 확장 관련 지역주민 고충, 피해 해소 및 공항소음 완충효과

○ 친환경 녹색도시 이미지 제고 및 지역주민 주거·학습환경 개선 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 7. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 포항시 남구 동해면 도구리 529-89번지 일원

○ 사업량 : 공원조성 1식(A=6,786㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	7,400	1,800	2,420	3,180
국 비
시 도 비
시군구비	2,400	1,800	600
지 방 채	3,000		1,820	1,180
민간자본	2,000			2,000
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ ‘17. 03. : 공원조성 사업비 지원결정(포스코, 20억원)

○ ‘17. 03. 17. : 지방재정 투자사업 심사 완료

○ ‘17. 06. 08. : 지역주민 설명회 개최

○ ‘17. 06. ~ 12. : 기본 및 실시설계 용역 시행

○ ‘17. 07. ~ 08. : 토지 및 지장물 감정평가

○ ‘17. 09. ~ : 토지 및 지장물 보상협의

- 사유지 : 29필지 중 26필지 보상완료(미보상 3필지, 소유주 1명)

- 국유지 : 7필지 보상협의 중(한국자산관리공사 포항지사)

- 지장물 : 가옥철거 23동 중 21동 철거완료(미철거 2동 보상협의중)

○ ‘18. 03. 30. : 지방재정 투자사업 심사완료(경상북도)

○ ‘19. 07. 15. : 공원조성사업 착공(포스코 발주 20억원)

□ 향후계획

○ 토지 및 지장물 보상 지속추진

○ 2019. 11. 30일까지 공원조성사업 완료예정

사업명

천만송이 장미도시 조성사업

담당자

그린웨이추진단 김정미

(☎270-5573)

□ 사업목적 및 필요성

○ 포항 市화 장미를 주제로 바다를 배경으로 한 주요 산책거리, 공원, 도시       숲에 컬러풀한 공간을 조성해 타 시군에서 볼 수 없는 색다른 경관 제공

○ 향기롭고 다채로운 공간으로 포항국제불빛 등 지역축제와 연계해 관광객       유입 및 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1. ~ 2021. 12. 31.

○ 위 치 : 포항시 관내(주요 녹지대, 도로변 등)

○ 규 모 : 장미공원 A=40,000㎡, 장미테마거리 조성 L=18.5km 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	7,500	780	1,120	500	5,100
국 비	3,700			250	3,450
시 도 비	1,100		150	75	875
시군구비	2700	780	970	175	775
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ ‘17. 05. 영일대 장미원 조성

○ ‘17. 10. 포항시 중기지방재정계획 반영

○ ‘18. 03. 2018년 제1차 투자심사(도) 반영

○ ‘18. 12. 천만송이 장미도시 기본계획 수립

○ ‘19.~’21. 포켓장미원 및 장미테마거리 조성

□ 향후계획

○ 포항을 상징 할 수 있는 거점 장미원 및 테마거리 조성 사업 확대

○ 포항국제불빛축제 등 각종 축제행사와 더불어 도시 브랜드 가치향상

사업명

제6회 대한민국 국제해양레저위크

담당자

해양산업과 김성우(☎270-2463)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전 세계가 함께 즐기는 해양레저체험 기회의 확대, 레저산업의 발전을

선도하기 위한 상호협력 방안 모색 및 해양스포츠의 도시 포항의 브랜드

가치향상

□ 사업개요

○ 기 간 :  2018. 8. 11 ~ 8. 25

○ 위 치 : 영일대해수욕장 일원

○ 규 모 : 약20,000명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계
국 비			200	200	200
시 도 비			200	200	200
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

○ 개막식, 국제컨퍼런스, 문화공연, 해양레저체험 등

□ 향후계획

○ 해양레저축제를 통한 해양관광·문화 활성화 컨퍼런스 개최

□ 사업변경 내역 : 해당사항 없음

사업명

형산강 마리나 계류장 조성

담당자

형산강사업과 김대원(☎270-4882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 포항시 수상기구 등록 현황 680대로 계류장이 부족한 실정

○ 형산강 하류 슬립웨이 포화상태로 무단방치 등 안전사고 위험

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2022

○ 위 치 : 포항시 남구 형산강 일원

○ 규 모 : 계류시설 12,000㎡, 휴게공간 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	10,000			400	9,600
국 비	5,000			200	4,800
시 도 비	1,500			60	1,440
시군구비	3,500			140	3,360
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2019. 03 : 실시설계용역 착수

○ 2019. 07 : 기본계획안 검토

□ 향후계획

○ 2020. 01 : 공사발주(토공작업)

○ 2022. 12 : 공사준공 및 운영

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

호동2매립장 순환이용 정비사업

담당자

자원순환과 정재원(☎270-4812)

□ 사업목적 및 필요성

○ 호동2매립장 매립율이 현재 90%로써 2020년말 사용종료 예상

○ 신규매립장 건설이 사실상 불가능한 데 대한 대안사업으로 추진

○ 기존매립장을 순환형으로 정비, 선별폐기물을 발전원료로 사용함으로 자원재활용률 제고

□ 사업개요

○ 기    간 : 2019. ~ 2022.

○ 위    치 : 남구 호동 산38번지 호동2매립장

○ 사업주체 : 포항시

○ 총사업비 : 371억원(국비185, 지방비186)

○ 사 업 량 : 폐기물 굴착, 선별, 압축, 포장 791천㎥

□ 연차별 투자계획

○ 지금까지 예산교부액 및 향후 투자예정금액

(단위 : 억원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	371	-	-	30	341
국 비	185			15	170
시 도 비	55.8			4.5	51.3
시군구비	130.2			10.5	119.7
기 타

□ 추진단계

○ 기본 및 실시설계 용역 수행 중

□ 향후계획

○ 매립폐기물 사전 안정화 작업, 선별시설 및 돔 설치, 굴착

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

개관기념 특별전

담당자

시립미술관 김석모

(☎270-4702)

□ 사업목적 및 필요성

○ 1957년 독일에서 결성되어 세계미술계에서 가장 주목받는 Zero그룹의
예술·과학·기술이 융·복합된 작업으로 구성된 아시아 최초 전시기획

□ 사업개요

○ 기 간 :  2019. 9. 3. ~ 2020. 1. 27. (147일간)

○ 위 치 : 포항시립미술관 로비 및 전관

○ 규 모 : Zero그룹의 대표작품 50여점 및 아카이브

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 873백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	873		6	770	97
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 전시장 조성 공사, 작품 반입 및 설치

○ 관람객 유치를 위한 홍보

(KTX 객실모니터, 전광판, 관내 신문사, 버스 랩핑 배너, 옥외 현수막 등)

□ 향후계획

○ 지속적인 홍보를 위한 전시 홍보

○ 쾌적한 전시 관람을 위한 전시장 유지보수

사업명

초곡지구 진입도로 개설공사

담당자

도시계획과 배병휴(☎270-3507)

□ 사업목적 및 필요성

○ 초곡지구 도시개발사업지구의 진입도로 추가 개설로 교통 불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 7. 18. ~ 2019. 4. 28.

○ 위 치 : 북구 흥해읍 성곡, 초곡리 일원

○ 규 모 : 횡단교량 L=47m, L=1.69km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,400	5,000	1,500	1,900
국 비
시 도 비
시군구비	8,400	5,000	1,500	1,900
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 공사준공(2019. 4. 28.)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 부산지방국토관리청에서 시행중인 “흥해 우회국도 건설공사”가 보상지연 등으로 공사추진이 늦어짐에 따라 중첩구간(Ramp-A No.0+100 ~ 0+320) 시공이 불가하여 물량 삭감

총공사비 : 당초 5,698,638,000원 → 변경 : 5,100,114,000원

사업명

영일만3일반산업단지 기반시설

조성공사

담당자

도시계획과 박종원(☎270-3814)

□ 사업목적 및 필요성

○ 포항시 산업구조 변화의 선도적 역할 수행 및 차세대 신성장 산업 유치를

위하여 미래지향적 전략산업의 입지공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 9. ~ 2021. 7.

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 용한리 894번지 일원

○ 규 모 : A=194,682.7㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,200	1,850	1,400	0	950
국 비
시 도 비	4,200	1,850	1,400	0	950
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 17. 3. 16. : 도로개설 L=253m(850백만원)

○ 17. 9. 29. : 도로개설 L=253m(1,000백만원)

○ 19. 6. 17. : 도로개설 L=340m(1,400백만원)

□ 향후계획

○ 2020. 3. : 호안녹화 공사 1식(950백만원)

사업명

영일만4일반산업단지 곡강IC연결도로

개설공사

담당자

도시계획과 송하동(☎270-3813)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영일만4 일반산업단지 진입도로가 2016. 12월 준공되었으나 영일만대로까지       단지 내 연결도로가 미개설되어 도로기능을 못하고 있는 실정으로 도로       연결을 통한 물류수송의 조기 확보로 미진한 산업단지 조성 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 2. ~ 2020. 2.

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 곡강리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=980m(B=20~30m), 교차로(IC) 1개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	21,800	4,000	10,000	7,800
국 비
시 도 비
시군구비	21,800	4,000	10,000	7,800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 편입토지 보상 93%

○ 공사 진도율 50%(대로2-3 토공60%, 중로1-2 임시개통)

□ 향후계획

○ 2019. 10. : 대로 임시개통

○ 2020.  2. : 2차분 준공

사업명

창포동~흥해 성곡간 도로(중1-58)

담당자

도로시설과 이동영

(☎270-3434)

□ 사업목적 및 필요성

○ 두호, 창포지구 도심지와 KTX포항역을 연결하는 간선도로 개설로

도시기반시설구축

○ 창포동 대단지 아파트 건축 및 기존 아파트단지로 인한 간선도로

교통체증 해소와 교통편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2023

○ 위 치 : 포항시 북구 창포동 ~ 흥해읍 성곡리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=2.71km, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 35,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	35,000	3,603	5,500	500	25,397
국 비
시 도 비	300	300
시군구비	34,700	3,303	5,500	500	25,397
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  27 %)

○ 2014. 04 : 실시설계용역 완료

○ 2016. 11 : 중기지방재정계획 반영

○ 2017. 03 : 중앙 투자심사 반영

○ 2019. 04 : 공사착공(1차분L=658m)

□ 향후계획

○ 2019. 08~ : 토지보상협의 시행

○ 도로개설공사 L=2.1km, B=20m

□ 사업변경 내역(해당시)

○

사업명

포항 철강관리공단(1,2,3) 완충저류시설 설치사업

담당자

환경정책과 이홍근(☎270-3113)

□ 사업목적 및 필요성

○ 포항철강산단 내 유독물 유출 등 수질오염 사고 시 오염물질 차단으로 형산강       오염 예방 기능

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2021

○ 위 치 : 포항시 남구 송내동 604-5번지 일원

○ 규 모 : 완충저류시설 (밀폐형 V=2,000㎥, 비점오염저감시설  V=47,500㎥)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 36,848백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	36,848		6,729	3,976	26,143
국 비	25,794		4,710	2,783	18,301
시 도 비	3,316		606	358	2,352
시군구비	7,738		1,413	835	5,490
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2018. 10월 기본 및 실시설계 용역 완료

○ 2019.  3월 공사착공

□ 향후계획

○ 2021. 12월 : 공사준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

구무천 생태하천복원사업

담당자

환경정책과 이홍근(☎270-3113)

□ 사업목적 및 필요성

○ 중금속으로 오염된 구무천 및 공단천을 생태하천으로 복원하여 수생태계       건강성 확보하고자함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2021

○ 위 치 : 포항시 남구 괴동동, 장흥동 일원

○ 규 모 : 생태하천 조성 L=7.5㎞, 오염토 제거 69,500㎥

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	20,000			5,500	14,500
국 비	10,000			2,200	7,800
시 도 비	3,000			660	2,340
시군구비	7,000			2,640	4,360
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 기본 및 실시설계 용역 중(2018. 12 ~ 2019. 11)

□ 향후계획

○ 2020.  2월 : 공사착공

○ 2021. 12월 : 공사준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

차량구입지원(시내버스 노선개편)

담당자

대중교통과 김정위(☎270-3773)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다양한 교통여건 변화에 민간중심 대중교통체계의 즉각적인 대응 한계

○ 시민들의 다양한 요구 반영과 대중교통 소외지역 주민들의 이동권 확보 등 시내버스 노선개편에 따라 증차되는 차량 구입지원

○ 친환경 차량도입을 통한 대기환경 개선 및 친환경도시 구현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 1월 ~ 2019년 6월

○ 위 치 : 포항시 시내버스 노선

○ 규 모 : 57대(대형 32대, 중형 25대)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	13,500			13,500
국 비	3,400			3,400
시 도 비	400			400
시군구비	9,200			9,200
지 방 채
민간자본	500			500
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 전기버스(중형) 국내제작사의 차량제작 및 환경부 인증 지연

○ 국내 제작사의 환경부 인증 결과에 따라 차량도입 절차 진행

□ 향후계획

○ 전기버스(중형) 국내 제작사 차량인증 결과에 따라 차종선정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 : (당초) 2019. 1 ~ 6        (변경) 2020. 5 ~ 8

○ 도입대수 : (당초) 57대(대형 32, 중형 25)  (변경) 40대(대형 22, 중형 18)

사업명

포항시 북구 치매안심센터 설치

담당자

건강관리과 이동순(☎270-4174)

□ 사업목적 및 필요성

○ 치매국가책임제 시행에 따른 치매안심센터 설치로 치매 고위험군 시기부

터 확진 이후 전체 돌봄 치료 및 가족지원의 치매통합관리 서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 :  2017. 12 ~ 2019. 12

○ 위 치 : 포항시 북구보건소(건강증진센터 철거 후 신축)

○ 규 모 : 1,256㎡(지상 3층)

- 통합건강증진센터, 치매카페, 강당, 사무실, 치매예방프로그램실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,265백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,265	10	221	3,034
국 비	1,128	8	177	943
시 도 비	84.6	0.6	13	71
시군구비	2,052.4	1.4	31	2,020
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  45%)

○ 2018. 12월 : 설계용역 완료 및 공사 착공

○ 2019.  6월 : 치매안심센터 골조공사 완료

□ 향후계획

○ 2019. 11월 : 건물 외장작업 및 실내 수장공사 완료

○ 2019. 12월 : 치매안심센터 준공 예정

□ 사업변경 내역

○  총사업비 변경

- 당초: 2,200백만원   변경: 3,265백만원

→ 지진발생에 따른 보건소내 위치 변경 : 건강증진센터 철거 후 신축으로 인함

- 11.15 지진 발생에 따른 신축 위치 변경 : 예산법무과-3004(2018.4.23.)호

→ 제248회 포항시의회 본회의 의결

10-2. 지방채 발행사업

우리 포항시에서 ‘18년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
영일만4일반산업단지 곡강IC연결도로 개설공사	10,000	10,000					10,000	42
포항공항 완충지역 공원화사업	3,000	3,000					3,000	70

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2018년에 추진한 사업

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

영일만4일반산업단지 곡강IC연결도로

개설공사

담당자

도시계획과 송하동(☎270-3813)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영일만4일반산업단지 진입도로와 영일만대로간의 미개설 구간을 연결하는 사업으로, 장량동과 인근지역의 출‧퇴근 교통난의 근본적인 해결을 위해 주거밀집지역과 영일만대로를 연결하는 도로개설 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 2. 1. ~ 2020. 2. 5.

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 곡강리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=780.0m, B=30.0m / L=200.0m, B=20.0m

교차로(곡강IC) 설치 1개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계
지 방 채	10,000		4,700	5,300
국 비
시 도 비	11,800	4,000			7,800
시군구비
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 42%)

○ 토공작업 진행중(44.2%)

○ 보상지연으로 인한 공사 중지

□ 향후계획

○ 중지해제에 따라 준공일 변경가능

※ 당초계획 : 2019년 12월 준공(곡강ic 연결도로 개설공사 1차분)

2020년 02월 준공(곡강ic 연결도로 개설공사 2차분)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 변경

- 1차분 : 2018. 02. 06. ~ 2019. 08. 05.(중지 : 19.07.31)

2차분 : 2019. 01. 28. ~ 2020. 02. 05.(중지 : 19.07.31)

사업명

포항공항 완충지역 공원화사업

담당자

그린웨이추진단 김호흥(☎270-5594)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공항 확장 관련 지역주민 고충, 피해 해소 및 공항소음 완충효과

○ 친환경 녹색도시 이미지 제고 및 지역주민 주거·학습환경 개선 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 7. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 포항시 남구 동해면 도구리 529-89번지 일원

○ 규 모 : 공원조성 1식(A=6,786㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	7,400	1,800	2,420	3,180
지 방 채	3,000		1,820	1,180
국 비
시 도 비
시군구비	2,400	1,800	600
기 타	2,000			2,000

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ ‘17. 03. : 공원조성 사업비 지원결정(포스코, 20억원)

○ ‘17. 03. 17. : 지방재정 투자사업 심사 완료

○ ‘17. 06. 08. : 지역주민 설명회 개최

○ ‘17. 06. ~ 12. : 기본 및 실시설계 용역 시행

○ ‘17. 07. ~ 08. : 토지 및 지장물 감정평가

○ ‘17. 09. ~ : 토지 및 지장물 보상협의

- 사유지 : 29필지 중 26필지 보상완료(미보상 3필지, 소유주 1명)

- 국유지 : 7필지 보상협의 중(한국자산관리공사 포항지사)

- 지장물 : 가옥철거 23동 중 21동 철거완료(미철거 2동 보상협의중)

○ ‘18. 03. 30. : 지방재정 투자사업 심사완료(경상북도)

○ ‘19. 07. 15. : 공원조성사업 착공(포스코 발주 20억원)

□ 향후계획

○ 토지 및 지장물 보상 지속추진

○ 2019. 11. 30일까지 공원조성사업 완료예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 현재까지 해당없음.

10-3. 민간투자사업

우리 포항시에서 ‘18년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2018년	2019년	2020년 이후
BTL	07 BTL사업	포항맑은물㈜	159,109	51,264	13,826	13,062	204,166	14.04 ~34.04
	09 BTL사업	포항맑은물길㈜	80,821	24,888	7,130	6,870	107,135	14.07 ~34.06
	10 BTL사업	청정포항(주)	89,821	12,441	7,119	7,148	119,984	16.04 ~36.03
	13 BTL사업	포항새물길(주)	64,312	-	1,458	4,767	98,741	18.10 ~38.09
BTO	가연성폐기물전처리시설 설치사업	포항이앤이	38,268	4,844	11,664	6,140	-	16.6.24~ ~19.1.18
	고형연료제품 전용보일러 설치사업	포항이앤이	117,664	32,018	15,792	340	-	16.6.24~ ~19.1.18

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2018년까지는 집행액(결산기준), 2019년 이후는 추정액

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

사업명

’07년 포항시 하수관거정비

임대형 민자사업(BTL)

담당자

하수도과 이의준(☎270-5424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 재원조달의 한계로 장기간 소요되는 하수관거정비사업을 민간의

자본을 활용하여 정비함으로써 하수처리장 운영효율 증대

□ 사업개요

○ 기    간 : 14. 04 ~ 34. 04

○ 위    치 : 중앙, 용흥, 양학, 대이, 송도, 죽도동 일원

○ 민간사업자 : 포항맑은물(주)

○ 총사업비 : 159,109백만원

○ 사업규모 : 하수관로정비 L=101km

□ 재정부담 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	282,318	51,264	13,826	13,062	204,166
국 비	178,934	33,255	8,947	8,370	128,362
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	103,384	18,009	4,879	4,692	75,804
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 택 1)

○ 운영 중

사업명

’09년 포항시 하수관거정비

임대형 민자사업(BTL)

담당자

하수도과 이의준(☎270-5424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 재원조달의 한계로 장기간 소요되는 하수관거정비사업을 민간의

자본을 활용하여 정비함으로써 하수처리장 운영효율 증대

□ 사업개요

○ 기    간 : 14. 07 ~ 34. 06

○ 위    치 : 중앙, 용흥, 대이동 일원

○ 민간사업자 : 포항맑은물길(주)

○ 총사업비 : 80,821백만원

○ 사업규모 : 하수관로정비 L=39km

□ 재정부담 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	146,023	24,888	7,130	6,870	107,135
국 비	89,396	15,645	4,470	4,269	65,012
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	56,627	9,243	2,660	2,601	42,123
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 택 1)

○ 운영 중

사업명

’10년 포항시 하수관거정비

임대형 민자사업(BTL)

담당자

하수도과 이의준(☎270-5424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 재원조달의 한계로 장기간 소요되는 하수관거정비사업을 민간의

자본을 활용하여 정비함으로써 하수처리장 운영효율 증대

□ 사업개요

○ 기    간 : 16. 04 ~ 36. 03

○ 위    치 : 상대, 해도, 죽도동 일원

○ 민간사업자 : 청정포항(주)

○ 총사업비 : 89,821백만원

○ 사업규모 : 하수관로정비 L=40km

□ 재정부담 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	146,692	12,441	7,119	7,148	119,984
국 비	90,283	7,900	4,514	4,514	73,355
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	56,409	4,541	2,605	2,634	46,629
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 택 1)

○ 운영 중

사업명

’13년 포항시 하수관거정비

임대형 민자사업(BTL)

담당자

하수도과 이의준(☎270-5424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 재원조달의 한계로 장기간 소요되는 하수관거정비사업을 민간의

자본을 활용하여 정비함으로써 하수처리장 운영효율 증대

□ 사업개요

○ 기    간 : 18. 10 ~ 38. 09

○ 위    치 : 상대, 해도, 효곡(유강)동 일원

○ 민간사업자 : 포항새물길(주)

○ 총사업비 : 159,109백만원

○ 사업규모 : 하수관로정비 L=53km

□ 재정부담 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	104,966	-	1,458	4,767	98,741
국 비	60,367	-	900	2,856	56,611
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	44,629	-	588	1,911	42,130
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 택 1)

○ 운영 중

사업명

가연성폐기물전처리시설 설치사업

담당자

자원순환과 황의호(☎270-3165)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활폐기물의 장기적 안정적 처리로 매립장 사용기간 연장

○ 버려지는 폐기물로부터 가용에너지를 회수하여 녹색성장 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2016.6.24.~2019.1.18.

○ 위    치 : 남구 호동 39-3번지 일원

○ 민간사업자 : 포항이앤이

○ 총사업비 : 38,268백만원

○ 사업규모 : 가연성폐기물 전처리시설 500톤/일

□ 재정부담 현황

○ 지금까지 재정부담액 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	38,268	13,708	18,420	6,140	-
국 비	16,258	4,844	11,414	-	-
시 도 비	1,350	-	250	1,100	-
시군구비	5,040	-	-	5,040	-
기 타	15,620	8,864	6,756	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 택 1)

○ 운영 중

□ 향후계획(해당없음)

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

고형연료제품 전용보일러 설치사업

담당자

자원순환과 황의호(☎270-3165)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활폐기물의 장기적 안정적 처리로 매립장 사용기간 연장

○ 버려지는 폐기물로부터 가용에너지를 회수하여 녹색성장 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2016.6.24.~2019.1.18.

○ 위    치 : 남구 호동 39-3번지 일원

○ 민간사업자 : 포항이앤이

○ 총사업비 : 117,664백만원

○ 사업규모 : 전용보일러시설 270톤/일

□ 재정부담 현황

○ 지금까지 재정부담액 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	117,664	72,816	44,508	340	-
국 비	47,810	32,018	15,792	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	340	-	-	340	-
기 타	69,514	40,798	28,716	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 택 1)

○ 운영 중

□ 향후계획(해당없음)

□ 사업변경 내역(해당없음)