109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 포항시에서 ‘19년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후
오천 원동11 근린공원 리모델링	2,100	100	-	2,000	-	2021	2019	공사시행중(15%)
상도근린 공원 조성	15,500	1,500	1,000	1,500	11,500	2026	2017	토지보상중(34%)
포항대흥초 다목적강당 및 급식소 증축	4,600	-	916	-	-	2019	2018	100%
포항장흥초 다목적강당증축	2,730	-	546	-	-	2020	2018	100%
첨단기술사업화센터 구축사업	16,000	2,600	500	7,200	5,700	2021	2018	10%
바이오오픈이노베이션센터구축	27,200	9,000	2,000	15,300	900	2020	2018	30%
수산자원(대문어) 산란·서식장 조성사업	10,000	-	2,000	2,000	6,000	2023	2019	40%
신창2리 어촌뉴딜300사업	12,865	-	4,503	5,789	2,573	2021	2019	15%
중소유통 공동도매 물류센터 건립	2,232	346	1,886	-	-	2019	2016	100%
구룡포시장 아케이드 설치공사	4,600	3,537	1,063	-	-	2019	2018	100%
포항중앙상가 야시장 조성사업	1,000	-	1,000	-	-	2019	2018	100%
죽도시장 농산물거리 아케이드 건립공사	2,800	-	-	2,800	-	2020	2017	10%
오천삼광시장 아케이드 설치공사	1,500	-	316	1,184	-	2020	2018	70%
죽도시장 공영주차장 조성공사	17,100	7,470	1,542	2,000	6,088	2021	2018	50%
흥해시장 공영주차장 조성공사	12,500	-	-	12,500	-	2020	2019	5%
흥해시장 장옥 개축	8,900	4,600	-	1,666	2,634	2021	2012	55%
해양기술시험 평가원 건립	3,700	-	700	1,500	1,500	2021	2019	15%
용한 서퍼비치 조성사업	2,000	-	-	400	1,600	2021	2019	10%
장기 신창리 해수욕장 조성	2,400	-	200	1,100	1,100	2021	2019	30%
포항시북구 치매 안심센터 설치	3,265	220	3,000	-	-	2019	2017	100%
동해~흥환리 도로 (시도1호) 확포장	15,400	9,200	1,100	700	4,400	2024	2017	10%
신광~흥해 매산리간 (시도7호) 확포장	21,200	7,900	2,000	2,000	9,300	2020	2017	44%
형산가 수변 친수레저파크조성	6,000	600	1,697	3,703	-	2020	2017	99%
국민안전로봇 프로젝드	67,100	42,084	13,883	6,757	4,425	2022	2017	67%
수출주력형 에너지강관산업 경쟁력 강화 기반구축	20,428	8,995	4,575	3,818	3,040	2021	2017	66%
친환경 생태 테마랜드 조성	12,000	-	-	400	11,600	2022	2017	2%
포항 장애인형 국민체육센터 건립	18,500	5,000	3,000	-	10,500	2021	2019	43%
화물자동차 공영차고지 조성	24,500	-	500	6,000	18,000	2021	2019	10%
세포막단백질연구소건립사업	45,800	12,250	12,250	16,311	17,239	2023	2019	27%
포항송도 국민체육센터 건립	11,500	-	4,000	600	6,900	2021	2019	34%
동해면민운동장 시설 확충사업	9,000	-	2,500	4,800	1,700	2021	2019	27%
구무천 생태하천 복원사업	20,000	-	398	1,800	12,700	2021	2018	10%
청림동 도시계획도로 (중1-24)개설	13,000	4,200	500	300	8,000	2022	2018	40%
포항 철강관리공단(1,2,3)완충저류시설 설치사업	43,200	1,420	6,169	3,328	29,167	2021	2018	36%
호동2매립장 순환이용 정비사업	37,100	-	3,000	2,000	32,151	2022	2018	8%
형산강 마리나 계류장 조성사업	10,000	-	240	2,040	7,720	2021	2018	10%
포항지식산업센터 건립	25,000	59	5,529	16,098	3,314	2020	2017	22%
포항테크노파크 제5벤처동 건립사업	12,300	4,300	8,000	-	-	2019	2017	100%
농업인교육복지관 건립	4,664	240	4,424	-	-	2019	2016	100%
형산 신부조장터 공원 및 뱃길 복원	9,000	3,800	2,000	3,200	-	2020	2016	70%
포항문화예술회관 시설개선	6,000	1,000	3,000	2,000	-	2020	2016	99%

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2019년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

오천 원동11근린공원 리모델링

담당자

공원과 박가혜

(☎270-3225)

□ 사업목적 및 필요성

○ 근린공원 재정비를 통하여 아름답고 쾌적한 공원으로 재조성하여 지역주민들에게 실용적인 여가 문화생활 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 4월 ~ 2021. 2월

○ 위 치 : 포항시 남구 오천읍 원리 979번지 일원

○ 규 모 : 공원리모델링 1식(A=10,104㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,100	100	-	2,000	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,100	100	-	2,000	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공정률 15%)

○ 2018. 04. 25. : 기본계획 및 실시설계 용역 착수

◦ 2018. 08. 07. : 주민설명회

◦ 2018. 09 ~ 12월 : 공원·경관 공동위원회 심의(2회)

◦ 2019. 01. 28. : 기본계획 수립 및 실시설계 완료

◦ 2019. 09. 02. : 공원조성계획변경

◦ 2020. 02월 : 총괄공사 및 1차분 공사 계약

□ 향후계획

○ 2020. 2 ~ 2021. 2 : 공사추진

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

상도근린공원 조성

담당자

공원과 박가혜

(☎270-3225)

□ 사업목적 및 필요성

○ 형산강과 연계한 자연이 살아 숨 쉬는 녹색생태공원 조성으로 도심지 녹색네트워크를 형성하고 시민들에게 실용적인 여가 문화생활 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2026

○ 위 치 : 포항시 남구 상도동 175-1번지 일원

○ 규 모 : 공원조성 A=49,605㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	15,500	1,500	1,000	1,500	11,500
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	15,500	1,500	1,000	1,500	11,500
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 토지보상 34%)

◦ 2006. 1. : 공원결정고시(경북고시 제2006-24호)

◦ 2006. 11 : 뱃머리마을사업(평생학습원)으로 공원부지 일부보상

- 5필지 5,631㎡, 12억원

◦ 2016 ~ 2019  : 9필지(A=4,782㎡) 토지보상(13억원) 완료

◦ 2020 현재 : 6필지(A=5,678㎡) 토지보상(14.4억원) 완료

2필지(A=282㎡) 토지보상(2천8백만원) 협의중

※ 총 보상대상〔106필지, 49,605㎡〕중 보상완료 34%〔20필지, 16,091㎡〕

잔여보상대상〔86필지, 33,514㎡, 85억원〕

□ 향후계획

○ 2021 ~ 2024 : 토지보상 시행

○ 2025 ~ 2026 : 공원조성 시행

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

포항대흥초 다목적강당 및 급식소 증축

담당자

교육청소년과 김나영

(☎270-3063)

□ 사업목적 및 필요성

○ 학생들 교육활동공간 확보를 통한 교육환경개선 및 지역주민의 문화・체육       공간활용, 학교 급식환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1. ~ 2019. 10.

○ 위 치 : 포항시 북구 용흥로 292번길 33 대흥초등학교

○ 규 모 : 1,607㎡(1층 급식소 759㎡, 2층 다목적강당 848㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,600		916	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	916	-	916	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	3,684	-	3,684	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 2018. 2. 설계용역 착수

○ 2018. 7. 설계용역 완료

○ 2018. 10. 공사착공

○ 2019. 10. 공사준공

□ 향후계획

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

포항장흥초 다목적강당 증축

담당자

교육청소년과 김나영

(☎270-3063)

□ 사업목적 및 필요성

○ 학생들 교육활동공간 확보를 통한 교육환경개선 및 지역주민의 문화・체육       공간활용, 학교 급식환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 9. ~ 2020. 3.

○ 위 치 : 포항시 북구 양덕남로 11 포항장흥초등학교

○ 규 모 : 822.5㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,730백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2019년	2020년 이후
계	2,730	-	546	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	546	-	546	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	2,184	-	2,184	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 2018. 9. 설계용역 착수

○ 2019. 3. 설계용역 완료

○ 2019. 5. 공사착공

○ 2020. 3. 공사준공

□ 향후계획

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

첨단기술사업화센터 구축사업

담당자

미래전략산업과 박준철

(☎270-2423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 선진국형 산업구조로 진입하여 단순 제조업 중심의 산업육성 한계 봉착

- 4차 산업혁명 및 새로운 산업 패러다임에 적극적으로 대응하기 위하여

첨단기술사업화 지원 기반 마련 필요

□ 사업개요

○ 기   간 : 2017 ~ 2020

○ 위   치 : 포항시 남구 지곡동 산 183번지

○ 규   모 : 연면적 7,271㎡(지하1층/지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	16,000	2,600	500	7,200	5,700
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	3,600	0	150	1,740	1,710
시군구비	8,400	0	350	4,060	3,990
민간자본	4,000	2,600	0	1,400	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2018. 03. : 지방재정투자사업 심사 승인

○ 2019. 03. : 첨단기술사업화센터 실시설계 완료

□ 향후계획

○ 2019.  9 : 첨단기술사업화센터 착공

○ 2020. 10 : 첨단기술사업화센터 준공

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

바이오오픈이노베이션센터 구축

담당자

미래전략산업과 박준철

(☎270-2423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 新산업 창출을 위한 원천기술 개발과 기업유치를 위한 플랫폼 구축을 위하여「바이오 오픈-이노베이션 센터」를 구축

□ 사업개요

○ 기   간 : 2016 ~ 2019

○ 위   치 : 포항시 남구 지곡동 166-20

○ 규   모 : 연면적 10,576㎡(지하1층/지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 27,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	27,200	9,000	2,000	15,300	900
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	4,700	3,250	1,000	0	450
시군구비	4,700	3,250	1,000	0	450
민간자본	17,800	2,500	0	15,300	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2016. 12. 15. BOIC 건립안 승인

○ 2018. 05. 15. 설계용역사, 기본설계 완료보고

○ 2019. 02.  BOIC 착공식(‘19. 12월 준공 예정)

□ 향후계획

○ 2020.  바이오오픈이노베이션센터 준공 및 제약·바이오기업 입주

□ 사업변경 내역

○ 당초 생명공학연구센터를 증축하는 것으로 계획하였으나, 바이오기업

입주수요 증가로 신축으로 변경

구분	당초	변경
사업기간	2016~2017	2016~2019
총사업비	95억원	272억원
규 모	4,400㎡증축	10,579㎡신축

사업명

수산자원(대문어)산란·서식장

조성사업

담당자

수산진흥과 김재선

(☎270-2740)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수산자원(대문어)의 산란‧서식장 조성을 통한 재생산성 향상 및 어업인 소득증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2023. 12. (5년)

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 칠포1리 ~ 청하면 이가리 지선

○ 규 모 : 대문어 산란·서식장 조성 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	10,000	-	2,000	2,000	6,000
국 비	5,000	-	1,000	1,000	3,000
시 도 비	1,500	-	300	300	900
시군구비	3,500	-	700	700	2,100
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2019. 1. : 1년차 위‧수탁 협약체결(한국수산자원관리공단)

○ 2019. 1. ~ 4. : 적지조사 및 기본계획 수립

○ 2019. 2. ~ 7. : 자원조사 등 경제성 분석(제주대학교)

○ 2019. 8. ~ 2020. 3. : 산란조성용 어초선정 및 계약 등 사업 추진

- 인공어초 및 잠입용 구조물 제작 668개 설치

○ 2020. 1. : 2년차 위‧수탁 협약체결(한국수산자원관리공단)

○ 2020. 2. : 인공어초 3배수 추천위원회 개최

○ 2020. 4. : 인공어초(6종) 및 잠입용 구조물 계약, 어미 대문어 매입 방류

□ 향후계획

○ 2021 ~ 2023 : 어류서식환경 조성, 생태환경 개선, 대문어 산란·서식장 조성, 효과분석 등 추진

사업명

신창2리 어촌뉴딜300사업

담당자

수산진흥과 시설6 김보연

(☎270-2762)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어촌이 보유한 핵심자원을 활용하여 차별화된 콘텐츠를 발굴하고 어촌•어항 통합재생을 통하여 사업효과 극대화 도모

□ 사업개요

○ 기    간 : 2019년 ~ 2021년(3년간)

○ 위    치 : 포항시 남구 장기면 신창2리항 일원

○ 규    모 : 어촌•어항 통합재생사업 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,865백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	12,865	-	4,503	5,789	2,573
국 비	9,006	-	3,152	4,052	1,802
시 도 비	1,158	-	406	521	231
시군구비	2,701	-	945	1,216	540
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   15%)

○ 2019. 08. 사업계획 고시

○ 2019. 09. 1단계 공사발주 및 착공

○ 2020. 05. 2단계 공사발주 및 착공

□ 향후계획

○ 2020. 06. 1단계(해양생태놀이터) 사업 준공

○ 2020. 12. 2단계(생활문화관, 해안풍경길 등) 사업 준공

○ 2021. 12. 돌미역 유통센터 준공

□ 기대효과

○ 어항의 인프라 확충•정비 및 배후 어촌마을 생활서비스 개선을 통한 어업인의 삶의 질 향상과 6차 산업화를 통한 사업다각화와 부가가치 제고

사업명

중소유통공동도매물류센터건립

담당자

일자리경제노동과

김덕진(☎270-2434)

□ 사업목적 및 필요성

○ 유통·물류기능 공동화 및 효율화를 통한 중소유통업체 경쟁력 확보

○ 포항의 대규모 수요대처필요성과 경북동남권지역 물류를 지원할 수 있는 물류센터 건설 시급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2019년

○ 위 치 : 포항시 남구 대도동 360-7(現 포항시슈퍼마켓협동조합)

○ 규 모 : 부지 4,912㎡, 건축면적 858㎡, 연면적 1,188㎡(지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,232백만원 (지특 1,340, 시비 548, 자부담 344)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,232	346	1,886	-	-
국 비	1,340	2	1,338	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	548	-	548	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	344	344	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2016. 5. 25. : 경상북도 투자심사

○ 2017. 12. : 공유재산 관리계획 등 행정절차 완료

○ 2018.  4. : 기본 및 실시설계

○ 2018.  6. : 공사착공

○ 2019. 12. : 공사완료 및 물류센터 개장

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

구룡포시장 아케이드 설치공사

담당자

일자리경제노동과

김휘웅(☎270-2437)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전통시장 기반시설 및 편의시설 확충을 위한 시설환경개선

○ 전통시장의 외적 이미지 제고와 이용객 편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1. ~ 2019. 5.

○ 위 치 : 남구 구룡포읍 구룡포시장 일원

○ 규 모 : 아케이드(L=410m, B=6m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 46억원 (지특 20.13, 특교 5, 시 18.74, 자부담 2.13)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,600	3,537	1,063	-	-
국 비	2,513	2,128	385	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,874	1,277	597	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	213	132	81	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2015.    : 1차 공사 완료

○ 2016.    : 2차 공사 완료

○ 2018. 5.  : 3차 공사 완료

○ 2018. 8. : 4차 공사 착공

○ 2019. 5. : 사업완료

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

포항중앙상가야시장조성사업

담당자

일자리경제노동과

김덕진(☎270-2434)

□ 사업목적 및 필요성

○ 침체된 포항 구도심을 살리고 시민과 함께 할 수 있는 상권 활성화 기여

○ 지진피해로 신음하고 있는 시민들과 지역경제의 활력 제고 기대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 12. ~ 2019. 6.

○ 위 치 : 포항시 북구 중앙상가길 31 일원(육거리~북포항우체국)

○ 규 모 : 야시장 조성사업 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10억원(특교 5, 도비 1, 시비 4)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	1,000	-	1,000	-	-
국 비	500	-	500	-	-
시 도 비	100	-	100	-	-
시군구비	400	-	400	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018. 1. 19. : 행정안전부 야시장 공모사업 응모(중앙상가 상인회)

○ 2018. 3. 13. : 야시장 공모사업 선정

○ 2018. 5.~12. : 중앙상가 상인 설명회 및 기본계획수립 용역 시행

○ 2019. 3. : 야시장 조성(시설물 설치, 매대운영자 모집 등)

○ 2019. 7. : 사업 완료

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

죽도시장농산물거리

아케이드건립공사

담당자

일자리경제노동과

김휘웅(☎270-2437)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전통시장 기반시설 및 편의시설 확충을 위한 시설환경개선

○ 동해안 최대규모의 죽도시장 관광객에게 외적 이미지 제고와 편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 3. ~ 2020. 11.

○ 위 치 : 북구 죽도동 죽도시장 농산물거리 내

○ 규 모 : 아케이드 건립(L=220m, B=10m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,800백만원(국비 1,680, 시비 1,120, 자부담 14)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,800			2,800
국 비	1,680			1,680
시 도 비
시군구비	1,120			1,120
지 방 채
민간자본
기 타	14			14

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2018. 10. 26. : 전통시장 시설현대화사업 신청

○  2019. 1.  3. : 전통시장 시설현대화사업 선정

○ 2019.  9.   : 설계용역 실시

○ 2020. 5. 4. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2020.  8. : 철골공사 및 외부마감공사

○ 2020. 11. : 공사 준공

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

오천삼광시장아케이드설치공사

담당자

일자리경제노동과

김휘웅(☎270-2437)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전통시장 기반시설 및 편의시설 확충을 위한 시설환경개선

○ 전통시장의 외적 이미지 제고와 이용객 편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1. ~2020. 9.

○ 위 치 : 남구 오천읍 오천삼광시장 내(구정리 34-5)

○ 규 모 : 아케이드 설치(L=105m, B=5~8m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15억원(균특 9, 시비 5.25, 자부담 0.75)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	1,500		316	1,184
국 비	900		200	700
시 도 비
시군구비	525		116	409
지 방 채
민간자본
기 타	75			75

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2017. 2. : 전통시장 시설현대화사업 신청

○ 2019. 1. : 전통시장 시설현대화사업 선정

○ 2018. 5. ~ 2019. 7. : 설계용역 시행

○ 2019. 5. : 공사계약 원가 심사

○ 2019. 10. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2020. 9. 공사 준공

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

죽도시장 공영주차장 조성공사

담당자

일자리경제노동과

김휘웅(☎270-2437)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동해안 최대 전통시장인 죽도시장 이미지 제고 및 전통시장 활성화

○ 공영주차장 조성으로 이용객 편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 9. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 포항시 북구 죽도동 579-1외 5필지

○ 규 모 : 타워주차시설 건립(승용차 350면), 부지면적 2,804㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  171억원(국 102.6, 시 68.4)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	17,100	7,470	1,542	2,000	6,088
국 비	10,515	4,478	984	1,400	3,653
시 도 비
시군구비	6,585	2,992	558	600	2,435
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2018.  4. : 중기부 공모사업(주차환경개선사업) 선정

○ 2018.  7. : 공유재산 관리계획 심의

○ 2018.  9. : 중기지방 재정계획

○ 2019. 12. : 사유지 보상 완료

□ 향후계획

○ 2020.  6. : 설계발주 및 행정절차 진행

○ 2020. 12. : 공사발주 및 착공예정

○ 2021. 12. : 공사준공

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

흥해시장 공영주차장 조성공사

담당자

일자리경제노동과

김덕진(☎270-2434)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전통시장 기반시설 및 편의시설 확충으로

○ 2017년 포항 지진의 가장 큰 피해지역인 흥해 지역의 위축된 상권 회복

□ 사업개요

○ 기  간 :  2019. 1. ~ 2020. 12.

○ 위  치 : 포항시 북구 흥해읍 성내리 흥해시장 인근

○ 규 모 : 예정부지 6,804㎡, 주차면 240면 정도

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  125억원(국비 75, 시비 50)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	12,500			12,500
국 비	7,500			7,500
시 도 비
시군구비	5,000			5,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2019. 6.    : 지방재정 투자심사(조건부)

○ 2019. 9. 11. : 2019 전통시장 주차환경개선사업 공모 선정

○ 2019. 9. 19. : 국비 45억 확보

○ 2020. 3.    : 토지보상 및 실시설계 추진

□ 향후계획

○ 2020.  7.  : 실시설계 완료 및 공사 발주

○ 2020. 12. : 공사완료 및 흥해시장 공영주차장 운영

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

흥해시장 장옥개축

담당자

일자리경제노동과

김덕진(☎270-2434)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전통시장 기반시설 및 편의시설 확충을 위한 시설환경개선

○ 전통시장의 외적 이미지 제고와 이용객 편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 :  2014~ 2021

○ 위 치 : 북구 흥해읍 성내리 20-2번지외 33필지

○ 규 모 : 장옥 12개동 2,013㎡, 아케이드 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 88.5억(특 10, 균 42.5, 시 36)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	8,900	4,600		1,666	2,634
국 비	2,720	2,720
시 도 비	2,580			1,000	1,580
시군구비	3,600	1,880		666	1,054
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

○ 2009.  2. : 흥해시장 환경개선공사 설계용역 착공(공사비 20억)

○ 2012. 12. : 지방재정 투융자 심의

○ 2016.  5. : 1구간 공사 준공

○ 2019. 12. : 2구간 공사 준공

□ 향후계획

○ 2020.  8.  : 3~4구간 사업 실시설계 추진

○ 2021.  3.  : 3~4구간 사업 착공

○ 2021. 12.  : 3~4구간 사업 준공

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

해양기술시험평가원 건립

담당자

해양산업과 이지혜

(☎270-3693)

□ 사업목적 및 필요성

○국가 R&D 사업으로 추진 중인 「해양기술 실해역 시험평가 시스템」을 구축함 따라 시험평가선 운용인력의 상주 공간, 시스템 운영업무 등 실해역 시험평가시스템의 원활한 운영을 위한 다용도 건축물 건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 년  1 월 ～ 2021 년  12 월(3년)

○ 위 치 : 포항시 흥해읍 용한리 894-17(영일만3 일반산업단지 내)

○ 규 모 : 부지 2,950㎡, 건축 연면적 1,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,700		700	1,500	1,500
국 비
시 도 비	1,500			750	750
시군구비	2,200		700	750	750
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ ’18. 7. : 평가원 부지 위치선점 및 매입관련 협의

- 경북도, 포항시(도시계획과), 한국해양과학기술원

◦ ‘19. 9. : 중기지방재정계획 반영

◦ ‘19. 9. : 공유재산심의회 및 시의회 의결(공유재산관리계획)

□ 향후계획

◦ ‘20. ∼ ‘21. : 해양기술시험평가원 착공 및 준공 예정

사업명

용한 서퍼비치 조성사업

담당자

해양산업과 김혜림

(☎270-2464)

□ 사업목적 및 필요성

○서핑의 최적지로 알려진 용한리 해변에 서핑 기반시설 등을 설치하여 서퍼들의 불편을 해소하고 해양레저관광객을 유치하여 지역경제 활성화 및 해양스포츠 저변 확산에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 1월 ～ 2021년 12월 (2년)

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 용한리 해변 일원

○ 규 모 : 샤워장, 탈의실, 화장실 등 서핑 기반시설(지상1층, 연면적 330㎡)                및 홍보조형물, 전광판 설치, 데크바닥 및 쉼터 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,000			400	1,600
국 비	1,000			200	800
시 도 비	500			100	400
시군구비	500			100	400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2019년 포항시 중기지방재정계획 반영(2018. 11.)

◦ 타당성 및 기본구상 용역 발주(2019. 1.)

□ 향후계획

◦ 2020.  1. : 공유수면 부지사용 협의

◦ 2020.  4.∼6. : 건축기획 심의 및 지반조사 용역 실시

◦ 2020.  6.∼12. : 기본 및 실시설계

◦ 2021. 1. : 공사 실시

□ 사업변경 내역

◦ 사업규모 변경(지상2층, 500㎡미만)

사업명

장기 신창리 해수욕장 조성

담당자

해양산업과 정유리

(☎270-2845)

□ 사업목적 및 필요성

○장기 일출암 등 천혜의 관광자원인 장기면 신창리 자연발생 유원지를

해수욕장으로 지정하여 쾌적하고 편리한 해양휴양공간을 조성하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2021년(3년간)

○ 위 치 : 포항시 남구 장기면 신창리 177-31번지 일원

○ 규 모 : 관리사무실 1동 320㎡, 화장실/탈의실/샤워실 1동 114㎡)

및 해안산책로, 전망데크, 녹지조성 등 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,400		200	1,100	1,100
국 비
시 도 비
시군구비	2,400		200	1,100	1,100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

◦ 2018.09 : 해수욕장 지정 타당성 검토 용역

◦ 2019.08. : 실시설계용역 착수(2억원, 해수욕장 지정 포함)

□ 사업변경 내역

◦ 코로나19로 인하여 해수욕장 협의회 및 주민설명회 개최가 불가하므로

용역 추진이 어려워 중지 상태

사업명

포항시 북구 치매안심센터 설치

담당자

건강관리과 이은정

(☎270-4172)

□ 사업목적 및 필요성

○ 치매국가책임제 시행에 따른 치매안심센터 설치로 치매 고위험군 시기부터

확진 이후 전체 돌봄 치료 및 가족지원의 치매통합관리 서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 :  2017. 12 ~ 2019. 12

○ 위 치 : 포항시 북구보건소(건강증진센터 철거 후 신축)

○ 규 모 : 1,256㎡(지상 3층)

- 통합건강증진센터, 치매카페, 강당, 사무실, 치매예방프로그램실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,265백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,220	220	3,000	-	-
국 비	1,119	176	943	-	-
시 도 비	84	13	71	-	-
시군구비	2,017	31	1,986	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018. 12월 : 설계용역 완료 및 공사 착공

○ 2019.  6월 : 치매안심센터 골조공사 완료

○ 2019. 12월 : 치매안심센터 준공

□ 사업변경 내역

○  총사업비 변경

- 당초: 2,200백만원   변경: 3,265백만원

→ 지진발생에 따른 보건소내 위치 변경 : 건강증진센터 철거 후 신축으로 인함

- 11.15 지진 발생에 따른 신축 위치 변경 : 예산법무과-3004(2018.4.23.)호

→ 제248회 포항시의회 본회의 의결

사업명

동해 흥환리 도로(시도1호) 확포장

담당자

도로시설과 박기호

(☎270-3445)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로확포장으로 각종 안전사고 예방 및 지역주민 편의제공

○ 도시기반시설 확충으로 지역균형개발 및 숙원사업 해결

□ 사업개요

○ 기 간 : 1996. 01 ~ 2024. 12

○ 위 치 : 포항시 남구 동해면 흥환리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=20.4km, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	15,400	9,200	1,100	700	4,400
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	4,540	2,850	90	200	1,400
시군구비	10,860	6,350	1,010	500	3,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

◦ 2016. 12월 : 실시설계용역 완료(300백만원)

◦ 2017. 02월 : 중앙 투자심사 반영

◦ 2019. 11월 : 보상율 56%(300필지 중 170필지 보상완료)

◦ 2019. 11월 : 공사진도율 51%(총사업비 중 60% 집행)

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

신광～흥해 매산리간 도로

(시도7호) 확포장공사

담당자

도로시설과

이동영(☎270-3433)

□ 사업목적 및 필요성

○도로기반시설 확충으로 지역주민 교통소통 원활 및 주민생활편익 제공

○도로 급커브길의 위험구간을 도로확장으로 안전사고 사전예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010. 1~ 2024. 12

○ 위 치 : 포항시 북구 신광면 사정리 ~ 흥해읍 매산리

○ 규 모 : 도로 확포장 L=3.3km, B=17.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	21,200	7,900	2,000	2,000	9,300
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	100	100	-	-	-
시군구비	21,100	7,800	2,000	2,000	9,300
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공정율 44%)

○ 2019. 04. : 1차 공사 준공 (송화타운~보원사 L=0.5km)

○ 2019. 06. : 2차 공사 준공 (범촌 매운탕~낚시터 매운탕 L=0.48km)

○ 2020. 05. : 3차 공사 준공 (보원사~호리교 L=0.47km)

○ 2020. 06. : 4차 공사 시행 (회전로터리~SK주유소 L=0.67km)

□ 향후계획

○ 2021. 4 : 5차 공사 시행(SK주유소~호리로 L=0.6km)

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

형산강 수변 친수레저파크 조성

담당자

형산강사업과 김대원

(☎270-4882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 특색 있는 야외 물놀이장을 조성하여 시민에게 친수 여가공간 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 12. ∼ 2020. 8.

○ 위 치 : 남구 연일읍(형산강변)

○ 규 모 : 수변공원 A=4,600㎡, 물놀이시설 A=3,400㎡,
수처리 기계설비, 부대시설(화장실, 휴게쉼터 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	6,000	600	1,697	3,703	-
국 비	1,500	300	848	352	-
시 도 비	2,001	90	255	1,656	-
시군구비	2,499	210	594	1,695	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 99%)

○ 2018.  3.  기본계획 및 실시설계용역 시행

○ 2018. 12.  공사 착공

○ 2020.  7.  공사 준공 및 물놀이시설 운영준비 완료

○ 2020.  8.  시설 운영(포항시 시설관리공단 위탁)

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

국민안전로봇프로젝트

담당자

미래전략산업과 임종익

(☎270-3564)

□ 사업목적 및 필요성

○ 복합재난 현장에서 소방대원을 도와 초기 정찰 및 긴급대응작업을 수행

하는 로봇 개발과 실증센터 구축을 통한 재난의 대형화를 방지하여

인명·재산 피해 최소화

□ 사업개요

○ 기   간 : 2016년 7월 ~ 2022년 6월 (6년간)

○ 위   치 : 포항시 북구 영일만3 일반산업단지 內 (2019년 완공)

○ 규   모 : 재난대응로봇기술개발, 안전로봇실증센터 구축

※ 안전로봇실증센터 : 부지 19,800㎡ , 건축연면적 7,508㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 67,149백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	67,149	42,084	13,883	6,757	4,425
국 비	38,372	21,272	8,383	5,219	3,498
시 도 비	10,297	7,867	1,813	353	264
시군구비	10,297	7,867	1,813	353	264
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	8,183	5,078	1,874	832	399

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 67 %)

○ (R&D) 시제품 제작 및 시스템 통합검증/개선

○ (인프라) 실증시험시설 구축 및 장비 구축

□ 향후계획

○ (R&D) 시스템 통합검증/개선, 모듈 개선 및 안정화

○ (인프라) 장비 구축 및 실증시설 활용

사업명

수출주력형 에너지강관산업

경쟁력 강화 기반구축

담당자

미래전략산업과 강영욱

(☎270-3563)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 강관사 대다수가 중소기업임에 따라 고객사 대응체계가 미흡하여

수출포기 물량이 증가함에 따라 품질인증을 통한 제품 경쟁력 강화와

고부가가치 강관 생산능력 확보를 위한 시험·평가 기반구축 및 생산

기술지원 마련이 필요

□ 사업내용

○ 시험인증․평가센터 활성화 지원

- 시험평가 및 공정기술지원, 기업 지원체계 구축

○ 에너지강관 시험평가기반구축

- 강관기술센터 구축(물성평가 및 공정기술 지원동, 사무동, 부식시험동,

적치장) 및 장비구축(22종)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,428백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	20,428	8,995	4,575	3,818	3,040
국 비	10,000	3,110	2,240	2,550	2,100
시 도 비	3,128	2,392.5	300	296.5	139
시군구비	7,300	3,492.5	2,035	971.5	801
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황

○ 2019. 3월 : 강관기술센터 착공식

○ 2019. 12월 : 강관기술센터 준공 및 장비도입

□ 향후계획

○ 2021. 12월 : 장비도입 완료 및 물성 및 부식분야 KOLAS 인정획득

사업명

친환경 생태테마랜드 조성

담당자

형산강사업과 공철민

(☎270-4893)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자연생태를 테마로 한 공원 조성으로 시민의 쾌적한 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2023

○ 위 치 : 남구 연일읍 중명리(중명자연생태공원 內)

○ 규 모 : 테마랜드 18,370㎡(5,550평)
- 생태체험관, 환경지표숲, 유아숲, 생태소류지 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	12,000	-	-	400	11,600
국 비	6,000	-	-	200	5,800
시 도 비	1,800	-	-	60	1,740
시군구비	4,200	-	-	140	4,060
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

○ 2016.  6. : 친환경 생태테마랜드 조성계획 타당성용역

○ 2016. 11. : 포항시 중기지방재정계획 반영

○ 2017. 11. : 2017년 제4차 중앙투자심사 완료

○ 2018.  4. : 친환경 생태테마랜드 조성계획 관련부서 협의

○ 2019.  3. : 균형발전특별회계 예산 신청

○ 2019.  4. : 경상북도 문화환경위원회 도의원 방문 시 사업건의

○ 2019.  8. : 경상북도 예산담당관, 환경정책과 방문(20년 예산 확보)

○ 2020.  5. : 기본 및 실시설계 용역 착수(2020. 5. ∼ 2021. 2.)

□ 향후계획

○ 2020. 12. : 기본계획(안) 결정 및 고시(자연환경보전법 시행규칙 24조)

○ 2021.  2. : 계약원가심사(도 감사실)

○ 2021.  3. : 공사 착공(‘21.03∼‘22.12)

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

포항 장애인형 국민체육센터 건립

담당자

새마을체육과 윤현광   (☎270-2806)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장애인들이 불편함 없이 생활체육을 할 수 있는 공간을 마련하여 건전한 사회적

참여를 유도

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 8월 ~ 2021. 10월

○ 위 치 : 포항시 북구 여남동 267-1번지 일원

○ 규 모 : 체육센터 건립(지상 3층, 연면적 5,600㎥)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	18,500	5,000	3,000		10,500
국 비	5,000	5,000
시 도 비
시군구비	10,500				10,500
지 방 채	3,000		3,000
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  43%)

◦ 2017. 03월 : 지방재정 투자 심사(변경, 155억)

◦ 2017. 04월 : 국민체육진흥기금 지원사업 공모 선정

◦ 2018. 05월 : 건축설계 공모

◦ 2018. 08월 : 실시설계용역

◦ 2019. 02월 : 설계 경제성검토 용역(VE)

◦ 2019. 08월 : 건설기술심의 및 중앙투자심사

◦ 2019. 10월 : 실시설계용역 준공

◦ 2019. 12월 : 공사 착공

□ 향후계획

◦2021. 10월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역: 해당없음

사업명

화물자동차 공영차고지 조성

담당자

대중교통과(☎270-3672)

□ 사업목적 및 필요성

○도심 내 화물자동차의 불법 주 정차와 밤샘주차로 인한 주민 불편해소 및 교통안전사고를 예방하고 화물운수 종사자 근로여건 개선 및 화물운송 물류 산업 토대 구출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019.01.~2021.12.(변경 2019.01.~2020.12.)

○ 위 치 : 포항시 남구 대송면 제내리 540번지 일원

○ 규 모 : 60,235㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 24,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	24,500		500	6,000	18,000
국 비
시 도 비	7,650			500	7,150
시군구비	8,950		500	5,500	2,950
지 방 채
민간자본	7,900				7,900
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10%)

◦ 2018. 12. : 중기지방재정계획 반영

◦ 2018. 12. : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 완료

◦ 2019. 10. : 지방재정투자심사(중앙)의뢰 결정(조건부)

◦ 2019. 12. : 도시관리계획(화물자동차 공영차고지)결정(변경)용역 진행

□ 향후계획

◦ 2020. 11. : 제내저수지 사토작업실시

◦ 2020. 12. : 제내저수지 토목공사 실시

◦ 2021. 06 : 공영차고지 준공

◦ 2022. 12. : 공영차고지 완공

□ 사업변경 내역

○ 제내제수지 매입을 위한 대체시설 작업지연(사업기간 1년 연장)

사업명

세포막단백질연구소 건립

담당자

미래전략산업과 이송이

(☎ 270-3569)

□ 사업목적 및 필요성

○ 4세대방사광가속기기반 세포막단밸질 구조규명을 통해 신약개발로

국제적 경쟁력 확보

○ 글로벌 신약시장 주도권 확보를 위한 국가 차원의 세포막단백질 구조

분석 연구 및 기반 시설 건립 시급

□ 사업개요

○ 기    간 : 2019 ∼ 2021

○ 위    치 : 포항융합기술산업지구 I6B 2L

○ 건립규모 : 지하1층~ 지상3층(연면적 6,086㎡, 부지면적 7,512㎡)

○ 사 업 비 : 458억원(국비229, 도비106.5, 시비 122.5)

※토지매입비16억(시비 포함)

○ 주관기관 : 경상북도, 포항시, 포항생명공학연구센터

○ 주요내용 : 세포막단백질연구소 구축

- 연구장비(전액국비), 실험실, 연구실, 세미나실, 자료실, 사무공간 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 458억원

(단위 : 억원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년 이후
계	458	-	122.5	335.5
국 비	229	-	59.5	169.5
도 비	106.5	-	23.5	83
시 비	122.5	-	39.5	83

※ 향후 소요액 일부 변동 가능

□ 추진상황

○ 2019.  1.  공유재산관리계획 의결(부지매입)

○ 2019.  2.  세포막단백질연구소 사업추진단 출범식 및 상호협력(MOU)체결

○ 2019.  5.  가속기기반 신약개발 지원사업 공모 선정(포스텍)

○ 2019.  9.  기본계획 및 실시설계용역 시행

○ 2019. 12.  부지매입

□ 향후계획

○ 2021. 1.    공사 준공

사업명

송도동 국민체육센터 건립

담당자

새마을체육과 윤현광   (☎270-2806)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 내 주민들이 이용할 수 있는 수영장 및 체육관 등 체육인프라가 갖춰

있지 않아 생활체육 활성화를 통한 체육복지 증진을 위한 체육관 건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 5월 ~ 2022. 6월

○ 위 치 : 포항시 남구 송도동 254-614번지 일원

○ 규 모 : 체육관 수영장 및 공공청사 건립 (대지면적 A=9,270㎡, 연면적               A=3,984㎡, 지상 3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	11,500	-	4,000	600	6,900
국 비	3,000	-	1,000	600	1,400
시 도 비	500	-	-	-	500
시군구비	8,000	-	3,000	-	5,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  34%)

◦ 2019. 03월 : 생활체육시설 확충 지원사업(기금) 선정(문체부)

◦ 2019. 08월 : 도시관리계획 결정(변경) 용역

□ 향후계획

◦ 2019. 08월 ~ 2020. 06월 : 도시관리계획 결정(변경) 용역 완료

◦ 2020. 07월 ~ 2021. 03월 : 설계공모 및 실시설계용역

◦ 2021. 04월 ~ 2022. 06월 : 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역: 해당없음

사업명

동해면민운동장 시설 확충사업

담당자

새마을체육과 윤현광   (☎270-2806)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동해면은 시내와 공단이 인접하고 있어 인구 유동성이 많지만 실내체육관 등 체육인프라가 부족하여 지역주민들이 체육활동을 즐길 수 있는 시설확충이 시급함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 9월 ~ 2022. 6월

○ 위 치 : 포항시 남구 동해면 약전리 370-1번지 일원

○ 규 모 : 체육관 A=2,000㎡, 풋살구장 A=2,000㎡, 체육공원 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,000	-	2,500	4,800	1,700
국 비	2,340	-	-	1,500	840
시 도 비	500	-	-	300	200
시군구비	6,160	-	2,500	3,000	660
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  27%)

□ 향후계획

○ 2020. 01. ~ 2020. 02. : 지적 분할 및 지장물 조사

○ 2020. 03. ~ 2020. 06. : 토지매입

○ 2020. 07. ~ 2020. 03. : 설계공모 및 실시설계용역

○ 2020. 04. ~ 2020. 06. : 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역: 해당없음

사업명

구무천 생태하천복원사업

담당자

환경정책과 정병조

(☎270-3113)

□ 사업목적 및 필요성

○ 중금속으로 오염된 구무천 및 공단천을 생태하천으로 복원하여 수생태계       건강성 확보하고자함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2021

○ 위 치 : 포항시 남구 괴동동, 장흥동 일원

○ 규 모 : L=7.97㎞(구무천 4.63㎞, 공단1천 2.74㎞, 공단2천 0.6㎞)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	20,000	-	398	1,800	12,700
국 비	10,000	-	-	900	6,900
시 도 비	3,000	-	-	270	2,070
시군구비	7,000	-	398	630	3,730
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2018. 12월~  기본 및 실시설계 용역 중

□ 향후계획

○ 2020. 10월  공사착공

○ 2021. 12월  공사준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

청림동 도시계획도로(중1-24) 개설

담당자

도로시설과 김준수

(☎270-3443)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주변 토지 이용 증대로 공장유치 및 주거환경 개선

○ 공단지역 물동량 수송원활로 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 01 ~ 2022. 12

○ 위 치 : 포항시 남구 청림동 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=1.0km, B=20.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	13,000	4,200	500	300	8,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	350	200	150	-	-
시군구비	12,650	4,000	350	300	8,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

◦ 2015. 11월 : 포항시 자체 투자심사 반영

◦ 2016. 12월 : 실시설계용역 완료

◦ 2018. 12월 : 국방부 편입토지 협의(부동의)

◦ 2019. 04월 : 공사착공(L=500m, 국도31호선~행복주택 구간)

◦ 2020. 11월 : 공사진도율 40%

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

포항 철강관리공단(1,2,3)

완충저류시설 설치사업

담당자

환경정책과 정병조

(☎270-3113)

□ 사업목적 및 필요성

○ 포항철강산업단지 내 수질오염사고 및 화재 등으로 인한 오염수 및       초기 우수 유출수를 저류하여 형산강 수생태계 건강성 확보하고자함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2022

○ 위 치 : 남구 송내동 604-5번지 일원

○ 규 모 : 완충저류시설 V=2,000㎥,  비점오염저감시설 V=55,300㎥

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 43,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	43,200	1,420	6,169	3,328	29,167
국 비	30,240	994	4,318	2,330	20,417
시 도 비	3,888	298	555	299	2,624
시군구비	9,072	128	1,296	699	6,126
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 36%)

○ 2018. 10월 기본 및 실시설계 완료

○ 2019.  2월 공사착공

□ 향후계획

○ 2022. 12월 공사준공

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경
사업기간	2017. 1 ~ 2021. 12	2017. 1 ~ 2022. 2
사 업 비	44,600백만원(국 31,200, 도 4,500, 시 8,900)	43,200백만원(국 30,240, 도 3,888, 시 9,072)
사 업 량	완충저류시설 V=7,100㎥ 비점오염저감시설 V=47,500㎥	완충저류시설 V=2,000㎥ 비점오염저감시설 V=55,300㎥

사업명

호동2매립장 순환이용 정비사업

담당자

자원순환과 정재원

(☎270-4812)

□ 사업목적 및 필요성

○ 호동2매립장의 포화로 추가 매립용량 확보 시급

○ 기존 매립폐기물을 굴착․선별하여 매립용량을 확보하고, 선별된 폐기물은 SRF를 통해 에너지화(전기생산)

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2022

○ 위 치 : 포항시 남구 호동 산38번지 일원

○ 규 모 : 폐기물 굴착·선별·처리 791,455㎥

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 37,151백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	37,151	-	3,000	2,000	32,151
국 비	18,575	-	1,500	1,000	16,075
시 도 비	5,573	-	450	300	4,823
시군구비	13,003	-	1,050	700	11,253
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황

○ 2019. 5. 기본 및 실시설계 착수

○ 2020. 1. 굴착폐기물 선별․분리공법 심의위원회 개최 및 공법 선정

□ 향후계획

○ 2020. 9. 건설기술심의 신청

○ 2020.11. 공사계약 및 착공

○ 2020. ~ 2022. 매립폐기물 굴착·선별·처리 및 순환형매립지 조성

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

형산강 마리나 계류장 조성사업

담당자

형산강사업과 김대원

(☎270-4882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마리나 계류장을 조성하여 형산강 관광자원과 연계, 수상레포츠 중심의

레저문화공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 7. ∼ 2021. 3.

○ 위 치 : 남구 송도동(형산강변)

○ 규 모 : 부유식 방파제(L=90m), 수상계류장(60선석), 경관전망대,
진출입로 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	10,000	-	240	2,040	7,720
국 비	840	-	120	720	-
시 도 비	5,660	-	36	606	5,018
시군구비	3,500	-	84	714	2,702
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2019.  1.  기본 및 실시설계용역 시행

○ 2020.  5.  특정공법·기술자문 심의 및 원가심사

○ 2020.  7.  공사 착공

□ 향후계획

○ 2021.  2.  계류시설(콘크리트 폰툰) 설치

○ 2022. 12.  공사 준공 및 운영

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

포항 지식산업센터 건립

담당자

미래전략산업과 정현정

(☎ 270-3843)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시형 산업 유치로 입주기업 성장 지원 및 청년창업 지원 공간 구축

○ 도시형 중소 제조업에 대한 저렴한 입지 공간 제공으로 도시형 산업의 인큐베이팅 활성화로 산업구조 다변화 유도

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2020

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 일원(포항융합기술산업지구 內)

○ 규 모 : 연면적 13,300㎡(지하1층/지상6층), 부지 10,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	25,000	59	5,529	16,098	3,314
국 비	16,000	59	3,439	10,252	2,250
시 도 비	2,100	-	-	1,887	213
시군구비	6,900	-	2,090	3,959	851
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

※ 향후 소요액 일부 변동 가능

□ 추진상황

○ 2019. 12. : 공사 착공

○ 2020.  8. : 골조공사 중(공정율 20%)

□ 향후계획

○ 2020. 12. : 센터 준공(예정)

사업명

포항테크노파크 제5벤처동 건립

담당자

미래전략산업과 이유한

(☎270-2424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 글로벌기업의 생산거점 포항유치로 일자리 창출 및 SW융합클러스터 기반 구축

○ 첨단산업 생산기반 조성 및 협력체계 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1. ~ 2019. 7.

○ 위 치 : 포항시 남구 지곡로 394(포항테크노파크)

○ 규 모 : 지상5층(총30개 임대호실 및 각종 부대시설)

- 연 면 적 : 6077㎡(1,838평) / 건축면적 : 1,324㎡(400평)

- 대지면적 : 7,898㎡(2,390평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	12,300	4,300	8,000	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,000	2,000	3,000	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	7,300	2,300	5,000	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018. 4. : 기본실시설계 완료

○ 2018. 7. : 건축 착공

○ 2019. 10. : 제5벤처동 준공

□ 향후계획

○ SW/ICT, 바이오, 차세대에너지 생태계 조성을 위한 벤처기업 발굴 및 육성

○ 융합 선도기업 유치를 통한 기업의 연쇄 입주, 창업 확산 및 고용 창출

사업명

농업인교육복지관 건립

담당자

농촌지원과 류성민

(☎270-3934)

□ 사업목적 및 필요성

○ 쾌적한 교육환경 조성을 통한 양질의 서비스로 교육효과 극대화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2019

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 성곡서로32번길 7

○ 규 모 : 부지 3,788㎡, 지하1층/지상3층 연면적 1,954㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,664백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,664	240	4,424	-	-
국 비	2,332	120	2,212	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,332	120	2,212	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018. 10. : 기본 및 실시설계 완료

○ 2018. 12. : 공사착공

○ 2019. 12. 17. : 농업인교육복지관 공사준공

□ 향후계획

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

형산 신부조장터 공원 및 뱃길 복원

담당자

형산강사업과 김대원

(☎270-4882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 옛 부조장터를 복원, 경주 양동마을과 연계한 전통문화 체험공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 6. ∼ 2020. 12.

○ 위 치 : 남구 연일읍(형산강변)

○ 규 모 : 신부조장터공원(A=9,600㎡), 보부상길(L=2.1㎞)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,000	3,800	2,000	3,200	-
국 비	2,900	1,900	1,000	-	-
시 도 비	2,100	420	80	1,600	-
시군구비	4,000	1,480	920	1,600	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2015. 12.  경북도 형산강지역 상생발전 기본구상용역 완료

○ 2017.  5.  경상북도문화관광공사 위·수탁협약 체결

○ 2017.  6.  기본 및 실시설계용역 시행

○ 2018. 11.  공사 착공

□ 향후계획

○ 2020.  9.  부조장터공원 기계설비 점검 및 보부상길 산책로 조성

○ 2020. 12.  공사 준공

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

문화예술회관 시설개선 사업

담당자

문화예술과 김성대

(☎270-2553)

□ 사업목적 및 필요성

○ 1995년 개관 이후 포항의 문화예술 대표시설로서 거점 역할을 하고 있      으나, 공연장을 비롯한 대부분 시설물의 노후로 안전성 확보가 시급함

○  2015년 정밀점검 및 보수보강 공사비 산정 용역 결과 노후로 인한          건축, 기계, 소방, 전기 등의 전반적인 보수 보강이 필요한 것으로 나타남

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2020년(3년)

○ 위 치 : 남구 희망대로 850 문화예술회관

○ 규 모 : 무대설비, 무대조명, 건축, 전기, 소방, 통신 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	6,000	1,000	3,000	2,000	-
국 비	1,340	330	1,010	-	-
시 도 비	1,085	80	260	745	-
시군구비	3,575	590	1,730	1,255	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 99%)

○ 2018. 04. ~ 05. 전기시설개선사업 실시설계

○ 2018. 06. ~ 12. 전기 시설개선사업(냉동기 교체 등) 완료

○ 2019. 02. ~ 10. 시설개선사업 실시설계

○ 2019. 07. ~ 08. 무대기계시설 우수제품선정 심의

○ 2019. 01. ~ 11. 시설개선사업 설계 용역

○ 2020. 01. ~ 08. 시설개선사업 시행

- 무대기계,무대조명,증기보일러,건축,전기,통신,소방 등

□ 향후계획

○ 2020. 09.  포항문화재단 관리 이관

□ 사업변경 내역 : 해당없음

10-2. 지방채 발행사업

우리 포항시에서 ‘19년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	도비	시비	기타
영일만4일반산업단지 곡강IC연결도로개설공사	24,800	7,000	-	-	17,800	-	7,000	50%
포항장애인형 국민체육센터 건립	18,500	3,000	5,000		10,500		3,000	43%
포항융합기술산업지구 용수공급시설 설치	28,501	2,000	10,625	3,187	12,689	-	2,000	5%
구.중앙초 폐교부지 매입	19,562	3,000	-	-	16,562	-	3,000	100%
가연성폐기물전처리시설 설치사업	37,376	5,000	16,258	1,350	40	14,728	5,000	100%

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2019년에 추진한 사업

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

영일만4 일반산업단지 곡강IC

연결도로 개설공사

담당자

도시계획과 송하동   (☎270-3813)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영일만4 일반산업단지 진입도로가 2016년 12월 준공 되었으나 산업단지내 도로 및 영일만대로 연결IC 미개설로 교통분산 효과 미흡

○ 조기개설 민원 해소 및 기반시설 구축으로 산업단지 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 7. ~ 2020. 12

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 곡강리 일원

○ 규 모 : 대로 L=750m, B=30m   교차로 L=170m, B=6m 4개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 24,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	24,800	14,000	7,800	3,000	-
지 방 채	7,000	-	7,000	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	17,800	14,000	800	3,000	-
기 타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2017.  7. 28 : 곡강IC 연결도로 실시설계 착공

○ 2017.  9. 30 : 보상계획 공고

○ 2017. 11. 21 : 계약심의위원회 개최

○ 2017. 12. : 공사 발주 및 편입토지 보상 시행

○ 2018.  2. : 공사 착공(2019. 1. : 2차분 착공)

□ 향후계획

○ 2020.  3. : 1차분 준공

○ 2020. 12월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역: 해당없음

사업명

포항 장애인형 국민체육센터 건립

담당자

새마을체육과 윤현광   (☎270-2806)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장애인들이 불편함 없이 생활체육을 할 수 있는 공간을 마련하여 건전한 사회적

참여를 유도

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 8월 ~ 2021. 10월

○ 위 치 : 포항시 북구 여남동 267-1번지 일원

○ 규 모 : 체육센터 건립(지상 3층, 연면적 5,600㎥)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	18,500	5,000	3,000	-	10,500
지 방 채	3,000	-	3,000	-	-
국 비	5,000	5,000	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	10,500	-	-	-	10,500
기 타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  43%)

◦ 2017. 03월 : 지방재정 투자 심사(변경, 155억)

◦ 2017. 04월 : 국민체육진흥기금 지원사업 공모 선정

◦ 2018. 05월 : 건축설계 공모

◦ 2018. 08월 : 실시설계용역

◦ 2019. 02월 : 설계 경제성검토 용역(VE)

◦ 2019. 08월 : 건설기술심의 및 중앙투자심사

◦ 2019. 10월 : 실시설계용역 준공

◦ 2019. 12월 : 공사 착공

□ 향후계획

◦2021. 10월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역: 해당없음

사업명

포항융합기술산업지구 용수공급시설 설치

담당자

투지기업지원과 김호준   (☎270-2398)

□ 사업목적 및 필요성

○ 포항융합기술산업지구내로 공업용수와 생활용수 공급하는 기반시설

○ 용수 적기공급으로 원활한 사업추진과 경제자유구역 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1. ~ 2022. 12

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 일원

○ 규 모 : 생활용수 D800~250 L=8.0km, 공업용수 D250~300 L=147km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 28,501백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	28,501	1,800	7,600	3,800	15,301
지 방 채	2,000	-	2,000	-	-
국 비	10,625	900	3,800	1,900	4,025
시 도 비	3,187	270	1,140	570	1,207
시군구비	12,689	630	660	1,330	10,069
기 타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 용수공급시설 설치 기본 및 실시설계 완료

○ 수도사업인가,하수도 재이용시설 사용허가

○ 전기, (토목,감리 1차분) 계약 및 착공

□ 향후계획

○ '21.  3 월 포항융합기술 산업지구 용수 공급시설(1차분) 준공

○ '21.  4 월 포항융합기술 산업지구 용수 공급시설(2차분) 착공

○ '22. 12 월 포항융합기술산업지구 용수공급시설

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

구.중앙초 폐교부지 매입

담당자

도시재생과 (☎270-3883)

□ 사업목적 및 필요성

○ 학교 이전 후 주변 슬럼화 및 공동화 심화를 방지하고 지진피해를 입은 북구청사 이전과 함께 도시재생 뉴딜사업의 원활한 추진을 위한 폐교부지 매입

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2021 (5개년)

○ 위 치 : 북구 동빈 1가 90번지 일원(구. 중앙초 부지)

○ 규 모 : 토지 17필지(18,734㎡), 건물(5,991㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,562백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	19,562	8,667	10,895
지 방 채	3,000		3,000
국 비
시 도 비
시군구비	16,562	8,667	7,895
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  매입완료 100%)

○ 교육감 소유 토지 13필지(13,584㎡), 건물(5,991㎡)

- 14,669백만원 지급 및 소유권 이전 완료

○ 기획재정부 소유 토지 4필지(5,150㎡)

- 4,893백만원 지급 및 소유권 이전 완료

□ 향후계획

○ 매입부지의 도시재생 거점시설 조성(~2021년)

- 북구청이전, 문화예술HUB, 행복주택건립 등

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

가연성폐기물전처리시설 설치사업

담당자

자원순환과 황의호

(☎270-3165)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활폐기물의 장기적 안정적 처리로 매립장 사용기간 연장

○ 버려지는 폐기물로부터 가용에너지를 회수하여 녹색성장 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2016.6.24.~2019.1.18.

○ 위    치 : 남구 호동 39-3번지 일원

○ 민간사업자 : 포항이앤이

○ 총사업비 : 37,376백만원

○ 사업규모 : 가연성폐기물 전처리시설 500톤/일

□ 재정부담 현황

○ 지금까지 재정부담액 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	37,376	31,236	6,140	-	-
지 방 채	5,000	-	5,000	-	-
국 비	16,258	16,258	-	-	-
시 도 비	1,350	250	1,100	-	-
시군구비	40	-	40	-	-
기 타	14,728	14,728	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 택 1)

○ 운영 중

□ 향후계획(해당없음)

□ 사업변경 내역(해당없음)

10-3. 민간투자사업

우리 포항시에서 ‘19년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총 사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2019년	2020년	2021년 이후
BTL	07 BTL사업	포항 맑은물㈜	113,988	60,366	11,973	11,648	171,963	2014.04 ~ 2034.04
BTL	09 BTL사업	포항 맑은물길㈜	67,559	29,377	6,235	5,943	89,007	2014.07 ~ 2034.06
BTL	10 BTL사업	청정포항(주)	87,965	17,742	6,452	6,452	98,386	2016.04 ~ 2036.03
BTL	13 BTL사업	포항 새물길㈜	55,754	1,286	4,079	4,292	76,175	2018.10 ~ 2038.09
BTO	가연성폐기물전처리시설 설치사업	포항이앤이	37,376	16,508	6,140	-	-	2016.6.~ 2019.1.
BTO	고형연료제품 전용보일러 설치사업	포항이앤이	118,275	47,810	340	-	-	2016.6.~ 2019.1.
BTO	포항하수종말처리장 2단계(증설)건설공사	포항수질환경(주)	107,686	73,227	-	-	-	2007.11 ~ 2022.10
BTO	포항시 장량하수처리시설	푸른장량(주)	52,739	33,665	-	-	-	2011.01 ~ 2030.12
BTO	포항시 청하·기계하수처리시설 건설공사	포항엔텍(주)	72,147	54,309	-	-	-	2016.02 ~ 2036.02
BTO	포항시 하수처리수 재이용시설	㈜피워터스	125,355	75,213	-	-	-	2014.08 ~ 2034.07

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2019년까지는 집행액(결산기준), 2020년 이후는 추정액

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

사업명

’07년 포항시 하수관거정비

임대형 민자사업(BTL)

담당자

하수도과 배순열(☎270-5424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 재원조달의 한계로 장기간 소요되는 하수관거 정비사업을 민간의

자본을 활용하여 정비함으로써 하수처리장 운영효율 증대

□ 사업개요

○ 기    간 : 14. 04 ~ 34. 04

○ 위    치 : 중앙, 용흥, 양학, 대이, 송도, 죽도동 일원

○ 민간사업자 : 포항맑은물(주)

○ 총사업비 : 113,988백만원

○ 사업규모 : 하수관로정비 L=90km

□ 재정부담 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	255,950	60,366	11,973	11,648	171,963
국 비	178,934	42,202	8,370	8,143	120,219
시 도 비	-
시군구비	77,016	18,164	3,603	3,505	51,744
기 타	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 택 1)

○ 운영중

□ 향후계획(해당없음)

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

’09년 포항시 하수관거정비

임대형 민자사업(BTL)

담당자

하수도과 배순열(☎270-5424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 재원조달의 한계로 장기간 소요되는 하수관거 정비사업을 민간의

자본을 활용하여 정비함으로써 하수처리장 운영효율 증대

□ 사업개요

○ 기    간 : 14. 07 ~ 34. 06

○ 위    치 : 중앙, 용흥, 대이동 일원

○ 민간사업자 : 포항맑은물길(주)

○ 총사업비 : 67,559백만원

○ 사업규모 : 하수관로정비 L=37km

□ 재정부담 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	130,562	29,377	6,235	5,943	89,007
국 비	89,395	20,114	4,269	4,069	60,943
시 도 비
시군구비	41,167	9,263	1,966	1,874	28,064
기 타

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 택 1)

○ 운영중

□ 향후계획(해당없음)

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

’10년 포항시 하수관거정비

임대형 민자사업(BTL)

담당자

하수도과 배순열(☎270-5424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 재원조달의 한계로 장기간 소요되는 하수관거 정비사업을 민간의

자본을 활용하여 정비함으로써 하수처리장 운영효율 증대

□ 사업개요

○ 기    간 : 16. 04 ~ 36. 03

○ 위    치 : 상대, 해도, 죽도동 일원

○ 민간사업자 : 청정포항(주)

○ 총사업비 : 87,965백만원

○ 사업규모 : 하수관로정비 L=39km

□ 재정부담 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	129,032	17,742	6,452	6,452	98,386
국 비	90,284	12,414	4,514	4,514	68,842
시 도 비
시군구비	38,748	5,328	1,938	1,938	29,544
기 타

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 택 1)

○ 운영중

□ 향후계획(해당없음)

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

’13년 포항시 하수관거정비

임대형 민자사업(BTL)

담당자

하수도과 배순열(☎270-5424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 재원조달의 한계로 장기간 소요되는 하수관거 정비사업을 민간의

자본을 활용하여 정비함으로써 하수처리장 운영효율 증대

□ 사업개요

○ 기    간 : 18. 10 ~ 38. 09

○ 위    치 : 상대, 해도, 효곡(유강)동 일원

○ 민간사업자 : 포항새물길(주)

○ 총투자비 : 55,754백만원

○ 사업규모 : 하수관로정비 L=49km

□ 재정부담 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	85,832	1,286	4,079	4,292	76,175
국 비	60,082	900	2,855	3,004	53,323
시 도 비
시군구비	25,750	386	1,224	1,289	22,851
기 타

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 택 1)

○ 운영중

□ 향후계획(해당없음)

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

가연성폐기물전처리시설 설치사업

담당자

자원순환과 황의호

(☎270-3165)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활폐기물의 장기적 안정적 처리로 매립장 사용기간 연장

○ 버려지는 폐기물로부터 가용에너지를 회수하여 녹색성장 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2016.6.24.~2019.1.18.

○ 위    치 : 남구 호동 39-3번지 일원

○ 민간사업자 : 포항이앤이

○ 총사업비 : 37,376백만원

○ 사업규모 : 가연성폐기물 전처리시설 500톤/일

□ 재정부담 현황

○ 지금까지 재정부담액 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	37,376	31,236	6,140	-	-
국 비	16,258	16,258	-	-	-
시 도 비	1,350	250	1,100	-	-
시군구비	5,040	-	5,040	-	-
기 타	14,728	14,728	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 택 1)

○ 운영 중

□ 향후계획(해당없음)

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

고형연료제품 전용보일러 설치사업

담당자

자원순환과 황의호

(☎270-3165)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활폐기물의 장기적 안정적 처리로 매립장 사용기간 연장

○ 버려지는 폐기물로부터 가용에너지를 회수하여 녹색성장 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2016.6.24.~2019.1.18.

○ 위    치 : 남구 호동 39-3번지 일원

○ 민간사업자 : 포항이앤이

○ 총사업비 : 118,275백만원

○ 사업규모 : 전용보일러시설 270톤/일

□ 재정부담 현황

○ 지금까지 재정부담액 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	118,275	117,935	340	-
국 비	47,810	47,810	-	-
시 도 비	-	-	-	-
시군구비	340	-	340	-
기 타	70,125	70,125

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 택 1)

○ 운영 중

□ 향후계획(해당없음)

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

포항하수종말처리장 2단계(증설)건설공사 민간투자사업

담당자

하수재생과

이태진(☎270-5284)

□ 사업목적 및 필요성

○ 형산강 및 인근해역의 수질개선, 지역 주민의 주거환경개선, 공중보건 향상 도모

□ 사업개요

○ 기    간 : 2004. 10. 15. ~ 2007. 11. 30.

○ 위    치 : 포항시 남구 형산강북로 203

○ 민간사업자 : 포항수질환경(주)

○ 총사업비 : 107,686백만원

○ 사업규모 : 하수처리장 152,000㎥/일, 차집관거 35.75km
중계펌프장 6개소(4개소 신설, 2개소 개량)

□ 재정부담 현황

○ 최소수입보장 (관리운영기간 중 연간 추정사용료 수입의 47% 미달시)

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	107,686	107,686	-	-	-
국 비	57,074	57,074	-	-	-
시 도 비	4,846	4,846	-	-	-
시군구비	11,307	11,307	-	-	-
기타(민자)	34,459	34,459	-	-	-

□ 추진단계 : 운영 중

□ 향후계획(해당없음)

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경 (당초 106,820백만원 ⇒ 최종 107,686백만원)

사업명

포항시 장량하수처리시설

민간투자사업

담당자

하수재생과

이태진(☎270-5284)

□ 사업목적 및 필요성

○ 포항시 장량동 지역의 대규모 택지개발사업, 신항만 및 배후단지개발계획 등에 따른 하수처리시설 건설로 친환경적인 주거환경개선, 공중보건 향상 도모

□ 사업개요

○ 기    간 : 2008. 4. 10. ~ 2010. 12. 28.

○ 위    치 : 포항시 흥해읍 신덕로 34-34

○ 민간사업자 : 푸른장량(주)

○ 총사업비 : 52,739백만원

○ 사업규모 : 하수처리장 15,000㎥/일, 차집관거 9.826km, 중계펌프장 3개소

□ 재정부담 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	52,739	52,739	-	-	-
국 비	27,952	27,952	-	-	-
시 도 비	1,714	1,714	-	-	-
시군구비	3,999	3,999	-	-	-
기타(민자)	19,074	19,074	-	-	-

□ 추진단계 : 운영 중

□ 향후계획(해당없음)

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경 (당초 53,432백만원 ⇒ 최종 52,739백만원)

○ 차집관거 11.633km ⇒ 9.826km

○ 중계펌프장 5개소 ⇒ 3개소

사업명

포항시 청하·기계하수처리시설 건설공사 민간투자사업

담당자

하수재생과

이태진(☎270-5284)

□ 사업목적 및 필요성

○ 포항시 북구 청하면, 기계면 일대의 공공수역 수질개선·주민환경개선· 위생환경개선을 위함.

□ 사업개요

○ 기    간 : 2013. 1. 10. ~ 2016. 2. 25.

○ 위    치 : 포항시 북구 청하면 화두길 138-15 외 1

○ 민간사업자 : 포항엔텍(주)

○ 총사업비 : 72,147백만원

○ 사업규모 : 청하하수처리장 1,900㎥/일, 기계하수처리장 1,000㎥/일
맨홀펌프장 24개소, 차집관거 49.46km, 하수관거 35.87km

□ 재정부담 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	72,147	72,147	-	-	-
국 비	50,503	50,503	-	-	-
시 도 비	3,429	3,429	-	-	-
시군구비	377	377	-	-	-
기타(민자)	17,838	17,838	-	-	-

□ 추진단계 : 운영 중

□ 향후계획(해당없음)

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경 (당초 72,330백만원 ⇒ 최종 72,147백만원)

사업명

포항시 하수처리수 재이용시설 민간투자사업

담당자

하수재생과

서동기(☎270-5283)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상수 · 하수에 이은 제3의 물산업 육성

○ 공업용수 수요 증가에 대응 및 지역경제 활성화

○ 오염부하량 저감으로 형산강 수질개선

□ 사업개요

○ 기    간 : 2012. 2. 1. ~ 2014. 7. 31.

○ 위    치 : 포항시 남구 형산강북로 203

○ 민간사업자 : ㈜피워터스

○ 총사업비 : 125,405백만원

○ 사업규모 : 하수처리수 재이용시설 100,000㎥/일
재이용(공업용수)공급관로 11.5km

□ 재정부담 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	125,405	125,405	-	-	-
국 비	67,719	67,719	-	-	-
시 도 비	2,759	2,759	-	-	-
시군구비	4,765	4,765	-	-	-
기타(민자)	50,162	50,162	-	-	-

□ 추진단계 : 운영 중

□ 향후계획(해당없음)

□ 사업변경 내역(해당없음)

○ 총사업비 변경 (당초 125,843백만원 ⇒ 최종 125,405백만원)