109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 포항시에서 ‘20년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후
포항시 신창2리 어촌뉴딜300사업	12,865	4,503	5,789	2,573	-	2021	2019	70%
포항시 영암1리항 어촌뉴딜 300사업	9,427	-	2,448	3,771	3,208	2022	2020	20%
포항시 오도2리항 어촌뉴딜 300사업	5,866	-	1,558	2,346	1,962	2022	2020	20%
다목적 행정선 건조사업	8,000	-	214	4,119	3,667	2022	2020	0%
수산자원(대문어) 산란서식장조성	10,000	2,000	2,000	2,000	4,000	2023	2019	40%
포항시 삼정리항 어촌뉴딜 300사업	9,945	2,578	-	3,978	3,389	2023	2020	10%
연안바다목장 조성사업	5,000	2,000	1,000	1,000	1,000	2022	2017	60%
행복도시 어울림 플랫폼 흥해공공도서관	8,000	-	-	26	7,974	2023	2020	5%
아이누리 플라자	1,950	-	40	1	1,910	2022	2020	5%
인공지능대학원 지원사업	3,000	-	600	600	1,800	2024	2020	20%
철강산업재도약 기술개발사업 (포항거점센터)	135,440	-	-	23,840	111,600	2025	2020	10%
신재생에너지 융복합 지원사업	3,395	-	-	3,395	-	2021	2020	5%
장성동~우창동 도시계획도로 (중1-184)개설	30,000	-	-	1,100	28,900	2025	2020	5%
흥해 초곡리 도시계획도로(소1-3)개설	30,000	-	850	-	29,150	2026	2020	5%
동해 도구 도시계획도로(소2-40개설)	2,400	1,100	600	300	400	2022	2020	70%
흥해 학천리 도시계획도로(소2-3)개설	30,000	-	850	-	29,150	2026	2020	5%
동해~흥환리 도로(시도1호)확포장	15,400	10,300	-	300	4,800	2024	2017	66%
신광~흥해 매산리간(시도7호)확포장	21,200	9,900	2,000	500	8,800	2025	2017	58%
창포동~흥새 성곡간도로(중1-58)개설	35,000	9,600	-	-	25,400	2025	2017	27%
청림동 도시계획도로(중1-24)개설	13,000	4,700	300	300	7,700	2022	2018	40%
도심권 단절 숲길 연결사업	5,900	-	48	2,452	3,400	2025	2019	5%
포항철길숲 상생숲길 인도교 연결사업	3,182	182	112	3,070	-	2021	2020	15%
미세먼지 차단숲 조성사업	2,000	-	1,500	500	-	2021	2020	75%
해도동근린생활형 국민체육센터 건립	11,500	-	-	17	11,483	2023	2020	5%
포항종합운동장 시설 리모델링사업	20,000	-	4,750	3,750	11,500	2022	2020	10%
다원 복합센터 생활SOC 복합화사업	44,550	-	-	13,300	31,250	2024	2020	5%
문화도시 조성사업	19,600	-	2,571	3,200	13,829	2024	2020	15%
제14회 포항칠포 재즈페스티벌	750	-	30	-	-	2020	2020	5%
영일대해수욕장 비점오염저감시설 사업	8,800	-	642	3,436	4,722	2022	2020	7%
대한민국 국제해양레저위크(KIMA)	500	-	500	-	-	2020 (연례사업)	2020	100%
흥해 오도 주상절리 탐방로 조성사업	19,700	-	-	-	19,700	2025	2020	5%
도시재생뉴딜 우리동네살리기, 신흥동 함께 가꾸는 삶터, 모갈숲 안포가도 마을	7,500	3,500	1,545	2,455	-	2021	2020	60%
연일대교 경관조명 설치공사	3,000	-	1,500	-	1,500	2022	2020	50%
명도학교 다목적강당 신축	2,750	-	550	-	-	2020	2019	100%
장량초 다목적강당 및 급식소 증축	5,327	-	1,065	-	-	2021	2019	100%
구정초 다목적강당 및 급식소 증축	4,894	-	979	-	-	2021	2019	100%
오천원동11근린 공원 리모델링	2,100	1,600	500	-	-	2021	2019	공사완료 (100%)
상도근린공원 조성	15,500	2,500	1,500	-	11,500	2026	2017	토지보상중 (25%)
흥해시장 주차환경개선사업	8,000	80	3,124	1,200	3,676	2022	2019	설계용역 (10%)
중앙상가 주차환경개선사업	12,500	28	4,398	4,602	3,472	2022	2019	보상및철거 (50%)
영일만4 일반산업단지 원형지 조성	32,300	18,000	4,500	9,800		2021	2020	80%

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2020년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

신창2리항 어촌뉴딜300사업

담당자

수산진흥과 정진수 (☎270-2765)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어촌이 보유한 핵심자원을 활용하여 차별화된 콘텐츠를 발굴하고 어촌․어항 통합 재생을 통하여 사업효과 극대화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년(3년간)

○ 위 치 : 포항시 남구 장기면 신창2리항 일원

○ 규 모 : 어촌∙어항 통합재생사업 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,865백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	12,865	4,503	5,789	2,573	-
국 비	9,006	3,152	4,052	1,802	-
시 도 비	1,158	406	521	231	-
시군구비	2,701	945	1,216	540	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2018. 12. 국비 공모사업 선정

○ 2019.  1. 한국농어촌공사 위․수탁 계약 체결

○ 2019.  2. 기본계획 및 실시설계 발주

○ 2019.  8. 사업계획 고시

○ 2019.  9. 1단계 공사 발주 및 착공

○ 2020.  5. 2단계 공사 발주

○ 2020. 11. 2단계(창바우 생활문화관) 착수

□ 향후계획

○ 2021. 12. 2단계(생활문화관, 해안풍경길, 어항시설정비 등) 준공

○ 2021. 12. 3단계(돌미역 유통센터 준공)

사업명

영암1리항 어촌뉴딜300사업

담당자

수산진흥과 정진수 (☎270-2765)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어항 및 항․포구를 중심으로 인접한 배후 어촌마을까지 포함한 통합개발로 사회․문화․경제․환경적으로 어촌지역 활력 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년(3년간)

○ 위 치 : 포항시 남구 장기면 영암1리항 일원

○ 규 모 : 어촌∙어항 통합재생사업 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,427백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,427	-	2,448	3,771	3,208
국 비	6,599	-	1,714	2,640	2,245
시 도 비	848	-	220	339	289
시군구비	1,980	-	514	792	674
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2019. 12. 19. 공모 선정

○ 2020. 08. 26. 기본계획 승인

○ 2020. 09. 04. 실시설계 용역 발주

□ 향후계획

○ 2021. 08. 어항시설정비 및 특화사업(멍게나눔 특화공간 조성 외 2건) 착공

○ 2022. 12. 사업 준공

□ 사업변경 내역

○ 2020. 08. 11 `20년 어촌뉴딜 사업 총사업비 조정(9,794⟶9,427)백만원

사업명

오도2리항 어촌뉴딜300사업

담당자

수산진흥과 정진수 (☎270-2765)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어항 및 항․포구를 중심으로 인접한 배후 어촌마을까지 포함한 통합개발로 사회․문화․경제․환경적으로 어촌지역 활력 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년(3년간)

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 오도2리항 일원

○ 규 모 : 어촌∙어항 통합재생사업 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,866백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,866	-	1,558	2,346	1,962
국 비	4,106	-	1,091	1,642	1,373
시 도 비	528	-	140	211	177
시군구비	1,232	-	327	493	412
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2019. 12. 19. 공모 선정

○ 2020. 08. 26. 기본계획 승인

○ 2020. 09. 04. 실시설계 용역 발주

□ 향후계획

○ 2021. 08. 어항시설정비 및 특화사업(오도어부장터 조성 외 2건) 착공

○ 2022. 12. 사업 준공

□ 사업변경 내역

○ 2020. 08. 11 `20년 어촌뉴딜 사업 총사업비 조정(6,233⟶5,866)백만원

사업명

다목적 행정선 건조사업

담당자

수산진흥과 김지원 (☎270-2754)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 노후 어업지도선(경북 207호, 29톤)을 대체 건조하여 원활한 불법어업 행위 단속 및 수산재해 대비 해역예찰 대응

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 6. ~ 2022. 7.

○ 위 치 : 미정(조선소 입찰결과에 따름)

○ 규 모 : 다목적 행정선 1척 건조

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,000	-	214	4,119	3,667
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,400	-	64	1,236	1,100
시군구비	5,600	-	150	2,883	2,567
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 기본 및 실시설계용역 준공(`21. 3. 30.)

□ 향후계획

○ 2021. 7. 조선소 선정 및 착공

○ 2022. 7. 준공

사업명

수산자원(대문어)산란·서식장 조성사업

담당자

수산진흥과 김재선(☎270-2742)

□ 사업목적 및 필요성

○ ‘17.11.15. 포항지진 이후 도시재생특별법 개정 및 특별재생지역 신설로        흥해를 대상으로 특별재생 시범사업 추진 발표함에 따라 지진피해지역        어업인의 실질적 지원을 위한 대문어 산란·서식장 기반 및 자원 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2023년(5년간)

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 칠포리 ~ 청하면 이가리 (수심30m이내)

○ 규 모 : 400ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	10,000	2,000	2,000	2,000	4,000
국 비	5,000	1,000	1,000	1,000	2,000
시 도 비	1,500	300	300	300	600
시군구비	3,500	700	700	700	1,400
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2019. 1.       위(수)탁 협약체결(포항시⇒한국수산자원공단)

○ 2019. 1. ~ 4.  적지조사 및 기본계획 수립

○ 2019. 2. ~ 7.  자원조사 등 경제성 분석(제주대학교)

○ 2020. 3. ~ 12. 산란조성용 어초(688개) 및 어장환경조성 어초(583개) 설치,                     효과조사, 대문어 부화유생 방류 및 먹이장 조성 등

□ 향후계획

○ 2021. 2. ~ 8.  산란 서식장 어초 조성 등 기반공사

○ 2021. 6. ~ 12. 어미종자 방류 및 모니터링 등 효과조사

사업명

포항시 삼정리항 어촌뉴딜 300사업

담당자

수산진흥과 전지환(☎270-2763)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삼정항 기반시설 정비 및 확충으로 수산업발전 도모

○ 지역특성 맞춤형개발로 어업과 관광의 시너지 효과 방출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2023년(3년간)

○ 위 치 : 포항시 북구 송라면 방석리 36-6번지 일원(방석항)

○ 규 모 : 공통사업 : 어항시설 정비(파제제, 이안제, 어구보관장, 공동작업장)

특화사업 : 해변산책로, 교류센터, 공원정비, 커뮤니티 공간 등

지역역량강화 : 삼정리항 상업 활성화 계획, 협의체운영 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,945백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,945	2,578	-	3,978	3,389
국 비	6,962	1,805	-	2,785	2,372
시 도 비	895	232	-	358	305
시군구비	2,088	541	-	835	712
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(진도 : 10%)

○ 2019. 12. : 21년 사업 공모 선정

○ 2021.  2. : 기본계획 준공

○ 2021.  7. : 기본 및 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○  2022.  4. : 시행계획 수립 및 공사 착수

○  2022. 12. : 삼정리항 어촌뉴딜 300사업 준공

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

연안바다목장 조성

담당자

수산진흥과 구광회(☎270-2742)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사업 대상지는 자연암반이 넓게 분포하고 천혜의 환경조건으로 인해 수산자원의

서식과 산란이 이루어져 유용수산생물들이 풍부한 지역이었으나 최근 기후변화,

침적폐기물 발생 등 어장환경 황폐화로 수산자원 회복 및 생태환경 개선 필요

□ 사업개요

○ 기  간 : 2018 ~ 2022년(5년간)

○ 위  치 : 포항시 남구 구룡포읍 삼정2,3리, 석병1리 지선

○ 사업량 : 121.8ha(어초시설, 문어산란장 조성 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,000	2,000	1,000	1,000	1,000
국 비	2,500	1,000	500	500	500
시 도 비	750	300	150	150	150
시군구비	1,750	700	350	350	350
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2016. ~ 2017   : 연안바다목장 기본계획 수립

○ 2018. 3. ~ 12.  : 어초 98개, 문어산란장 조성 1식, 전복 30만마리 방류, 해적

생물 구제작업 등 추진

○ 2019. 6. ~ 12.  : 어초 117개, 문어산란구조물 167개, 환경개선 및 효과조사

○ 2020. 3. ~ 12.  : 어초 113개, 전복·해삼 방류, 자연석 투석 및 환경개선 사업,

효과조사 등 추진

□ 향후계획

○ 2021 ~ 2022년 : 해적생물 구제, 해조장 조성, 종자방류 등 사업추진

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

행복도시어울림플랫폼

흥해공공도서관

담당자

안전도시사업과 박준모(☎270-5583)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 대표 도서관 건립으로 시민들의 정주의식 고취 및 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2023년

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 마산리 62-1번지

○ 규 모 : 공공도서관 1식(13,576㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,000	-	-	26	7,794
국 비	3,199	-	-	10	3,189
시 도 비	257.6	-	-	1.6	256
시군구비	4543.4	-	-	14.4	4,529

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5 %)

○ 2018.11.15. : 특별재생지역 지정 및 특별재생계획 승인(국토부)

○ 2019.02.22. : 공유재산심의회 심의 의결

○ 2020.04.03. : 2020년 제1차 지방재정 중앙 투자사업 심사(조건부)

○ 2020.05.20. : 건축설계공모 공고

○ 2020.08.04. : 기본 및 실시설계용역 계약

○ 2021.07.23. : 기본 및 실시설계용역 중지(행정절차 이행)

□ 향후계획

○ 공사 착공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

아이누리플라자

담당자

안전도시사업과 박준모(☎270-5583)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전파주택부지 매입 및 특별재생 시행으로 주거안정 및 지역의 신규 활력 부여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2023년

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 마산리 62-1번지

○ 규 모 : 아이누리플라자 1식(1,402㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,950백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	1,950	-	40	1	1,909
국 비	337	-	40	1	296
시 도 비	89	-	-	-	89
시군구비	1,524	-	-	-	1,524
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5 %)

○ 2018.11.15. : 특별재생지역 지정 및 특별재생계획 승인(국토부)

○ 2019.02.22. : 공유재산심의회 심의 의결

○ 2020.04.10. : 2020년 제1차 지방재정 도 투자사업 심사(적정)

○ 2020.05.18. : 건축설계공모 공고

○ 2020.07.09. : 기본 및 실시설계용역 계약

○ 2021.07.23. : 기본 및 실시설계용역 중지(행정절차 이행)

□ 향후계획

○ 공사 착공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

인공지능대학원 지원사업

담당자

미래전략산업과 진효림

(☎270-2423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인공지능(AI)은 4차 산업혁명의 핵심기술로, 타산업과의 융합을 통해 새로운 부가가치 창출은 물론, 기존 산업분야의 획기적 변화를 촉발

○ 全 산업분야에 인공지능이 접목되어 혁신이 가속화되는 현실에서 산업계의 석·박사급 AI 전문가 수요가 증가함에 따라 지원 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2024

○ 위 치 : 경북 포항시 포스텍 일원

○ 주요내용

∙ 입학정원 : 50명/연(석사 30, 박사 5, 석·박사통합 15)

∙ 인공지능 특화 교육과정 운영(3개 과정) : 미디어 AI, 데이터 AI, AI 이론

∙ AI 및 융합 기술을 바탕으로 신산업을 창출할 수 있는 기업가 자질을 갖춘 인재 양성

∙ 공동연구 : 세계 유수의 협력기관(구글 등)들과의 인턴십 및 공동 연구를 통한 글로벌 역량 배양

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원                                   (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,000	-	600	600	1,800
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,500	-	300	300	900
시군구비	1,500	-	300	300	900
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ ’20. 3월 2020-1학기 인공지능 대학원 개강

※20-1학기 신입생 선발 12명(석사8명, 박사2명, 석·박사통합2명)

○ ’20. 8월 인공지능대학원 공용 연구실 구축 및 연구장비 구입

○ ’20. 9월 2020-2학기 인공지능 대학원 개강

※20-2학기 신입생 선발 31명(석사16명, 박사6명, 석·박사통합9명)

□ 향후계획

○ 지역에서 세계최고수준의 AI고급인재 양성으로 AI기반 신산업 및 고급 일자리 창출

○ 지역 내 기업들과의 다양한 협력 프로그램을 통해 AI관련 애로기술 지원으로 지역기업 경쟁력 강화

사업명

철강산업 재도약 기술개발사업

담당자

미래전략산업과 강영욱

(☎270-3563)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국내외 철강산업 여건의 변화 대응과 지역 철강산업의 침체 극복을 위한 기업 기술경쟁력 강화 및 고부가 가치화를 통한 철강 생태계 기반구축 대두

○ 철강산업 고도화를 통한 지역 경제 활성화 및 일자리 창출 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2025

○ 위 치 : 포항블루밸리국가산업단지 연구1B 2L(동해면 공당리)

○ 주요내용

∙ 기술개발(고부가가치화 및 친환경 자원순환)

∙ 산업공유자산(실증장비+산업간 협의체)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,540백만원                                   (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	135,440	-	-	23,840	111,600
국 비	92,390	-	-	16,690	75,700
지 방 비	10,280	-	-	950	9330
민간자본	32,770	-	-	6,200	26,570
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ΄20. 06. : 철강산업재도약기술개발사업 과기정통부 예비타당성조사 최종 통과

○ ΄20. 10. : 지방 투자재정 심사 통과

○ ΄21. 04. : 철강재도약기술개발사업 운영지원단 유치

○ ΄21. 01. ~ 06. : 포항철강거점센터 부지매입 및 실시설계 실시

□ 향후계획

○ ΄21. 10. ~ ΄22. 03. : 포항철강거점센터 공사착공 및 준공

○ ΄21. 04. ~ ΄25. 12. : 장비구축 및 사업 성과확산 지원 등

사업명

신재생에너지 융복합지원사업

담당자

미래전략산업과 정치영

(☎270-3394)

□ 사업목적 및 필요성

○ 에너지 취약 지역에 태양광, 태양열, 지열난방 등 2종 이상의 신재생에너지원을 주택, 상가, 공공건물 등에 융·복합적으로 설치하여 지속가능발전 도시 건설

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 포항시 북구 기계면, 기북면, 송라면, 죽장면

○ 규 모 : 413개소(태양광 378개소, 태양열 22개소, 지열 11개소, 연료전지 2개소)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,395백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,395	-	-	3,395
국 비	1,713	-	-	1,713
시 도 비	379	-	-	379
시군구비	883	-	-	883
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	420	-	-	420	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2020. 02. 사전 수요조사

○ 2020. 04. 컨소시엄 구성

○ 2020. 12. 공모사업 선정

□ 향후계획

○ 2021. 01. 컨소시엄 협약 체결

○ 2021. 03. 에너지원별 시공

○ 2021. 12. 시공 완료 및 정산

사업명

장성동~우창동 도시계획도로(중1-184) 개설

담당자

도로시설과 박진섭(☎270-3433)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도심 내부의 순환 도로 기능으로 상습 정체구간인 영일만대로 및 새천년대로의       교통정체 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2025

○ 위 치 : 포항시 북구 우창동 ~ 장량동

○ 규 모 : 도시계획도로 L=3.5km, B=20.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	30,000	-	-	1,100	28,900
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	30,000	-	-	1,100	28,900
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)

○ 2019. 11. : 도시계획시설 결정(도로 : 중로1-184호선)

○ 2021. 03. : 실시설계용역 착수(2021. 03. 29. ~ 2022. 03. 28.)

□ 향후계획

○ 부지 매입 및 도시계획도로 개설 (L=3.5km, B=20.0m)

(1단계 : 우창동~마장지 L=1.4km, 2단계 : 마장지~장성두산위브 L=2.1km)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

흥해 초곡리 도시계획도로(소1-3) 개설

담당자

도로시설과 박진섭(☎270-3433)

□ 사업목적 및 필요성

○ 계획노선 주변에 초곡지구 등 대규모 공동주택단지가 조성됨에 따라       교통량 증가에 따른 우회도로개설이 시급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2026

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 학천리~초곡리 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 L=3.16km, B=10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	30,000	-	850	-	29,150
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	30,000	-	850	-	29,150
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)

○ 2019. 11. : 도시계획시설 결정 변경(대로1-6호선 → 소로1-3호선)

○ 2020. 10. : 실시설계용역 착수(2020. 10. 20. ~ 2021. 10. 19.)

□ 향후계획

○ 부지 매입 및 도시계획도로 개설 (L=3.16km, B=10.0m)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

동해 도구 도시계획도로(소2-40개설)

담당자

도로시설과 김가영(☎270-3444)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시계획도로 개설로 지역주민 민원해소

○ 주택밀집지역 소방도로 확보 및 도시기반시설 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021.01~2022.12

○ 위 치 : 포항시 남구 동해면 도구리 3-8 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=460m, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,400	1,100	600	300	400
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,400	1,100	600	300	400
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2012. 03월 : 실시설계용역 완료

○ 2021. 08월 : 보상율 88%(17필지 중 15필지 보상완료), 공사 진도 40%

□ 향후계획

○ 2021. 12월 : 미보상 잔여 필지 보상완료

○ 2022. 12월 : 전체사업 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

흥해 학천리 도시계획도로(소2-3)개설공사

담당자

도로시설과 강호원(☎270-3434)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설로 차량 통행 편의와 지역주민들에게 쾌적한 주거생활      환경 제공

○ 도시기반시설을 확충하여 지역균형발전에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 1월 ～ 2022년 12월

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 학천리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=500m, B=8.0m, 토지보상 4,182㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,900	2,450	-	700	750
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	325	325	-	-	-
시군구비	3,575	2,125	-	700	750
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

○ 2020. 09월 : 준공 L=135m, B=8.0

○ 2021. 07월 : 착공 L=200m, B=8.0

□ 향후계획

○ 2022. 12월 : 전 구간 보상 완료 후 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

동해~흥환리 도로(시도1호)확포장

담당자

도로시설과 이영민(☎270-3445)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로확포장으로 각종 안전사고 예방 및 지역주민 편의제공

○ 도시기반시설 확충으로 지역균형개발 및 숙원사업 해결

□ 사업개요

○ 기 간 : 1996.01~2024.12

○ 위 치 : 포항시 남구 동해면 흥환리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=20.4km, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	15,400	10,300	-	300	4,800
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	6,730	2,940	-	-	3,790
시군구비	8,370	7,060	-	300	1,010
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	300	300	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2016. 12월 : 실시설계용역 완료

○ 2021. 08월 : 보상율 56%(300필지 중 170필지 보상완료), 공사 진도 50%

□ 향후계획

○ 2021. 12월 : 2020년 발주공사 준공

○ 2024. 12월 : 전체사업 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

신광~흥해 매산리간 (시도7호) 확포장

담당자

도로시설과 박진섭(☎270-3433)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로기반시설을 구축하여 지역주민들에게 교통편의 제공 및 도로확장을       통한 위험도로 구조개선으로 안전사고 사전예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010 ~ 2022

○ 위 치 : 포항시 북구 신광면 사정리~흥해읍 매산리 일원

○ 규 모 : 시도확포장 L=3.3km, B=17.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	30,000	9,900	2,000	500	8,800
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	6,750	100	-	-	6,650
시군구비	14,450	9,800	2,000	500	2,150
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  58%)

○ 2019. 04. : 1차공사 준공(송화타운~보원사 L=0.5km)

○ 2019. 06. : 2차공사 준공(낚시터매운탕~범촌매운탕 L=0.48km)

○ 2020. 05. : 3차공사 준공(보원사~호리교 L=0.47km)

○ 2021. 06. : 4차공사 준공(사정 삼거리~SK주유소 L=0.67km)

□ 향후계획

○ 잔여구간(L=1.18km) 부지 매입 및 도로확포장

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

창포동~흥해 성곡간도로(중1-58) 개설

담당자

도로시설과 박진섭(☎270-3433)

□ 사업목적 및 필요성

○ 창포동 대단위 공동주택단지 건설로 인한 새천년대로 등 주변도로

교통정체 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2025

○ 위 치 : 포항시 북구 창포동 ~ 흥해 성곡리 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=2.71km, B=20.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 35,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	35,000	9,600	-	-	25,400
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	300	300	-	-	-
시군구비	34,700	9,300	-	-	25,400
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  27%)

○ 2020. 06. : 1차공사 준공(작은굴식당~마장지 L=0.66km)

□ 향후계획

○ 잔여구간(L=2.05km) 부지 매입 및 도로확포장

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

청림동 도시계획도로(중1-24)개설

담당자

도로시설과 김성원(☎270-3443)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주변 토지 이용 증대로 공장유치 및 주거환경 개선

○ 공단지역 물동량 수송원활로 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016.01~2022.12

○ 위 치 : 포항시 남구 청림동 일원(한국주철~한빛타운)

○ 규 모 : 도로확포장 L=1km, B=20.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	13,000	4,700	300	300	7,700
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	350	350	-	-	-
시군구비	12,650	4,350	300	300	7,700
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2016. 12월 : 실시설계용역 완료

○ 2021. 08월 : 보상율 70%(75필지 중 52필지 보상완료), 공사 진도 40%

□ 향후계획

○ 2022. 12월 : 2022년 예산편성에 따라 미보상 잔여필지 보상 및

잔여구간 공사 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

도심권 단절 숲길 연결사업

담당자

녹지과 정병훈(☎270-3823)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로개설 및 개발로 단절된 숲길을 생태적 기법 연결로 시민들에게 편의 제공

○ Green Way 사업과 연계하여 포항시의 역사와 문화를 엮어주는 숲길 조성

□ 사업개요

○ 기    간 : 2020 ~ 2022

○ 위    치 : 포항시 남구 이동 산60-2(포항IC진입로) 외 3개소

○ 사업내용 : 도심권 단절 숲길 연결 4개소

※ 4개소 : 포항IC진입로, 연화재, 소티재, 교육청 앞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,900백만원(도비 3,835, 시비 2,065)

(단위 : 억원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	59	-	0.48	24.52	34
국 비	-	-	-	-	-
도 비	38.35	-	0.16	6.34	31.85
시 비	20.65	-	0.32	18.18	2.15

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5 %)

○ 2017.12.06. : 타당성 조사 및 기본구상용역

○ 2019.04.26. : 지방재정 투자심사 반영

○ 2019.11.13. : 중기재정계획 반영

○ 2020.02.18. : 실시설계용역 착공(포항IC진입로)

○ 2020.06.04. : 포항시 기술자문 심의(교량특허공법 선정)

○ 2021.04.26. : 한국도로공사 설계심의

○ 2021.05.17. : 경상북도 계약원가 심사

□ 향후계획

○ 2021.06. ~ 11. : 포항IC진입로 단절 숲길 연결 착공 및 준공

○ 2022.01. ~ 12. : 도심권 단절 숲길연결 사업 시행(연화재 외 2개소)

사업명

포항철길숲 상생숲길 인도교 연결사업

담당자

김주욱 (☎270-3203)

□ 사업목적 및 필요성

○ 형산강권역과 시가지 중심지을 연결하는 새로운 그린웨이와 연계된 도시 녹지네트워크 강화

○ 녹색도시 이미지 제고와 도시민의 삶의 질 향상 보행자 중심 걷기 도시 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 7. ~ 2021. 12.

○ 사 업 량 : L=170m, B=3m

○ 사업위치 : 포항시 남구 연일읍 유강리 601-1번지 주변

○ 사업내용 : 보행교 신설, 자전거도로, 야간조명 등

○ 사 업 비 : 3,182백만원 (국비500 도비 500 시비 2,182)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,182백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,182	182	112	1,070	2,000
국 비	500	-	-	500	-
시 도 비	500	-	-	-	500
시군구비	2,182	182	112	570	1,500
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2020.04월 : 자체투자심사 완료

○ 2020.07월 : 실시설계 용역 발주

○ 2021.07월 : 인도교 교량공법 제안참여 및 공법선정 완료

□ 향후계획

○ 2021.10월 : 실시설계 완료

○ 2021.11월 : 공사 발주

사업명

미세먼지 차단숲 조성사업

담당자

김호흥 (☎270-5593)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공단 주변 차단숲 조성을 통하여 미세먼지 저감 등 건강한 도시환경 구축

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 미세먼지 차단숲 조성사업(연일철강산업단지)

○ 대 상 지 : 포항시 연일읍 동문리 9-2 외(공업지역 및 산업단지 주변)

○ 사업기간 : 2020. 04. 02. ~ 2021. 09. 10.

○ 사업내용 : 수목 다층・혼효식재 및 산책로 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원(국비 1,000, 지방비 1,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,000	-	1,500	500	-
국 비	1,000	-	750	250	-
시 도 비	300	-	225	75	-
시군구비	700	-	525	175	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ ‘19. 08. : 사업 대상지 보고(산림청)

○ ‘19. 09. : 사업 대상지 확정(안) 통보 및 중기지방재정계획 수립

○ ‘19. 11. : 지방재정 투자심사 완료(국비확보 조건)

○ ‘19. 12. : 국비확보 및 2020년 당초예산 반영

○ ‘20. 01. ∼ 03. : 기본 및 실시설계용역 추진 및 관련기관 협의

○ ‘20. 04. : 공사착공

□ 향후계획

○ ’21. 09. : 공사준공

사업명

해도동 근린생활형 국민체육센터 건립

담당자

새마을체육과 김령희(☎270-2453)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주민들이 지역근린생활권을 중심으로 거주지에서 편리하게 이용할 수 있는 소규모      다목적체육관 건립으로 해도동 주민들의 다양한 체육수요와 청원에 따른 지역의      문제 해결 및 주민 만족도 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019.9. ~ 2023.12.

○ 위 치 : 포항시 남구 해도동 512-23번지 일원

○ 규 모 : 국민체육센터 1식(지상3층)

(대지면적 A=2,617㎡, 건축면적 A=800㎡, 연면적 A=2,400㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	11,500	-	-	17	11,483
국 비	1,000	-	-	17	983
시 도 비	10,500	-	-	-	10,500
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

◦ 2019. 9. : 근린생활형 국민체육센터 공모선정(기금 10억)

◦ 2019.10. ~12. : 공유재산 심의계획 의결 및 중기지방재정계획 수립

◦ 2021. 1. ~ 5. : 부지선정 타당성용역 완료

□ 향후계획

◦ 2021. 6. ~ 8. : 건축기획 용역

◦ 2021. 8. ~ 9. : 사전검토 및 건축심의

◦ 2021. 9. ~ 2022. 5. : 건축설계공모 및 실시설계

◦ 2022. 6. ~ 2023.12. : 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 재산정 : 11,000백만원->11,500백만원

※ 물가상승률 반영 및 부지선정 용역에 따른 총 사업비 재산정

사업명

포항종합운동장

시설 리모델링사업

담당자

새마을체육과 윤현광(☎270-2806)

□ 사업목적 및 필요성

○ 성공적인 ‘2022 도민체전’을 비롯한 각종 전국대회 유치로 체육도시 포항시 이미지 제고 및 건강하고 활기찬 스포츠 문화도시 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020-01 ~ 2022-12

○ 위 치 : 경상북도 포항시 남구 대도동 313-1번지 일원

○ 규 모 : 리모델링 1식(부지면적 : 46,942㎡, 연면적 : 22,638㎡)

- 노후화 및 지진 피해로 인한 건물 균열 보수 보강

- 내·외부 도색 및 방수(본부석 캐노피, 창호, 사무실, 화장실 등 개선)

- 2종 육상경기장(도민체전) 공인을 위한 판독실, 용기구 설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	20,000	-	4,750	3,750	11,500
국 비	6,000	-	3,000	3,000	-
시 도 비	1,500	-	750	750	-
시군구비	12,500	-	1,000	-	11,500
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2019. 09. : 2020년 국비 사업예산 신청

○ 2019. 11. : 중기지방재정계획 반영

○ 2020. 09. : 지방재정 중앙투자심사 완료

○ 2020. 11. : 건축기획 사전검토 의뢰

□ 향후계획

○ 2021. 02.∼2021.03 : 사업수행능력평가 및 적격심사

○ 2021. 04.∼2021.10 : 기본 및 실시설계 용역

○ 2021. 11.∼2022.12 : 착공 및 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당 없음

사업명

다원 복합센터

생활SOC 복합화사업

담당자

새마을체육과 방원(☎270-2805)

□ 사업목적 및 필요성

○ 체육시설(수영장, 다목적체육관), 돌봄센터, 공공청사 부족으로 인한 남구 지역 주민들의 삶의 질 개선을 위한 인프라 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021-01 ~ 2024-12

○ 위 치 : 경상북도 포항시 남구 오천읍 원리 1564, 1564-1번지

○ 규 모 : 다원복합센터 건립

- 지하1층 : 기계/전기실, 창고, 공용부 등(480㎡)

- 지상1층 : 실내수영장, 다목적체육관 등(4,885㎡)

- 지상2층 : 관람석, 유아놀이방, 매점/휴게실 등(822㎡)

- 지상3층 : 청소년문화의집, 다함께돌봄센터, 공공청사(500㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 44,550백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	44,550	-	-	13,300	31,250
국 비	4,050	-	-	200	3,850
시 도 비	3,360	-	-	240	3,120
시군구비	37,140	-	-	12,860	24,280
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2020. 1. : 생활SOC 복합화사업 기본계획 수립

○ 2020. 9. : 생활SOC 복합화사업 공모 선정

○ 2021. 1. : 타당성조사 용역 착수

○ 2021. 6. : 공공위탁개발 위‧수탁 계약 체결

□ 향후계획

○ 2021. 10. : 건축설계 공모

○ 2022. 11. : 실시설계 완료

○ 2023. 2. ~ 2024. 12. : 착공 및 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당 없음

사업명

법정문화도시 조성사업

담당자

정책기획팀 임승용(☎289-7902)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시민의 문화적 권리를 보장하여 향유와 참여를 통한 시민의 문화적 성장 도모

○ 포항이 지니고 있는 다양한 문화적 가치가 자유롭게 공존하는 도시 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 04 ~ 12.   ※2020년 ~ 2024년(5개년)

○ 위 치 : 포항시 전역

○ 규 모 : 19,600백만원 (5년간 최대 20,000백만원)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	19,600	-	2,571	3,200	13,829
국 비	9,800	-	1,285.5	1,600	6,914.5
시 도 비	2,940	-	385.5	480	2,074.5
시군구비	6,860	-	900	1,120	4,840
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 기본계획 수립 완료

○ 시민 협업그룹 선정 진행

□ 향후계획

○ 거버넌스 구축 및 프로그램 운영

○ 특성화 사업 계획 및 운영

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

제14회 포항칠포재즈패스티벌

담당자

문화예술과 고연오(☎270-2873)

□ 사업목적 및 필요성

○ 재즈를 통해 철강도시 이미지를 벗어나 문화예술도시 이미지를 정립하는       한편 지역민에게 문화생활 향유의 기회 제공

○ 국내외 최정상급 뮤지션 섭외로 관광객 유치 및 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 9. 18. ~ 9. 19.

○ 위 치 : 칠포해수욕장 상설공연장

○ 규 모 : 750백만원(도비 150, 시비 300, 자부담 220, 기타(수익금) 80)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 750백만원 (코로나 19로 인한 행사취소로 계약금만 집행)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	30	-	30	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	20	-	20	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	10	-	10	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)

○ 2020. 9. 18. ~ 9. 19. 이틀 간 진행 예정이었으나, 코로나19의 확산에 따라       칠포재즈페스티벌 개최를 취소함

○ 보조금 사전 집행분(시비 20백만원) 정산 완료

- 해외 뮤지션 출연료(2팀) 계약금

□ 향후계획

○ (사)칠포재즈축제위원회와의 회의를 통해 2021년에는 코로나19를 대비한       안전한 칠포재즈페스티벌 개최를 도모하겠음

사업명

영일대해수욕장 비점오염저감시설 설치사업

담당자

환경정책과 남승학(☎270-3113)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영일대해수욕장 주변 지역의 도로측구 오염물 및 관로내 퇴적된 슬러지 등       비점오염원이 함유된 우수의 해수욕장 유입방지

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2022

○ 위 치 : 포항시 북구 두호동 영일대해수욕장 일원

○ 규 모 : 장치(여과)형 시설 2개소(Q=5,400)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,800	-	642	3,436	4,722
국 비	4,400	-	378	1,661	2,361
시 도 비	1,320	-	79	533	708
시군구비	3,080	-	185	1,242	1,653
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본		-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(진도 : 7%)

○ 2019. 07 : 타당성조사 및 기본계획 수립완료

○ 2020. 03 : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2021. 01 : 공법선정

○ 2021. 03 : 신규사업설명회

□ 향후계획

○ 2021. 07 : 기본 및 실시설계용역 준공 및 공사발주

○ 2022. 12 : 공사준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모(당초 : 비점저감시설 4개소 → 현재 : 비점저감시설 2개소)

○ 총사업비(당초 : 113억원 → 현재 : 88억원)

○ 사업기간(당초 : 2020~2021 → 현재 : 2020~2022)

사업명

대한민국 국제해양레저위크

담당자

해양산업과 김혜림(☎270-2464)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대한민국 국제해양레저 축제인 국제해양레저위크의 개최를 통해 해양레저관광        도시로서 포항의 브랜드 가치를 높이고, 해양스포츠 저변확산에 기여하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 매년 7월 ~ 8월중(연례사업)

○ 위 치 : 포항시 일원

○ 규 모 : 해양레저스포츠 체험 및 대회 개최, 해양레저 이벤트, 해양레저 홍보 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,100	600	500	500	500
국 비	800	200	200	200	200
시 도 비	270	-	90	90	90
시군구비	1,030	400	210	210	210
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(2020년도 실적)

○ 해양레저 체험 6,000여명(스쿠버다이빙, 요트, 서핑, 운하체험 등)

○ 해양레저홍보(홍보영상, 안전캠페인, 가이드북 제작)

○ 이벤트존(포토존, 해양레저 VR체험존) 조성 등

□ 향후계획

○ 체험종목 확대 및 키마위크 홍보 강화로 해양도시 포항 이미지 구축

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

사업명

흥해 오도 주상절리 탐방로 조성사업

담당자

관광산업과 정세현(☎270-2884)

□ 사업목적 및 필요성

○ 천혜의 자연자원인 오도 주상절리와 해안경관을 활용한 관광자원화

사업 추진으로 지역경제 및 관광 활성화에 기여하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022~2025년

○ 위 치 : 경상북도 포항시 흥해읍 오도리 일원

○ 규 모 : 주상절리 탐방로(L=500m), 고래보행로, 디지털 아쿠아리움 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  19,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	19,700	-	-	-	19,700
국 비	9,850	-	-	-	9,850
시 도 비	2,955	-	-	-	2,955
시군구비	6,895	-	-	-	6,895
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○  ’19.  9. : 「흥해 오도 주상절리 탐방로 조성」 기본구상 완료

○  ’20.  6. : 경상북도 투자심사 승인(조건부)

○  ’20.  9. : 「흥해 오도 주상절리 탐방로 조성」기본계획 완료

○  ’20. 11. : 포항시 중기지방재정계획 반영

□ 향후계획

○ ‘ 22이후 : 기본 및 실시설계

○ ‘ 23이후 : 시설 공사 착공

사업명

도시재생뉴딜 우리동네살리기, 신흥동 함께 가꾸는 삶터, 모갈숲 안포가도 마을

담당자

도시재생과 장광호 (☎270-3714)

□ 사업목적 및 필요성

○ 일제강점기에 설치된 동해중부선 철도노선으로 약100년간 마을내 공간이 단절된 채, 도심 쇠퇴로 인한 인구 감소 및 주택 등의 급격한 노후화 진행

○ 2016년 마을 내 철도부지가 폐지되고 모갈숲으로 계획됨에 따라 노후주택 정비 및 생활환경 개선 등을 통해 공동체 회복 및 지속가능한 삶터 조성

□ 사업개요

○ 기반시설 및 거점시설 조성 5건 6,310백만원

○ 신흥마을 상생대학 운영 등 7건 1,190백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,500 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	7,500	1,180	325	5,995	-
국 비	4,500	1,016	226	3,258	-
시 도 비	750	-	7	743	-
시군구비	2,250	164	92	1,994	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  20 %)

○거점시설(어울림센터,커뮤니티센터,마을공동작업장) 관련 편입토지 등 보상금 지급

○거점시설(어울림센터,커뮤니티센터,마을공동작업장) 관련 지장물 철거공사

및 폐기물 처리

○거점시설 및 마을주차장, 골목길 조성사업 기본 및 실시설계 용역

○신흥마을 자립형 도시재생CRC육성 1단계 교육

○신흥동 도시재생 성과관리(1차) 용역

□ 향후계획

○거점시설(어울림센터,커뮤니티센터,마을공동작업장) 공사 시행

○마을주차장 및 골목길 조성공사 시행

○거점시설 연계 S/W 사업 시행

□ 사업변경 내역(해당시)

○거점시설 준공 및 연계S/W사업 실행에 따른 전체 사업기간 조정 필요

사업명

연일대교 경관조명 설치공사

담당자

도시재생과 박진현 주무관

□ 사업목적 및 필요성

○ 연일읍 연일대교에 우리시를 대표하는 야경연출 및 설비를 개선하여 밝고 활기찬 품격 있는 도시 이미지 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2022년(5년간)

○ 위 치 : 포항시 남구 연일읍 연일대교 일원

○ 규 모 : 전기공사 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,000	-	-	1,500	1,500
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	-	-	-	1,500	1,500
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

○ 2020. 11. 연일대교 경관조명 설치공사(1차) 기본계획 및 실시설계 준공

○ 2020. 11. 연일대교 경관조명 설치공사(1차) 착공

○ 2021.  6. 연일대교 경관조명 설치공사(1차) 준공

○ 2021.  9. 연일대교 경관조명 설치공사(2차) 실시설계 용역 착공

□ 향후계획

○ 2021. 12. 연일대교 경관조명 설치공사(2차) 실시설계 용역 준공

○ 2022.  1. 연일대교 경관조명 설치공사(2차) 착공

○ 2022.  6. 연일대교 경관조명 설치공사(2차) 준공

사업명

명도학교 다목적강당 신축

담당자

교육청소년과 김나영

(☎270-3063)

□ 사업목적 및 필요성

○ 혹한, 혹서기, 우천, 고농도 미세먼지로부터 안전한 교육환경 구축을       통하여 장애학생들의 재활과 연계한 질 높은 체육활동 및 공정한 교육       기회, 학생들의 건강권확보, 지역주민의 문화・체육 공간 활용

□ 사업개요

○ 기 간 :  2019. 1. ~ 2020. 12.

○ 위 치 :  포항시 북구 소티재로 133, 명도학교

○ 규 모 :  다목적강당(1층)신축 1,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,750	-	550	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	550	-	550	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	2,200	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019.  6. 설계용역 착수

○ 2019. 10. 설계용역 완료

○ 2020.  1. 공사착공

○ 2020. 12. 공사준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

사업명

장량초등학교 다목적강당 및 급식소증축

담당자

교육청소년과 김나영

(☎270-3063)

□ 사업목적 및 필요성

○ 학생들 교육활동공간 확보를 통한 교육환경개선 및 지역주민의 문화・체육        공간 활용, 학교 급식환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 :  2019. 7. ~ 2021. 1.

○ 위 치 :  포항시 북구 삼흥로100번길 9 장량초등학교

○ 규 모 :  1,783㎡(1층 급식소 814㎡, 2층 다목적강당 969㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,327백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,327	-	1,065	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,065	-	1,065	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	4,262	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019. 7. 설계용역 착수

○ 2020. 1. 설계용역 완료

○ 2020. 3. 공사착공

○ 2021. 1. 공사준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

사업명

구정초등학교 다목적강당 및 급식소증축

담당자

교육청소년과 김나영

(☎270-3063)

□ 사업목적 및 필요성

○ 학생들 교육활동공간 확보를 통한 교육환경개선 및 지역주민의 문화・체육        공간 활용, 학교 급식환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 :  2019. 7. ~ 2021. 1.

○ 위 치 :  포항시 남구 오천읍 구정길 11, 구정초등학교

○ 규 모 :  1,563㎡(1층 급식소 594㎡, 2층 다목적강당 969㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,894백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,894	-	979	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	979	-	979	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	3,915	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019. 7. 설계용역 착수

○ 2020. 2. 설계용역 완료

○ 2020. 4. 공사착공

○ 2021. 1. 공사준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

사업명

오천 원동11근린공원 리모델링

담당자

공원과 박가혜 (☎270-3226)

□ 사업목적 및 필요성

○ 근린공원 재정비를 통하여 아름답고 쾌적한 공원으로 재조성하여 지역주민들에게 실용적인 여가 문화생활 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2021.

○ 위 치 : 포항시 남구 오천읍 원리 979번지 일원

○ 규 모 : 공원 리모델링 1식(A=10,104㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,100	1,600	500	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,600	1,100	500	-	-
특별교부세	500	500	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공사완료 100%)

○ 2018.04.25. : 기본계획 및 실시설계 용역 착수

○ 2018.08.07. : 주민설명회

○ 2018.09. ~ 12. : 공원·경관 공동위원회 심의(2회)

○ 2019.01.28. : 기본계획 수립 및 실시설계 완료

○ 2019.09.02. : 공원조성계획 변경

○ 2020.02.17. ~ 2021.02.15. : 공원조성 공사 추진

□ 향후계획

○ 공원 지속적 유지관리 및 쾌적한 녹지환경 제공

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

상도근린공원 조성

담당자

공원과 박가혜 (☎270-3226)

□ 사업목적 및 필요성

○ 형산강과 연계한 녹색생태공원 조성으로 도심 내 새로운 녹지축을 형성하고 시민들에게 실용적인 여가 문화생활 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. ~ 2026.

○ 위 치 : 포항시 남구 상도동 175-1번지 일원

○ 규 모 : 공원 조성 1식 (A=43,790㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	15,500	4,000	-	-	11,500
지 방 채	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	15,500	4,000	-	-	11,500
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 토지보상 25%)

○ 2006.01.16. : 공원결정 고시 (경북고시 제2006-24호)

뱃머리마을 종합개발사업으로 공원조성 기본계획을 수립하여 사업 추진 (도시건설사업소 업무시설과)

○ 2006.03.13. : 공원조성계획 결정 및 지형도면승인 고시 (포항시고시 제2006-221호)

○ 2006. ~ 2020. : 토지보상 중 (27필지, A=10,790㎡, 40억원 보상완료)

○ 2020.07.07. : 도시계획시설 결정(변경) - 포항시고시 제2020-166호

보훈회관 건립에 따른 공원면적 변경(49,605㎡ ⇒ 43,790㎡ / 감 5,815㎡)

○ 2020.07.15. : 공원조성계획 결정(변경) 및 지형도면승인 고시(포항시고시 제2020-172호)

※ 총 보상대상 〔94필지, 43,790㎡〕 중 보상완료 25% 〔27필지, 10,790㎡〕

□ 향후계획

○ 2022. ~ 2026. : 토지보상 및 공원조성사업 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

흥해시장 주차환경 개선사업

담당자

일자리경제노동과 김일동

(☎270-2434)

□ 사업목적 및 필요성

○ 흥해시장을 찾는 이용객의 주차 불편사항 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2022

○ 위 치 : 북구 흥해읍 성내리 48번지 외 35필지

○ 규 모 : 주차구획 240면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	12,500	28	4,398	4,602	3,472
국 비	7,500	28	2,668	2,762	2,042
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,000	0	1,730	1,840	1,430
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 보상추진 (36필지 중 보상완료 18필지, 보상률 50%)

○ 보상 완료된 지장물 철거공사 시행(21. 3 ~ )

□ 향후계획

○ 22.  1월 : 공사 착공

○ 22. 12월 : 준공 및 개소

□ 사업변경 내역

구분	당초	변경	비고
사업규모	대지 4,832㎡/ 주차대수 240대	대지 6,804㎡ / 주차대수 240대
사업기간	2019 ~ 2020년	2019년 ~ 2022년

사업명

중앙상가 주차환경 개선사업

담당자

일자리경제노동과 김일동

(☎270-2434)

□ 사업목적 및 필요성

○ 중앙상가를 찾는 이용객의 주차 불편사항 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2022

○ 위 치 : 북구 신흥동 813-7번지 외 3필지

○ 규 모 : 3개층, 연면적 4,140.84㎡, 주차구획 120면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,000	-	3,124	1,200	3,676
국 비	4,800	-	1,874	720	2,206
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,200	-	1,250	480	1,470
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 설계용역 추진(10%)

□ 향후계획

○ 21. 10월 : 공사착공

○ 22.  6월 : 준공 및 개소

□ 사업변경 내역

구분	당초	변경	비고
사업규모	대지 2,073㎡/ 주차대수 150대	대지 1,805㎡ / 주차대수 120대
사업기간	2020년	2020년 ~ 2022년

사업명

영일만4 일반산업단지 원형지 조성

담당자

민자사업추진단

배병휴(☎270-3813)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영일만4 일반산업단지 조성으로 기업유치, 일자리 창출 등 경제적 유발

효과 및 지역경제 활성화로 지속발전 가능한 포항 발판 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~2021. 12.s

○ 위 치 : 북구 흥해읍 용한리 일원

○ 규 모 : 편입토지  보상(A=120,000㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 32,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	32,300	18,000	4,500	9,800	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	32,300	18,000	4,500	9,800	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2020.6.~12. : 보상협의

○ 2020.12.31. : 수용재결 신청(경상북도 지방토지수용위원회)

□ 향후계획

○ 2021. 3. : 보상 완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

10-2. 지방채 발행사업

우리 포항시에서 ‘20년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
포항장애인형 국민체육센터건립	18,500	3,000	5,000	-	10,500	-	3,000	65%
포항융합기술산업지구용수공급시설 설치	24,579	2,000	8,664	2,599	4,065	7,251	2,000	35%
세포막단백질연구소 구축	45,800	5,000	22,900	10,650	7,250	-	5,000	95%
배터리 종합관리센터 건립	10,700	7,000	-	2,700	1,000	-	7,000	92%
화물자동차 공영차고지 건립공사	24,430	5,000	-	7,450	4,580	7,400	5,000	20%
영일만4 일반산업단지 곡강IC연결도로 개설공사	24,800	10,000	-	-	14,800	-	10,000	82%

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2020년에 추진한 사업

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

포항 장애인형 국민체육센터 건립

담당자

새마을체육과 윤현광   (☎270-2804)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장애인들이 불편함 없이 생활체육을 할 수 있는 공간을 마련하여 건전한 사회적

참여를 유도

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 8월 ~ 2022. 2월

○ 위 치 : 포항시 북구 여남동 267-1번지 일원

○ 규 모 : 체육센터 건립(지상 3층, 연면적 5,665㎥)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	18,500	8,000	-	10,500	-
지 방 채	3,000	3,000	-	-	-
국 비	5,000	5,000	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	10,500	-	-	10,500	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

◦ 2017. 03월 : 지방재정 투자 심사(변경, 155억)

◦ 2017. 04월 : 국민체육진흥기금 지원사업 공모 선정

◦ 2018. 05월 : 건축설계 공모

◦ 2018. 08월 : 실시설계용역

◦ 2019. 02월 : 설계 경제성검토 용역(VE)

◦ 2019. 08월 : 건설기술심의 및 중앙투자심사

◦ 2019. 10월 : 실시설계용역 준공

◦ 2019. 12월 : 공사 착공

□ 향후계획

◦ 2022. 02월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

포항융합기술산업지구 용수공급시설 설치공사

담당자

투자기업지원과 김한호

(☎270-2398)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경제자유구역의 기초 인프라 시설 설치로 지역균형발전 및 지역 일자리 창출 촉진

○ 포항융합기술산업지구 조성사업(`08~`22) 완공 시기를 감안하여 용수공급시설 건설사업 조속 추진 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017~2022년(6년간)

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 일원

○ 규 모 : 포항융합기술산업지구 생활 및 공업용수 공급을 위한 관로 설치

생활용수 D350~800mm L=8.0km, 공업용수 D250~300mm L=14.0km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  24,579백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계		9,400	3,800	7,625	3,754
지 방 채	2,000	2,000	-	-	-
국 비	8,664	4,700	1,900	2,000	64
시 도 비	2,599	1,410	570	600	19
시군구비	4,065	1,290	1,330	1,400	45
기 타	7,251	-	-	3,625	3,626

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35.29%)

○ ΄19.  1. : 실시설계 완료

○ ΄19. 11. : 총사업비 조정(1차) 승인

○ ΄20.  4. : 공사 발주

□ 향후계획

○΄22년 이후 : 용수공급시설 설치공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 21년, 22년 원인자 부담금 징수 불가 시 시비우선투입 필요

사업명

세포막단백질연구소 구축

담당자

미래전략산업과 이송이

(☎270-3568)

□ 사업목적 및 필요성

○ 4세대방사광가속기 기반 세포막단백질 구조규명을 통한 신약개발로 국제적 경쟁력 확보

○ 글로벌 신약시장 주도권 확보를 위한 국가 차원의 세포막단백질 구조 분석 연구 및 기반 시설 건립 시급

□ 사업개요

○ 기    간 : 2019 ~ 2021

○ 위    치 : 포항시 북구 흥해읍 이인리 포항융합기술산업지구 I6B 2L

○ 규    모 : 지하1층/지상4층(연면적 6,107.42㎡, 부지면적 7,512㎡)

○ 사 업 비 : 458억원(국비 229, 도비 106.5, 시비 122.5)

※ 건축비 168억원[토지매입비 16억(시비) 포함]

○ 주관기관 : 경상북도, 포항시, 포항공과대학교

○ 주요내용 : 세포막단백질연구소 구축

- 연구장비(전액국비), 실험실, 연구실, 세미나실, 자료실, 사무공간 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 45,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	45,800	12,250	16,311	7,100	10,139
지 방 채	5,000	-	5,000	-	-
국 비	22,900	5,950	4,611	5,600	6,739
시 도 비	10,650	2,350	5,850	750	1,700
시군구비	7,250	3,950	850	750	1,700
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2019. 1. 공유재산관리계획 의결(부지매입)

○ 2019. 2. 세포막단백질연구소 사업추진단 출범식 및 상호협력(MOU) 체결

○ 2019. 5. 가속기기반 신약개발 지원사업 공모 선정(포스텍)

○ 2019. 9. 기본계획 및 실시설계용역 시행

○ 2019. 12. 부지매입

○ 2020. 3. 세포막단백질연구소 공사 착공

○ 2021. 4. 세포막단백질연구소 준공

□ 향후계획

○ 2021. 8. 공사 준공 후 인증절차

사업명

배터리 종합관리센터 건립

담당자

투자기업지원과 서연주

(☎270-2189)

□ 사업목적 및 필요성

○ 배터리 규제자유특구 활성화를 위한 거점 센터 건립 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 12. ~ 2021. 9.

○ 위 치 : 남구 동해면 블루밸리 국가산단(공당리 1025-3)

○ 규 모 : 연면적 3,549㎡(지상 3층, 2개동), 부지면적 8,050㎡,

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	10,700	-	3,217	7,483	-
지 방 채	7,000	-	2,600	4,400	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,700	-	480	2,220	-
시군구비	1,000	-	137	863	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 91.85%)

○ 2019.  7. 24. : 차세대 배터리 리사이클링 규제자유특구 지정

○ 2019. 11. 11. : 공유재산 심의회 심의

○ 2019. 11. 25. : 공유재산 관리계획(안) 가결(포항시 의회)

○ 2020.  2.  4. : 토지 매입(1,562백만원, 8,050㎡)

○ 2020.  2. 24. : 공공건축 사업계획 사전검토 의견 통지(국토부→포항시)

○ 2020.  4. 13. : 건축설계 공모 공고(조달청)

○ 2020.  8.  3. : 이차전지종합관리센터 기본설계 확정

○ 2020. 12.  4. : 착공

○ 2021.  4. 27. : 포항시 이차전지산업 육성을 위한 지원시설 설치 및 운영 조례 제정

○ 2021.  6. 29. : 이차전지종합관리센터 관리·운영 위탁 동의안 가결(포항시 의회)

□ 향후계획

○ 2021.  9. 17. : 이차전지 종합관리센터 준공 예정

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

화물자동차 공영차고지 조성

담당자

대중교통과 박지은

(☎270-3666)

□ 사업목적 및 필요성

○ 접근성 용이·저렴한 비용·다양한 편의시설로 인해 많은 운전자들이 이용       하고 싶어하는 차고지 조성으로 불법 밤샘주차 개선

○ 운전자에게 쾌적하고 안락한 휴식공간 제공으로 안전사고 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 포항시 남구 대송면 제내리 540번지 일원

○ 규 모 : 부지면적 60,105㎡

(주차대수: 484대, 부대시설: 주유소, 휴게실, 식당 등 편의시설)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 24,430백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	24,430	500	6,000	3,800	14,130
지 방 채	5,000	-	5,000	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	7,450	-	500	2,500	4,450
시군구비	4,580	500	500	1,300	2,280
기 타	7,400	-	-	-	7,400

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2018. 12. : 타당성 조사 및 기본계획수립용역 완료

○ 2019. 01. : 도시관리계획 결정(변경) 용역 시행

○ 2020. 06. : 기초토목공사 실시설계 용역 시행

○ 2020. 07. : 민간투자사업자 공모 및 우선협상대상자 지정

○ 2020. 12. : 사업부지 농어촌공사 계약완료

□ 향후계획

○ 2021. 10. : 토목공사 착공

○ 2022. 10. : 건축공사 착공

○ 2023. 12. : 공영차고지 준공 및 조례개정, 운영

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

영일만4 일반산업단지 곡강IC 연결도로 개설공사

담당자

도시계획과 배병휴

(☎270-3813)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영일만4 산단 기반 구축으로 물류비용 절감 및 기업 유치 등 산단 활성화

○ 장량동과 인근지역 출·퇴근 교통난의 근본적인 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 2. ~ 2021. 4.

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 곡강리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=980m, B=20~30m, IC 1개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 24,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	24,800	21,800	3,000	-	-
지 방 채	10,000	7,000	3,000	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	14,800	14,800	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 82%)

○ 2017.  7. 28 : 곡강IC 연결도로 실시설계 착공

○ 2017.  9. 30 : 보상계획 공고

○ 2017. 11. 21 : 계약심의위원회 개최

○ 2017. 12. : 공사 발주 및 편입토지 보상 시행

○ 2018.  2. : 공사 착공(2019. 1. : 2차분 착공)

○ 2020.  3. : 1차분 공사 준공

□ 향후계획

○ 2021.4. : 공사 준공

□ 사업변경 내역: 해당없음

10-3. 민간투자사업

우리 포항시에서 ‘20년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총 사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2020년	2021년	2022년 이후
BTL	07 하수관로 정비사업	포항 맑은물㈜	114,700	78,098	12,688	14,007	175,364	2014.04 ~ 2034.04
BTL	09 하수관로 정비사업	포항 맑은물길㈜	68,300	38,859	6,552	7,232	92,400	2014.07 ~ 2034.06
BTL	10 하수관로 정비사업	청정포항(주)	77,800	26,688	7,132	7,211	105,585	2016.04 ~ 2036.03
BTL	13 하수관로 정비사업	포항 새물길㈜	55,000	5,115	4,975	5,037	88,285	2018.10 ~ 2038.09

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2020년까지는 집행액(결산기준), 2021년 이후는 추정액

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

사업명

07년 포항 하수관로정비

담당자

하수도과 배순열(☎270-5424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우·오수를 분리하여 연안오염 방지 및 하수처리장 효율성 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2009.11.13 ~ 2014.04.12

○ 위치 : 포항시 용흥동, 중앙동, 학산동, 죽도동, 양학동, 대이동, 송도동 일원    ○ 민간사업자 : 포항맑은물(주)

○ 총사업비 : 114,700백만원

○ 사업규모 : 하수관로 101㎞, 배수설비 9,780가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	280,157	78,098	12,688	14,007	175,364
국 비	177,784	50,638	8,154	8,958	110,034
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	102,373	27,460	4,534	5,049	65,330
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계

○ 운영 중

○ 운영기간 : 2014. 4. 13 ~ 2034. 4. 12 (20년간)

□ 향후계획

○ 2034년까지 민간사업자(운영사)에서 운영 및 유지관리

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

09년 포항 하수관로정비

담당자

하수도과 배순열(☎270-5424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우·오수를 분리하여 연안오염 방지 및 하수처리장 효율성 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2011.1.1 ~ 2014.06.30

○ 위치 : 포항시 죽도동, 용흥동, 대이동 일원

○ 민간사업자 : 포항맑은물길(주)

○ 총사업비 : 68,300백만원

○ 사업규모 : 하수관로 39㎞, 배수설비 3,083가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	145,043	38,859	6,552	7,232	92,400
국 비	90,779	24,928	4,160	4,570	57,121
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	54,264	13,931	2,392	2,662	35,279
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계

○ 운영 중

○ 운영기간 : 2014. 7. 1 ~ 2034. 6. 30 (20년간)

□ 향후계획

○ 2034년까지 민간사업자(운영사)에서 운영 및 유지관리

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

10년 포항 하수관로정비

담당자

하수도과 배순열(☎270-5424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우·오수를 분리하여 연안오염 방지 및 하수처리장 효율성 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2012.6.1 ~ 2016.03.31

○ 위치 : 포항시 대잠동, 죽도동, 상대동, 해도동 일원

○ 민간사업자 : 청정포항(주)

○ 총사업비 : 77,800백만원

○ 사업규모 : 하수관로 48㎞, 배수설비 4,950가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	146,616	26,688	7,132	7,211	105,585
국 비	90,322	16,935	4,516	4,516	64,355
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	56,294	9,753	2,616	2,695	41,230
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영 중

○ 운영기간 : 2016.4.1. ~ 2036.3.31.(20년간)

□ 향후계획

○ 2036년까지 민간사업자(운영사)에서 운영 및 유지관리

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

13년 포항 하수관로정비

담당자

하수도과 배순열(☎270-5424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우·오수를 분리하여 연안오염 방지 및 하수처리장 효율성 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2015.7.1 ~ 2018.09.30

○ 위치 : 포항시 상대동, 해도동 일원

○ 민간사업자 : 포항새물길(주)

○ 총사업비 : 55,000백만원

○ 사업규모 : 하수관로 53㎞, 배수설비 4,412가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	103,412	5,115	4,975	5,037	88,285
국 비	59,303	2,976	3,004	3,004	50,319
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	44,079	2,139	1,971	2,003	37,966
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 시공 중

○ 시공기간 : 2015. 7. 1 ~ 2018. 9. 30 (39개월간)

□ 향후계획

○ 2018년 9월 준공

○ 2038년까지 민간사업자(운영사)에서 운영 및 유지관리

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음