109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 포항시에서 ‘21년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후
연일전통시장 공영주차장 조성사업	3,950	-	-	3,500	450	2023	2021	50
문화도시 조성사업	19,600	2,571	2,116	3,000	10,828.6	2024	2020	30
석곡기념관 건립	4,000	-	148	3,852	-	2022	2020	3
미세먼지차단숲 조성사업	5,000	300	4,700	-	-	2022	2020	80
조박저수지 둘레길 조성사업	3,000	5	-	20	5	2022	2021	20
선도산림 경영단지 조성	7,500	-	500	780	6,220	2030	2021	10
보경사군립공원 내 자연학습장 조성	6,321	3,321	1,000	1,600	400	2023	2021	80
북구보건소 이전신축	25,630	-	450	6,248	18,932	2024	2021	30
연일형산초 다목적강당 증축	3,347	-	669	-	-	2023	2020	50
상도중학교 다목적강당 증축	3,347	-	669	-	-	2022	2020	70
포항해양과학고 마이스터고전환 기숙사 증축	8,600	-	1,000	-	-	2024	2020	30
아동복지시설 기능보강사업<보조>	2,426	-	-	2,426	-	2022	2021	70
방석리항 어촌뉴딜300사업	8,400	-	1,680	3,360	3,360	2023	2021	30
스마트양식 클러스터 조성사업	40,000	-	1,500	8,000	30,500	2025	2021	10
신광면 복지회관 목욕탕 신축	3,000	-	700	2,300	-	2022.12	2021	15
신광~흥해 매산리간 도로(시도7호) 확포장	21,200	11,900	500	1,500	7,300	2026	2017	58
양학동~흥해 대련간 도시계획도로 (중1-55) 개설	30,000	400	200	200	29,200	2025	2017	3
여남동 도시계획도로 (소2-43)개설	2,900	1,200	700	200	800	2025	2021	23
기계 현내리 도시계획도로 (중2-78)개설	3,800	3,500	300	-	-	2021	2013 2020	100
죽장 현내~두마리 (리도201) 도로확포장	3,330	1,830	300	600	600	2024	2017	70
흥해 학천리 도시계획도로 (소2-3) 개설	4,500	2,400	700	200	1200	2023	2014 2015 2020	70
연일 생지리 도시계획도로 (중2-91) 개설	2,350	1,600	100	650	-	22	21	85
연일 택전리 도시계획도로 (중1-16) 개설	2,900	50	350	900	1,600	25	21	20
대송 대각리 도시계획도로 (중1-171) 개설	5,600	1,200	2,000	1,000	1,400	2023	18	30
국민안전로봇 프로젝트	67,217	62,792	3,534	891		2022	2017	90
수출주력형 에너지강관산업 경쟁력 강화 기반구축	20,228	16,462	3,766			2021	2017	100
수중건설로봇 실용화사업	31,000	14,320	12,100	4,580		2022	2019	90
재난현장활용 로봇 기술개발	8,040	4,160	2,320	1,560		2022	2019	80
세포막단백질 연구소건립사업	45,800	28,561	7,100	5,489	4,650	2023	2019	90
철강산업재도약기술개발사업 (포항거점센터)	20,650		6,550	4,295	9,805	2025	2020	20
강소연구개발 특구 육성	19,835	6,335	4,800	2,900	5,800	2024	2021	50
마이크로바이옴 인프라 기업활용 지원	4,075	0	650	725	2,700	2027	2021	10
식물백신 기업지원시설 건립사업	17,700	15,810	1,890	0	0	2022	2018	100
포항 지열발전 부지매입	5,066	-	4,726	-	-	2021. 5.	2020	100
북구보건소 및 재난트라우마센터 통합건립	49,700	8,300	724	11,108	29,568	2024	2021	10
포항 철강산업단지 완충저류시설 설치사업	43,187	13,568	7,987	21,632		2022	2018	69
구무천 생태하천복원사업	28,046	3,831	6,542	6,927	10,746	2023	2021	25
영일대해수욕장 비점오염저감 시설 사업	10,606	642	288	5,626	4,050	2023	2020	15
생활체육인 전용 체육파크 조성	19,700	900	-	1,200	17,600	2024.12	2021	1
송도 생활밀착형 국민체육센터·행정복지센터 건립	14,500	6,000	3,876	3,500	5,000	2023	2019 (당초) 2021 (재심사)	15

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2021년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

연일전통시장 공영주차장 조성사업

담당자

일자리경제노동과 임치완

(☎270-2436)

□ 사업목적 및 필요성

○ 포항시 남구권 전통시장인 연일전통시장은 부추 특화시장과 골목형 시장 육성사업으로 전통시장 활성화를 위한 다양한 정책을 추진하고 있으나 주차장 부족 및 고객 접근성이 떨어져 상가 활성화에 한계가 있어 주차환경개선사업의 일환으로 추진 중인 「연일전통시장 공영주차장 조성사업」으로 전통시장 활성화 및 소상공인 경제활동에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 01월 ～  2023년 12월(2년)

○ 위 치 : 경북 포항시 남구 연일읍 생지리 196-2번지

○ 규 모 : 부지면적 2,637㎡, 주차구획 90면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,950백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,950			3,500	450
국 비	2,370			2,100	270
시 도 비
시군구비	1,580			1,400	180
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 2021. 07. 〜 09. 중기부 공모사업(주차환경개선사업) 신청 및 선정

○ 2021. 09. 중기지방재정계획 반영

○ 2022. 01. 토지 등 보상 시행

□ 향후계획

○ 2023. 02. 기본 및 실시설계 실시

○ 2023. 06. 공사 착공

○ 2023. 12. 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

문화도시 조성사업

담당자

문화예술과 김진향(☎270-2263)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 시민의 품격과 행복한 삶을 위한 문화도시 포항 조성

◦ 시민 누구나 문화예술을 즐기고 배우는 문화생태계의 기본 조성

* 2019년 12월 법정 문화도시로 문화체육관광부에서 최종 선정

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2024년(5년간)

○ 위 치 : 포항시 전역(포항운하, 동빈내항, 꿈틀로 등)

○ 규 모 : 19,600백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,687	2,571	2,116	3,000	10,828.6
국 비	2343.5	1,285.5	1,058	1,500	5,414.3
시 도 비	702.5	385.5	317	450	1,624.3
시군구비	1641	900	741	1,050	3,790
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 시민주도형 도시문화 거버넌스 구축

○ 문화거점공간 조성

○ 특성화 계획 및 프로그램 운영

○ 도시재생뉴딜사업과 연계협력 구축

□ 향후계획

○ 지속가능한 문화도시 조성을 위한 중장기계획 수립

○ 권역별 문화거검 확대 및 문화적 도시재생

사업명

석곡기념관 건립

담당자

문화예술과 손근아(☎270-2553)

□ 사업목적 및 필요성

○ 석곡 이규준 선생의 생애, 철학, 활동 등 근거 문헌 발굴과 보급을       통해 석곡 이규준을 재조명 함

○ 포항지역의 전통문화를 연계하고 전통과학 관련 문화 콘텐츠 확충을     위한 학술연구 및 편찬자료 전시 공간을 마련하여 관광자원으로 활용     함으로서 지역 경제 활성화 도모 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. ~ 2022. (2년)

○ 위 치 : 남구 동해면 도구리 607번지 외 3필지

○ 규 모 : 연면적 1,370㎡, 지상2층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,000		148	3,852
국 비
시 도 비	2,320		86	2,234
시군구비	1,680		62	1,618
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

○ 2021. 3. 공공건축물 심의

○ 2021. 4. 건축심의

○ 2021. 6. 설계공모

○ 2021. 9. 실시설계

□ 향후계획

○ 2022. 3. 착공 및 준공

사업명

미세먼지차단숲 조성사업

담당자

그린웨이추진과

윤태휘(☎270-5593)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산업단지 및 공업지역으로부터 유입되는 오염원(미세먼지, 비점오염원 등)이 차단숲 조성을 통하여 인근 주거지역으로 확산되지 않도록 차단·저감함으로써 지역주민들의 삶의 질 및 주거환경 향상

○ 차단숲의 미세먼지 흡수·흡착 기능과 도심열섬현상 완화 기능을 적극 활용하여 도심지내 녹색 허파 역할 기대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 포항시 남구 오천읍, 연일읍, 청림동 일원(공업지역 및 산업단지 인근)

○ 규 모 : 미세먼지 차단숲 조성 5.0ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :    5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,000	300	4,700
국 비	236	150	2,350
시 도 비	70	45	705
시군구비	164	105	1,645
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2020. 11. : 지방재정 투자심사 완료

○ 2021. 01. : 미세먼지 차단숲 실시설계 용역

○ 2021. 02. : 미세먼지 차단숲 조성사업 착공

□ 향후계획

○ 2022. 10. : 미세먼지 차단숲 조성사업 준공 예정

사업명

조박저수지 둘레길 조성사업

담당자

그린웨이추진과

이종필(☎270-3024)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2020년 11월 조박지 둘레길의 일부구간(L=1.6km)이 조성된 후 하루 약

200~300명의 시민 및 관광객들이 찾는 둘레길이 됨에 따라 수변공간을
통하여 원점회귀할 수 있도록 완전 개통하여 관광명소로 자리매김하여

힐링 및 휴식공간 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 포항시 남구 연일읍 인주리, 대송면 남성리 일원

○ 규 모 : 둘레길 조성 L=3.0km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,000 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,000	500		2,000	500
국 비
시 도 비	550	150		400
시군구비	2,450	350		1,600	500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  20%)

○ 2020. 06. ~ 2020. 11. : 둘레길(L=1.6km)조성

□ 향후계획

○ 2022. 01. ~ 04. : 실시설계 용역

○ 2022. 06. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

선도산림경영단지 조성

담당자

그린웨이추진과

서현정(☎270-2403)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소요규모의 영세성과 임업의 장기성 극복을 위해 경영면적을 규모화·       집단화를 하고 투자 집중을 통해 산림경영 성공모델을 개발·확산하여        사유림 경영 활성화를 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2030. 12.(10년간)

○ 위 치 : 포항시 북구 죽장면 상사리, 석계리 일원

○ 규 모 : 668ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,392		490	767	6135
국 비	5,174		343	537	4,295
시 도 비	665		44	69	552
시군구비	1,552		103	161	1,288
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2021. 03. : 경상북도 투자심사 완료

○ 2021. 07. : 기본계획용역 및 임도설계용역 착수

○ 2022. 01. : 산림경영기반시설(임도) 조성사업 착공

□ 향후계획

○ ~ 2030. : 통합사업실행(조림·숲가꾸기·임도 등)

사업명

보경사군립공원 내 자연학습장 조성

담당자

공원과 박가혜 (☎270-3226)

□ 사업목적 및 필요성

○ 보경사 군립공원 내 자연학습장을 조성하여 군립공원을 찾는 다양한 계층의 이용객에게 산책 및 휴게공간을 제공하고 어린이들에게 학습공간을 제공하는 자연친화적인 휴식 공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. ~ 2023.

○ 위 치 : 포항시 북구 송라면 중산리 574-4번지 일원(보경사군립공원 내)

○ 규 모 : 자연학습장 조성 1식(A=41,901㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,321백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,321	3,321	1,000	1,600
국 비
시 도 비	800			800
시군구비	5,521	3,321	1,000	800	400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계 80%)

◦ 2013. 1. ~ 2021. 12. : 토지보상실시

※ 총 보상대상 (32필지, 34,341㎡), 기보상 (26필지(지분),31,534㎡)

→ 보상중〔6필지, 2,807㎡〕(1인 소유)

◦ 2021. 3. ~ 현재 : 실시설계용역

□ 향후계획

○ 2022. 8 : 실시설계 완료

○ 2022. 9 : 토지보상 및 공사 발주

○ 2022. 9 ~ 2023. 12 : 자연학습장 조성공사 추진

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

북구보건소 이전신축

담당자

북구보건소 정미영(☎ 270-4113)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도농간 보건의료환경의 불균형 해소 및 지진피해지역 도심 활성화

○ 감염병 대응 등 미래를 대비한 스마트 보건행정 인프라 구축

○ 현 청사의 노후화 진행 및 지진 피해로 인한 건물의 구조적 안정성 우려

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2024. 6.

○ 위 치 : 북구 흥해읍 마산리 62번지(구. 대성아파트 A~C동)

○ 규 모 : 지하 2층 ~ 지상 6층

대지 4,469㎡, 건축연면적 13,800㎡(보건소8,300㎡, 트라우마센터 5,500㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  25,630백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	25,630		450	6,248	18,932
국 비	4,104			4,104
시 도 비	1,026			1,026
시군구비	20,500		450	1,118	18,932
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황 (공정률 : 30%)

○ 2020. 10. : 공유재산 심의

○ 2020. 12. ~ 2021. 3. : 지방재정투자심사(1차 경상북도, 2차 행정안전부)

○ 2021. 3. ~ 2021. 6. : 건축설계 공모

○ 2021. 7. ~ 2022. 7. : 기본 및 실시설계

□ 향후계획

○ 2022. 8. ~ 2024. 6. : 공사

○ 2024. 7. : 준공 및 개소식

사업명

연일형산초등학교 다목적강당 증축

담당자

교육청소년과 김나영

(☎270-3063)

□ 사업목적 및 필요성

○ 혹한, 혹서기, 우천, 고농도 미세먼지로부터 안전한 교육환경 구축을       통하여  학생들의 건강권확보, 지역주민의 문화・체육 공간 활용

□ 사업개요

○ 기 간 :  2021. 10. ~ 2023. 5.

○ 위 치 :  포항시 남구 연일읍 형산강남로 262

○ 규 모 :  다목적강당(1층)신축 969㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,347백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,347		669
국 비
시 도 비
시군구비	669		669
지 방 채
민간자본
기 타	2,678

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2021. 11. 설계용역 착수

○ 2022.  5. 설계용역 완료

○ 2022.  7. 공사착공

□ 향후계획

○ 2023.  5. 공사준공

□ 사업변경 내역(해당시)

사업명

상도중학교 다목적강당 증축

담당자

교육청소년과 김나영

(☎270-3063)

□ 사업목적 및 필요성

○ 혹한, 혹서기, 우천, 고농도 미세먼지로부터 안전한 교육환경 구축을       통하여  학생들의 건강권확보, 지역주민의 문화・체육 공간 활용

□ 사업개요

○ 기 간 :  2021. 2. ~ 2022. 11.

○ 위 치 :  포항시 남구 상공로 92번길 16

○ 규 모 :  다목적강당(1층)신축 969㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,347백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,347		669
국 비
시 도 비
시군구비	669		669
지 방 채
민간자본
기 타	2,678

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2021.  2. 설계용역 착수

○ 2021. 10. 설계용역 완료

○ 2022.  2. 공사착공

□ 향후계획

○ 2022. 11. 공사준공

□ 사업변경 내역(해당시)

사업명

포항해양과학고 마이스터고전환

기숙사 증축

담당자

교육청소년과 김나영

(☎270-3063)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산업수요 맞춤형 고등학교인 스마트 해양 수산분야 전문 마이스터고

전환을 위한 기숙사 증축

□ 사업개요

○ 기 간 :  2021. 3. ~ 2024. 2.

○ 위 치 :  포항시 북구 여남포길21번길 18

○ 규 모 :  2,527㎡(지하1층, 지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  8,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	8,600		8,600
국 비
시 도 비
시군구비	1,000		1,000
지 방 채
민간자본
기 타	7,600		7,600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2021.  5. 마이스터고 전환 확정(교육부)

○ 2022.  1. 설계용역 착수

○ 2022.  6. 설계용역 완료

○ 2022.  7. 시설공사 입찰

□ 향후계획

○ 2022.  9. 공사착공

○ 2024.  9. 공사준공

□ 사업변경 내역(해당시)

사업명

아동복지시설 기능보강사업<보조>

담당자

교육청소년과 박기용(☎270-5215)

□ 사업목적 및 필요성

○ 학대피해로 인하여 즉각 분리, 응급조치 사례 증가 및 보호자의 부재 등으로 요보호 아동은 증가하나 아동을 보호할 수 있는 시설부족

○ 일시보호시설을 건립하여 보호 및 돌봄이 필요한 위기 아동을 신속하게 보호하기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 10. 1. ~ 2022. 9. 30.

○ 위 치 : 경상북도 포항시 북구 흥해읍 해안로 1499

○ 규 모 : 연면적 1,232㎡(370평/지하1층, 지상4층)

- 지하(251.46㎡) : 식당, 주방, 창고(주방), 기계실

- 1층(269.46㎡) : 사무실, 상담실, 양호실, 심리치료실, 원장실, 문서고

- 2층(269.46㎡) : 생활실 2세대, 도서실

- 3층(269.46㎡) : 생활실 2세대, 프로그램실

- 4층(172.98㎡) : 생활실 1세대, 강당

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,426백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,426
기 금	561	0	0	561
시 도 비	168	0	0	168
시군구비	393	0	0	393
지 방 채
민간자본	1,304	0	0	1,304
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ ’21. 6월 : 사회복지법인(포항선린재단) 건물 자부담 매입 및 보건복지부 기능보강사업비 신청

○ ’21.  8월 : 기능보강사업대상 확정

○ ’21. 10월 : 일시보호시설 건물 구조안전진단 실시

○ ’21. 11월 : 일시보호시설 설치 관련 포항시 자체투자 심사 실시

○ ’21. 11. 18일 : 국‧도비 예산 지원

○ ’21. 12월 : 구조안전진단 결과

○ ’22. 1월~3월 : 건축 설계 실시(설계도 작성 등)

○ ’22. 2월 : 보조금 신청(법인→포항시)

○ ’22. 3월 : 일상감사 요청(건축, 소방)

○ ’22. 3월 : 건축․대수선․용도변경 신고(新건축신고)

○ ’22. 3월 : 일상감사 결과 통보(포항시→법인)

○ ’22. 4월 : 일상감사 지적사항 조치결과 통보(법인→포항시)

○ ’22. 4월 : 일시보호시설 공사 입찰

○ ’22. 5월 : 낙찰 업체 계약

○ ’22. 6월 : 선급금(보조금) 지급

□ 향후계획

○ ’22. 7월 : 노무비(보조금) 지급

○ ’22. 8월 : 일시보호시설 공사 시공 및 장비(기자재) 구입

○ ’22. 8월 : 시설장 및 직원 채용

○ ’22. 9월 : 시설 설치 허가 및 일시보호시설 개소

□ 사업변경 내역(해당 시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

방석리항 어촌뉴딜300사업

담당자

수산진흥과 시설7 전지환

(☎270-2763)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어항 및 항․포구를 중심으로 인접한 배후 어촌마을까지 포함한 통합개발로 사회․문화․경제․환경적으로 어촌지역 활력 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2023년(3년간)

○ 위 치 : 포항시 북구 송라면 방석리항 일원

○ 규 모 : 어촌∙어항 통합재생사업 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	8,400		1,680	3,360	3,360
국 비	5,880		1,176	2,352	2,352
시 도 비	756		151	302	303
시군구비	1,764		353	706	705
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2020. 12.  공모 선정

○ 2021. 12.  기본계획 승인

○ 2022. 03.  실시설계 용역 발주

□ 향후계획

○ 2022. 12. 시행계획수립 용역 완료

○ 2023. 03. 사업 착공

○ 2023. 12. 사업 준공

개별 투자심사 사업 추진현황 (스마트양식 클러스터 조성사업)

사업명

스마트양식클러스터 조성사업

담당자

수산진흥과 수산8 이한솔

(☎270-2734)

□ 사업목적 및 필요성

○ 연어 양식기술 개발, 기자재 실증 및 표준화를 통한 민간주도형 시범 양식장 조성

○ 최신 스마트 연어양식 기술개발, 생산기지 구축, 국내 소비량 국산화 및

해외 수출을 통하여 국내 양식산업 발전 및 수출품목으로 육성하여 지역

경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2025(5년간)

○ 위 치 : 포항시 남구 장기면 금곡리 일원

○ 규 모 : 테스트베드 28,570㎡, 배후부지 195,570㎡

○ 내 용 : 연어 스마트양식 기반 시험시설 및 대규모양식장 가공처리시설

건립을 위한 배후단지 기반 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  40,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	40,000	-	1,500	8,000	30,500
국 비	22,000	-	750	4,100	17,150
시 도 비	3600	-	135	720	2,745
시군구비	8,400	-	315	1,680	6,405
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	6,000	-	300	1,500	4,200
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○’20.12.  스마트양식 클러스터 조성사업 예산 확보

○’21.10.  테스트베드 운영 SPC 설립, 지방재정투자심사 승인

○’22.01.  행정절차(개발행위, 농지전용) 수행을 위한 토목,건축설계

□ 향후계획

○ ’22. 07. 해양수산부 기본계획 수립(승인), 테스트베드 실시설계

○ ’22. 12. ~ ’24. 06. 테스트베드 공종별 착공 및 준공

○ ’23. 04. ~ ’25. 12. 배후부지 조성 설계 및 공종별 착공, 준공

사업명

신광면 복지회관 목욕탕 신축

담당자

농촌활력과

김선우(☎270-5443)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고령화, 인구 감소 등 점점 낙후되는 농촌마을에 활력증진과 정주환경

개선을 위해 추진 중인「신광면 기초생활거점육성사업」복지회관 신축과 연계

□ 사업개요

○ 기 간 :  2022년  1월 ～ 2022년 12월(1년)

○ 위 치 :  포항시 북구 신광면 토성리 702번지 일원

○ 규 모 :  연면적 539.15㎡ (지하1층, 지상1층), 부지매입 4필지(A=760㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,000		700	2,300
국 비
시 도 비
시군구비	2,300			2,300
지 방 채
민간자본
기 타	700		700

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 토지매입(4필지) 보상완료

○ 실시설계 용역중

□ 향후계획

○ 2022. 12 : 공사준공 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

신광~흥해 매산리간도로(시도7호) 확포장

담당자

도로시설과 박진섭

(☎054-270-3433)

□ 사업목적 및 필요성

○도로기반시설 확충으로 교통소통 원활 및 지역균형 발전 도모

○급커브 등 위험구간 도로확장으로 안전사고 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010년 ~ 2026년

○ 위 치 : 포항시 북구 신광면 사정리 ~ 흥해읍 매산리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=3.8km, B=17.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	21,200	11,900	500	1,500	7,300
국 비
시 도 비	100	100
시군구비	21,100	11,800	500	1,500	7,300
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 58%)

○2019년 1, 2차공사 준공(범촌매운탕~보원사, L=0.98km)

○2020년 3차공사 준공(보원사~호리교, L=0.47km)

○2021년 4차공사 준공(회전교차로~SK주유소, L=0.67km)

□ 향후계획

○잔여구간(L=1.68km) 토지매입 및 도로개설

○

□ 사업변경 내역(해당시)

○해당없음

사업명

양학동~흥해 대련간 도시계획도로(중1-55) 개설

담당자

도로시설과 박진섭

(☎054-270-3433)

□ 사업목적 및 필요성

○포항~대구간 고속도로 개통으로 연화재사거리 구간 교통량 증가에 따른      교통정체 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2025년

○ 위 치 : 포항시 북구 양학동 ~ 흥해읍 대련리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.76km, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	30,000	400	200	200	29,200
국 비
시 도 비	200	200
시군구비	29,800	200	200	200	29,200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

○2020년 실시설계 완료

○2021년 소규모환경영향평가 협의 완료

□ 향후계획

○편입토지 지적분할 및 보상

○도로개설(L=1.76km)

□ 사업변경 내역(해당시)

○해당없음

사업명

여남동 도시계획도로(소2-43)개설

담당자

도로시설과 김민수

(☎054-270-3435)

□ 사업목적 및 필요성

○장기 미집행 도시계획시설(도로)개설로 지역주민 민원해소

○주택 밀집지역 소방도로 확보 및 도시기반시설 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2025년

○ 위 치 : 포항시 북구 여남동 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=530m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,900	1,200	700	200	800
국 비
시 도 비	750	400	350	-	-
시군구비	2,150	800	350	200	800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 23%)

○2017년 1차공사 준공(L=120m)

○2022년 잔여구간 토지보상 22필지중 17필지 완료

□ 향후계획

○잔여구간(L=410m) 토지매입 및 도로개설

○

□ 사업변경 내역(해당시)

○사업기간 변경 2016년~2023년 -> 2016년~2025년

사업명

기계 현내리 도시계획도로(중2-78)개설

담당자

도로시설과 김민수

(☎054-270-3435)

□ 사업목적 및 필요성

○장기 미집행 도시계획시설(도로)개설로 지역주민 민원해소

○면 소재지의 혼잡한 교통정체로 인한 주민불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2021년

○ 위 치 : 포항시 북구 기계면 현내리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=460m, B=15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,800	3,500	300	-	-
국 비
시 도 비	960	810	150	-	-
시군구비	2,840	2,690	150	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○2020년 L=330m 개설

○2022년 L=130m 개설

□ 향후계획

○해당없음

○

□ 사업변경 내역(해당시)

○해당없음

사업명

죽장 현내~두마리(리도201)도로 확포장

담당자

도로시설과 권혁진

(☎054-270-3434)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 차로 협소 및 노면상태 불량하여 농산물 적기수송 불편

○ 면봉산 방문 등산객들의 이용차량 증가로 주민생활 불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2024년

○ 위 치 : 포항시 북구 죽장면 현내~두마리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=8.4km, B=6.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,330	1,830	300	600	600
국 비
시 도 비	1,120	1,120
시군구비	2,210	710	300	600	600
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  70%)

○ ’03 ~ ’21년 일부 구간 공사완료 L= 5.33km, B=6.5

□ 향후계획

○L=3.07km, B=6.5m 개설

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 변경

당초 2003~2018,  변경 2003-2024

사업명

흥해 학천리 도시계획도로(소2-3) 개설

담당자

도로시설과 권혁진

(☎054-270-3434)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역주민 민원해소

○ 어린이보호구역 인근 도로개설로 사고위험

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2023년

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 학천리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=500m, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,500	2,400	700	200	1,200
국 비
시 도 비	325	325
시군구비	4,175	2,075	700	200	1,200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  70%)

○ ’18 ~ ’21년 일부 구간 공사완료 L= 340km, B=8.0m

□ 향후계획

○L=160m, B=8.0m 개설

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 변경

: 당초 2014~2022,  변경 2014-2023

○ 총사업비 변경

: 당초 39억원,  변경 45억원

사업명

연일 생지리 도시계획도로(중2-91) 개설

담당자

도로시설과 김성원(☎3443)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역주민 민원해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2022

○ 위 치 : 포항시 남구 연일읍 생지리 100-3 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=500m, B=15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,350	1,600	100	650
국 비
시 도 비
시군구비	2,350	1,600	100	650
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2015. 03. : 실시설계용역 완료

○ 2021. 09. : 보상율 50%

□ 향후계획

○ 2022. 1~12 : 공사완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

연일 택전리 도시계획도로(중1-16) 개설

담당자

도로시설과 김성원(☎3443)

□ 사업목적 및 필요성

○ 연일읍사무소~인주IC간(광3-4) 도로가 2021년 개설예정이나 택전리, 중단리,

중명리 일원 주민들은 신규개설 도로를 우회하여 진입하는 불편함을

초래할것으로 예상됨

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2025

○ 위 치 : 포항시 남구 연일읍 택전리 247-5일원

○ 규 모 : 도로개설 L=280m, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,900	50	350	700	1,800
국 비
시 도 비
시군구비	2,900	50	350	700	1,800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2020. 08. : 실시설계용역 완료

○ 2021. 09. : 보상율 33%

□ 향후계획

○ 2022. 1~12 : 보상시행

○ 2023. ~ 2025 : 공사시행

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

대송 대각리 도시계획도로(중1-171) 개설

담당자

도로시설과 김성원(☎3443)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시기반시설 확충으로 물동량 수송원활

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2023

○ 위 치 : 포항시 남구 대송면 대각리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=1.3km, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,600	1,200	2,000	1,000	1,400
국 비
시 도 비	250	250
시군구비	5,350	950	2,000	1,000	1,400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2019. 08. : 실시설계용역 완료

○ 2021. 09. : 보상율 86%

□ 향후계획

○ 2022. ~ 2023 : 공사시행

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

국민안전로봇 프로젝트 사업

담당자

미래전략산업과 김지혜

(☎270-3564)

□ 사업목적 및 필요성

○ 복합 재난 현장에서 소방대원을 도와 초기 정찰 및 긴급대응작업을 수행       하는 로봇 개발과 실증센터 구축을 통한 재난의 대형화를 방지하여 인명       재산 피해 최소화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 7. ~ 2022. 6. (6년간)

○ 위 치 : 포항시 북구 영일만 3 일반산업단지 내 (2019년 완공)

○ 규 모 : 재난대응로봇기술개발, 안전로봇실증센터 구축

※ 안전로봇실증센터 : 부지 19,800㎡ , 건축연면적 7,508㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 67,217백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	67,217	62,792	3,534	891	-
국 비	38,372	34,874	2,701	797	-
시 도 비	10,297	10,033	264	-	-
시군구비	10,297	10,033	264	-	-
지 방 채					-
민간자본					-
기 타	8,251	7,852	305	94	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  90 %)

○ (R&D) 시제품 제작, 시스템 통합검증/개선, 모듈 개선 및 안정화

○ (인프라) 실증시험시설 구축 및 장비 구축

□ 향후계획

○ 개발 제품 고도화 및 상용화 지속 추진

○ ‘23년 3월 국내 최초 실외로봇 KOLAS 인정 획득 추진

사업명

수출주력형 에너지 강관산업

경쟁력 강화 기반 구축

담당자

미래전략산업과 강영욱

(☎270-3564)

□ 사업목적 및 필요성

○ 철강산업 활성화를 위한 돌파구 마련이 시급한 상황에서 고부가가치

강관 생산 능력 및 판로 다변화를 위한 강관 경쟁력 확보 및 고도화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 4. ~ 2022. 4.

○ 위 치 : 포항시 남구 블루밸리국가산업단지

○ 규 모 : 시험평가동 건립, 시험 평가장비 구축, 기업지원

- 고품질 강관기술센터 구축

- 시험장비 구축(제조공정, 품질보증 등 관련장비) -21여종

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,228백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	20,228	16,462	3,492	-	-
국 비	10,000	6,974	3,026	-	-
시 도 비	3,128	2,989	139	-	-
시군구비	7,300	6,499	801	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-		-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   100 %)

○ 강관기술센터 건립 완료

○ 시험장비 구축 - 21여종

□ 향후계획

○ 제품 품질 고급화에 취약했던 지역 강관사 대상 기술개발 및 성능평가

지원으로 철강산업 지속적 성장 도모

사업명

수중건설로봇 실용화사업

담당자

미래전략산업과 김지혜

(☎270-3564)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수중건설로봇 국내외 해양구조물 시장 진입을 위한 현장 적용 실적 확보를       위한 수중건설시장 경쟁력 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 7. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 한국해양과학기술원 수중건설로봇사업단

○ 규 모 : 수중로봇복합실증센터 교육정비동 인프라 구축

※교육정비동 : 부지 2,901㎡ , 건축연면적 650㎡, 지상 1층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 31,000

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	31,000	14,320	12,100	4,580	-
국 비	16,500	6,920	6,500	3,080	-
시 도 비	900	750	150	-	-
시군구비	2,100	1,750	350	-	-
지 방 채					-
민간자본					-
기 타	11,500	4,900	5,100	1,500	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  90 %)

○ 회류수조 수심별 유속 측정장치 구축

○ 수중로봇복합실증센터 교육정비동 완공 및 사용승인

□ 향후계획

○ 수심 500~2,500m 실해역 테스트 수행

○ 교육 인프라 활용 전문 인력 교육 및 수중로봇 분야 신규인력 양성 촉진

사업명

재난현장 로봇활용 지원사업

담당자

미래전략산업과 김지혜

(☎270-3564)

□ 사업목적 및 필요성

○ 재난안전 분야 특화 로봇산업 육성과 연계 기술 시너지 창출을 위한        관련 로봇기업의 육성 및 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 4. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 포항시 북구 영일만 3 일반산업단지 내 안전로봇실증센터

○ 규 모 : 안전로봇실증센터 내 재난안전로봇분야 사업화 지원

※ 안전로봇실증센터 : 부지 19,800㎡ , 건축연면적 7,508㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,040백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	8,040	4,160	2,320	1,560	-
국 비	5,700	3,000	1,700	1,000	-
시 도 비	480	240	120	120	-
시군구비	1,120	560	280	280	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	740	360	220	160	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   80 %)

○ 상용화 및 사업화 패키지 6개 기업 지원

□ 향후계획

○ 후속 사업(소방현장 탐색·진압 활동지원 로봇기술개발 사업) 연계 추진

사업명

세포막단백질연구소 건립사업

담당자

미래전략산업과 정재원

(☎270-3568)

□ 사업목적 및 필요성

○ 글로벌 의약품 시장은 2019년 1.2조 달러를 상회하여 자동차, 반도체 시장을 능가하는 거대시장으로 미래 먹거리 산업으로 각광

○ 국내에서 유일하게 세포막단백질 구조 분석이 가능한 4세대방사광가속기를 활용, 질병원인의 60% 이상을 차지하는 세포막단백질의 구조 규명을 통한 신약개발 국제적 경쟁력 우위 확보 시급

○ 글로벌 신약시장 주도권 확보를 위한 국가 차원의 세포막단백질 연구 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2023.

○ 위 치 : 포항융합기술산업지구 내

○ 규 모 : 부지면적 7,512㎡/ 연먼적 6,086㎡(지하1층/지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 45,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	45,800	28,561	7,100	5,489	4,650
국 비	22,900	10,561	5,600	3,839	2,900
도 비	10,650	8,200	750	825	875
시 비	12,250	9,800	750	825	875

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 극저온전자현미경 도입

○ 세포막단백질연구소 준공

○ 가속기기반 국제 심포지엄 개최

○ 입주기업 평가위원회 개최

□ 향후계획

○ 입주기업 유치 및 홍보

○ 후속 연계사업 발굴

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

철강산업재도약기술개발사업

(포항거점센터)

담당자

미래전략산업과 강영욱

(☎270-3564)

□ 사업목적 및 필요성

○ 철강산업 여건의 변화 대응과 지역 철강산업의 침체 극복을 위한 기업

기술 경쟁력 강화 및 고부가가치화를 통한 철강 생태계 기반 구축 대두

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 포항블루밸리 국가산업단지 연구1B 2L

○ 내 용 : 포항철강거점센터 건립 및 공유자산(실험장비) 구축 추진

- 포항 철강거점센터 구축(사무동, 연구동 등)

- 공유 자산(철강재 제조 및 가공 관련 장비) 8종 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,650백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	20,650	-	6,800	6,450	-
국 비	5,775	-	250	1,825	-
시 도 비	4,462.5	-	4,585	3,237.5	-
시군구비	10,412.5	-	1,965	1,057.5	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   30 %)

○ 철강산업재도약 기술개발사업 운영지원 유치

○ 포항철강거점센터 착공

○ 포항철강거점센터 장비 2종 구축

□ 향후계획

○ 포항철강거점센터 중심으로 한 철강중심 고부가가치화 전후방 신시장 창출

사업명

강소연구개발특구 육성

담당자

미래전략산업과 강영욱

(☎270-3563)

□ 사업목적 및 필요성

ㅇ 강소연구개발특구를 통해 연구개발 성과가 지역경제 성장으로 연결되는 지역주도형 첨단신소재 산업 혁신 성장 거점 육성

□ 사업개요

ㅇ 기 간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.(1단계, 5년)

ㅇ 위 치 : 포항시 남구 지곡동, 북구 흥해읍 이인리 일원(면적 2.72㎢)

- 기술핵심기관 : 포스텍(R&D창업지구/1.64㎢), 포항산업과학연구원(기술상용화지구/0.36㎢)

- 배후공간 : 포항테크노파크(사업화지구/0.14㎢), 포항융합기술산업지구(생산거점지구/0.58㎢)

ㅇ 사업주체 : 과학기술정보통신부, 경상북도, 포항시

ㅇ 특화분야 : 첨단신소재(바이오, 에너지, 나노)

ㅇ 사업내용 : 공공연구성과의 사업화 지원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

ㅇ 총사업비 : 19,835백만원 (국 151,35, 도 1,410, 시 3,290)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	19,835	6,335	4,800	2,900	5,800
국 비	15,135	5,135	4,000	2,000	4,000
시 도 비	1,410	360	240	270	540
시군구비	3,290	840	560	630	1,260
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50 %)

ㅇ 2019. 6. 19. : 전국 최초 ‘포항 강소연구개발특구’지정

ㅇ 2019. 12. 1. : 포스텍(기술핵심기관) 內 전담조직(포항강소특구육성센터) 설립

ㅇ 2020. 3. 10. ~ 2021. 3. 9. : 1차년도 육성사업 시행(63.35억원, 10개 세부사업, 80개사)

ㅇ 2021. 3. 10. ~ 2022. 3. 9. : 2차년도 육성사업 시행(48억원, 12개 세부사업, 76개사)

ㅇ 2022. 3. ~ : 3차년도 사업 시행(29억원, 9개 세부사업)

□ 향후계획

ㅇ 지역 R&D기관, 기업협의체 등 네트워크 육성을 통한 사업화 유망 기술발굴과 기술이전‧사업화 촉진 및 기술창업 활성화

ㅇ POSCO 벤처플랫폼과 연계한 연구소기업, 첨단기술기업, 특화분야 기업 등 맞춤형 성장지원

사업명

마이크로바이옴 인프라 기업활용 지원

담당자

미래전략산업과 김진영

(☎270-3400)

□ 사업목적 및 필요성

○ 글로벌 시장규모 고속 성장으로 마이크로바이옴 분야 신산업 창출 필요

– 글로벌 마이크로바이옴 시장은 2019년 811억 달러(약 97조 원, 2022년 1월 기준)에서 연평균 7.6%로 성장하여 2023년 약 1,086.8억 달러(약 130조 원) 규모를 보일 것으로 전망

○ 고부가가치 유망분야이며, 미개척 상태의 신생 분야로 지속적인 성장이 가능

– 마이크로바이옴 연구로부터 도출되는 새로운 지식과 상업화 잠재력으로 연평균 약 7.6% 이상의 성장을 보일 것으로 전망

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 06. ~ 2027. 02.

○ 위 치 : 마이크로바이옴 핵심연구지원센터(생명공학연구센터 내)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,075백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,075	0	650	725	2,700
국 비	2,975	0	500	475	2,000
도 비	40	0	0	20	20
시 비	160	0	0	80	80
민간자본	900	0	150	150	600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 마이크로바이옴 핵심연구지원센터 시설 구축 및 운영체계 확립

□ 향후계획

○ MOU체결

– 양산부산대병원 의생명융합연구원(22.05.)

– 중앙대학교 시스템생명과학과(22.07.)

○ 기업지원사업(질환분석장비 및 무균동물활용 지원) 실시(2022~2023)

○ 마이크로바이옴 국내 산학연 네트워크 조성

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경

-당초 4,100백만원(국비 3,000백만원) → 현재 4,075백만원(국비 2,975백만원)

사업명

식물백신기업지원시설 건립사업

담당자

미래전략산업과 강용학

(☎240-3567)

□ 사업목적 및 필요성

○ 식물백신 상용화를 위한 KvGMP 제조시설 구축

○ 식물백신 개발 바이오 벤처기업 유치 및 육성을 위한 지원시스템 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 10. ~ 2022. 2.

○ 위 치 : 포항융합기술산업지구 I6블록 3롯트(북구 흥해읍 이인리 일원)

○ 규 모 : 부지면적 6,840㎡/ 연먼적 4,695㎡(백신생산동3F/동물실험동1F)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	17,700	15,810	1,890	0	0
국 비	6,000	5,310	690	0	0
시 도 비	4,260	3,900	360	0	0
시군구비	7,440	6,600	840	0	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019. 03 : 기본 및 실시설계

○ 2020. 09 : 건립공사 착공

○ 2022. 03 : 그린백신실증지원센터 준공식 개최

□ 향후계획

○ 장비 고도화 사업 완료

○ GMP 인증 예비 테스트 보완 및 신청

□ 사업변경 내역

○ 2019. 12. : 총사업비 증액

- 135억(국 60, 도 30, 시 45) → 165억(국 60, 도 39, 시 66)

○ 2021. 10. : 총사업비 증액 및 사업기간 변경

- 165억(국 60, 도 39, 시 66) → 177억(국 60, 도 42.6, 시 74.4)

- 2018.11. ~ 2021. 10. → 2018.11. ~ 2022. 2.

사업명

포항 지열발전 부지매입

담당자

방재정책과 박은희(☎270-2586)

□ 사업목적 및 필요성

○ 포항 지진을 촉발한 지열발전부지의 지진 활동 및 지하수 수위 변화 모니터링       시스템 구축을 위한 부지 확보

○ 지속적인 지진 및 지하수위 모니터링을 전담할 연구기관(센터) 설립을        통해 해당 부지의 안정적 관리 및 시민들의 지진에 대한 불안감 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 1월 ~ 2021년 12월( 1년 )

○ 위 치 : 북구 흥해읍 남송리 329번지 외 2필지

○ 규 모

- 부지면적 : 13,843㎡(토지 3필지)

- 건축연면적 : 1,023.6㎡(건물 5동)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,066		4,726
국 비	3,300		3,300
시 도 비
시군구비	1,766		1,426
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2020. 02. : 지열발전 부지 경매개시 결정(대구지방법원 포항지원)

○ 2020. 03. : 지열발전 부지 감정평가(대구지방법원 포항지원)

○ 2020. 06. : 포항지열발전 부지매입 관련 협의(포항시, 산업부)

○ 2020. 07. : 「포항지진피해구제법」 제18조에 근거해 포항지진연구센터 설립 건의

○ 2020. 09. : 채권단과 부지매입을 전제로 경매유예 및 임대 추진(산업부)

○ 2020. 09. : 부지매입비 33억원 2021년 예산 요청(산업부)

○ 2021. 02. : 부지 및 건물 감정평가 실시

○ 2021. 04. : 부지 및 건물 매입 추진

□ 향후계획

○ 2022.     : 포항지진연구센터 설립 실시설계 및 착공(국가직접)

○ 2023.     : 포항지진연구센터 설립 공사 준공(국가직접)

사업명

북구보건소 및 재난트라우마센터 통합건립

담당자

방재정책과 황민정(☎270-4733)

북구보건소 보건정책과 정미영(☎270-4113)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후화된 북구보건소의 시설개선을 통해 변화된 보건□의료 환경에 대응하고 도□농간       심각한 보건의료 환경의 불균형 해소

○ 북구보건소 및 재난트라우마센터 통합건립을 통해 지진피해주민들의 트라우마 극복 및       신체적 건강증진을 통한 치유효과 극대화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021.1.~2024. 10.

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 마산리 62번지

○ 규 모 : 부지면적 4,465㎡/ 연면적 13,740㎡ (지하2층, 지상 6층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  49,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	49,700	8,300	724	11,108	29,568
국 비	22,074	2,200	274	8,964	10,636
시 도 비	1,676	200	450	1,026
시군구비	25,950	5,900		1,118	18,932
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ‘19.12. 트라우마치유센터 건립 및 기본계획 수립연구용역 완료

○ ‘20.04. 포항시 북구 보건소 신청사 건립 타당성 용역 완료

○ ‘20.07. 북구보건소, 재난트라우마센터 통합건립 추진(기획재정부 의견)

○ ‘20.10. 건립예정지 토지보상 완료/ 포항시 공유재산심의회 심의 완료

○ ‘20.11. 중기지방재정계획 반영

○ ‘20.12. 중앙투자심사 의뢰 ⇒ 조건부 통과

○ ‘21.06. 건축설계공모 완료

○ ‘21.07. 건축설계(기본 및 실시설계) 등 진행

□ 향후계획

○ ‘22. 09. : 공사 계약 및 착공

○ ‘24. 10. : 준공 및 개관

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 (당초 2021.1.~2024.3. ⇒변경 2021.1.~2024.10.)

○ 총사업비 (당초 437억원 ⇒변경 497억원)

사업명

포항철강산업단지 완충저류시설 설치사업

담당자

환경정책과 남승학(☎270-3113)

□ 사업목적 및 필요성

○ 포항철강산업단지 내 사고 및 화재 등으로 발생되는 유해물질과 강우시       비점오염원의 하천 직유입을 차단하여 수질오염 사전예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2022

○ 위 치 : 포항시 남구 송내동 철강산업단지 일원

○ 규 모 : 완충저류시설 V=2,000㎥, 비점오염저감시설 V=56,800㎥

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 43,187백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	43,187	13,568	7,987	21,632	0
국 비	30,213	9,498	7,379	13,336
시 도 비	3,885	1,221	189	2,475
시군구비	9,089	2,849	419	5,821
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 69%)

○ 2018. 10. : 기본 및 실시설계용역 완료

○ 2019. 02. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2022. 12. : 공사준공 예정

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황 (작성서식 예시) → 투자심사 대상사업 반드시 작성

- 사업별로 별지 작성

사업명

구무천 생태하천복원사업

담당자

환경정책과 남승학(☎270-3113)

□ 사업목적 및 필요성

○ 중금속으로 오염된 구무천, 공단천의 오염퇴적물 준설을 포함한 생태하천       복원을 통해 건강한 수(水)환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2023

○ 위 치 : 포항시 남구 괴동동, 장흥동 일원

○ 규 모 : 생태복원 7.97km, 오염토 정화시설 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 28,046백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	28,046	3,831	6,542	6,927	10,746
국비(전환)	10,000	1366	3,271	3,463	1,900
시 도 비	5,414	410	981	1,039	2,984
시군구비	12,632	2055	2,290	2,425	5,862
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 2018. 04. : 통합집중형 오염하천 개선사업 선정

○ 2022. 01. : 오염토 정화시설 공사착공

□ 향후계획

○ 2023. 12. : 공사준공 예정

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황 (작성서식 예시) → 투자심사 대상사업 반드시 작성

- 사업별로 별지 작성

사업명

영일대해수욕장 비점오염저감사업

담당자

환경정책과 남승학(☎270-3113)

□ 사업목적 및 필요성

○ 강우시 비점오염원, 하수관거 퇴적물의 영일대해수욕장 유입에 따른

악취발생 및 도시미관 저해

○ 비점오염원의 체계적 관리로 연안 수질개선 도모 및 깨끗한 도시조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2023

○ 위 치 : 포항시 북구 두호동 영일대해수욕장 일원

○ 규 모 : 장치(여과)형 시설 2개소(Q=5,400㎥/h)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,606백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,606	642	288	5,626	4,050
국 비	5,303	378	87	2,813	2,025
시 도 비	1,592	80	60	844	608
시군구비	3,711	184	141	1,969	1,417
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2021. 09. : 기본 및 실시설계용역 완료

○ 2022. 06. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2023. 12. : 공사준공 예정

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

생활체육인 전용 체육파크 조성

담당자

체육산업과 정병훈(☎270-2803)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주52시간 근무제의 확대로 건전한 여가문화에 대한 필요성이 증가됨에

따라 스포츠 활동을 위한 체육시설 개발과 시설확충의 필요성 증가

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022.01. ~ 2024.12.

○ 위 치 : 포항시 남구 연일읍 우복리 산16-1번지 일원

○ 규 모 : 부지면적 149,476㎡ , 건축연면적 1,375㎡

야구장3면, 내야연습장, 잔디마당, 바닥분수 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,700백만원(균5,580 도1,500 시12,620)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	19,700	900	-	1,200	17,600
국 비	5,580	-	-	300	5,280
시 도 비	1,500	-	-	200	1,300
시군구비	12,620	900	-	700	11,020
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   1%)

○2020. 07. : 체육시설 조성 타당성 조사 용역

○2021. 10. : 지방재정 투자심사, 공유재산관리계획 의결

○2022. 05. : 기본계획 및 실시설계 용역 착공

□ 향후계획

○2023. 05. : 기본계획 및 실시설계 용역 준공

○2023. 06. ~ 2024. 12. : 공사 착공 및 준공

사업명

송도 생활밀착형 국민체육센터·행정복지센터 건립사업

담당자

체육산업과 김휘웅(☎270-2805)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 내 주민들이 이용할 수 있는 수영장 등 체육 인프라가 갖춰 있지        않아 생활체육 활성화를 통한 체육복지 증진을 위한 시설이 시급한 실정

○ 현 송도동 행정복지센터는 1989년 준공하여 33년 경과된 노후 청사로서       민원실이 협소하고, 주차면수가 부족하여 주민들의 이용이 불편한 실정       이므로 청사 이전 건립이 시급함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019.01. ~ 2023.06.

○ 위 치 : 포항시 남구 송도동 254-614번지 일원

○ 규 모 : 부지면적 9,270㎡ , 건축연면적 3,747㎡

운동시설 지상3층, 공공청사 지상2층 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,500백만원(기금3,000 특교1,000 시10,500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	14,500	6,000	-	3,500	5,000
국 비	3,000	3,000	953	-	-
시 도 비		-	-	-	-
시군구비	11,500	3,000	2,923	3,500	5,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   15%)

○2019. 03. : 생활체육시설 확충 지원사업 선정

○2019. 06. : 도 지방재정 투자심사 완료

○2019. 08. : 도시관리계획 결정(변경) 용역 착수

사업명	송도 생활밀착형 국민체육센터·행정복지센터 건립사업	담당자	체육산업과 김휘웅(☎270-2805)
□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%) ○2019. 10. : 공유재산관리계획 의결 ○2019. 12. : 중기지방재정계획 반영 ○2020. 02. : 도시관리계획(용도지역 및 체육시설·공공청사) 결정(변경) 입안 ○2020. 07. : 도시관리계획 결정(변경) ○2020. 10. : 건축기획 및 사전검토, 공유재산관리계획 변경(용도변경) ○2020. 11. : 건축설계 공모 ○2021. 02. ~ 2021. 11. : 실시설계 용역 ○2022. 01. : 착공 □ 향후계획 ○2023. 06. : 준공

10-2. 지방채 발행사업

우리 포항시에서 ‘21년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
장성공원 조성사업	8,300	8,300	-	-	-	-	8,300	100
옥명공원 조성사업	3,400	3,400	-	-	-	-	3,400	100
북송공원 조성사업	1,600	1,600	-	-	-	-	1,600	100
두호공원 조성사업	500	500	-	-	-	-	500	100
중성공원 조성사업	600	600	-	-	-	-	600	100
구정공원 조성사업	600	600	-	-	-	-	600	100
장애인형국민 체육센터	19,350	10,000	5,000	-	4,350	-	10,000	100
다원복합센터 생활SOC 복합화사업	44,600	10,000	4,050	3,366	3,654	23,530	10,000	15
국지도 20호선 (효자~상원) 건설	21,500	2,000	-	-	19,500	-	2,000	5
흥해 공공도서관 건립	25,000	3,000	10,000	800	11,200	-	3,000	15
영일만4일반산업단지 조성	80,800	40,000	-	-	40,800	-	40,000	100

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2021년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황(별첨 가능)

※ 사업별로 서식(예시)에 따라 사업별 1장씩 별지 작성

※ 작성요령은 투자심사사업에 준하며, 재원에 지금까지 지방채 발행액 및 발행예정액을 필히 기재

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

장성공원 조성사업

담당자

공원과 배대한(☎270-3227)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시공원의 실효(일몰제)를 대비하여 공원별 이용현황 및 향후       개발가능성 등을 검토하여 선정된 우선관리지역 공원으로 항구적으로 보        전하여 지역주민의 건강, 휴양 ,정서생활 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2025년

○ 위 치 : 포항시 북구 장성동 산101-1번지 일원

○ 규 모 : 공원조성 1식(A=242,400㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 45,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	45,000		8,300	20,600	16,100
지 방 채	44,700		8,300	20,600	15,800
국 비
시 도 비
시군구비	300				300
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 토지보상 60%)

○ 2021. 1. : 보상계획 열람공고

○ 2021. 5. ~ 12. : 토지보상 실시(5필지, 32,107㎡)

□ 향후계획

○ 2022. 1. ~ 현재. : 토지보상 실시

※ 총 보상대상 (74필지, 242,400㎡)

→ 보상완료 (31필지, 99,645㎡)

○ 2022. 7. : 재감정평가 실시

○ 2022. 8. ~ : 토지보상 실시

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

옥명공원 조성사업

담당자

공원과 배대한(☎270-3227)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시공원의 실효(일몰제)를 대비하여 공원별 이용현황 및 향후       개발가능성 등을 검토하여 선정된 우선관리지역 공원으로 항구적으로 보        전하여 지역주민의 건강, 휴양 ,정서생활 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2025년

○ 위 치 : 포항시 남구 오천읍 원리 산52번지 일원

○ 규 모 : 공원조성 1식(A=757,877㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 36,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	36,300		3,400	16,300	16,600
지 방 채	35,100		3,400	16,300	15,400
국 비
시 도 비
시군구비	1,200				1,200
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 토지보상 50%)

○ 2021. 1. : 보상계획 열람공고

○ 2021. 5. ~ 12. : 토지보상 실시(16필지, 66,947㎡)

□ 향후계획

○ 2022. 1. ~ 현재. : 토지보상 실시

※ 총 보상대상 (178필지, 757,877㎡)

→ 보상완료 (56필지, 365,749㎡)

○ 2022. 7. : 재감정평가 실시

○ 2022. 8. ~ : 토지보상 실시

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

북송공원 조성사업

담당자

공원과 배대한(☎270-3227)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시공원의 실효(일몰제)를 대비하여 공원별 이용현황 및 향후       개발가능성 등을 검토하여 선정된 우선관리지역 공원으로 항구적으로 보        전하여 지역주민의 건강, 휴양 ,정서생활 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2025년

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 마산리 산13번지 일원

○ 규 모 : 공원조성 1식(A=283,200㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	19,800		1,600	9,400	8,800
지 방 채	19,500		1,600	9,400	8,500
국 비
시 도 비
시군구비	300				300
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  토지보상 50%)

○ 2021. 1. : 보상계획 열람공고

○ 2021. 5. ~ 2021. 12. : 토지보상 실시(3필지, 16,927㎡)

□ 향후계획

○ 2022. 1. ~ 현재 : 토지보상 실시

※ 총 보상대상 (105필지, 283,200㎡)

→ 보상완료 (40필지, 90,483㎡)

○ 2022. 7. : 재감정평가 실시

○ 2022. 8. ~ : 토지보상 실시

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

두호공원 조성사업

담당자

공원과 배대한(☎270-3227)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시공원의 실효(일몰제)를 대비하여 공원별 이용현황 및 향후       개발가능성 등을 검토하여 선정된 우선관리지역 공원으로 항구적으로 보        전하여 지역주민의 건강, 휴양 ,정서생활 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2025년

○ 위 치 : 포항시 북구 두호동 산44번지 일원

○ 규 모 : 공원조성 1식(A=24,800㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,000		500	5,200	300
지 방 채	5,700		500	5,200
국 비
시 도 비
시군구비	300				300
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  토지보상 40%)

○ 2021. 1. : 보상계획 열람공고

○ 2021. 5. ~ 2021. 12. : 토지보상 실시(1필지, 2,311㎡)

□ 향후계획

○ 2022. 1. ~ 현재 : 토지보상 실시

※ 총 보상대상 (29필지, 24,800㎡)

→ 보상완료 (2필지, 11,780㎡)

○ 2022. 7. : 재감정평가 실시

○ 2022. 8. ~ : 토지보상 실시

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

중성공원 조성사업

담당자

공원과 배대한(☎270-3227)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시공원의 실효(일몰제)를 대비하여 공원별 이용현황 및 향후       개발가능성 등을 검토하여 선정된 우선관리지역 공원으로 항구적으로 보        전하여 지역주민의 건강, 휴양 ,정서생활 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2025년

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 망천리 1058번지 일원

○ 규 모 : 공원조성 1식(A=40,000㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,800		600	2,900	300
지 방 채	3,500		600	2,900
국 비
시 도 비
시군구비	300				300
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 토지보상 70%)

○ 2021. 1. : 보상계획 열람공고

○ 2021. 5. ~ 2021. 12. : 토지보상 실시(3필지, 2,632㎡)

□ 향후계획

○ 2022. 1. ~ 현재 : 토지보상 실시

※ 총 보상대상 (30필지, 40,000㎡)

→ 보상완료 (12필지, 12,255㎡)

○ 2022. 7. : 재감정평가 실시

○ 2022. 8. ~ : 토지보상 실시

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

구정공원 조성사업

담당자

공원과 배대한(☎270-3227)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시공원의 실효(일몰제)를 대비하여 공원별 이용현황 및 향후       개발가능성 등을 검토하여 선정된 우선관리지역 공원으로 항구적으로 보        전하여 지역주민의 건강, 휴양 ,정서생활 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2025년

○ 위 치 : 포항시 남구 오천읍 구정리 440번지 일원

○ 규 모 : 공원조성 1식(A=10,000㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,300		600	4,100	600
지 방 채	4,700		600	4,100
국 비
시 도 비
시군구비	600				600
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 토지보상 10%)

○ 2021. 1. : 보상계획 열람공고

○ 2021. 5. ~ 2021. 12. : 토지보상 실시(1필지, 1,160㎡)

□ 향후계획

○ 2022. 1. ~ 현재 : 토지보상 실시

※ 총 보상대상 (12필지, 10,000㎡)

→ 보상완료 (1필지, 1,160㎡)

○ 2022. 7. : 재감정평가 실시

○ 2022. 8. ~ : 토지보상 실시

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

장애인형 국민체육센터 건립사업

담당자

체육산업과 김휘웅(☎270-2805)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장애인들이 불편함 없이 생활체육을 할 수 있는 공간을 마련하여 건전한       사회적 참여를 유도하고 지역 상생발전에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 8. ~ 2022. 8.

○ 위 치 : 포항시 북구 양덕동 62번지 일원

○ 규 모 : 지하1층, 지상3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 193.5억원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	19,350	18,500	5,750	850
국 비	5,000	5,000	-
시 도 비
시군구비	14,350	13,500	5,750	850
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `17. 04. : 국민체육진흥기금 지원사업 공모 선정

○ `18. 05. : 건축설계 공모

○ `18. 08. ~ `19. 10. : 실시설계 용역

○ `18. 11. : 공유재산 관리계획 의결

○ `19. 02. : 설계 경제성검토 용역(VE)

○ `19. 08. : 건설기술심의(경북도) 및 중앙투자심사(문체부)

○ `19. 10. : 실시설계 용역 완료

○ `19. 12. : 지방재정 중앙 투자심사 완료

○ `19. 12. : 착공

○ `20. 10. : 중기지방재정계획 반영

○ `22. 08. : 준공

□ 향후계획

○ ‘22. 10. : 개관

사업명

다원복합센터 생활SOC복합화사업

담당자

체육산업과 심석원(☎270-2804)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역의 체육인프라 확충으로 주민화합과 체육복지 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2025. 8.

○ 위 치 : 포항시 남구 오천읍 원리 1564번지, 1564-1번지 일원

○ 규 모 : 지하1층, 지상4층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 494.7백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	44,600	15,125	13,300	1,825	29,475
국 비	4,050	1,400	200	1,200	2,650
시 도 비	3,366	740	240	500	2,626
시군구비	3,654	2,985	2,860	125	669
지 방 채	10,000	10,000	10,000
민간자본
기 타	23,530				23,530

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ `20. 01. : 생활SOC 복합화사업 기본계획 수립

○ `20. 09. : 생활SOC 복합화사업 공모 선정

○ `20. 11. : 중기지방재정계획 반영

○ `21. 06. : 위·수탁계약 체결(한국자산관리공사)

○ `21. 07. : 도시관리계획 변경(도시계획시설 중복결정)

○ `21. 08. : 중앙투자심사 승인(조건부)

○ `21. 10. : 개발사업계획 승인

○ `21. 12. : 공공건축심의회 / 설계공모

○ `22. 02. : 설계공모 당선작 발표

○ `22. 03. : 주민설명회

□ 향후계획

○ ‘22. 11. : 기본 및 중간설계완료 및 도시관리계획 실시계획 인가

○ ‘23. 03. : 실시설계 완료

○ ‘23. 06. : 중앙투자심사(2단계)

○ ‘23. 09. ~ ’25. 08. : 착공 및 준공(24개월)

사업명

국지도 20호선(효자~상원) 건설

담당자

건설과 김성현(☎270-3423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경북도에서 추진 중인 국지도20호선(효자~상원) 건설공사 사업비 중
명품 교량 건설비용과 보상금을 우리시에서 부담하기로 한 협약사항 이행

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2025년

○ 위 치 : 포항시 남구 송도동~북구 항구동 일원

○ 규 모 : 도로개설 L:1.36KM(4차로, 해상교량 395M), 전망대 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	21,500
지 방 채	2,000	-	2,000
국 비
시 도 비
시군구비	19,500	3,000	1,500	10,000	5,000
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 착공 5%)

○ 2019. 10. : 실시설계 완료

○ 2020. 3. : 실시설계 적격심의 완료

○ 2020. 7. : 설계내역 적정성검토 완료

○ 2020. 12. : 도로구역 결정 고시

□ 향후계획

○ 2021. 5. : 편입토지 보상 시행

○ 2022. 6. : 수용재결 감정

사업명

흥해공공도서관 조성

담당자

안전도시사업과 박지은(☎270-5583)

□ 사업목적 및 필요성

○ 포항시 도서관정책 컨설팅 결과 북구지역 도서관 분포 빈약진단 및 지진피해지역 주민들에 대한 문화공간 제공과 농어촌 주민들의 문화격차 해소를 위해 도서관 건립이 필요함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2024년

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 마산리 62-1외 2필지(대성아파트 부지)

○ 규 모 : 부지면적 5,687㎡, 건축면적 2,467㎡, 연면적 11,424㎡(지하1층, 지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	45,000	-	8,060	6,050	10,890
지 방 채	3,000	-	3,000	-	-
국 비	10,000	-	3,000	2,500	4,500
시 도 비	800	-	800	-	-
시군구비	11,200	-	1,260	3,550	6,390
기 타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 착공 15%)

○ 2018.  4. : 흥해공공도서관 건립 사업계획 수립

○ 2018. 11. : 흥해 특별재생지역 지정(국토교통부)

○ 2018. 12. : 중기지방재정계획 반영

○ 2019.  3. : 공공도서관건립 타당성 평가 심사통과(문체부)

○ 2020.  4. : 지방재정 중앙투자심사 통과(조건부)

○ 2020.  5. : 특별재생지역 전파공동주택 부지매입

○ 2020.  8. : 기본 및 실시설계용역 추진

○ 2021.  1. : 지방재정 투자심사 면제(포항 흥해 특별재생사업)

○ 2021. 12. : 기본 및 실시설계용역 완료

○ 2022.  1. : 착공

□ 향후계획

○ 2024. 1. : 준공

○ 2024. 상반기 : 개관

□ 사업변경 내역 : 사업규모 및 주소 변경 승인(2022. 6. 2.)

사업명

영일만4 일반산업단지 조성

담당자

민자사업추진단 배병휴

(☎270-3813)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산업단지 조성으로 고용증대 및 지역경제 자립기반 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021.01.01. ~ 2021.12.31.

○ 위 치 : 북구 흥해읍 용한리, 곡강리 일원

○ 규 모 : 산업단지 조성 A=283,070㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 80,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	80,800		80,800
지 방 채	40,000		40,000
국 비
시 도 비
시군구비	40,800		40,800
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 토지 보상 A=283,070㎡ 완료

□ 향후계획

○ 사업 준공

10-3. 민간투자사업

우리 포항시에서 ‘21년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총 사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2021년	2022년	2023년 이후
BTL	07 하수관로 정비사업	포항 맑은물㈜	114,700	90,786	12,707	14,043	161,321	2014.04 ~ 2034.04
BTL	09 하수관로 정비사업	포항 맑은물길㈜	68,300	45,411	6,563	7,253	85,147	2014.07 ~ 2034.06
BTL	10 하수관로 정비사업	청정포항(주)	77,800	33,825	7,140	7,233	98,352	2016.04 ~ 2036.03
BTL	13 하수관로 정비사업	포항 새물길㈜	55,000	11,203	4,986	5,059	83,226	2018.10 ~ 2038.09

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2021년까지는 집행액(결산기준), 2022년 이후는 추정액

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

사업명

07년 포항 하수관로정비

담당자

하수도과 배순열(☎270-5424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우·오수를 분리하여 연안오염 방지 및 하수처리장 효율성 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2009.11.13 ~ 2014.04.12

○ 위치 : 포항시 용흥동, 중앙동, 학산동, 죽도동, 양학동, 대이동, 송도동 일원    ○ 민간사업자 : 포항맑은물(주)

○ 총사업비 : 114,700백만원

○ 사업규모 : 하수관로 101㎞, 배수설비 9,780가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	278,857	90,786	12,707	14,043	161,321
국 비	176,979	58,791	8,154	8,958	101,076
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	101,878	31,995	4,553	5,085	60,245
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계

○ 운영 중

○ 운영기간 : 2014. 4. 13 ~ 2034. 4. 12 (20년간)

□ 향후계획

○ 2034년까지 민간사업자(운영사)에서 운영 및 유지관리

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

09년 포항 하수관로정비

담당자

하수도과 배순열(☎270-5424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우·오수를 분리하여 연안오염 방지 및 하수처리장 효율성 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2011.1.1 ~ 2014.06.30

○ 위치 : 포항시 죽도동, 용흥동, 대이동 일원

○ 민간사업자 : 포항맑은물길(주)

○ 총사업비 : 68,300백만원

○ 사업규모 : 하수관로 39㎞, 배수설비 3,083가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	144,374	45,411	6,563	7,253	85,147
국 비	90,369	29,088	4,160	4,570	52,551
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	54,005	16,323	2,403	2,683	32,596
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계

○ 운영 중

○ 운영기간 : 2014. 7. 1 ~ 2034. 6. 30 (20년간)

□ 향후계획

○ 2034년까지 민간사업자(운영사)에서 운영 및 유지관리

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

10년 포항 하수관로정비

담당자

하수도과 배순열(☎270-5424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우·오수를 분리하여 연안오염 방지 및 하수처리장 효율성 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2012.6.1 ~ 2016.03.31

○ 위치 : 포항시 대잠동, 죽도동, 상대동, 해도동 일원

○ 민간사업자 : 청정포항(주)

○ 총사업비 : 77,800백만원

○ 사업규모 : 하수관로 48㎞, 배수설비 4,950가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	146,550	33,825	7,140	7,233	98,352
국 비	90,321	21,452	4,514	4,516	59,839
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	56,229	12,373	2,626	2,717	38,513
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영 중

○ 운영기간 : 2016.4.1. ~ 2036.3.31.(20년간)

□ 향후계획

○ 2036년까지 민간사업자(운영사)에서 운영 및 유지관리

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

13년 포항 하수관로정비

담당자

하수도과 배순열(☎270-5424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우·오수를 분리하여 연안오염 방지 및 하수처리장 효율성 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2015.7.1 ~ 2018.09.30

○ 위치 : 포항시 상대동, 해도동 일원

○ 민간사업자 : 포항새물길(주)

○ 총사업비 : 55,000백만원

○ 사업규모 : 하수관로 53㎞, 배수설비 4,412가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	104,474	11,203	4,986	5,059	83,226
국 비	60,082	6,759	3,004	3,004	47,315
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	44,392	4,444	1,982	2,055	35,911
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 시공 중

○ 시공기간 : 2015. 7. 1 ~ 2018. 9. 30 (39개월간)

□ 향후계획

○ 2018년 9월 준공

○ 2038년까지 민간사업자(운영사)에서 운영 및 유지관리

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음