109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 포항시에서 ‘22년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후
송도 생활밀착형 국민체육센터· 행정복지센터 건립	15,700	6,000	3,500	6,200	-	2023	2019 (당초) 2022 (재심사)	61
제60회경북도민 체육대회 개최	3,290	-	3,290	-	-	2022	2021년	100
보경사군립공원 내 자연학습장 조성	9,221	3,321	1,000	1,600	3,300	2024	2023	5
호미곶한민족 해맞이축전	345	-	184	-	-	2022 (행사축소)	2022	53
한반도 동끝마을, 호미곶으로의 초대	412	-	-	286	126	2024	2022	0
포항운하축제	120	-	120	-	-	2022	2022	100
포항국제불빛축제	860	-	371	-	-	취소 (태풍힌남노)	2022	43
환동해해양복합전시센터 건립	176,600	23,500	-	3,600	149,500	2026	2022	20
경상권역 임산물 물류터미널 조성	4,000	-	-	70	3,930	2024	2022	5
여남동 도시계획도로 (소2-43)개설	3,750	1,900	125	1,025	700	2025	2021	23
기계 현내리 도시계획도로 (중2-78)	3,800	3,521	279	-	-	2022	2013 2020	100
기계 현내리 도시계획도로 (중2-173)개설	2,500	-	1,000	1,200	300	2024	2022	30
기계 남계~현내리 (면도103)도로개설	6,750	4,250	783	417	1,300	2025	2017	70
송라 하송리 (리도202) 도로확포장 공사	5,750	-	50	700	5,000	2027	2022	10
청하 신흥리 (리도206) 도로확포장 공사	5,580	70	-	150	5,360	2027	2022	10
신광~흥해 매산리간도로 (시도7호선) 확포장	21,200	12,400	1,500	400	6,900	2026	2017	60
양학동~흥해 대련간 도로 (중1-55) 개설	32,800	600	200	10,000	22,000	2025	2017	5
죽장 현내~두마리 (리도201) 도로확포장	3,830	1,830	600	600	800	2024	2017	70
흥해 학천리 도시계획도로 (소2-3) 개설	4,200	3,150	200	850	-	2023	2020	85
죽장 침곡리(리도203) 도로확포장	2,400	1,120	1,000	-	280	2024	2017	30
동해 도구리 도시계획도로 (소2-40) 개설	3,400	1,450	250	1,700	-	2024	2022	70
오천 세계리 도시계획도로 (소1-17) 개설	2,300	800	-	900	600	2024	2022	50
동해 도구리 도시계획도로 (중2-14) 개설	2,900	1,000	800	400	700	2023	2022	50
오천 세계리 도시계획도로 (중2-12) 개설	5,600	5,000	600	-	-	2022	2022	100
연일 생지리 도시계획도로 (중2-91) 개설	2,350	1,700	650	-	-	2023	2021	80
연일 택전리 도시계획도로 (중1-16) 개설	2,900	400	700	500	1,300	2025	2021	20
대송 대각리 도시계획도로 (중1-171) 개설	5,600	3,200	1,000	1,000	400	2025	2018	30
동해 흥환리 도로(시도1호) 확포장	15,400	10,376	844	150	4,030	2030	2020	67
문화도시 조성사업	19,600	5,771	2,480	3,520	7,829	2024	2020	60
제14회연일부조장터문화축제	125	-	125	-	-	2022	2019	100
제7회 월포 락 페스티벌	250	-	250	-	-	2022	2019	100
제5회 포은서예 국제대전	126	-	126	-	-	2022	2019	100
교향악단 기획공연 포항뮤직페스티벌	100	-	66	-	-	2022	2019	100
첨단제조 플랫폼기반 ICT혁신 제품화 지원사업	4,500	-	-	750	3,750	2024	2022	50
그린바이오 벤처 캠퍼스	35,000	-	-	3,300	31,700	2029	2022	10
구조기반 백신기술 상용화 시스템 조성	18,000	-	-	6,000	12,000	2024	2022	40
바이오프린팅 활용 동물대체시험평가 플랫폼 구축	16,465	-	-	8,777	7,688	2024	2022	30
스마트양식 클러스터 조성사업	40,000	-	5,600	19,400	15,000	2025	2021	14
방석리항 어촌뉴딜300사업	8,400	89	436	7,875	-	2023	2021	20
철강산업재도약기술개발사업 (포항거점센터)	20,650		6,800	6,450	7,400	2025	2020	40
북구보건소 및 재난트라우마센터 통합건립	49,730	9,824	5,547	18,654	15,705	2024	2021	19
포항 철강산업단지 완충저류시설 설치사업	43,187	21,555	9,515	12,117		2022	2018	73
구무천 생태하천복원사업	28,046	10,373	1,685	15,988		2023	2021	30
영일대해수욕장 비점오염저감 시설 설치사업	10,606	930	1,674	8,002		2023	2020	42

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2022년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

송도 생활밀착형 국민체육센터·행정복지센터 건립

담당자

체육산업과 장호성(☎270-2805)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 내 주민들이 이용할 수 있는 수영장 등 체육인프라가 갖춰 있지 않아

생활체육 활성화를 통하여 체육복지 증진을 위한 시설이 시급한 실정

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 3월 ~ 2023. 11월

○ 위 치 : 포항시 남구 송도동 254-614번지 외 9필지

○ 규 모 : 국민체육센터(수영장 25m*4L) 및 행정복지센터 건립

지상3층, 연면적 3,747㎡, 부지면적 9,270㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,700백만원(기금 3,000, 특교 1,000, 시비 12,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	15,700	6,000	3,500	6,200
국 비	3,000	3,000	-	-
특별교부세	1,000	1,000	-	-
시 비	11,700	2,000	3,500	6,200

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 61%)

○ 2019. 03. : 생활체육시설 확충 지원사업 선정

○ 2019. 06. : 경상북도 지방재정 투자심사

○ 2019. 08. : 도시관리계획 결정(변경) 용역 착수

○ 2019. 10. : 공유재산관리계획 의결

○ 2019. 12. : 중기지방재정계획 반영

○ 2020. 02. : 도시관리계획(용도지역 및 체육시설⸱공공청사) 결정(변경)입안

○ 2020. 07. : 도시관리계획 결정(변경)

○ 2020. 10. : 건축기획 및 사전검토, 공유재산관리계획 변경(용도변경)

○ 2020. 11. : 건축설계 공모

○ 2021. 02. ~ 2021. 11. : 실시설계

○ 2022. 01. : 착공

○ 2022. 02. : 경상북도 지방재정 투자심사(재심사)

○ 2019. 08. : 도시관리계획 결정(변경) 용역 착수

○ 2022. 03. : 문체부 사업변경 승인(행정복지센터 추가)

□ 향후계획

○ 2023. 11. : 준공

사업명

제60회 경북도민체육대회 개최

담당자

체육산업과 정연석(☎270-2783)

□ 사업목적 및 필요성

○ 제60회 경북도민체육대회를 개최하여 도민화합 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 7. 15. ~ 7. 18.

○ 위 치 : 포항종합운동장 외 각 종목별 경기장

○ 규 모 : 29개 종목

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,290백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,290		3,290
국 비
시 도 비	1,700		1,700
시군구비	1,590		1,590
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 제60회 경북도민체육대회 개최

□ 향후계획

○ 해당없음

사업명

보경사군립공원 내 자연학습장 조성

담당자

공원과 박가혜 (☎270-3226)

□ 사업목적 및 필요성

○ 내연산보경사시립공원 내 자연학습장을 조성하여 군립공원을 찾는 다양한 계층의 이용객에게 산책 및 휴게공간을 제공하고 어린이들에게 학습공간을 제공하는 자연친화적인 휴식 공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2024년

○ 위 치 : 포항시 북구 송라면 중산리 574-4번지 일원

○ 규 모 : 자연학습장 조성 1식(A=40,901㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,221백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2023년 이후
계	9,221	4,321	1,600	2,500	800
국 비
시 도 비	1,700		800	500	400
시군구비	7,521	4,321	800	2,000	400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공사추진 공정율 5%)

○ 2021. 03. ~ 2022. 12. : 실시설계용역

○ 2022. 07. ~ 2023. 01. : 관련부서 협의

○ 2023. 04. ~ 현재 : 공사 추진

□ 향후계획

○ 2024. 10. : 자연학습장 조성공사 완료

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

제26회 호미곶한민족해맞이축전

담당자

컨벤션관광산업과 양영진

(☎270-2246)

□ 사업목적 및 필요성

○ 한반도에서 연중 해가 가장 먼저 뜨는 호미곶의 지리·역사적 상징성을

활용하여 지역 브랜드 인지도 제고 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 제25회 호미곶한민족해맞이축전

- 일시 : 2022. 12. 31. ~ 2023. 1. 1.

- 장소 : 호미곶해맞이광장 일원

- 내용 : 해넘이행사(자정행사), 해맞이행사, 떡국나눔 등 부대행사 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 345백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	184	-	184
국 비	-	-	-
시 도 비	18	-	18
시군구비	166	-	166
지 방 채		-	-	-	-
민간자본		-	-	-	-
기 타		-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 53.3 %)

○ 제25회 호미곶한민족해맞이축전 개최 완료

- 일시 : 2022. 12. 31. ~ 2023. 1. 1.

- 장소 : 호미곶해맞이광장 일원

- 내용 : 해넘이행사(자정행사), 해맞이행사, 떡국나눔 등 부대행사 운영

□ 향후계획

○ 호미곶한민족해맞이축전 행사대행사 확정 및 안전대책 수립

○ 축제 운영 및 추진결과·정산보고

사업명

한반도 동끝마을, 호미곶으로의 초대

담당자

컨벤션관광산업과 양영진

(☎270-2246)

□ 사업목적 및 필요성

○ 호미곶이 가진 해양지질자원과 해맞이광장, 새천년기념관 등 기존 관광

자원을 활용·개선하여 생태관광 명소화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 9. ~ 11.

○ 위 치 : 호미곶 일원

○ 규 모 : 야심만만 영화제, 포항의 인어, 호미곶 지질탐험대 등 행사운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 412백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	412	-	-	286	126
국 비	206	-	-	143	63
시 도 비	61.8	-	-	42.9	18.9
시군구비	144.2	-	-	100.1	44.1
지 방 채		-	-	-	-
민간자본		-	-	-	-
기 타		-	-	-	-

※ (`22. 9. ~ 12.) 태풍 힌남노 피해복구로 인한 예산 명시이월

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0 %)

○ (`22.9. ~ 12.) 태풍 힌남노 피해복구로 인한 예산 23년 명시이월

□ 향후계획

○ (`23. 5. 예정) 호미곶 생태녹색관광 프로그램 운영

○ (`23. 7. 예정) 행사 운영 및 추진결과·정산보고

사업명

포항운하축제

담당자

컨벤션관광산업과 박수정

(☎270-2243)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국유일 도심운하인 ‘포항운하’의 상징성을 강화하고, 포항운하축제를 통하여

지역의 문화와 특성을 살린 도시이미지 제고 및 지역경제 활성화 기여

○ 포항운하 인근 주거환경이 열악한 송도·해도 구도심 지역의 주민들에게

색다른 문화관광 경험의 기회를 제공하여 삶의 질 제고

□ 사업개요

○ 제7회 포항운하축제

- 기 간 : 2022. 10. 22.(토) ~ 10. 23.(일)

- 위 치 : 포항운하 일원

- 내 용

· 1일차 : 방티타기대회, 에코보트경연대회, 개막식 및 축하공연 등

· 2일차 : 운하폰툰달리기대회, 워터볼레이스 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  120백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	120	-	120	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	30	-	30	-	-
시군구비	70	-	70	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	20	-	20	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 제7회 포항운하축제 개최완료

- 기 간 : 2022. 10. 22.(토) ~ 10. 23.(일)

- 위 치 : 포항운하 일원

- 내 용

· 1일차 : 방티타기대회, 에코보트경연대회, 개막식 및 축하공연 등

· 2일차 : 운하폰툰달리기대회, 워터볼레이스 등

□ 향후계획

○ (’23년 상반기 중) 행사 결과보고 및 정산 추진

사업명

포항국제불빛축제

담당자

컨벤션관광산업과 박수정

(☎270-2243)

□ 사업목적 및 필요성

○ 포스코 용광로로 대표되는 공업도시 포항의 정체성인 ‘불’과 ‘빛’을 테마로

지역기업과 시민들이 주도하여 참여하는 ‘포항국제불빛축제’ 개최 추진

○ 전국 3대 불꽃축제이자 포항의 대표적인 문화관광축제로서 명실상부한

전국대표축제로 자리매김하기 위한 축제브랜딩 통해 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 2022 포항국제불빛축제

- 기 간 : 2022년 9월 23일 ~ 9월 25일

- 위 치 : 형산강체육공원 일원

- 내 용

· 1,3일차 : 불빛낭만콘서트, 데일리불꽃쇼, 각종 부대행사 등

· 2일차 : 개막식, 퐝거리퍼레이드, 국제불꽃쇼, 각종 부대행사 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  860백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	371	-	371	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	371	-	371	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 43.1%)

○ ‘22. 9.  : 제11호 태풍 힌남노 피해복구 및 시민안전 위한 축제 취소

(축제 취소 홍보 등 운영비 일부집행)

□ 향후계획

○ (’23년 상반기 중) : 2023 포항국제불빛축제 사업비 정산

사업명

환동해해양복합 전시센터 건립

담당자

컨벤션관광산업과김현정

(☎270-8108)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지진 피해 및 철강산업 침체 극복과 산업의 다변화를 위한 새로운 성장 동력 창출을 통한 지역경제 재도약의 계기 마련

○ 환동해 해양물류관광 거점도시의 미래 성장산업 육성 플랫폼 구축으로 고부가치 MICE산업을 접목한 환동해 해양복합전시센터 건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2023.

○ 위 치 : 포항시 북구 장성동 1287번지 일원 [(구) 캠프리비]

○ 규 모 : 지하1층/지상5층, 건축면적 18,557㎡, 연면적 48,460㎡

* 전시시설 7,175㎡, 컨벤션시설 3,444㎡, 지원·부대·공용·기타시설 37,841㎡, 주차대수 707대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 176,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	176,600	23,500	2,335	6,365	144,400
국 비	27,000	-	1,000	900	25,100
시 도 비	149,600	23,500	1,335	5,465	119,300
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ ‘22. 5. ~ ’22. 10. 도시관리계획 결정(변경) 용역 (80%)

* 용역중지(‘22.11.), 재개예정(’23.08.)

○ ‘22.12. ~ ‘23.12. 기본 및 실시설계 용역 (20%)

○ ‘23.03. ~ ‘23.11. 교통영향평가 용역(20%

□ 향후계획

○ ‘24.03. : 착공

○ ‘26.12. : 준공 및 시운전

○ ‘27.06. : 개관식

□ 사업변경 내역

		당 초	현 재	비 고
총사업비		97,100백만원	176,600백만원	2022년 지방재정 중앙투자심사 결과 반영 (부지매입 기투자비 235억 포함)
건축규모	층 수	지하1층/지상3층	지하1층/지상5층
	건축면적	15,430㎡	18,378㎡	증 2,948㎡
	연 면 적	47,931㎡	48,460㎡	증 529㎡
	전 시 장	7,679㎡	7,175㎡	▽ 504㎡
	컨 벤 션	3,541㎡	3,444㎡	▽ 97㎡
	부대시설	7,407㎡	4,113㎡	▽ 3,294㎡
	기타시설	16,829㎡	33,728㎡	증 16,899㎡
	주차대수	674대	707대	증 33대

※ 건축규모 설계완료 후 변경 가능

사업명

경상권역 임산물 물류터미널 조성

담당자

녹지과 김봉현(☎270-2403)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고부가가치 임업의 6차 산업화 추진 및 입업과 산촌의 소득창출 기여

○ 단기소득 임산물에 대한 유통 및 수출 활성화를 위한 인프라와 거점마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 09. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 대련리 산152

○ 규 모 : 부지 5,000㎡(건축 900㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,000		70	130	3,800
국 비	2,000		35	65	1,900
시 도 비	600		10.5	9.75	570
시군구비	1,400		24.5	45.5	1,330
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ (＇22. 12.~＇23. 6.) 경상권역 임산물 물류터미널 기본계획 용역

○ (＇23. 07.~＇23. 8.) 경상권역 임산물 물류터미널 건축기획 용역

□ 향후계획

○ (＇23. 08.) : 포항시공공건축심의위원회 심의

○ (＇23. 08.~＇23. 09.) 경상권역 임산물 물류터미널 설계공모

○ (＇23. 10.~＇24. 01.) 경상권역 임산물 물류터미널 실시설계 용역

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

여남동 도시계획도로(소2-43)개설

담당자

도로시설과 김민수(☎270-3435)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기 미집행 도시계획시설(도로)개설로 지역주민 민원해소

○ 주택 밀집지역 소방도로 확보 및 도시기반시설 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2025년

○ 위 치 : 포항시 북구 여남동 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=530m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,750	1,900	125	1,025	700
국 비
시 도 비	750	750
시군구비	3,000	1150	125	1,025	700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 23%)

○2017년 1차공사 완료

○2022년 잔여구간 토지보상 22필지중 19필지 완료

□ 향후계획

○ 잔여구간(L=410m) 토지매입 및 도로개설

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경 29억→37.5억

사업명

기계 현내리 도시계획도로(중2-78)개설

담당자

도로시설과 김민수(☎270-3435)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기 미집행 도시계획시설(도로)개설로 지역주민 민원해소

○ 면 소재지의 혼잡한 교통정체로 인한 주민불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2022년

○ 위 치 : 포항시 북구 기계면 현내리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=460m, B=15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,800	3,521	279	-	-
국 비
시 도 비	960	820.5	139.5
시군구비	2,840	2,700.5	139.5	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○2020년 L=330m 개설

○2022년 L=130m 개설

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경 2021년→2022년

사업명

기계 현내리 도시계획도로(중2-173)개설

담당자

도로시설과 김민수(☎270-3435)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국도31호선 연결도로 개설로 접근성 및 주민이동 편의성 향상

○ 도시기반시설 확충으로 지역균형발전 및 쾌적한 주거생활제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2024년

○ 위 치 : 포항시 북구 기계면 현내리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=170m, B=15m, 도로확장 L=390m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,500	-	1,000	1,200	300
국 비
시 도 비	475	-		475
시군구비	2,025	-	1,000	725	300
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○2022년 토지보상완료

□ 향후계획

○ 도로개설(L=170m, B=15m) 및 확장(L=390m)

사업명

기계 남계~현내리(면도103) 도로확포장

담당자

도로시설과 김민수(☎270-3435)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌주민 교통편익 제공 및 농산물 수송 물류비 절감

○ 마을 접근성 개선으로 정주여건 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010년 ~ 2025년

○ 위 치 : 포항시 북구 기계면 인비리~남계리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 및 개설 L=6.1km, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,750	4,250	783	417	1,300
국 비
시 도 비	50	50
시군구비	6,700	4,200	783	417	1,300
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○2020년 L=5.1km 개설완료

○2022년 토지보상 진행중 (30필지중 24필지 완료)

□ 향후계획

○ 보상완료구간 도로개설(L=200m, B=8m)

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경 2020년 → 2025년

○ 사업비 변경 63억 → 67.5억

사업명

송라 하송리(리도202)도로확포장 공사

담당자

도로시설과 지승훈(☎270-3328)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌주민 교통편익 제공 및 농산물 수송 물류비 절감

○ 협소한 농어촌도로 확장으로 교통안정성 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022.02. ~ 2027.12.

○ 위 치 : 포항시 북구 송라면 하송리 일원

○ 규 모 : 농어촌도로 확·포장 L=1,600m, B=7.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	5,750	50		700	5,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2022. 02.~06. : 실시설계용역 착공 및 준공

○ 2022. 08. : 주민설명회 개최

□ 향후계획

○ 2023.06. : 보상협의

○ 2023.11. : 공사착공

사업명

청하 신흥리(리도206)도로확포장 공사

담당자

도로시설과 지승훈(☎270-3328)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신흥리 인근 공장 밀집지역의 진·출입 화물차량 우회도로 개설

○ 협소한 농어촌도로 확장으로 교통안정성 확보

○ 고속국도 제65호선 포항~영덕간 고속도로공사 협의사항

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022.02. ~2027.12.

○ 위 치 : 포항시 북구 청하면 신흥리 일원

○ 규 모 : 농어촌도로 확·포장 L=1,600m, B=9m~12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	5,580	70		150	5,360
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2020. 02. : 실시설계용역 착공

○ 2022. 04. : 신흥리 마을주민들의 확포장 반대 건의

○ 2022. 05. : 실시설계용역 준공

□ 향후계획

○ 2023.08. : 소규모재해영향평가, 환경영향평가 용역

○ 2023.11. : 보상협의

사업명

신광~흥해 매산리간도로(시도7호선) 확포장

담당자

도로시설과 배병휴(☎270-3433)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로기반시설 확충으로 교통소통 원활 및 지역균형 발전 도모

○ 급커브 등 위험구간 도로확장으로 안전사고 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010년 ~ 2026년

○ 위 치 : 포항시 북구 신광면 사정리 ~ 흥해읍 매산리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=3.8km, B=17.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	21,200	12,400	1,500	400	6,900
국 비
시 도 비	100	100
시군구비	21,100	12,300	1,500	400	6,900
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2019년 1, 2차 공사 준공(범촌매운탕~보원사, L=0.98km)

○ 2020년 3차 공사 준공(보원사~호리교, L=0.47km)

○ 2021년 4차 공사 준공(회전교차로~SK주유소, L=0.67km)

□ 향후계획

○ 잔여구간(L=1.68km) 토지매입 및 도로개설

사업명

양학동~흥해 대련간 도시계획도로(중1-55) 개설

담당자

도로시설과 배병휴(☎270-3433)

□ 사업목적 및 필요성

○ 포항~대구간 고속도로 개통으로 연화재사거리 구간 교통량 증가에 따른 교통정체 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2025년

○ 위 치 : 포항시 북구 양학동 ~ 흥해읍 대련리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.76km, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	32,800	600	200	10,000	22,000
국 비
시 도 비	200	200
시군구비	32,600	400	200	10,000	22,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2020년 실시설계 완료

○ 2021년 소규모환경영향평가 협의 완료

○ 2022년 지적분할 및 공부정리

□ 향후계획

○ 보상 및 도로개설(L=1.76km)

사업명

죽장 현내~두마리(리도201)도로 확포장

담당자

도로시설과 양희원(☎270-3434)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 차로 협소 및 노면상태 불량하여 농산물 적기수송 불편

○ 면봉산 방문 등산객들의 이용차량 증가로 주민생활 불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2024년

○ 위 치 : 포항시 북구 죽장면 현내~두마리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=8.4km, B=6.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,830백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2023년 이후
계	3,830	1,830	173	600	800
국 비
시 도 비	1,120	1,120	173
시군구비	2,710	710		600	800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  70%)

○ ’03 ~ ’23년 일부 구간 공사완료 L= 5.6km, B=6.5

□ 향후계획

○L=2.8km, B=6.5m 개설

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경

당초 2003~2018,  변경 2003-2024

사업명

흥해 학천리 도시계획도로(소2-3) 개설

담당자

도로시설과 양희원(☎270-3434)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역주민 민원해소

○ 어린이보호구역 인근 도로개설로 사고위험

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2023년

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 학천리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=500m, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2023년 이후
계	4,200	3,150	200	850
국 비
시 도 비	325	325
시군구비	3,875	2,925	200	850
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  70%)

○ ’18 ~ ’21년 일부 구간 공사완료 L= 412km, B=8.0m

□ 향후계획

○L=88m, B=8.0m 개설

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경

: 당초 2014~2022,  변경 2014-2023

○ 총사업비 변경

: 당초 39억원,  변경 45억원, 변경 42억원

사업명

죽장 침곡리(리도203)도로 확포장

담당자

도로시설과 양희원(☎270-3434)

□ 사업목적 및 필요성

○ 미포장 및 협소한 도로로 인한 지역주민 불편 해소

○ 마을 접근성 개선으로 정주여건 조성 및 지역균형발전 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2023년

○ 위 치 : 포항시 북구 죽장면 침곡리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=6.0km, B=6.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2023년 이후
계	2,400	1,120	1,000	280
국 비
시 도 비	500		500
시군구비	1,900	1,120	500	280
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  30%)

○ ’19 ~ ’20년 일부 구간 공사완료 L= 1.3km, B=6.5

□ 향후계획

○L=4.7km, B=6.5m 개설

사업명

동해 도구리 도시계획도로(소2-40) 개설

담당자

도로시설과 공영훈(☎270-3444)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동해면민운동장 시설 확충사업계획에 따른 교통체증 해소 및 차량통행 편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. ~ 2023.

○ 위 치 : 포항시 남구 동해면 도구리 3-8번지 일원(복지회관 옆)

○ 규 모 : 도로개설 L=460m B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,400	1,450	250	1,700
국 비
시 도 비
시군구비	3,400	1,450	250	1,700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2012. 03. : 실시설계용역 완료

○ 2016. 04. : 동해 약전리 구간 공사 완료(L=217m)

○ 2022. 11. : 1구간 공사 완료(L=158m)

○ 2022. 11. : 보상완료

□ 향후계획

○ 2023. 04. : 잔여구간 발주(L=85m)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 변경

: 당초 2012~2021,  변경 2012-2023

○ 총사업비 변경

: 당초 24억원,  변경 34억원(재심사)

사업명

오천 세계리 도시계획도로(소1-17) 개설

담당자

도로시설과 공영훈(☎270-3444)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시기반시설 확충에 따라 지역경제 활성화와 각종 민원해소를 위하여 사업추진이 시급함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2024.

○ 위 치 : 포항시 남구 오천읍 세계리 702-1번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=232m B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,300	800		900	600
국 비
시 도 비
시군구비	2,300	800		900	600
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2018. 03. : 실시설계용역 완료

○ 2019. 09. : 1구간 공사 완료(L=112m)

○ 2022. 06. : 보상(1필지) 및 지장물 보상

□ 향후계획

○ 2023. 04. : 2구간 공사 착공(L=20m)

사업명

동해 도구리 도시계획도로(중2-14) 개설

담당자

도로시설과 공영훈(☎270-3444)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기부 대 양여 사업에 따른 해병대1사단16연대의 협소한 부대 진출입로 해결.

○ 지역주민 및 포항공항 이용객 등의 통행불편 등 각종 민원해소.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. ~ 2023.

○ 위 치 : 포항시 남구 동해면 도구리(예비군훈련장 인근) 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=1.08km B=15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,900	1,000	800	400	700
국 비
시 도 비
시군구비	2,900	1,000	800	400	700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2016. 09. : 실시설계용역 완료

○ 2022. 12. : 포항공항~예비군훈련장 공사 완료(L=265m)

○ 2022. 12. : 기부대양여사업 착공

□ 향후계획

○ 2023. 08. : 도로개설 잔여구간 착공(L=168m)

○ 2023. 10. : 기부대양여사업 준공

사업명

오천 세계리 도시계획도로(중2-12) 개설

담당자

도로시설과 공영훈(☎270-3444)

□ 사업목적 및 필요성

○ 오천읍 세계리 주민 및 오천 해병대를 찾는 방문객의 교통량을 분산시켜 도심지 교통체증 해소.

○ 밀집된 주택가의 소방도로 개설로 인한 주민의 재산과 생명 보호.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2006. ~ 2022.

○ 위 치 : 포항시 남구 오천읍 세계리(오천세계지점농협 옆) 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=1.14km B=15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,600	5,000	600
국 비
시 도 비	1,300	1,300
시군구비	4,300	3,700	600
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2006. 04. : 실시설계용역 완료

○ 2017. 03. : 지방재정 자체투자심사 완료

○ 2022. 12. : 잔여구간 공사 완료(L=265m)

○ 2022. 12. : 보상완료

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경

: 당초 2006~2018,  변경 2012-2023

○ 총사업비 변경

: 당초 40억원,  변경 56억원(재심사)

사업명

연일 생지리 도시계획도로(중2-91) 개설

담당자

도로시설과 김성원(☎270-3443)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역주민 민원해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2022

○ 위 치 : 포항시 남구 연일읍 생지리 100-3 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=500m, B=15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,350	1,600	100	650
국 비
시 도 비
시군구비	2,350	1,600	100	650
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2015. 03. : 실시설계용역 완료

○ 2021. 12. : 보상율 100%

○ 2022. 04. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2022. 04~12 : 준공

사업명

연일 택전리 도시계획도로(중1-16) 개설

담당자

도로시설과 김성원(☎270-3443)

□ 사업목적 및 필요성

○ 연일읍사무소~인주IC간(광3-4) 도로가 2021년 개설예정이나 택전리, 중단리,

중명리 일원 주민들은 신규개설 도로를 우회하여 진입하는 불편함을

초래할것으로 예상됨

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2025

○ 위 치 : 포항시 남구 연일읍 택전리 247-5일원

○ 규 모 : 도로개설 L=280m, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,900	50	350	700	1,800
국 비
시 도 비
시군구비	2,900	50	350	700	1,800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2020. 08. : 실시설계용역 완료

○ 2022. 12. : 보상율 50%

□ 향후계획

○ 2023. 1~12 : 보상시행

○ 2023. ~ 2025 : 공사시행

사업명

대송 대각리 도시계획도로(중1-171) 개설

담당자

도로시설과 김성원(☎270-3443)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시기반시설 확충으로 물동량 수송원활

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2025

○ 위 치 : 포항시 남구 대송면 대각리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=1.3km, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,600	1,200	2,000	1,000	1,400
국 비
시 도 비	250	250
시군구비	5,350	950	2,000	1,000	1,400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2019. 08. : 실시설계용역 완료

○ 2021. 12. : 보상율 90%

○ 2022. 07. : 특정공법심의 완료

□ 향후계획

○ 2023.01 ~ 2023.07 : 사전행정 행위 완료

(지방하천기본계획변경, 공작물설치허가 등)

○ 2023.07 ~ 2024.12 : 교량공사 시행

사업명

동해 흥환리 도로(시도1호) 확포장

담당자

도로시설과 김서준(☎270-3445)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로확포장으로 각종 안전사고 예방 및 지역주민 편의제공

○ 도시기반시설 확충으로 지역균형개발 및 숙원사업 해결

□ 사업개요

○ 기 간 : 1996. 01. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 포항시 남구 동해면 흥환리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=20.4km, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	15,400	10,376	844	150	4,030
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,940	2,940	-	-	-
시군구비	12,160	7,136	844	150	4,030
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	300	300	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2016. 12. : 실시설계용역 완료(300백만원)

○ 2017. 02. : 중앙 투자심사 반영

○ 2019. 11. : 보상율 56% (170필지/300필지 보상완료)

* 총사업비 중 60% 집행 (공사진도율 51%)

○ 2022. 10. : 흥환2리 일부구간(L=180m) 준공

○ 2022. 12. : 중흥리 일부구간(L=110m) 준공

○ 2023. 04~09. : 흥환리 일부구간(L=84m) 준공

□ 향후계획

○ 흥환리 및 중흥리 도로(시도1호선) 구간 확포장

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

문화도시 조성사업

담당자

문화예술과 김진향(☎270-2263)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시민의 품격과 행복한 삶을 위한 문화도시 포항 조성

○ 시민 누구나 문화예술을 즐기고 배우는 문화생태계의 기본 조성

* 2019년 12월 법정 문화도시로 문화체육관광부에서 최종 선정

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2024년(5년간)

○ 위 치 : 포항시 전역(포항운하, 동빈내항, 꿈틀로 등)

○ 규 모 : 19,600백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	19,600	5,771.4	2,480	3,520	7,828.6
국 비	9,800	2,885.7	1,240	1,760	3,914.3
시 도 비	2,940	865.71	372	528	1,174.29
시군구비	6,860	2,019.99	868	1,232	2,740.01
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 시민주도형 도시문화 거버넌스 구축

○ 권역별 문화거점화로 생활문화공간 확대 및 문화적 공간 지속성 확보

○ 다양한 지역자원을 활용한 문화콘텐츠의 발굴을 통한 문화적 자산 확보

○ 복합문화공간 활성화 사업 운영

□ 향후계획

○ 문화도시 4~5차 년도 사업 추진

○ 문화도시 조성사업 구체적 성과 도출 및 향후 지속방안 마련

사업명

제14회 연일부조장터 문화축제

담당자

문화예술과 이현수(☎270-2264)

□ 사업목적 및 필요성

○ 조선시대 경상도 지역 3대 장터 ‘부조장’을 재현한 문화축제 개최로 전통문화를 계승․발전시키고, 지역민의 애향심과 지역문화에 대한 긍지를 고취

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 11. 12. ~ 13.(2일간)

○ 위 치 : 포항시 남구 연일읍 형산강 둔치(신부조 장터공원)

○ 규 모 : 연일부조장터 문화축제 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 125백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	125	-	125
국 비
시 도 비	30	-	30
시군구비	70	-	70
지 방 채
민간자본
기 타	25	-	25

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2022. 10. 지방보조금 교부

○ 2022. 11. 축제 개최

○ 2023.  1. 지방보조금 정산 완료

□ 향후계획

○ 2023.  9. 지방보조금 교부

○ 2023. 10. 제15회 연일부조장터축제 개최

사업명

제7회 월포 락 페스티벌

담당자

문화예술과 이선미(☎270-2873)

□ 사업목적 및 필요성

○ 뮤직페스티벌의 불모지인 포항에서 여름철 관광객 및 포항시민이 함께 즐길 수 있는 수준 높은 공연을 개최함으로써 월포해수욕장을 여름철 대표적 공연의 명소로 만들고, 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 8. 5. ~ 8. 6.(2일간)

○ 위 치 : 월포해수욕장 특설공연장

○ 규 모 : 축제 · 행사 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	250		250
국 비
시 도 비	60		60
시군구비	140		140
지 방 채
민간자본
기 타	50		50

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

◦ 2021. 8.～9. : 사업 계획 수립, 관계자 회의 등

◦ 2022. 3.～5. : 공연 실행계획 수립, 뮤지션 섭외 등

◦ 2022. 6.～7. : 경연대회 참가팀 모집 및 1차 심사,

공연팀과 공연 협의, 시스템 및 물품 구성 계획 등

◦ 2022. 8월 첫째 주 공연실행 : 실행계획에 따른 공연실행 및 결과 정리

□ 향후계획

○ 2023. 8. 제8회 월포 락 페스티벌 개최 예정

사업명

제5회 포은서예국제대전(교류전)

담당자

문화예술과 이선미(☎270-2873)

□ 사업목적 및 필요성

○ 포은의 학문과 업적을 기리고 포은의 고장을 국제적 홍보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 4월 ~ 10월

○ 위 치 : 포항문화예술회관

○ 규 모 : 축제 · 행사 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 126백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	126		126
국 비
시 도 비	23		23
시군구비	77		77
지 방 채
민간자본
기 타	26		26

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :100%)

○ 2022. 4. 사업홍보 및 작품접수

○ 2022. 8. 작품공모 접수, 심사위원회 구성

○ 2022. 10. 도록제작, 전시

○ 2022. 10.~ 시상, 배부, 사업정산

□ 향후계획

○ 제6회 포은서예국제대전(교류전) 개최

사업명

교향악단 기획공연 포항뮤직페스티벌

담당자

문화예술과 함성준(☎270-5482)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낯설게 느껴지는 클래식 문화에 대한 대중의 문턱을 낮추고, 대중적이고       친숙한 프로그램 구성으로 시민들의 음악적 수요에 부응

○ 유명 지휘자 및 연주자와의 협연을 통한 시립예술단의 대외경쟁력 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 7. 1. ~ 7. 2.(2일간)

○ 위 치 : 포항문화예술회관 대공연장, 포항시청 대잠홀

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	66		66
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 1일차(2022. 7. 1.) : 김준수와 두 번째달

○ 2일차(2022. 7. 2.) : 포항시립교향악단·합창단 오페라 하일라이트

□ 향후계획

○ 2023 포항뮤직페스티벌 개최 완료 (2023. 6. 9.)

○ 매년 새로운 프로그램 구성

○ 국내외 저명한 지휘자 및 협연자 초청 공연 추진

사업명

첨단제조 플랫폼기반 ICT혁신 제품화 지원사업

담당자

바이오미래산업과 진효림

(☎270-3843)

□ 사업목적 및 필요성

○ 첨단제조 플랫폼 기반 ICT 핵심기술개발 지원

○ 애플 “제조업 R&D 지원센터” 유치를 계기로 경북소재 중소/벤처기업에 대한 첨단기술 기반 ICT 혁신 제품화를 위한 연계 협력사업 추진 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 09. 01 ~ 2024. 08. 31 (24개월/2년)

○ 위 치 : 포항공과대학교 산학협력단(나노융합기술원)

○ 규 모 : 첨단융합산업/제품 핵심기술의 사업화 지원 및 산업화 촉진

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,500	-	750	2,250	1,500
도 비	1,170	-	195	585	390
시 비	2,730	-	455	1,365	910
민 간	600	-	100	300	200

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50 %)

○ 기업지원을 위한 플랫폼 공정기술개발/3차원 고정밀 분석 개발

○ 시제품 제작을 위한 첨단제조 공정/성능평가 시험분석 기업지원

○ 첨단제조 플랫폼 지원을 위한 핵심장비 : AFM, EDS(SDD) 장비구매 진행

□ 향후계획

○ 신규 LP CVD용 Furnace 장비 구매 진행

○ 기업수요 맞춤형 8인치 웨이퍼 반도체 공정 플랫폼 기술개발/나노반도체

공정개발 고정밀 토탈 솔루션 분석기술개발

○ 첨단 ICT 핵심기술 기반 첨단제조 공정/시험분석 기업지원

사업명

그린바이오 벤처 캠퍼스

담당자

바이오미래산업과 강용학

(☎270-3133)

□ 사업목적 및 필요성

○ IT, BT 등 첨단기술과 융합한 그린바이오 산업은 높은 잠재력과 성장 가능성으로       농식품 및 관련 산업의 새로운 성장 동력을 창출하는 신산업 분야

○ 우리나라는 그린바이오 산업 분야 육성을 위한 대규모 유전 자원 확보에도

불구하고 첨단기술을 활용한 산업화 기술은 선도국에 비해 낮은 실정

○ 포항은 첨단기술을 기반으로 그린바이오 5대 핵심기술 지원이 가능하며

벤처 창업 및 육성 경험을 통해 그린바이오 창업 생태계 조성에 최적지

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 8. ~ 2029.

○ 위 치 : 포항융합기술산업지구 I8-1L

○ 규 모 : 부지면적 13,051㎡/ 연먼적 6,000㎡(지하1층/지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 35,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계			3,300	7,394	24,306
국 비	16,170	0	350	2,394	13,426
시 도 비	4,809	0	45	1,500	3,264
시군구비	14,021	0	2,905	3,500	7,616

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ `22. 05.: 공모사업 선정

○ `22. 09.: 부지매입

○ `23. 06.: 기본 및 실시설계 시행

□ 향후계획

○ `24. 02.: 시공사 선정공모

○ `24. 04.: 조성사업 착공

○ `24. 06.: 조성사업 준공

사업명

구조기반 백신기술 상용화 시스템 조성

담당자

바이오미래산업과 정재원

(☎270-3143)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신·변종 감염병 질환 증가에 대비한 상용화 기술개발 필요

○ 포항은 단백질 구조 분석 통한 구조규명 기술과 전문인력 보유하여 기업 수요에 맞춘 기술지원 가능

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2024

○ 위 치 : 세포막단백질연구소 내

○ 규 모 : 기업지원용 극저온전자현미경 도입 1식 / 상용화 기술개발 및 기업지원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계
국 비	10,000	-	3,000	3,500	3,500
시 도 비	2,400	-	900	1,500	-
시군구비	5,600	-	2,100	3,500	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40 %)

○ 기업지원 시스템 : 기업협의체 구성·운영 통한 기업지원 시스템 구축/운영

○ 기업지원 연구장비 구축 : 고해상도 현미경 및 서버 구축

- 고해상도 극저온 전자현미경 입고(2023. 6. ~ 9.)

- 고성능 컴퓨터 서버 구축(2022. 11.)

□ 향후계획

○ 신규 극저온전자현미경 도입(2023. 10. 설치 완료 및 시운전)

○ 기업수요 맞춤형 극저온 전자현미경 기반 기술개발

○ 구조기반 백신 선도물질 발굴 및 기업지원

○ 극저온전자현미경 활용 기업지원 시스템 구축·운영

사업명

바이오프린팅 활용 동물대체시험평가 플랫폼 구축

담당자

바이오미래산업과 정재원

(☎270-3143)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인구 고령화로 인공장기 시장의 급성장이 예상됨에 따라, 바이오 인공장기 기술을 활용한 다양한 연관 산업 활성화 기대

○ 바이오프린팅 기반 인공장기 대량 제작기술 도입으로 장기이식 대기환자를 위한 맞춤형 치료기술 선점 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2024

○ 위 치 : 포항지식산업센터 내

○ 규 모 : 인공장기 제작 및 생산시설(GMP) 구축 1식 및 기술지원/인력양성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,465백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	16,465	-
국 비	7,465	-	3,088	2,777	1,600
시 도 비	6,477	-	1,380	1,110	210
시군구비	2,300	-	3,220	2,590	490

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30 %)

○ 2022.  4. 스마트특성화 기반구축사업 공모선정

○ 2022. 10. 개념설계 실시

○ 2023.  6. GMP 인증 컨설팅 계약

○ 2023.  6. 기업협의체 구성/운영 및 장비활용시스템 구축

○ 2023.  7. cGMP 및 Wet-lab 시설 건축사 선정 및 착공

□ 향후계획

○ 2023. 7. : cGMP 및 Wet-lab 시설 건축사 선정 및 착공

○ 2024. 1. : cGMP 및 Wet-lab 시설 완공 및 시운전

○ 2024. 4. : cGMP 시설 인증(국내 cGMP 기관 연계)

○ 2024. 5. : 인공장기 활용 시험/성능 평가 및 cGMP 활용 기술 지원

○ 2024. 8. : 인공피부 시험평가 지원 및 평가법 개발 및 제공

○ 2024. 12. : 바이오소재(의약품, 화장품) 기업지원을 통한 바이오산업 활성화

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

스마트양식 클러스터 조성사업

담당자

수산정책과 장태호(☎270-2733)

□ 사업목적 및 필요성

○ 연어의 양식기술 개발 및 생산성 제고, 기자재 실증 및 표준화를 통한 민간주도형 시범 양식장 조성

○ 최신 스마트 연어양식 기술개발, 생산기지 구축, 국내 소비량 국산화 및 해외 수출을 통하여 국내 양식 산업발전 및 수출품목으로 육성하여 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2025년(5년간)

○ 위 치 : 포항시 장기면 일원

○ 규 모 : 테스트베드 28,570㎡, 배후부지 195,570㎡

○ 내 용 : 연어 스마트양식 기반 시험시설 및 대규모양식장 가공처리시설

건립을 위한 배후단지 기반 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 40,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	40,000		5,600	19,400	15,000
국 비	22,000		2,800	10,500	8,700
시 도 비	3,600		504	1,746	1,350
시군구비	8,400		1,176	4,074	3,150
지 방 채
민간자본	6,000		1,120	3,080	1,800
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ ΄20. 04. : 포항형 스마트양식 클러스터 조성사업 기본계획 용역

○ ΄21. 10. : 2021년 제4차 지방재정투자심사(중앙) 승인(10.26)

○ ΄22. 10. : 개발행위 및 농지전용 인허가 완료

○ ΄22. 12. : 해양수산부 기본계획 승인 및 테스트베드 실시설계 용역 입찰공고

□ 향후계획

○ ΄23. 09. : 테스트베드 건축, 토목 입찰공고 및 시공 착수

○ ΄24. 12. : 테스트베드 준공 및 배후부지 조성 착공

○ ΄25. 12. : 배후단지 조성 준공

사업명

방석리항 어촌뉴딜300사업

담당자

수산정책과 권혁진(☎270-2764)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어항 및 항․포구를 중심으로 인접한 배후 어촌마을까지 포함한 통합개발로 사회․문화․경제․환경적으로 어촌지역 활력 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2023년(3년간)

○ 위 치 : 포항시 북구 송라면 방석리항 일원

○ 규 모 : 어촌∙어항 통합재생사업 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,400	89	436	7,875	-
국 비	5,880	62	305	5,513	-
시 도 비	756	8	39	709	-
시군구비	1,764	19	92	1,653	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2020. 12.  공모 선정

○ 2021. 12.  기본계획 승인

○ 2022. 03.  실시설계 용역 발주

□ 향후계획

○ 2023. 07. 시행계획 고시

○ 2023. 07. 사업 착공

○ 2023. 12. 사업 준공

사업명

철강산업재도약기술개발사업

(포항거점센터)

담당자

배터리첨단산업과 허휘빈

(☎270-3564)

□ 사업목적 및 필요성

○ 철강산업 여건의 변화 대응과 지역 철강산업의 침체 극복을 위한 기업

기술 경쟁력 강화 및 고부가가치화를 통한 철강 생태계 기반 구축 대두

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 포항시 남구 동해면(블루밸리 국가산업단지)

○ 내 용 : 고기능금속기술센터(철강거점센터) 건립 및 공유자산(실험장비) 구축 추진

- 고기능금속기술센터(철강거점센터) 구축(사무동, 연구동 등)

- 공유 자산(철강재 제조 및 가공 관련 장비) 8종 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,650백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	20,650	-	6,800	6,450	7,400
국 비	5,775	-	250	1,825	3,700
시 도 비	4,462.5	-	1,965	1,387.5	1,110
시군구비	10,412.5	-	4,585	3237.5	2,590
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 철강산업재도약 기술개발사업 운영지원단 유치

○ 고기능금속기술센터(포항철강거점센터) 착공 및 준공

○ 고기능금속기술센터(포항철강거점센터) 장비 2종 구축

□ 향후계획

○ 고기능금속기술센터(포항철강거점센터)를 중심으로 한 철강중심 고부가가치화

전후방 신시장 창출

사업명

북구보건소 및 재난트라우마센터 통합건립

담당자

지진방재사업과 황민정(☎270-4733)

북구보건소 보건정책과 이동순(☎270-4115)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후화된 북구보건소의 시설개선을 통해 변화된 보건□의료 환경에 대응하고 도□농간       심각한 보건의료 환경의 불균형 해소

○ 북구보건소 및 재난트라우마센터 통합건립을 통해 지진피해주민들의 트라우마 극복 및       신체적 건강증진을 통한 치유효과 극대화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021.1.~2024. 11.

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 마산리 62번지

○ 규 모 : 부지면적 4,465㎡/ 연면적 13,753㎡ (지하2층, 지상 6층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  49,730백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	49,730	9,824	5,547	18,654	15,705
국 비	22,378	3,274	4,808	9,246	5,050
시 도 비	1,676	650	626	400
시군구비	25,676	5,900	113	9,008	10,655
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 19%)

○ ‘19.12. 트라우마치유센터 건립 및 기본계획 수립연구용역 완료

○ ‘20.04. 포항시 북구 보건소 신청사 건립 타당성 용역 완료

○ ‘20.07. 북구보건소 ‧재난트라우마센터 통합건립 추진(기획재정부 의견)

○ ‘20.10. 건립 예정지 토지보상 완료/ 포항시 공유재산심의회 심의 완료

○ ‘20.11. 중앙지방재정계획 반영

○ ‘20.12. 중앙투자심사 의뢰 → 조건부 통과

○ ‘21.07. ~ 22.10. 건축설계(기본 및 실시설계)등 진행

○ ‘22.11. 건축공사 착공

○ ‘23.05. ~ 토공사 진행 중 (터파기 및 띠장‧버팀보 설치)

□ 향후계획

○ ‘23. 07. : 1차수 공사 설계변경(예정)

○ ’23. 11. : 2차수 공사 착공(예정)

○ ‘24. 11. : 준공 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 (당초 2021.1.~2024.3. ⇒변경 2021.1.~2024.11.)

○ 총사업비 (당초 437억원 ⇒변경 497억원)

사업명

포항철강산업단지

완충저류시설 설치사업

담당자

환경정책과 정남헌(☎270-3113)

□ 사업목적 및 필요성

○ 포항철강산업단지 내 사고 및 화재 등으로 발생되는 유해물질과 강우시       비점오염원의 하천 직유입을 차단하여 수질오염 사전예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2023

○ 위 치 : 포항시 남구 송내동 철강산업단지 일원

○ 규 모 : 완충저류시설 V=2,000㎥, 비점오염저감시설 V=56,800㎥

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 43,187백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	43,187	21,555	9,515	12,117
국 비	30,197	16,877	5,624	7,696
시 도 비	3,884	1,410	1,001	1,473
시군구비	9,106	3,268	2,890	2,948
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 73%)

○ 2018. 10. : 기본 및 실시설계용역 완료

○ 2019. 02. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2023. 12. : 공사준공 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 변경 : 당초 2017~2022 변경 2017~2023

사업명

구무천 생태하천복원사업

담당자

환경정책과 정남헌(☎270-3113)

□ 사업목적 및 필요성

○ 중금속으로 오염된 구무천, 공단천의 오염퇴적물 준설을 포함한 생태하천       복원을 통해 건강한 수(水)환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2023

○ 위 치 : 포항시 남구 괴동동, 장흥동 일원

○ 규 모 : 생태복원 7.97km, 오염토 정화시설 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 28,046백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	28,046	10,373	1,685	15,988
국 비	10,000	4,637		5,363
시 도 비	5,414	1,391	1,118	2,905
시군구비	12,632	4,345	567	7,720
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2018. 04. : 통합집중형 오염하천 개선사업 선정

○ 2022. 01. : 오염토 정화시설 공사착공

□ 향후계획

○ 2023. 12. : 공사준공 예정

사업명

영일대해수욕장 비점오염저감시설 설치사업

담당자

환경정책과 황지영(☎270-3115)

□ 사업목적 및 필요성

○ 강우시 비점오염원, 하수관거 퇴적물의 영일대해수욕장 유입에 따른

악취발생 및 도시미관 저해

○ 비점오염원의 체계적 관리로 연안 수질개선 도모 및 깨끗한 도시조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2023

○ 위 치 : 포항시 북구 두호동 영일대해수욕장 일원

○ 규 모 : 장치(여과)형 시설 2개소(Q=5,400㎥/h)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,606백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,606	930	1,674	8,002
국 비	5,304	465	950	3,889
시 도 비	1,591	140	217	1,234
시군구비	3,711	325	507	2,879
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 42%)

○ 2021. 09. : 기본 및 실시설계용역 완료

○ 2022. 06. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2023. 12. : 공사준공 예정

10-2. 지방채 발행사업

우리 포항시에서 ‘22년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
장성공원 조성사업	48,200	20,600	-	-	-	‘21년 지방채 8,300	20,600	42
옥명공원 조성사업	40,100	16,300	-	-	-	‘21년 지방채 3,400	16,300	40
북송공원 조성사업	21,300	9,400	-	-	-	‘21년 지방채 1,600	9,400	44
두호공원 조성사업	6,800	5,200	-	-	-	‘21년 지방채 500	5,200	63
구정공원 조성사업	5,900	4,100	-	-	-	‘21년 지방채 600	4,100	49
중성공원 조성사업	4,200	2,900	-	-	-	‘21년 지방채 600	2,900	88
약전1공원 조성사업	1,550	1,000	-	-	150	-	1,000	90
약전3공원 조성사업	1,000	500	-	-	-	-	500	90

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2022년에 추진한 사업

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

장성공원 조성사업

담당자

공원과 배대한(☎270-3227)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시공원의 실효(일몰제)를 대비하여 공원별 이용현황 및 향후       개발가능성 등을 검토하여 선정된 우선관리지역 공원으로 항구적으로 보        전하여 지역주민의 건강, 휴양 ,정서생활 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2025년

○ 위 치 : 포항시 북구 장성동 산101-16번지 일원

○ 규 모 : 공원조성 1식(A=243,618㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 48,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	48,200	8,300	20,600	19,000	300
지 방 채	47,900	8,300	20,600	19,000
국 비
시 도 비
시군구비	300				300
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 42%)

○ 2021. 1. : 보상계획 열람공고

○ 2021. 5. ~ 2024. 12. : 토지 등 보상시행

□ 향후계획

○ 2024. 1. : 토지 등 수용재결

○ 2025. 1. ~ 2025. 12. : 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모 : (당초)242,400㎡ → (변경)243,618㎡

○ 총사업비 : (당초)45,000백만원 → (변경)48,200백만원

사업명

옥명공원 조성사업

담당자

공원과 배대한(☎270-3227)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시공원의 실효(일몰제)를 대비하여 공원별 이용현황 및 향후       개발가능성 등을 검토하여 선정된 우선관리지역 공원으로 항구적으로 보        전하여 지역주민의 건강, 휴양 ,정서생활 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2025년

○ 위 치 : 포항시 남구 오천읍 원리 산52번지 일원

○ 규 모 : 공원조성 1식(A=756,511㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 40,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	40,100	3,400	16,300	19,200	1,200
지 방 채	38,900	3,400	16,300	19,200
국 비
시 도 비
시군구비	1,200				1,200
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2021. 1. : 보상계획 열람공고

○ 2021. 5. ~ 2024. 12. : 토지 등 보상시행

□ 향후계획

○ 2024. 1. : 토지 등 수용재결

○ 2025. 1. ~ 2025. 12. : 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모 : (당초)757,877㎡ → (변경)756,511㎡

○ 총사업비 : (당초)36,300백만원 → (변경)40,100백만원

(단위 : 백만원)

사업명

북송공원 조성사업

담당자

공원과 배대한(☎270-3227)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시공원의 실효(일몰제)를 대비하여 공원별 이용현황 및 향후       개발가능성 등을 검토하여 선정된 우선관리지역 공원으로 항구적으로 보        전하여 지역주민의 건강, 휴양 ,정서생활 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2025년

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 마산리 산13-2번지 일원

○ 규 모 : 공원조성 1식(A=284,257㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	21,300	1,600	9,400	10,000	300
지 방 채	21,000	1,600	9,400	10,000
국 비
시 도 비
시군구비	300				300
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 44%)

○ 2021. 1. : 보상계획 열람공고

○ 2021. 5. ~ 2024. 12. : 토지 등 보상시행

□ 향후계획

○ 2024. 1. : 토지 등 수용재결

○ 2025. 1. ~ 2025. 12. : 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모 : (당초)283,200㎡ → (변경)284,257㎡

○ 총사업비 : (당초)19,800백만원 → (변경)21,300백만원

사업명

두호공원 조성사업

담당자

공원과 배대한(☎270-3227)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시공원의 실효(일몰제)를 대비하여 공원별 이용현황 및 향후       개발가능성 등을 검토하여 선정된 우선관리지역 공원으로 항구적으로 보        전하여 지역주민의 건강, 휴양 ,정서생활 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2025년

○ 위 치 : 포항시 북구 두호동 산44-1번지 일원

○ 규 모 : 공원조성 1식(A=24,904㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,800	500	5,200	800	300
지 방 채	6,500	500	5,200	800
국 비
시 도 비
시군구비	300				300
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 63%)

○ 2021. 1. : 보상계획 열람공고

○ 2021. 5. ~ 2024. 12. : 토지 등 보상시행

□ 향후계획

○ 2024. 1. : 토지 등 수용재결

○ 2025. 1. ~ 2025. 12. : 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모 : (당초)24,800㎡ → (변경)24,904㎡

○ 총사업비 : (당초)6,000백만원 → (변경)6,800백만원

사업명

구정공원 조성사업

담당자

공원과 배대한(☎270-3227)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시공원의 실효(일몰제)를 대비하여 공원별 이용현황 및 향후       개발가능성 등을 검토하여 선정된 우선관리지역 공원으로 항구적으로 보        전하여 지역주민의 건강, 휴양 ,정서생활 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2025년

○ 위 치 : 포항시 남구 오천읍 구정리 440번지 일원

○ 규 모 : 공원조성 1식(A=9,130㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,900	600	4,100	600	600
지 방 채	5,300	600	4,100	600
국 비
시 도 비
시군구비	600				600
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 49%)

○ 2021. 1. : 보상계획 열람공고

○ 2021. 5. ~ 2024. 12. : 토지 등 보상시행

□ 향후계획

○ 2025. 1. ~ 2025. 12. : 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모 : (당초)10,000㎡ → (변경)9,130㎡

○ 총사업비 : (당초)5,300백만원 → (변경)5,900백만원

사업명

중성공원 조성사업

담당자

공원과 배대한(☎270-3227)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시공원의 실효(일몰제)를 대비하여 공원별 이용현황 및 향후       개발가능성 등을 검토하여 선정된 우선관리지역 공원으로 항구적으로 보        전하여 지역주민의 건강, 휴양 ,정서생활 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2025년

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 망천리 1058번지 일원

○ 규 모 : 공원조성 1식(A=41,466㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,200	600	2,900	400	300
지 방 채	3,900	600	2,900	400
국 비
시 도 비
시군구비	300				300
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 88%)

○ 2021. 1. : 보상계획 열람공고

○ 2021. 5. ~ 2024. 12. : 토지 등 보상시행

□ 향후계획

○ 2024. 1. : 토지 등 수용재결

○ 2025. 1. ~ 2025. 12. : 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모 : (당초)40,000㎡ → (변경)41,466㎡

○ 총사업비 : (당초)3,800백만원 → (변경)4,200백만원

사업명

약전1공원 조성사업

담당자

공원과 배대한(☎270-3227)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시공원의 실효(일몰제)를 대비하여 공원별 이용현황 및 향후       개발가능성 등을 검토하여 선정된 우선관리지역 공원으로 항구적으로 보        전하여 지역주민의 건강, 휴양 ,정서생활 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2025년

○ 위 치 : 포항시 남구 동해면 도구리 710번지 일원

○ 규 모 : 공원조성 1식(A=2,533㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,550백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,550		1,150		400
지 방 채	1,000		1,000
국 비
시 도 비
시군구비	550		150		400
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2021. 1. : 보상계획 열람공고

○ 2021. 5. ~ 2023. 12. : 토지 등 보상시행

□ 향후계획

○ 2024. 1. ~ 2025. 12. : 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

약전3공원 조성사업

담당자

공원과 배대한(☎270-3227)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시공원의 실효(일몰제)를 대비하여 공원별 이용현황 및 향후       개발가능성 등을 검토하여 선정된 우선관리지역 공원으로 항구적으로 보        전하여 지역주민의 건강, 휴양 ,정서생활 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2025년

○ 위 치 : 포항시 남구 동해면 약전리 200-3번지 일원

○ 규 모 : 공원조성 1식(A=2,419㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,000		500		500
지 방 채	500		500
국 비
시 도 비
시군구비	500				500
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2021. 1. : 보상계획 열람공고

○ 2021. 5. ~ 2023. 12. : 토지 등 보상시행

□ 향후계획

○ 2024. 1. ~ 2025. 12. : 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

10-3. 민간투자사업

우리 포항시에서 ‘22년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2021년	2022년	2023년 이후
BTL	07 하수관로 정비사업	포항 맑은물㈜	114,700	103,493	12,759	13,024	149,581	2014.04 ~ 2034.04
BTL	09 하수관로 정비사업	포항 맑은물길㈜	68,300	51,974	6,593	6,959	78,848	2014.07 ~ 2034.06
BTL	10 하수관로 정비사업	청정포항(주)	77,800	40,965	7,173	7,270	91,142	2016.04 ~ 2036.03
BTL	13 하수관로 정비사업	포항 새물길㈜	55,000	16,189	5,020	5,118	78,147	2018.10 ~ 2038.09

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2022년까지는 집행액(결산기준), 2023년 이후는 추정액

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

사업명

07년 포항 하수관로정비

담당자

하수도과 김제헌(☎270-5424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우·오수를 분리하여 연안오염 방지 및 하수처리장 효율성 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2009.11.13 ~ 2014.04.12

○ 위치 : 포항시 용흥동, 중앙동, 학산동, 죽도동, 양학동, 대이동, 송도동 일원    ○ 민간사업자 : 포항맑은물(주)

○ 총사업비 : 114,700백만원

○ 사업규모 : 하수관로 101㎞, 배수설비 9,780가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	278,857	103,493	12,759	13,024	149,581
국 비	177,365	66,859	8,143	8,143	94,220
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	101,492	36,634	4,616	4,881	55,361
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계

○ 운영 중

○ 운영기간 : 2014. 4. 13 ~ 2034. 4. 12 (20년간)

□ 향후계획

○ 2034년까지 민간사업자(운영사)에서 운영 및 유지관리

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

09년 포항 하수관로정비

담당자

하수도과 김제헌(☎270-5424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우·오수를 분리하여 연안오염 방지 및 하수처리장 효율성 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2011.1.1 ~ 2014.06.30

○ 위치 : 포항시 죽도동, 용흥동, 대이동 일원

○ 민간사업자 : 포항맑은물길(주)

○ 총사업비 : 68,300백만원

○ 사업규모 : 하수관로 39㎞, 배수설비 3,083가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	144,374	51,974	6,593	6,959	78,848
국 비	89,207	32,521	4,069	4,069	48,548
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	43,470	19,453	2,524	2,890	18,603
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계

○ 운영 중

○ 운영기간 : 2014. 7. 1 ~ 2034. 6. 30 (20년간)

□ 향후계획

○ 2034년까지 민간사업자(운영사)에서 운영 및 유지관리

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

10년 포항 하수관로정비

담당자

하수도과 김제헌(☎270-5424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우·오수를 분리하여 연안오염 방지 및 하수처리장 효율성 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2012.6.1 ~ 2016.03.31

○ 위치 : 포항시 대잠동, 죽도동, 상대동, 해도동 일원

○ 민간사업자 : 청정포항(주)

○ 총사업비 : 77,800백만원

○ 사업규모 : 하수관로 48㎞, 배수설비 4,950가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	146,550	40,965	7,173	7,270	91,142
국 비	92,820	25,954	4,511	4,511	57,844
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	53,730	15,011	2,662	2,759	33,298
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영 중

○ 운영기간 : 2016.4.1. ~ 2036.3.31.(20년간)

□ 향후계획

○ 2036년까지 민간사업자(운영사)에서 운영 및 유지관리

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

13년 포항 하수관로정비

담당자

하수도과 김제헌(☎270-5424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우·오수를 분리하여 연안오염 방지 및 하수처리장 효율성 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2015.7.1 ~ 2018.09.30

○ 위치 : 포항시 상대동, 해도동 일원

○ 민간사업자 : 포항새물길(주)

○ 총사업비 : 55,000백만원

○ 사업규모 : 하수관로 53㎞, 배수설비 4,412가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	104,474	16,189	5,020	5,118	78,147
국 비	60,315	9,763	3,004	3,004	44,544
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	44,159	6,426	2,016	2,114	33,603
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 시공 중

○ 시공기간 : 2015. 7. 1 ~ 2018. 9. 30 (39개월간)

□ 향후계획

○ 2018년 9월 준공

○ 2038년까지 민간사업자(운영사)에서 운영 및 유지관리

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음